2021년도 수시분 공유재산 관리계획 변경안

의안 번호	3045		제출년월일	2021. 9. 1.
			제 출 자	진 주 시 장

Ⅰ. 제안이유

당초 공유재산의 취득․처분에 대한 관리계획을 수립한 후 해당 사업이 취소  되어 공유재산 및 물품 관리법 제10조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 2021년도 수시분 공유재산 관리계획(변경)안을 수립하여 시의회의 의결을 받아 시행하고자 함.

Ⅱ. 주요내용

2021년도 공유재산 관리계획 변경안의 의결을 얻고자 하는 재산은 2019년도 제216회 2020년도 정기분 공유재산 관리계획안 의결(의안번호:2740, 의결일자:      2019.12.3.)된 『비봉체육공원 조성사업』건의 취소에 관한 사항임.

Ⅲ. 사업현황

가. 사업개요(당초)

❍ 사 업 명 : 비봉체육공원 조성사업

❍ 위    치 : 진주시 상봉동 238번지 일원

❍ 취득재산

- 토지매입 75필지 93,437㎡

재산소재지	지목	면적(㎡)	소유자	취득시기	비고
상봉동 238 외 74필지	답	93,437	김철 외 72인	2020년 ~ 2022년

❍ 사 업 비 : 24,905백만원(국비 4,100, 시비 20,805)

- 토지매입비 10,364, 체육시설 조성비 14,541

❍ 연도별 사업비 내역                                   (단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자현황			비고
			2019	2020	2021
계	24,905	-	13,300	5,805	5,800
국 비	4,100		1,100	1,500	1,500
도 비
시 비	20,805	-	12,200	4,305	4,300

❍ 사업규모 : 체육공원 조성 A=93,437㎡

❍ 주요시설 : 축구장 2면, 야구장 1면, 족구장 2면, 풋살장 1면, 테니스장 1면, 파크골프장(9홀) 1개소, 기타 부대시설

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)

❍ 사업부서 : 문화관광국 체육진흥과

(변경)- 사업계획 취소

가. 취소사유

❍ 도시공원일몰제 해제로 비봉체육공원 주변 지가 상승에 따른 총사업비 증가

❍ 사업 경제성·효율성 저하로 대체 체육시설 조성 필요

⇒ 명석지구 체육시설 조성 사업

Ⅳ. 2021년도 수시분 공유재산 관리계획(변경)안 목록

❍ 공유재산 관리계획 총괄표   ----------------------    4

❍ 공유재산 취득재산 목록     ----------------------    5

❍ 위치도 및 현황사진         ----------------------    6

공유재산 관리계획 총괄표

(단위 : ㎡, 백만원)

구 분			당 초			변 경			감			비고
			건수	(연)면적	금액	건수	면적	금액	건수	면적	금액
취득	계	토지	75	93,437	10,364	-	-	-	75	93,437	10,364	취소
		건물
		기타
	매입 (신축)	토지	75	93,437	10,364	-	-	-	75	93,437	10,364	취소
		건물
		기타
	교환으로 취득	토지
		건물
		기타
	기타취득	토지
		건물
		기타
처분	계	토지
		건물
		기타
	매 각	토지
		건물
		기타
	양 여	토지
		건물
		기타
	교환으로 처분	토지
		건물
		기타
	기타처분	토지
		건물
		기타
무상사용 및 대부허가		계
		토지
		건물
		기타

공유재산 취득재산 목록

(단위 : ㎡, 백만원)

사 업 명	취 득 재 산 표 시					소요 사업비	취득 시기	취득 방법	비고 (소관부서)
	구분	소 재 지	지목	(연)면적	기준가격 (천원)
		해	당		없	음

비봉체육공원 조성사업 위치도

사업대상지

비봉체육공원 조성사업 현황사진