도시환경위원회

제출부서 : 하수운영과

(진주시 하수슬러지 처리시설 민간위탁운영)

재위탁(재계약) 보고

□ 위탁사유(필요성)

❍ 진주시 하수슬러지처리시설을 기술과 노하우를 갖춘 전문업체가 적절하게 운영관리 함으로써 합리적이고 효율적인 시설관리를 통하여 시설의 내구연한 및 활용도를 증대시키고, 위생적인 폐기물관리에 따라 시민의 보건 향상 및 환경보호에 기여하고자 함.

□ 근거법령

❍ 지방자치법 제104조(사무의 위임)

❍ 행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정 제11조(민간위탁의 기준)

❍ 진주시 사무의 위탁조례 제4조(위탁사무의 기준 등)

□ 위탁 주요내용

❍ 시설현황

위 치	시설용량	부지면적	건축연면적	운영방법	운영업체
남강로 1607	100톤/일	4,230㎡	1,943㎡ (지하2, 지상3)	민간위탁	환경시설관리(주)

- 처리방법 : 간접가열 무산소 열분해방식

- 처리지역 : 진주시 5개(진주,문산,사봉,대곡,진성) 하수처리장 발생 슬러지

❍ 용역개요

- 위    치 : 진주시 하수슬러지처리시설

- 용역기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.

- 용 역 량 : 진주시 발생 하수슬러지 처리 1식

- 용 역 비 : 3,429백만원 (1,143백만원/년)

❍ 수탁자 선정

- 사업시행계획(안) 확정

- 입찰공고 및 질의응답

- 입찰참가 신청 및 제안서 접수

- 제안서평가위원회 구성 및 통보

- 제안 설명회 및 제안서 평가위원회 개최

- 협상대상자 결정 및 통보

- 기술 및 가격 등 사업전반에 대한 협상

- 낙찰자 통보

- 위․수탁협약 체결 및 공증

- 수탁자 결정 고시 및 통보

- 인계 ․ 인수

- 위 ․ 수탁개시

❍ 소요예산 및 산출근거

구 분		연간금액(천원)	비고
고정비	계	1,143,105
	노 무 비	757,185
	관 리 비	8,665
	이 윤	87,588
	기 술 료	75,718
	부가가치세	103,918

□ 향후계획

❍ 민간위탁 추진 계획

- 2021. 07. : 하수슬러지처리(탄화)시설 민간위탁 추진계획 보고

- 2021. 07. : 진주시 계약심의위원회 심의(회계과)

- 2021. 08. : 운영방안 검토 및 추진계획 보고(시장님)

- 2021. 08. : 시의회 동의안 재위탁(재계약) 보고

- 2021. 09. : 민간위탁 선정위원회 개최(하수운영과)

- 2021. 09. : 용역과제 사전심의위원회 심의(기획예산과)

- 2021. 10. : 민간위탁 시행 품의 및 계약심사(감사관)

- 2021. 10. : 입찰 및 기술제안서 제출서류 확정(회계과)

- 2021. 10. : 입찰 및 기술제안서 제출 안내 공고 의뢰(회계과)

- 2021. 11. : 기술제안서 평가위원회 개최

- 2021. 12. : 기술제안서 평가 및 협상적격자 통보

(위수탁 결정 통보 및 고시)

- 2021. 12. : 위·수탁협약서 공증

- 2021. 12. : 가격협상 및 계약서 작성

- 2022. 01. : 위탁운영 시행