	부강한 진주 행복한 시민	제252회 진주시의회(제2차 정례회)

시정 주요업무 보고

(2023년 실적 및 2024년 계획)

진   주   시

(도시건설국)

보  고  순  서

□	도시계획과

□	건설하천과

□	도 로 과

□	시민안전과

□	건  축  과

□	주택경관과

□	공공시설추진단

도시계획과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	22	1	1	5	8	7
현 원	22	1	1	5	10	2	3	공무직 1
증 감					2	△5	3

□ 국토이용계획

(단위 : ㎢)

총 면 적	도시지역	관리지역	농림지역	자연환경 보전지역
712.840 (100%)	275.869 (38.70%)	149.501 (20.97%)	283.690 (39.80%)	3.780 (0.53%)

□ 도시지역

(단위 : ㎢)

총 면 적	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역
275.869 (100%)	19.212 (6.96%)	3.240 (1.18%)	6.453 (2.34%)	246.964 (89.52%)

□ 도시기본계획 지표

목표 년도	계획인구 (명)	가구수 (호)	가구당 인 구 (명)	주 택 보급률 (%)	토지이용계획(㎢)
					계	시가화 용 지	시 가 화 예정용지	보전용지
2030년	520,000	208,000	2.5	112.15	712.840 (100%)	37.536 (5.27%)	20.127 (2.82%)	655.177 (91.91%)

□ 위원회 현황

(단위 : 명)

구 분 위원회명	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원 중 여성위원수	％
			계	공무원	％	민간인	％
진 주 시 도시계획위원회	22		22	2	9.1	20	80.9	7	31.8

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추진중	시기 미도래	미착공	비 고
계	10	2	8	-	-
예 산 사 업	9	1	8	-	-
비예산사업	1	1	-	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업 --- 2건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
진주~서울 수서 SRT 유치	❍ 위 치 : 진주~창원~동대구 ~오송~수서 ❍ 사업기간 : 2021 ~ 2023년 ❍ 사업내용 : 경부선 운행 중인 SRT차량 1대를 투입하여 수서행 고속열차로 신설 운행 (1일 왕복 2회) ❍ 사업주체 : 국토교통부, ㈜SR	□ 추진사항 ❍ 2021. 5. : 수서 고속철도(SRT) 경전 선 운행 건의(경상남도→㈜SR) ❍ 2021. 5. : 경제부지사 국토부 제2차관 면담(경상남도) ❍ 2021. 6. : ㈜SR 사장 면담 (경상남도) ❍ 2021. 9. : 진주시장 국토부 제2차관 면담(수서행 KTX·SRT신설 건의) ❍ 2022. 3. : 대통령직 인수위 방문 현 안 사업 국정과제 반영 건의 ❍ 2022. 5. : 경상남도 관계자와 업무 협의 (수서행 SRT 신설 관련) ❍ 2023. 1. : 수서행 SRT 유치를 위한 국토부 방문 및 건의 ❍ 2023. 4. : 진주 ~ 서울 수서 SRT 신설 운행 발표(국토교통부) ❍ 2023. 9. : 진주~서울 수서 SRT 차량 [1일, 4회(왕복 2회)] 신설 운행	서울 강남,경기 동남부권 이동 시 교통 불편 해소
구)진주역 복합문화 공원 조성 사업	❍ 위 치 : 천전동 일원 ❍ 사업기간 : 2019 ~ 2023년 ❍ 사 업 량 : 42,108㎡ - 다목적문화시설 - 복합커뮤니티, 생태공원 - 부대시설 1식 → 공사 : 토목․조경 외 12 용역 : 확정 측량 외 6 ❍ 사 업 비 : 48,000백만 원 (보상비 35,600 공사비 10,000 각종 용역 2,400)	□ 추진사항 ❍ 2020. 3. : 지구단위계획(변경) 결정 및 지형도면 고시 ❍ 2020. 7. : 기본 및 실시설계 착수 ❍ 2020.12. : 도시재생 인정사업 선정 ❍ 2021. 5. : 실시계획인가 고시 ❍ 2022. 1. : 문화재 발굴유예 승인 ❍ 2021. 3. : 일호광장 진주역 준공 ❍ 2022. 4. : 공사 착공(전체) ❍ 2022. 9. : 맹꽁이 이주 완료 ❍ 2022.12. : 공원 명칭 공모 완료 ❍ 2023. 6. : 철도문화공원 준공	옛 진주역 철도부지를 활용한 문화시설 확충

□ 추진중 사업 --- 8건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
서부경남 KTX 조기개통 추진	❍ 위 치 : 김천~합천~ 진주~고성~통영~거제 ❍ 사업기간 : 2019 ~ 2030년 ❍ 사 업 량 : 177.9km ❍ 사 업 비 : 6조8,664억 원 (국비)	□ 추진사항 ❍ 2022. 1. : 남부내륙철도 건설사업 기본계획 고시 ❍ 2022. 6. ~ 2024. 6. : 노반 기본 및 실시 설계용역 ․ 6공구 : 합천군 삼가면~진주시 이현동 ․ 7공구 : 진주시 이현동~고성군 영오면 ❍ 2023. 2. ~ 3. : 기본설계(안) 관련기관(부서) 협의 ❍ 2023. 9. : 사업계획의 적정성 재검 토(KDI) ※ 9~12개월 소요 □ 향후계획 ❍ 2024.12. : 환경영향평가 관련 공람 및 주민설명회 ❍ 2025. 6. : 기본 및 실시설계 용역 준공 ❍ 2025. 7. : 인허가 및 총사업비 협의 ❍ 2025.12. : 실시계획 승인 고시, 보 상착수 및 공사 착공 ❍ 2030.하. : 공사 준공
국립진주 박물관 이전 건립 지원	❍ 위 치 : 천전동 일원 (구) 진주역사 부지) ❍ 사업기간 : 2021 ~ 2027년 ❍ 사 업 량 - 부 지 : 20,079㎡ - 연면적 : 15,185㎡ (지하 1, 지상 3) ❍ 사 업 비 : 85,500백만 원 (건축 65,500 보상 20,000) - 박물관 이전부지와 현)박물관 등가교환 ❍ 사업구분 : 국가시행사업	□ 추진사항 ❍ 2019. 6. : 업무협약(MOU) 체결 ❍ 2020.12. : 이전 건립 연구용역 완료 ❍ 2022. 6. : 타당성재조사 승인 ❍ 2023. 7. : 설계공모 당선작 선정 ❍ 2023. 8. : 중앙투자심사 완료 ❍ 2023.10. : 기본 및 실시설계 착수 (국립진주박물관) □ 향후계획 ❍ 2023.12. : 보상 협의(진주시) ❍ 2024.11. : 기본 및 실시설계 완료 ❍ 2025.상. : 공사 준공(국립중앙박물관) ❍ 2027.10. : 개관
진주 여객자동차 터미널 개발	❍ 위 치 : 가좌·호탄동 일원 ❍ 사업기간 : 2012 ~ 2025년 ❍ 사 업 량 : 86,728㎡ (진주복합터미널, 주상복합 용지, 일반상업용지 등) ❍ 사 업 비 : 229,600백만 원 (민간자본)	□ 추진사항 ❍ 2020.10. : 사업시행자 지정 신청 ❍ 2021.12. : 사업시행자(변경) 지정 ❍ 2022. 2. : 도시개발구역(변경) 지정, 개발계획(변경) 및 실시 계획인가 고시 ❍ 2022. 6. : 부지조성사업 착공 ❍ 2022. 8. : 터미널 이전 관련 세부 계획 협의(운수업체) ❍ 2022.10. : 복합터미널 건축허가 ❍ 2023. 1. : 지구외사업 실시계획인가 (대로 1-2, 1-8호선 확장) ❍ 2023. 9. : 진주시 소하천정비종합 계획(부분변경) 완료 ❍ 2023.10. : 우회도로 개설 (개양중 앞) □ 향후계획 ❍ 2024.상. : 터미널 이전에 따른 중간 정류장 및 기존시설물 활용방안 검 토 용역 시행 ❍ 2025.12. : 사업완료(건축준공 포함)
문산지구 도시개발 사 업 (서부경남 G-city건설)	❍ 위 치 : 문산읍 일원 ❍ 사업기간 : 2022 ~ 2030년 ❍ 사 업 량 : 1,407,912㎡ ❍ 사 업 비 : 미확정 - LH시행 사업으로 지구계 획수립 시 사업비 확정 계 획	□ 추진사항 ❍ 2022. 9. : 공공주택지구 지정 제안 (LH⇒국토교통부) ❍ 2022.10. : 공공주택지구 관련 사전 협의(진주시⇔국토교통부) ❍ 2023. 6. : 지구 지정 및 사업인정 의제에 관한 주민 열람·공고 ❍ 2023. 6. : 토지거래허가구역 지정 (국토교통부) ❍ 2023. 7. : 관계기관(부서) 의견 조회 □ 향후계획 ❍ 2024.12. : 공공주택지구 지정 ❍ 2025.12. : 지구계획 승인 ❍ 2026. 1. : 보상 협의 ❍ 2026.12. : 조성공사 착공 ❍ 2030.12. : 조성공사 준공
초전신도심 개발	❍ 위 치 : 초전동 일원 (경상남도 농업기술원) ❍ 사업기간 : 2014 ~ 2031년 ❍ 사 업 량 : 415,300㎡ (1단계 67,853 2단계 347,447) ❍ 사 업 비 : 526,285백만 원 (도비, 민간자본)	□ 추진사항 ❍ 2022. 4. : 도시개발구역(1단계) 지 정 요청(진주시→경상남도) ❍ 2022.12. : 도시개발구역 지정 (1단계, 67,853㎡) ❍ 2023.10. : 개발계획 변경 및 실시 계획인가(1단계사업) □ 향후계획 ❍ 2021. 8. ~ 2024.12. : 초전신도심 전체 개발계획 수립 용역 ❍ 2024. 1. ~ 2025.12. : 1단계사업 착공 및 준공 ❍ 2026. 1. ~ 2028.12. : 2단계사업 구 역 지정 및 실시계획 수립 ❍ 2029. 1. ~ 2031.12. : 2단계사업 착공 및 준공
소망․희망광장 조성사업	❍ 위 치 : 망경동 일원 ❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024년 ❍ 사 업 량 - 소망광장 1,035㎡ - 희망광장 1,006㎡ - 소망진산 입구쉼터 451㎡ ❍ 사 업 비 : 6,400백만 원 (보상비 5,300 공사비 1,100)	□ 추진사항 ❍ 2021.10. : 도시관리계획(시설) 결정 및 지형도면 고시 ❍ 2021.12. : 실시계획인가 고시 ❍ 2022. 5. : 보상 협의 ❍ 2023. 4. : 공사 착공 ❍ 2023.10. : 부지 보상 협의 (소망진산 입구쉼터) □ 향후계획 ❍ 2024. 2. : 공사 준공
구)진주역 문화거리 조성사업	❍ 위 치 : 망경동 일원 ❍ 사업기간 : 2022 ~ 2025년 ❍ 사 업 량 : L=852m B=20m - 도로 개설(문화거리 조성) - 접속도로 개설, 주차장 - 기타 부대시설 1식 ❍ 사 업 비 : 29,300백만 원 (보상비 18,000 공사비 등 11,300)	□ 추진사항 ❍ 2020. 3. : 지구단위계획(변경) 결정 및 지형도면 고시 ❍ 2020. 4. : 국유재산 매각 승인 ❍ 2021.11. : 중기지방재정계획 수립 ❍ 2022. 3. : 투자사업 심사 완료 ❍ 2022. 6. : 기본 및 실시설계 착수 ❍ 2023. 1. : 실시계획인가 고시 ❍ 2023. 5. : 보상 협의 ❍ 2023.10. : 문화재 표본조사 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 보상 협의(사유지) ❍ 2024. 4. : 공사 착공 ❍ 2025.12. : 공사 준공
시(市) 관문지역 도시조형물 설치사업	❍ 위 치 : 가좌동 68-12 (진주역 앞) ❍ 용역기간 : 2022 ~ 2025년 ❍ 사 업 량 - 도시조형물 설치 1식 - 분수, 쉼터, 경관조명 등 ❍ 사 업 비 : 1,580백만 원 (실시설계 80 공사비 1,500)	□ 추진사항 ❍ 2022. 9. : 시 관문지역 도시조형물 설치 구상용역 완료 ❍ 2023. 3. : 기본 및 실시설계 착수 ❍ 2023. 4. : 1차 설문조사 ❍ 2023. 5. : 전문가 의견 수렴 ❍ 2023. 6. : 2차 설문조사 및 기본설계 ❍ 2023. 9. ~ 11. : 디자인 공모 □ 향후계획 ❍ 2024. 6. : 기본 및 실시설계 완료 ❍ 2024.10. : 공사 착공 ❍ 2025. 6. : 공사 준공

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

❍ 옛 진주역 철도부지 재생프로젝트의 체계적 개발 추진

- 철도문화공원, 문화거리, 국립진주박물관 이전 건립을 통한 역사·문화
· 자연이 조화로운 복합문화공간 조성

- 옛 진주역에서 강남지구 도시재생 및 다목적 문화센터를 연결하는 거점공간으로 조성

❍ 남중부권 교통 중심도시로 도약

- 여객자동차터미널 개발사업 추진과 남부내륙철도 착공을 위한 행정력 집중으로 남중부권 교       통 중심도시로 균형발전 도모

❍ 우주항공청 개청 및 수도권 공공기관 이전 대비 G-city 건설

- 우주항공청 개청 및 수도권 공공기관 이전 대비 주거·업무시설 용지 확보

- G-city 건설로 쾌적한 도시조성 및 주거환경 개선

2. 총    괄

(단위 : 백만 원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	8	7,745,065	-	-	-	-
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	8	7,745,065	-	-	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

서부경남 KTX 조기 개통 추진

침체된 서부경남 경제 활성화와 국가 균형발전을 위한 혁신 동력으로 남중부권 100만 생활권  중심도시로 성장하기 위한 초석 마련

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 남부내륙철도 건설사업

❍ 위    치 : 김천~합천~진주~고성~통영~거제

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2030년

❍ 사 업 량 : 177.9km(단선), 설계속도 250km/h

❍ 사 업 비 : 6,866,400백만 원(국비)

□ 추진상황

❍ 2019. 11. ~ 2021. 12. : 타당성조사 및 기본계획 용역 완료(국토부)

❍ 2022.  1. 13. : 남부내륙철도 건설 기본계획 고시 확정

❍ 2022.  6.  3. : 노반 기본 및 실시설계용역(기타공사) 낙찰자 선정

※ 6공구 : 합천군 삼가면 ~ 진주시 이현동, 7공구 : 진주시 이현동 ~ 고성군 영오면

❍ 2022.  6. 14. ~ 2024. 6. 12. : 남부내륙철도 노반 기본 및 실시설계 용역

❍ 2023.  2. : 진주역사 증축 설계 공모  *선정 : 서울시 소재 ㈜서한종합건축사사무소

❍ 2023.  3. : 진주역사 증축 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2023.  2. ~ 3. : 기본설계(안)에 대한 관계기관(부서) 협의(KR ↔ 진주시)

❍ 2023.  9. : 사업계획의 적정성 재검토(KDI)  ※ 9~12개월 소요

□ 추진계획

❍ 2024. 12. : 환경영향평가 관련 공람 및 주민설명회

❍ 2025.  6. : 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ 2025.  7. : 인허가 및 총사업비 협의

❍ 2025. 12. : 실시계획 승인 고시, 보상착수 및 공사 착공

❍ 2030. 하. : 공사 준공

국립진주박물관 이전 건립 지원

구)진주역 철도부지 재생프로젝트와 연계한 문화‧예술의 거점 공간 조성 지원

□ 사업개요

❍ 위    치 : 천전동 구)진주역사 부지 일원

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2027년

❍ 사 업 량

- 부  지 : 20,079㎡

- 연면적 : 15,185㎡(지하 1, 지상 3)

❍ 사 업 비 : 85,500백만 원(국비 65,500 시비 20,000)

＊ 건축 65,500(국비), 보상비 20,000(시비)

→ 박물관 이전부지와 현)박물관 등가교환

□ 추진상황

❍ 2019.  6. : 진주시-국립중앙박물관 업무협약 체결

❍ 2020. 12. : 국립진주박물관 이전 기본계획 수립 연구용역 완료

❍ 2021.  4. : 타당성 재조사 신청(국립중앙박물관 → 기재부)

❍ 2022.  6. : 타당성 재조사 최종 승인(기재부 → 국립중앙박물관)

❍ 2022. 10. : 총사업비 조정 등록 완료(기재부 → 국립중앙박물관)

❍ 2023.  7. : 국제설계공모 당선작 선정

❍ 2023.  8. : 중앙투자심사 완료(진주시)

❍ 2023. 10. : 기본 및 실시설계 용역 착수(국립진주박물관)

□ 추진계획

❍ 2023. 12. : 보상 협의(진주시)  ＊국가철도공단, 한국철도공사 부지

❍ 2024. 11. : 기본 및 실시설계 완료(국립중앙박물관)

❍ 2025. 상. : 공사 착공(국립중앙박물관)

❍ 2027. 10. : 공사 준공

진주 여객자동차터미널 개발

❍ 남부권 중심도시로 성장발전 토대 마련 및 인구 50만 교통인프라 구축

❍ 터미널 개발로 인한 도심 공동화, 교통 등 현안 문제 해소 방안 마련

□ 사업개요

❍ 위    치 : 가좌・호탄동 일원

❍ 사업기간 : 2012 ~ 2025년

❍ 사 업 량 : 86,728㎡(진주복합터미널, 주상복합용지, 일반상업용지 등)

❍ 사 업 비 : 229,600백만 원(민간자본)

□ 추진상황

❍ 2017.  7. : 도시개발구역 지정 신청(진주시→경상남도)

❍ 2019. 10. : 경상남도 도시계획위원회 심의 ⇒ 조건부 승인

❍ 2019. 12. : 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 고시

❍ 2020. 10. : 사업시행자 지정 신청(진주시→경상남도) 및 지정(경상남도→진주시)

❍ 2021. 12. : 사업시행자(변경) 지정 통보(진주시 ‧ STS → STS)

❍ 2022.  2. : 도시개발구역(변경) 지정, 개발계획(변경) 수립 및 실시계획인가 고시

❍ 2022.  6. : 부지조성사업 착공

❍ 2022.  8. : 터미널 이전 관련 세부계획 협의(운수업체)

❍ 2022. 10. : 복합터미널 건축허가

❍ 2023.  1. : 지구외 사업 실시계획인가(대로 1-2, 1-8호선 확장)

❍ 2023.  6. : 경상남도 광역소하천관리위원회 심의회 개최

❍ 2023.  9. : 진주시 소하천정비종합계획(부분변경) 완료

❍ 2023. 10. : 우회도로 개통(개양중학교 앞)

□ 추진계획

❍ 2024. 상. : 터미널 이전에 따른 중간정류장 및 기존시설물 활용방안 검토 용역 시행

❍ 2025. 12. : 사업완료(건축 준공 포함)

문산지구 도시개발사업

(서부경남 G-city 건설)

❍ 수도권 공공기관 2차 이전과 항공국가산업단지 기업유치에 대비해 부족한 주거시설, 공공·업      무시설 용지 확보

❍ 혁신도시와 연계한 지역의 균형발전 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 문산읍 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2030년

❍ 사 업 량 : 1,407,912㎡(주거용지, 공공·업무용지, 도시기반시설 등)

❍ 사 업 비 : 미확정

＊ LH 시행 사업으로 지구계획 수립 시 사업비 확정 계획

□ 추진상황

❍ 2022.  9. : 공공주택지구 지정 제안(LH ⇒ 국토교통부)

❍ 2022. 10. : 공공주택지구 관련 사전협의(진주시 ⇔ 국토교통부)

❍ 2023.  6. 15. : 지구 지정 및 사업인정 의제에 관한 주민 열람·공고

❍ 2023.  6. 21. : 토지거래허가구역 지정(국토교통부)

❍ 2023.  7. : 관계기관(부서) 의견 조회

□ 추진계획

❍ 2024. 12. : 공공주택지구 지정

❍ 2025. 12. : 지구계획 승인

❍ 2026.  1. : 보상 협의

❍ 2026. 12. : 조성공사 착공

❍ 2030. 12. : 조성공사 준공

초전 신도심 개발사업

｢미래 50년 전략사업｣관련 경상남도에서 지역균형발전을 위한 초전  신도심 개발사업을 시행하여 체계적인 도시 발전을 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 초전동 360-1 일원(경상남도 농업기술원 일원)

❍ 사업기간 : 2014 ~ 2031년

❍ 사 업 량 : 415,300㎡(1단계 67,853  2단계 347,447)

❍ 사 업 비 : 526,285백만 원(도비 42,300 민자 483,985)

＊ 보상비 336,869, 조성비 84,202, 금융비용 24,877, 기타 80,337

□ 추진상황

❍ 2019. 10. : 초전신도심 1단계(舊 종축장부지) 현물출자(경상남도→경남개발공사)

❍ 2019. 10. ~ 2020. 10. : 타당성조사 완료 및 지방재정투자심사(1단계사업)

❍ 2020. 11. 4. : 중앙투자심사 결과 조건부 승인 통보(1단계사업)(행안부→경상남도)

(조건사항 : 2단계 사업계획 수립 후 1단계 사업을 포함하여 투자심사 후 추진, 1단계 실시설계 후 2단계 심사)

❍ 2021. 10. : 도시개발구역 지정 제안서 접수(1단계사업)(경남개발공사→진주시)

❍ 2021. 11. ~ 2022.  2. : 진주시 도시계획위원회 자문

❍ 2022.  4. : 도시개발구역(1단계) 지정 요청(진주시→경상남도)

❍ 2022.  9. : 경상남도 경관위원회 개최(1단계사업)(조건부 의결)

❍ 2022. 10. : 경상남도 도시계획위원회 개최(1단계사업)(조건부 의결)

❍ 2022. 12. : 1단계사업 구역지정(67,853㎡)

❍ 2023. 10. : 개발계획 변경 및 실시계획인가(1단계사업)

□ 추진계획

❍ 2021.  8. ~ 2024. 12. : 초전신도심 전체 개발계획 수립 용역

❍ 2024.  1. ~ 2025. 12. : 1단계사업(舊 종축장) 착공 및 준공

❍ 2026.  1. ~ 2028. 12. : 2단계사업 구역지정 및 실시계획 수립

❍ 2029.  1. ~ 2031. 12. : 2단계사업(現 농업기술원) 착공 및 준공

소망 ‧ 희망광장 조성사업

철도부지 재생프로젝트와 유등테마공원, 남강변을 연결하는 명품 쉼터 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 망경동 76-4 일원(소망광장), 55-3 일원(희망광장), 151(소망진산 입구쉼터)

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

❍ 사 업 량 : 소망광장 1,035㎡ 희망광장 1,006㎡ 소망진산 입구쉼터 451㎡

❍ 사 업 비 : 6,400백만 원

＊ 보상비 5,300, 공사비 1,100

□ 추진상황

❍ 2021. 10. : 도시관리계획(시설) 결정 및 지형도면 고시

❍ 2021. 12. : 소망‧희망광장(근린광장) 실시계획인가 고시

❍ 2022.  2. : 보상계획 열람 공고 및 주민의견 수렴

❍ 2022.  4. : 토지 및 지장물 감정평가 실시

❍ 2022.  5. : 손실보상 협의

❍ 2022.  9. : 실시계획인가(변경) 고시

❍ 2022. 12. : 수용재결 심의 완료(지방토지수용위원회)

❍ 2023.  2. : 수용재결 공탁금 지급

❍ 2023.  4. : 공사 착공

❍ 2023. 10. : 부지 보상 협의(소망진산 입구쉼터)

□ 추진계획

❍ 2024.  2. : 공사 준공

구)진주역 문화거리 조성사업

❍ 문화‧예술의 거점인 철도부지 재생프로젝트와 강남지구 도시재생 및 다목적 문화센터를 연결      하는 문화거리 조성

❍ 문화거리를 통해 문화‧예술인들이 다양한 예술활동을 할 수 있는 기반 마련

□ 사업개요

❍ 위    치 : 망경동 일원(지식산업센터 ~ 한주럭키 앞 구.철도건널목)

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2025년

❍ 사 업 량 : 문화거리 L=852m, B=20m, 접속도로 개설, 주차장 등

❍ 사 업 비 : 29,300백만 원

＊ 보상비 18,000, 공사비 11,000, 각종 용역비 300

□ 추진상황

❍ 2022.  3. : 지방재정투자사업 심사 완료

❍ 2022.  6. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2022. 12. : 실시계획인가 신청 및 관련기관 협의, 주민공람 공고

❍ 2023.  1. : 실시계획인가 고시

❍ 2023.  4. : 보상계획 공고 및 감정평가

❍ 2023.  5. : 보상 협의(국가철도공단, 한국철도공사)

□ 추진계획

❍ 2023. 11. : 보상 협의(사유지)

❍ 2024.  4. : 공사 착공

❍ 2025. 12. : 공사 준공

시 관문지역 도시 조형물 설치

고도 1,300년 역사와 임진왜란 등 충절의 도시에 걸맞은 조형물, 분수 및 주민편의시설 등을 설    치하여 환경개선을 통한 도시 이미지 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 가좌동 68-12 (진주역 앞)

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2025년

❍ 사 업 량 : 도시조형물 설치 1식(조형물, 분수, 휴게쉼터, 경관조명 등)

❍ 사 업 비 : 1,580백만 원

＊ 실시설계비 80, 공사비 1,500

□ 추진상황

❍ 2022.  9. : 시 관문지역 도시조형물 설치 구상용역 완료

❍ 2023.  3. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2023.  4. : 1차 설문조사 실시(온라인 및 대면조사)

❍ 2023.  5. : 전문가 의견 수렴(지역 역사문화 원로 및 지도층)

❍ 2023.  6. : 2차 설문조사 실시 및 기본설계

❍ 2023.  9. ~ 11. : 디자인 공모(조형물, 광장)

□ 추진계획

❍ 2024.  6. : 기본 및 실시설계 완료

❍ 2024. 10. : 공사 착공

❍ 2025.  6. : 공사 준공

건설하천과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	18	1	5	6	4	2
현 원	18	1	5	6	2	4	공무직 2명
증 감					△2	2

□ 하천현황

(단위 : km)

구 분	개 소	연 장	축제 연장	기개수 연 장	미개수 연 장	개수율 (％)	비 고
계	240	690.44	829.41	347.72	481.69	52.0
국가하천	3	159.54	136.22	119.78	16.44	87.9
지방하천	55	311.80	440.19	142.88	297.31	32.5
소 하 천	182	219.10	253.00	85.06	167.94	33.6

□ 배수문 현황

(단위 : 개소)

관리부서	계	국가하천	지방하천	비 고
진주시	85	32	53
농어촌공사	4	4	-

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추진중	시기 미도래	미착공	비 고
계	31	15	16	-	-
예 산 사 업	31	15	16	-	-
비 예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업 --- 15건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
경남항공 국가산단 공업용수도 건설사업	❍ 위 치 : 정촌면 대축리 일원 ❍ 사업기간 : 2020~2023년 ❍ 사 업 량 - 배 수 지 Q=2,400톤/일 - 진입도로 L=245m ❍ 사 업 비 : 3,025백만 원 (공사비 2,000, 설계 및 보상 1,025)	□ 추진사항 ❍ 2011. 3. : 국가산업단지 지정 건의서 제출 (경상남도 → 국토부, 지경부) ❍ 2014. 3. : 경남항공 지역특화 산업단지 선정(국토부) ❍ 2014. 12. : 항공산업 국가산업단지 확정 발표(국토부) ❍ 2017. 5. : 산업단지계획 승인 고시 (국토부) ❍ 2020. 10. : 기본 및 실시설계 용역 착수 ❍ 2021. 4. : 기본 및 실시설계 용역 완료 ❍ 2021. 6. : 편입부지 및 지장물 보상 협의 ❍ 2021. 9. : 실시계획인가 승인고시 (진주시 고시 제 2021-199호) ❍ 2022. 1. : 수용재결 신청 ❍ 2022. 6. : 공사 착공 ❍ 2023. 8. : 공사 준공	항공국가산단 배수지 건설 사업 준공으로 용수 적기 공급
경남항공 공공폐수처리 관로 설치사업	❍ 위 치 : 정촌면 예하리 일원 ❍ 사업기간 : 2020~2023년 ❍ 사 업 량 : 연계처리 관로 설치 L=2.05km ❍ 사 업 비 : 2,634백만 원 (국1,355 도174 시1,105)	□ 추진사항 ❍ 2011. 3. : 국가산업단지 지정 건의 서 제출(경남도 → 국토 부, 지경부) ❍ 2014. 3. : 경남항공 지역특화 산업단 지 선정(국토부) ❍ 2014. 12. : 항공산업 국가산업단지 확정 발표(국토부) ❍ 2017. 5. : 산업단지계획 승인 고시 (국토부) ❍ 2018. 5. : 폐수처리시설 기본계획 수립용역 착수(LH) ❍ 2018. 11. : 폐수처리시설 기본계획 승인 요청 (진주시→낙동강유역청) ❍ 2020. 3. : 예산(국비)확보 관련기관 협의(환경부) ❍ 2020. 7. : 정촌산단 내 폐수처리장 연계 처리 결정 (낙동강유역청) ❍ 2020. 12. : 기본 및 실시설계 용역 착수 ❍ 2021. 1. : 정촌 공공폐수처리기본 계획 변경 승인□고시 (낙동강유역청) ❍ 2021. 4. : 기본 및 실시설계 용역 완료 ❍ 2022. 1. : 공사 착공 ❍ 2023. 5. : 공사 준공	산업단지에서 발생하는 공공폐수를 적기에 처리하여 산업단지 활성화 및 입주기업 지원
진주 보건대학교 앞 봉원천 정비공사	❍ 위 치 : 유곡동 일원 ❍ 사업기간 : 2022 ~ 2023년 ❍ 사 업 량 - 수로박스 L=15m - 보도블럭 설치 L=25m ❍ 사 업 비 : 329백만 원	□ 추진사항 ❍ 2021.11. : 사업관련 차담회 ❍ 2022. 6. : 공사 착공 ❍ 2023. 3. : 공사 준공	봉원천 교량확장을 통해 진출입로 분리하여 보행환경 개선
월암지구 일반하천 정비사업	❍ 위 치 : 대곡면 일원 [대곡천(지방하천)] ❍ 사업기간 : 2022 ~ 2023년 ❍ 사 업 량 - 하천정비 L=300m ❍ 사 업 비 : 191백만 원 (도 50%, 시 50%)	□ 추진사항 ❍ 2022.10. : 공사 착공 ❍ 2023. 1. : 공사 준공	미정비된 지방하천을 정비하여 재해를 사전에예방
남강에일린의 뜰 앞 경관 조명공사	❍ 위 치 : 호탄동 일원 ❍ 사업기간 : 2022~2023년 ❍ 사 업 량 - 가로등 9EA - 공원등 2EA - 난간등 128EA ❍ 사 업 비 : 158백만 원	□ 추진사항 ❍ 2022.11. : 공사 착공 ❍ 2023. 2. : 공사 준공	남강둔치 야간 경관조명 설치를 통해 안전한 친수공간 제공
남강둔치 (상평동) 진주시 로고물 경관조명 설치사업	❍ 위 치 : 상평동 일원 ❍ 사업기간 : 2022~2023년 ❍ 사 업 량 - 포인트조명 3,100EA - 제어장치 1식 ❍ 사 업 비 : 181백만 원	□ 추진사항 ❍ 2022.12. : 공사 착공 ❍ 2023. 4. : 공사 준공	남강둔치 진주시 로고물에 경관조 명 설치를 통해 이미지 제고
진주교~ 진양교 산책로 보수공사	❍ 위 치 : 진주교~진양교 ❍ 사업기간 : 2023년 ❍ 사 업 량 - 흙콘크리트 포장 L=1,667m, B=2.5m ❍ 사 업 비 : 198백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 공사 착공 ❍ 2023. 2. : 공사 준공	노후 및 파손된 산책로 정비를 통해 보행환경 개선
영천강 둔치 경관조명 설치공사	❍ 위 치 : 충무공동 따스하리교 ❍ 사업기간 : 2023년 ❍ 사 업 량 - 수중등 208EA - 난간보행등 64EA ❍ 사 업 비 : 289백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 2. : 공사 착공 ❍ 2023. 5. : 공사 준공	야간 경관 개선하여 안전한 보행환경 개선과 볼거리 제공
영천강 둔치 친수공간 조성사업	❍ 위 치 : 충무공동 일원 ❍ 사업기간 : 2022~2023년 ❍ 사 업 량 : - 수목식재 : 83,129본 (소나무 외 28종) - 산책로 포장 L=1,354m - 공원등 18EA - 경관조명 101EA - CCTV 2개소 설치 ❍ 사 업 비 : 1,900백만 원 (특별조정교부금 1,600 시 300)	□ 추진사항 ❍ 2022. 9.~12. : 구상용역 ❍ 2023. 1. : 실시설계 용역 및 하천점용허가 완료 ❍ 2023. 2. : 공사 착공 ❍ 2023. 8. : 공사 준공	미정비된 둔치 정비를 통해 시민의 건강도모와 휴식공간이 융합된 테마형 친수공간 제공
가좌천 친수공간 조성사업	❍ 위 치 : 가좌동 일원 ❍ 사업기간 : 2022~2023년 ❍ 사 업 량 - 목재데크 설치 A=424㎡ - 막구조물 설치 A=302㎡ - 보도용블럭 포장 A=299㎡ - 하천준설 V=1,676㎥ ❍ 사 업 비 : 476백만 원	□ 추진사항 ❍ 2021. 7. : 진주시-경상국립대학교 상생발전 업무 협약 (시민 개방형 생태캠퍼스 구축) ❍ 2023. 2. : 공사 착공 ❍ 2023. 6. : 공사 준공	지자체와 지역대학의 협력을 통해 지역사회와 대학에 활력을 제공
남강변 식재 정비사업	❍ 위 치 : 진양교~상평교 ❍ 사업기간 : 2023년 ❍ 사 업 량 - 수목식재 : 23,738본 (황금사철 외 12종) ❍ 사 업 비 : 499백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 2. : 공사 착공 ❍ 2023.10. : 공사 준공	남강변 식재 및 친수공간 조성으로 시민들에게 휴식공간 제공
하모공원~ 유등테마 공원 연결 경사로 설치공사	❍ 위 치 : 망경동 일원 ❍ 사업기간 : 2023년 ❍ 사 업 량 - 경사로 설치 L=87.5m - 전망대 A=42.3㎡ - LED라인바 43EA - 스텝등 20EA ❍ 사 업 비 : 220백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 하천점용허가 완료 및 공사 착공 ❍ 2023. 7. : 공사 준공	하모쉼터~ 물빛나루터~ 유등테마공원의 이동동선 개선을 통해 시민들의 접근성 증대
촉석문 앞~ 남강둔치 계단보수 공사	❍ 위 치 : 본성동 일원 ❍ 사업기간 : 2023년 ❍ 사 업 량 - 계단설치 L=22.1m, B=4.0m (길이 19.2→22.1m, 경사도 26~31°→21°) - 성곽석 쌓기 L=46.5m, A=78.0㎡ ❍ 사 업 비 : 236백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 5. : 문화재 현상변경허가 완료 ❍ 2023. 6. : 하천점용 허가 완료 및 공사 착공 ❍ 2023.10. : 공사 준공	가파른 계단 경사완화 및 계단 폭 확장을 통해 안전한 보행환경 개선
진양교~ 상평교 제방도로 보수공사	❍ 위 치 : 진양교~ 상평교 일원 ❍ 사업기간 : 2023년 ❍사 업 량 - 흙콘크리트 포장 L=528.3m, B=3.3~5.0m ❍ 사 업 비 : 88백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 10. : 착공 ❍ 2023. 11. : 준공	노후화된 제방도로 보수를 통해 보행환경 개선
남강변 친수공간 조성사업 (와룡지구)	❍ 위 치 : 금산면 와룡지구 일원 ❍ 사업기간 : 2023년 ❍사 업 량 - 메타세콰이아 590본 식재 ❍ 사 업 비 : 214백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 9. : 하천점용허가 완료 및 착공 ❍ 2023. 11. : 준공	와룡지구 수목식재를 통해 경관개선 및 휴식공간 제공

□ 추진중 사업 --- 16건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
경남항공 (진주지구) 국가산업단지 조성사업	❍ 위 치 : 정촌면 예하· 대축·화개리 일원 ❍ 사업기간 : 2011~2024년 ❍ 사 업 량 : 834,870㎡ ❍ 사 업 비 : 219,800백만원 ❍ 시 행 자 : 한국토지 주택공사 ❍ 유치업종 : 중형 민항기 완제품 및 관련 부품 생산업종	□ 추진사항 ❍ 2011. 3. : 국가산업단지 지정 건의서 제출 (경상남도 → 국토부, 지경부) ❍ 2014. 3. : 경남항공 지역특화 산업단지 선정(국토부) ❍ 2014. 12. : 항공산업 국가산업단지 확정 발표(국토부) ❍ 2017. 5. : 산업단지계획 승인 고시(국토부) ❍ 2017. 11. : 사업시행 협약 체결 (LH, 경상남도, 진주시) ❍ 2018. 6. : 편입부지 및 지장물 보상협의 통지 ❍ 2019. 3. : 수용재결(중토위) ❍ 2019. 6. : 토지(사유지)등기완료 (2019. 5. 공탁신청) ❍ 2019. 9. : 착공 ❍ 2021. 2. : 서부경남 공공병원 입지 선정 ❍ 2022. 11. : 산업시설용지 분양 공고(A4블록, 73,662㎡) ❍ 2023. 1. : 산업단지계획(4차) 변경 신청(서부경남 공공병원 용지 변경) □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 산업단지계획(4차) 변경 승인(서부경남 공공병원 용지 변경) ❍ 2023. 12. : 산업단지계획(5차) 변경 신청(우주환경시험시설 허용용도 변경) ❍ 2024. 10. : 준공
가산 일반산업단지 확장	❍ 위 치 : 이반성면 가산리 일원 ❍ 사업기간 : 2021~2023년 ❍ 시 행 량 : 산업단지 확장 (A=253,687㎡→296,724㎡) ❍ 사 업 비 : 42,000백만원 ❍ 시 행 자 : 주식회사 제이앤컴퍼니(주)	□ 추진사항 ❍ 2021. 6. : 회전익 비행센터 투자 협약체결(진주시․KAI) ❍ 2021. 7. : 투자유치위원회 심의․의결 ❍ 2021. 9. : 산업단지계획 변경 신청 및 주민 공람․공고 ❍ 2021. 9.~ 11. : 관련기관 협의 (국토부, 낙동강유역청 등) ❍ 2021. 12. : 지방산업단지계획심의 (경상남도) ❍ 2022. 1. : 산업단지계획변경 (KAl 회전익비행센터관련) ❍ 2022. 2. : 보상계획 공고 및 공사 착수 ❍ 2022. 10. : 산업단지계획 변경 (사업기간, 구역계 변경) ❍ 2023. 1. : 토지수용(2필지) ❍ 2023. 5. : 토지수용개시 ❍ 2023. 8. : 회전익비행센터 착공 (KAl ) □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 산업단지 개발계획 변경 및 준공 인가 신청 (확정측량 반영 등) ❍ 2023. 12. : 준공인가 고시
경남항공 국가산단 완충저류지 설치사업	❍ 위 치 : 정촌면 예하리 825 일원 ❍ 사업기간 : 2022 ~ 2025년 ❍ 사 업 량 : 완충저류지 설치 Q = 2,831㎥/일 ❍ 사 업 비 : 9,155백만 원 (국 6,408 도 824 시 1,923)	□ 추진사항 (진도율 10%) ❍ 2021. 3. : 완충저류시설 설치사업 국비 지원 건의 ❍ 2021. 5. : 완충저류시설 설치·운영계획 협의 (낙동강유역환경청) ❍ 2021. 11. : 완충저류시설 설치·운영계획 보완 제출 ❍ 2022. 1. : 완충저류시설 설치·운영계획 승인 (낙동강유역환경청) ❍ 2022. 3. : 완충저류시설 설치사업 국비 지원 재건의 ❍ 2023. 2. : 기본 및 실시설계 용역착수 ❍ 2023. 6. : 기본계획 협의 완료 (낙동강유역청) ❍ 2023. 10. : 환경부 기본계획 협의 □ 향후계획 ❍ 2024. 11. : 소규모 지하안정성 영향평가 협의(부산지방국토관리청) ❍ 2024. 1. : 경남도 건설기술심의 ❍ 2024. 2. : 실시설계 및 재원 협의(낙동강유역환경청) ❍ 2024. 4. : 실시설계 용역 완료 ❍ 2024. 5. : 공사 착공 ❍ 2025. 12. : 공사 준공
중촌 자연재해 위험개선지구 정비사업	❍ 위 치 : 진성면 동산리 911-11 일원 ❍ 사업기간 : 2020 ~ 2026년 ❍사 업 량 - 하천정비 L=1.0km - 교량 2개소 - 가동보 1개소 - 배수펌프장(Q=90㎥/sec) - 유수지 설치(A=7,200㎡) ❍ 사 업 비 : 18.250백만 원 [국 50%, 도 50%] ※ 도비재배정 사업	□ 추진사항 ❍ 2017. 4. : 진주시 풍수해저감 종합계획 수립 ❍ 2020. 3. : 자연재해위험개선지구 지정 및 지형도면 고시 ❍ 2020. 5. : 중촌천 기본계획 재수립 및 실시설계 용역 착수 ❍ 2022. 6. : 중촌천 하천기본계획 변경 고시 ❍ 2023. 1. : 행안부 사전설계 조치계획서 협의 (당초 98억원 ⟹ 최종 182.5억원) ❍ 2023. 4. : 경상남도 지방건설기술 심의 ❍ 2023. 8. : 조달청 원가검토 및 계약 의뢰 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 공사 착공 ❍ 2026. 7. : 공사 준공
남강 (진주성~ 동방호텔) 하천시설 정비사업 실시설계 용역	❍ 위 치 : 장대동 남강둔치 일원 ❍ 사업기간 : 2021 ~ 2023년 ❍사 업 량 - 하천정비 L=700m 실시설계 1식 ❍ 사 업 비 : 187백만 원	□ 추진사항 ❍ 2021. 1. : 실시설계 용역 착수 - 1차 협의 (2021. 1. 15.) : 부력식 홍수방어벽 검토 - 2차 협의 (2021. 10. 28.) : 투명 홍수방어벽 검토 - 3차 협의 (2021. 11. 28.) : 제방절토 및 계획하폭 재검토 - 4차 협의 (2023. 10. 30.) : 제방고 조정에 따른 치수안전성 확보 검토 : 투명홍수방어벽 구조안전성 검토 ⟹ 기술자문위원회 심의 결과에 따라 하천점용 허가 가능 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 용역비 정산 처리 ❍ 2024. 상반기 : 하천점용 협의 계속
금곡 세경소하천 정비사업 (계 속)	❍ 위 치 : 금곡면 두문리· 검암리 일원 ❍ 사업기간 : 2019 ~ 2024년 ❍사 업 량 : L=1.7㎞ B=6~12m ❍ 사 업 비 : 3,420백만 원 [균특 510 / 시비 1,710 / 기타(전환) 1,200]	□ 추진사항 ❍ 2019. 1. : 실시설계 용역 완료 ❍ 2019. 12. : 공사 착공(1차분) ❍ 2020. 3. : 공사 착공(2차분) ❍ 2021. 11. : 공사 준공(1차분) ❍ 2023. 10. : 공사 준공(2차분) □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 공사 착공(3차분) ❍ 2024. 6. : 공사 준공(3차분)
명석 우수골 소하천 정비사업 (계 속)	❍ 위 치 : 명석면 우수리 일원 ❍ 사업기간 : 2019 ~ 2024년 ❍ 사 업 량 : L=1.6㎞, B=6~12m ❍ 사 업 비 : 6,656백만 원 [균특 186 / 특교 1,000 / 시비 2,828 / 기타(전환) 2,642 ]	□ 추진사항 ❍ 2019. 12. : 실시설계 용역 완료 ❍ 2022. 1. : 공사 착공(1차분) ❍ 2022. 3. : 공사 착공(2차분) ❍ 2023. 1. : 공사 준공(1차분) ❍ 2023. 5. : 공사 준공(2차분) ❍ 2023. 6. : 공사 착공(3차분) □ 향후계획 ❍ 2024. 4. : 공사 준공(3차분)
금곡 화박골 소하천 정비사업 (전환)	❍ 위 치 : 금곡면 검암리 일원 ❍ 사업기간 : 2023 ~ 2024년 ❍사 업 량 : L=400m, B=8~10m ❍ 사 업 비 : 600백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 9. : 실시설계 용역 완료 ❍ 2023. 8. : 토지 및 지장물 보상협의 ❍ 2023. 10. : 소규모 환경영향평가 용역 착수 □ 향후계획 ❍ 2024. 1. : 소규모 환경영향평가 용역 완료 ❍ 2024. 2. : 공사 착공 ❍ 2024. 8. : 공사 준공
명석 함박골 소하천 정비사업 (전환)	❍ 위 치 : 명석면 우수리 일원 ❍ 사업기간 : 2023 ~ 2024년 ❍사 업 량 : L=395m, B=6m ❍ 사 업 비 : 800백만 원	□ 추진상황 ❍ 2023. 7. : 실시설계 용역 완료 ❍ 2023. 10. : 토지 및 지장물 보상협의 및 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2024. 7. : 준공
대곡 대곡지구 (대곡천) 일반하천 정비사업	❍ 위 치 : 대곡면 와룡리 일원 [대곡천(지방하천)] ❍ 사업기간 : 2022~2023년 ❍사 업 량 : L=120m ❍ 사 업 비 : 300백만 원 (도 50%, 시 50%)	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023. 6. : 토지 및 지장물 보상 협의 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 준공
이반성면 발산지구 일반하천 정비사업	❍ 위 치 : 이반성면 발산리 일원 [반성천(지방하천)] ❍사 업 량 : L=232m ❍ 사 업 비 : 300백만 원 (도 50%, 시 50%)	□ 추진사항 ❍ 2023. 5. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2024. 1. : 준공
금곡 인담지구 (인담천) 일반하천 정비사업	❍ 위 치 : 금곡면 인담리 일원 [인담천(지방하천)] ❍ 사업기간 : 2022~2023년 ❍사 업 량 : L=140m ❍ 사 업 비 : 300백만 원 (도 50%, 시 50%)	□ 추진사항 ❍ 2023. 6. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
정촌 대축지구 (대축천) 일반하천 정비사업	❍ 위 치 : 정촌면 대축리 일원 [대축천(지방하천)] ❍ 사업기간 : 2022~2024년 ❍사 업 량 : L=107m ❍ 사 업 비 : 500백만 원 (도 50%, 시 50%)	□ 추진사항 ❍ 2023. 8. : 토지 및 지장물 보상 협의 완료 ❍ 2023. 9. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2024. 2. : 준공
대곡 (봉평지구) 일반하천 정비사업	❍ 위 치 : 대곡면 와룡리, 광석리 일원 [대곡천(지방하천)] ❍ 사업기간 : 2023~2024년 ❍사 업 량 : L=280m ❍ 사 업 비 : 500백만 원 (도 50%, 시 50%)	□ 추진사항 ❍ 2023. 10. : 실시설계 용역 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 토지 및 지장물 보상 협의 및 착공 ❍ 2024. 5. : 준공
희망교 내동면 하부 휴게공간 조성사업	❍ 위 치 : 내동면 독산리 일원 ❍ 사업기간 : 2023년 ❍사 업 량 - 휴게공간 설치 A=417㎡ - 수목식재 : 1,450본 (산철쭉 외 1종) ❍ 사 업 비 : 170백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 10. : 하천점용허가 완료 및 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
가좌천 (가호지구 택지) 둑마루 정비사업	❍ 위 치 : 가좌동 일원 ❍ 사업기간 : 2023년 ❍사 업 량 : L=700m ❍ 사 업 비 : 100백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 11. : 실시설계 용역 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 착공 ❍ 2023. 12. : 준공

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

❍ 경남항공 국가산업단지, 가산 일반산업단지 확장사업 통하여 지역경제 활성화 및 일자리

창출

❍ 미정비된 하천의 정비를 통해 지역주민의 생명과 재산을 보호

❍ 최근 기후변화의 반영과 각종 개발사업과 수해 발생에 따른 지형변화 등으로 기수립된 소

하천정비 종합계획의 변경 수립을 통해 재해 사전 예방

❍ 하천구역 내 계절별 초화류 식재를 통해 시민과 관광객들에게 다양한 볼거리를 제공

2. 총    괄

(단위 : 백만 원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	5	252,672	-	-	-	-
일반시책사업	1	219,800	연	중	추	진
주요예산사업	4	32,872	연	중	추	진

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

경남항공(진주지구) 국가산업단지 조성사업

❍ 대한민국 항공산업 G7 도약을 위한 동북아 항공산업 생산거점 육성

❍ 경남의 새로운 미래 50년을 주도할 성장동력 산업 기반시설 확충

□ 사업개요

❍ 위    치 : 정촌면 예하리·대축리·화개리 일원

❍ 사업기간 : 2011 ~ 2024년(14년간)

❍ 사 업 량 : 산업단지 조성 (A=834,870㎡)

❍ 사 업 비 : 219,800백만 원(용지비 136,500 조성비 83,300)

❍ 시 행 자 : 한국토지주택공사(LH)

❍ 유치업종 : 중형민항기 완제품 및 관련 부품 생산업종

□ 추진상황

❍ 2011.  3. : 국가산업단지 지정 건의서 제출(경상남도 → 국토부, 지경부)

❍ 2014. 12. : 항공 국가산업단지 확정 발표(국토부)

❍ 2017.  5. : 산업단지계획 승인 고시(국토부)

❍ 2017. 11. : 사업시행 협약 체결(LH, 경상남도, 진주시)

❍ 2018.  6. : 편입부지 및 지장물 보상협의 통지

❍ 2019.  3. : 수용재결(중토위)

❍ 2019.  9. : 공사 착공

❍ 2021.  2. : 서부경남 공공병원 입지 선정

❍ 2021. 10. : 산업단지계획 변경[사업기간, 구)예하초교 편입 등 토지이용계획]

❍ 2022.  6. : 분양홍보 용역 발주(LH)

❍ 2022. 11. : 산업시설용지 분양 공고(A4블록, 73,662㎡)

❍ 2023.  1. : 산업단지계획(4차) 변경 신청(서부경남 공공병원 용지 변경)

□ 추진계획

❍ 2023. 11. : 산업단지계획(4차) 변경 승인(서부경남 공공병원 용지 변경)

❍ 2023. 12. : 산업단지계획(5차) 변경 신청(우주환경시험시설 허용용도 변경)

❍ 2024. 10. : 공사 준공

경남항공 국가산단 완충저류지 설치사업

경남항공 국가산업단지 내 사고 및 화재 등으로 인한 사고 유출수 및 초기우수 유출수를 적정 처리하여 산업단지 환경개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 정촌면 예하리 825 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2025년

❍ 사 업 량 : 완충저류지 설치 Q = 2,831㎥/일

❍ 사 업 비 : 9,155백만 원(국 6,408 도 824 시 1,923)

□ 추진상황

❍ 2021.  3. : 완충저류시설 설치사업 국비지원 건의

❍ 2021.  5. : 완충저류시설 설치·운영계획 협의(낙동강유역환경청)

❍ 2021. 11. : 완충저류시설 설치·운영계획 보완제출

❍ 2022.  1. : 완충저류시설 설치·운영계획 승인(낙동강유역환경청)

❍ 2022.  3. : 완충저류시설 설치사업 국비지원 재건의

❍ 2023.  2. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2023. 10. : 기본설계 협의 중(낙동강유역환경청)

□ 추진계획

❍ 2024. 11. : 소규모 지하안정성 영향평가 협의(부산지방국토관리청)

❍ 2024.  1. : 경남도 건설기술심의

❍ 2024.  2. : 실시설계 및 재원협의(낙동강유역환경청)

❍ 2024.  4. : 실시설계 용역 완료

❍ 2024.  5. : 공사 착공

❍ 2025. 12. : 공사 준공

중촌 자연재해위험개선지구 정비사업

진성면 중촌천 하류 지역의 미정비된 제방으로 인해 가옥 및 농경지가 상습 침수되어 금회 정비사업을 시행하여 지역주민의 생명과 재산을 보호

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진성면 동산리 911-11 일원(중촌천 : 지방하천)

❍ 사업기간 : 2020 ~ 2026년(7년간)

❍ 사 업 량 : 하천정비 L=1.0km, 교량 2개소, 가동보 1개소, 배수펌프장 및

유수지 설치 1식

❍ 사 업 비 : 18,250백만 원(국 50%, 도 50%) ※도비 재배정사업

* 공사비 14,543, 폐기물처리비 343, 설계·감리비 1,267, 보상비 2,047, 기타 50

□ 추진상황

❍ 2017.  4. : 진주시 풍수해저감종합계획 수립(중촌지구 하천재해위험지구 반영)

❍ 2020.  3. : 자연재해위험개선지구 지정 및 지형도면 고시(중촌지구)

❍ 2020.  5. : 중촌 자연재해위험개선지구 정비사업 기본계획 재수립 및 실시설계 용역 착수

❍ 2022.  6. : 중촌천 하천기본계획(변경) 고시(경상남도)

❍ 2023.  1. : 행안부 사전설계검토 조치계획서 협의(98억원 → 182.5억원)

❍ 2023.  4. : 경상남도 지방건설기술심의

❍ 2023.  8. : 일상감사, 조달청 원가검토 및 계약 의뢰

□ 추진계획

❍ 2023. 12. : 공사 착공

❍ 2026.  7. : 공사 준공

소하천정비종합계획(변경) 수립 용역

「소하천 정비법」제6조에 따른 관내 소하천 정비계획 재수립(10년) 시기 도래와 각종 개발사업에 따른 지형과 기후변화에 대응하기 위하여「소하천정비 종합계획(변경)」수립하여 재해예방하고자 함

□ 법적근거

❍「소하천 정비법」제6조 및 같은 법 시행령 제6조 제3항

□ 용역개요

❍ 위    치 : 시 관내 소하천 182개소 중 21개소 L=25km

❍ 사업기간 : 2024 ~ 2025년(2년간)

❍ 사 업 량 : 소하천정비종합계획 재수립 1식

❍ 사 업 비 : 1,500백만 원

□ 추진상황

❍ 2016.  6. 14. : 소하천정비종합계획(1차) 고시 (21개소 / L=25km)

❍ 2018.  4. 24. : 소하천정비종합계획(2차) 고시 (36개소 / L=64km)

❍ 2018.  4. 25. : 소하천정비종합계획(3차) 고시 (43개소 / L=55km)

❍ 2022.  6. 30. : 소하천정비종합계획(4차) 고시 (82개소 / L=75km)

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 사업수행능력평가(PQ) 계획수립 및 공고

❍ 2024.  4. : 용역 입찰 및 착수

❍ 2025. 12. : 용역 완료

하천 정비 및 유지관리 사업

❍ 하천의 효율적인 이용과 체계적 정비를 통하여 재해예방 및 환경보전

❍ 수해 방지를 통한 시민 안전 확보와 시민들의 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 관내

❍ 사 업 비 : 3,966.8백만 원

❍ 사업내용

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사 업 량	사업 기간	사 업 비				비고
			소 계	국 비	도 비	시 비
계			3,966.8	638	271.9	3,056.9
국가하천 유지보수	남강 배수문, 제방보수 1식 친수시설관리 (와룡, 진주)1식	매년	638	638	-	-
지방하천 유지관리	문산천 외 54개소	매년	200	-	100	100
노후 배수문 정비	하천배수문 89개소	매년	35	-	17.5	17.5
지방하천 준설사업	문산천 외 54개소	매년	300	-	150	150
하천표지판 정비	문산천 외 54개소	매년	8.8	-	4.4	4.4
하천둔치 관리	와룡, 진주지구, 남강습지원 등	매년	895	-	-	895
하천제방유지관리	하천제방 풀베기, 지장목 제거 등	매년	470	-	-	470
소하천(세천) 정비 및 유지관리	소하천, 세천, 구거 등 정비	매년	1,420	-	-	1,420

도 로 과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	23	1	6	8	4	4	공무직 12 임기제 10
현 원	23	1	7	5	7	3
증 감			1	△3	3	△1

□ 도로 및 교량 현황

(단위 : 노선, 개)

구분	계	고속 국도	국도	국가지원 지 방 도	지방도	시 도		농어촌 도 로
						동지역	읍면지역
도로 (㎞)	2,302 (2,285)	2 (55)	3 (120)	1 (11)	10 (195)	1,989 (964)	28 (228)	269 (715)

□ 시설물안전유지관리특별법 대상 도로시설물 현황

(단위 : 개)

계	1종			2종				3종						기타
215	계	교량	복개도로	계	교량	옹벽	절토사면	계	교량	지하차도	육교	터널	절토사면	급경 사지
	9	8	1	25	17	6	2	181	167	1	9	2	2	31

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추진중	시기 미도래	미착공	비 고
계	59	25	34	-	-
예 산 사 업	59	25	34	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업 --- 25건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
금산삼거리 ~ 지방도 (1009호선)간 도로개설	❍ 위 치 : 금산면 중천리 ❍ 사업기간 : 2019~2023년 ❍ 사 업 량 : L=340m, B=20m ❍ 사 업 비 : 10,400백만 원	□ 추진사항 ❍ 2020. 5. : 보상협의 통지 ❍ 2020.10. : 도시계획시설결정 ❍ 2020.12. : 실시설계 완료 ❍ 2021. 1. : 착공 ❍ 2023.10. : 준공	지방도 1009호선 연결로금산면 일대 교통량 분산
문산 남동마을 도시계획 도로 개설	❍ 위 치 : 문산읍 소문리 일원 ❍ 사업기간 : 2020. 10. ~ 2023. 6. ❍ 사 업 량 : L=296m, B=8~10.7m ❍ 사 업 비 : 2,800백만 원	□ 추진사항 ❍ 2020. 6. : 장기미집행 실효 대비 실시계획 인가 ❍ 2020. 10. : 보상협의 ❍ 2022. 1. : 실시설계 ❍ 2022. 7. : 공사착공 ❍ 2023. 6. : 공사준공	도시계획도로 개설로 지역주민 통행 편익제공 및 주거환경개선
신진주 역세권~진주역광장간 도시계획도로 개설	❍ 위 치 : 가좌동 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 7. ❍ 사 업 량 : L=30m, B=15.5m ❍ 사 업 비 : 149백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 실시설계 ❍ 2023. 5. : 공사착공 ❍ 2023. 7. : 공사준공	도시계획도로 개설로 지역주민 통행 편익제공 및 주거환경개선

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
소로 중앙 3-1호선 도시계획 도로 개설	❍ 위 치 : 상봉동 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 12. ~ 2023. 9. ❍ 사 업 량 : L=80m, B=7m ❍ 사 업 비 : 600백만 원	□ 추진사항 ❍2022.12. : 실시설계 ❍2023. 4. : 공사착공 ❍2023. 9. : 공사준공	도시계획도로 개설로 지역주민 통행 편익제공 및 주거환경개선
명석 팔미마을 (시도16호선) 도로확포장	❍ 위 치 : 명석면 외율리 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 7. ❍ 사 업 량 : L=104m, B=3.5~4m ❍ 사 업 비 : 300백만 원	□ 추진사항 ❍ 2022. 1. : 실시설계 및 보상협의 ❍ 2022. 7. : 공사착공 ❍ 2023. 7. : 공사준공	농어촌도로 확포장으로 주거환경개선 및 통행 편익제공
이반성 계룡마을 (농도309호선) 도로 확포장	❍ 위 치 : 이반성면 길성리 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 7. ❍ 사 업 량 : L=198.5m, B=6.5m ❍ 사 업 비 : 300백만 원	□ 추진사항 ❍ 2022. 1. : 실시설계 및 보상협의 ❍ 2022.11. : 공사착공 ❍ 2023. 7. : 공사준공	농어촌도로 확포장으로 주거환경개선 및 통행 편익제공
지수 덕암마을 (농도307호선) 도로 확포장	❍ 위 치 : 지수면 청담리 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 3. ❍ 사 업 량 : L=161m, B=4.3~5.7m ❍ 사 업 비 : 350백만 원	□ 추진사항 ❍ 2022. 1. : 실시설계 및 보상협의 ❍ 2022.11. : 공사착공 ❍ 2023. 3. : 공사준공	농어촌도로 확포장으로 주거환경개선 및 통행 편익제공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
정촌 화원마을 (리도206호선) 도로 확포장	❍ 위 치 : 정촌면 화개리 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 4. ❍ 사 업 량 : L=108m, B=7.2~9.5m ❍ 사 업 비 : 200백만 원	□ 추진사항 ❍ 2022. 1. : 실시설계 및 보상협의 ❍ 2022.10. : 공사착공 ❍ 2023. 4. : 공사준공	농어촌도로 확포장으로 주거환경개선 및 통행 편익제공
명석 내율마을 (면도102호선)도로 확포장	❍ 위 치 : 명석면 외율리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 7. ❍ 사 업 량 : L=400m, B=4m ❍ 사 업 비 : 200백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 실시설계 및 보상협의 ❍ 2023. 4. : 공사착공 ❍ 2023. 7. : 공사준공	농어촌도로 확포장으로 주거환경개선 및 통행 편익제공
미천 벌당리 (농도302호선) 도로 확포장	❍ 위 치 : 미천면 벌당리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 10. ❍ 사 업 량 : L=380m, B=5.5m ❍ 사 업 비 : 400백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 실시설계 및 보상협의 ❍ 2023. 4. : 공사착공 ❍ 2023.10. : 공사준공	농어촌도로 확포장으로 주거환경개선 및 통행 편익제공
집현 월평마을 진입로 확포장	❍ 위 치 : 집현면 장흥리 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 7. ❍ 사 업 량 : L=610m, B=5m ❍ 사 업 비 : 550백만 원	□ 추진사항 - 2022. 1. : 실시설계 및 보상협의 - 2022.11. : 공사착공 - 2023. 7. : 공사준공	정주환경정비 및 주민생활 불편 해소

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
초장동 3통 안길정비	❍ 위 치 : 장재동 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 6. ❍ 사 업 량 : L=260m, B=4m ❍ 사 업 비 : 300백만 원	□ 추진사항 - 2022. 1. : 실시설계 및 보상협의 - 2023. 1. : 공사착공 - 2023. 6. : 공사준공	정주환경정비 및 주민생활불편 해소
초장동 안새미골 안길 확포장	❍ 위 치 : 장재동 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 4. ❍ 사 업 량 : L=400m, B=8m ❍ 사 업 비 : 500백만 원	□ 추진사항 - 2022. 1. : 실시설계 및 보상협의 - 2022. 8. : 공사착공 - 2023. 4. : 공사준공	정주환경정비 및 주민생활불편 해소
이현동 면호실마을 진입로 정비	❍ 위 치 : 이현동 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 7. ❍ 사 업 량 : L=593m, B=6~7m ❍ 사 업 비 : 80백만 원	□ 추진사항 - 2023. 1. : 실시설계 - 2023. 4. : 공사착공 - 2023. 7. : 공사준공	정주환경정비 및 주민생활불편 해소
집현 죽산마을 안길개설	❍ 위 치 : 집현면 신당리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 9. ❍ 사 업 량 : L=68m, B=3m ❍ 사 업 비 : 100백만 원	□ 추진사항 - 2023. 1. : 실시설계 및 보상협의 - 2023. 5. : 공사착공 - 2023. 9. : 공사준공	정주환경정비 및 주민생활불편 해소
미천 임곡마을 안길확장	❍ 위 치 : 미천면 안간리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 9. ❍ 사 업 량 : L=90m, B=6m ❍ 사 업 비 : 45백만 원	□ 추진사항 - 2023. 1. : 실시설계 및 보상협의 - 2023. 5. : 공사착공 - 2023. 9. : 공사준공	정주환경정비 및 주민생활불편 해소

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
도 로 덧씌우기	❍ 위 치 - 칠암동 강변도로 외 25개소 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 8. ❍ 사 업 량 : 덧씌우기 L=17.0㎞ ❍ 사 업 비 : 5,800백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. : 착공 ❍ 2023. 8. : 준공	노후도로 재포장을 통한 쾌적한 도로환경 제공
도로 보수관리	❍ 위 치 : 상대로 외 10개소 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 8. ❍ 사 업 량 : 인도 보도블록 교체, 표지판정비, 소규모 포장, 긴급보수 등 ❍ 사 업 비 : 7,166백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. : 착공 ❍ 2023. 8. : 준공	노후도로 재포장을 통한 쾌적한 도로환경 제공
금산 중장로 보도정비	❍ 위 치 : 금산면 중장로 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 6. ❍ 사 업 량 : 보도정비 L=0.7km ❍ 사 업 비 : 157백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 설계 ❍ 2023. 2. : 착공 ❍ 2023. 6. : 준공	노후도로 재포장을 통한 쾌적한 도로환경 제공
하촌동 도로 제설자재창고 이설	❍ 위 치 : 명석면 관리지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 2. ~ 10. ❍ 사 업 량 : 창고 신설 1식 ❍ 사 업 비 : 1,500백만 원	□ 추진사항 ❍ 2022.12. : 관련기관 협의 ❍ 2023. 2. : 착공 ❍ 2023.10. : 준공	자재창고 이설을 통한 체계적인 자재관리 및 신속한 민원 대응
상습침수도로 정비사업 (진주교, 진양교 하부도로)	❍ 위 치 - 진양교, 진주교 하부도로 ❍ 사업기간 : 2023. 2. ~ 7. ❍ 사 업 량 : 맨홀펌프 설치 2식 ❍ 사 업 비 : 400백만 원	□ 추진사항 ❍ 2022. 12. : 관련기관 협의 ❍ 2023. 2. : 착공 ❍ 2023. 7. : 준공	펌프 설치를 통한 상습 침수구간 개선 으로 안전한 도로환경 제공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
지수IC 삼거리 회전교차로 설치	❍ 위 치 : 지수면 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2023. 11. ❍ 사 업 량 : 회전교차로 설치 1식 ❍ 사 업 비 : 560백만 원	□ 추진사항 ❍ 2022. 8. : 전문기관 자문 ❍ 2022. 9. : 관련기관 협의 ❍ 2022. 10. : 착공 ❍ 2023. 11. : 준공	회전교차로 설치 를 통한 통행 편익 제공 및 정체현상 해소
도로안전 시설물 유지관리	❍ 위 치 : 시 관내 ❍ 사업기간 : 2023. 1.~12. ❍ 사 업 량 - 가드레일 설치 및 보행자방호휀스 L=4,410m - 차선분리대 정비 L=1134m - 낙석방지책 정비 L=285m - 과속방지턱 29개소 - 반사경정비 66개소 - 급경사지정비 3개소 ❍ 사 업 비 : 1,700백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 착공 ❍ 2023. 12. : 준공	과속방지턱, 반사경, 가드레일 정비 등을 통한 안전한 도로 환경 조성
어린이 보호구역 개선사업	❍ 위 치 : 관내 초등학교 ❍ 사업기간 : 2023. 4.~12. ❍ 사 업 량 - 차선도색, 표지판정비 재포장, 미끄럼방지포장 등 ❍ 사 업 비 : 1,190백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023. 12. : 준공	어린이보호구역 내 시설물 정비 및 보강으로 안전한 통학 환경 조성
교량유지 관리사업	❍ 위 치 : 관내 ❍ 사 업 량 - 16개소 정밀안전점검(진단) - 13개소 보수·보강 ❍ 사 업 비 : 2,100백만원 ❍ 사업기간 : 2023. 1.~12.	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023.12. : 준공	관내 교량, 옹벽 등을 점검하고 정비하여 안전한 도로 통행 환경조성

□ 추진중 사업 --- 34건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
소로 남강 3-1 호선 도시계획도로 개설	❍ 위 치 : 망경동 일원 ❍ 사업기간 : 2020. 10. ~ 2023. 11. ❍ 사 업 량 : L=126.8m, B=6m ❍ 사 업 비 : 609백만 원	□ 추진사항 ❍ 2020.10. : 보상협의 ❍ 2022. 9. : 실시설계 ❍ 2023. 5. : 공사착공 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 공사준공
소로 금산 3-4호선 도시계획도로 개설	❍ 위 치 : 금산면 장사리 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2024. 6. ❍ 사 업 량 : L=223m, B=8m ❍ 사 업 비 : 1,600백만 원	□ 추진사항 ❍ 2022.10. : 실시설계 및 보상 협의 ❍ 2023. 5. : 지정폐기물 철거 ❍ 2023. 7. : 지장가옥 철거 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 공사착공 ❍ 2024. 6. : 공사준공
소로 문산 2-11호선 (서정마을) 도시계획도로 개설	❍ 위 치 : 문산읍 소문리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 2. ~ 2024. 6. ❍ 사 업 량 : L=125m, B=8m ❍ 사 업 비 : 1,800백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 도시관리계획 변경 ❍ 2023. 2. : 실시설계 및 보상 협의 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 공사착공 ❍ 2024. 6. : 공사준공
집현 냉정마을 (면도103호선) 도로 확포장	❍ 위 치 : 집현면 냉정리 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 11.❍ 사 업 량 : L=266m, B=5~6m ❍ 사 업 비 : 500백만 원	□ 추진사항 ❍ 2022. 1. : 실시설계 및 보상 협의 ❍ 2022.12. : 공사착공 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 공사준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
정촌 죽봉마을 (리도203호선) 도로 확포장	❍ 위 치 : 정촌면 화개리 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 11. ❍ 사 업 량 : L=537m, B=8m ❍ 사 업 비 : 1,000백만 원	□ 추진사항 ❍ 2022. 1. : 실시설계 및 보상협의 ❍ 2023. 7. : 공사착공 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 공사준공
미천 오방리 (면도101호선) 도로 확장	❍ 위 치 : 미천면 오방리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. ❍ 사 업 량 : L=490m, B=6~7m ❍ 사 업 비 : 500백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 실시설계 및 보상협의 ❍ 2023. 5. : 공사착공 □ 향후계획 ❍ 2023.12. : 공사준공
지수 청담마을 (리도204호선) 도로 확포장	❍ 위 치 : 지수면 청담리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. ❍ 사 업 량 : L=298m, B=8m ❍ 사 업 비 : 400백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 실시설계 및 보상협의 ❍ 2023. 8. : 공사착공 □ 향후계획 ❍ 2023.12. : 공사준공
정촌 내계마을 (농도305호선) 도로 확포장	❍ 위 치 : 정촌면 관봉리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6. ❍ 사 업 량 : L=590m, B=6m ❍ 사 업 비 : 500백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 실시설계 및 보상협의 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 공사착공 ❍ 2024. 6. : 공사준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
명석 송목마을 (리도205호선) 도로 확포장	❍ 위 치 : 명석면 용산리 일원 ❍ 사 업 량 : L=360m, B=5m ❍ 사 업 비 : 300백만 원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6.	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 실시설계 및 보상협의 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 공사착공 ❍ 2024. 6. : 공사준공
명석 용산마을 (리도206호선) 도로 개설	❍ 위 치 : 명석면 용산리 일원 ❍ 사 업 량 : L=1.6km, B=3~5m ❍ 사 업 비 : 600백만 원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6.	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 실시설계 및 보상협의 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 공사착공 ❍ 2024. 6. : 공사준공
집현 냉정~ 대암간 (면도103호선) 도로 확포장	❍ 위 치 : 집현면 냉정리 일원 ❍ 사 업 량 : L=500m, B=6m ❍ 사 업 비 : 500백만 원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6.	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 실시설계 및 보상협의 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 공사착공 ❍ 2024. 6. : 공사준공
하촌동 마을 진입로 개선	❍ 위 치 : 하촌동 일원 ❍ 사 업 량 : L=99m, B=6m ❍ 사 업 비 : 700백만 원 ❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.	□ 추진사항 ❍ 2022. 1. : 실시설계 및 보상협의 ❍ 2022. 9. : 공사착공 □ 향후계획 ❍ 2023.12. : 공사준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
정촌 매동(2반) 마을 진입로 정비	❍ 위 치 : 정촌면 화개리 일원 ❍ 사 업 량 : L=180m, B=9m ❍ 사 업 비 : 70백만 원 ❍ 사업기간 : 2022. 11. ~ 2023. 11.	□ 추진사항 ❍ 2022.11. : 실시설계 및 보상협의 ❍ 2023. 6. : 공사착공 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 공사준공
이반성 스마트 산림바이오 진입도로 확포장	❍ 위 치 : 이반성면 대천리 일원 ❍ 사 업 량 : L=130m, B=6m ❍ 사 업 비 : 350백만 원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 보상협의 ❍ 2023. 5. : 공사착공 □ 향후계획 ❍ 2023.12. : 공사준공
명석 덕곡마을 안길 확포장	❍ 위 치 : 명석면 덕곡리 일원 ❍ 사 업 량 : L=163m, B=5m ❍ 사 업 비 : 150백만 원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 실시설계 및 보상협의 ❍ 2023. 7. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2023.12. : 공사준공
대곡 가정마을 안길정비	❍ 위 치 : 대곡면 가정리 일원 ❍ 사 업 량 : L=117m, B=3~4m ❍ 사 업 비 : 200백만 원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 11.	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 실시설계 및 보상협의 ❍ 2023. 7. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 공사준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
선학산 모덕로 확포장	❍ 위 치 : 상대동 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 11. ❍ 사 업 량 : L=180m, B=9m ❍ 사 업 비 : 174백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 5. : 실시설계 ❍ 2023. 7. : 공사착공 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 공사준공
내동 유동마을 (역앞골) 진입로 정비	❍ 위 치 : 내동면 유수리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6.❍ 사 업 량 : L=150m, B=5m ❍ 사 업 비 : 450백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 실시설계 및 관계 기관 협의(국가철도공단) □ 향후계획 ❍ 2023.12. : 국유재산 용도 폐지 및 매수 ❍ 2024. 1. : 공사착공 ❍ 2024. 6. : 공사준공
내동 독산마을 (서당골) 안길 개설	❍ 위 치 : 내동면 독산리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6.❍ 사 업 량 : L=120m, B=4m ❍ 사 업 비 : 550백만 원	□ 추진사항 - 2023. 1. : 실시설계 및 보상협의 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 공사착공 ❍ 2024. 6. : 공사준공
대곡 봉평마을 안길 확장	❍ 위 치 : 대곡면 와룡리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. ❍ 사 업 량 : L=150m, B=5m ❍ 사 업 비 : 350백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 실시설계 및 보상협의 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 공사착공 ❍ 2023.12. : 공사준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
집현 지내마을 안길 개설	❍ 위 치 : 집현면 지내리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. ❍ 사 업 량 : L=140m, B=4m ❍ 사 업 비 : 250백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 실시설계 및 보상협의 ❍ 2023. 9. : 공사착공 □ 향후계획 - 2023.12. : 공사준공
명석 용산마을 안길정비	❍ 위 치 : 명석면 용산리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6. ❍ 사 업 량 : L=390m, B=4~5m ❍ 사 업 비 : 300백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 실시설계 및 보상협의 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 공사착공 ❍ 2024. 6. : 공사준공
명석 나불마을 도로정비사업	❍ 위 치 : 명석면 우수리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6. ❍ 사 업 량 : L=350m, B=6m ❍ 사 업 비 : 900백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 실시설계 및 보상협의 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 공사착공 ❍ 2024. 6. : 공사준공
대곡 산방마을 진입로 위험사면 정비	❍ 위 치 : 대곡면 대곡리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 7. ~ 2024. 6. ❍ 사 업 량 : L=800m, B=5~6m ❍ 사 업 비 : 800백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 7. : 실시설계 □ 향후계획 ❍ 2024. 1. : 공사착공 ❍ 2024. 6. : 공사준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
남강변 다목적문화센터 주변 도시계획도로 개설	❍ 위 치 : 망경동 일원 ❍ 사업기간 : 2021~2026년 ❍ 사 업 량 : L=445m, B=8~20m ❍ 사 업 비 : 17,000백만 원	□ 추진사항 ❍ 2021. 5. : 보상업무 위수탁 ❍ 2023. 5. : 공사 착공(중로1-154호) □ 향후계획 ❍ 2024. 5. : 공사 준공(중로1-154호) ❍ 2025. 3. : 공사 착공 (중로1-163호, 소로남강2-49호) ❍ 2026. 2. : 공사 준공 (중로1-163호, 소로남강2-49호)
하촌교차로~ 하촌마을간 도로 확·포장	❍ 위 치 : 하촌동 일원 ❍ 사업기간 : 2021~2025년 ❍ 사 업 량 : L=1.05㎞, B=20m ❍ 사 업 비 : 11,800백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. : 실시설계 완료 ❍ 2023. 6. : 실시계획 인가 ❍ 2023. 7. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2025. 7. : 공사 준공
장재동 도시계획도로 (대로3-11호) 개설공사	❍ 위 치 : 장재동 일원 ❍ 사 업 비 : 8,000백만 원 ❍ 사업기간 : 2021~2024년 ❍ 사 업 량 : L=675m, B=25m	□ 추진사항 ❍ 2022. 2. : 보상협의 ❍ 2023. 2. : 실시설계 완료 ❍ 2023. 7. : 실시계획 인가 ❍ 2023. 7. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2024. 7. : 공사 준공
신진주역세권~ 국도2호선간 연결도로 개설	❍ 위 치 : 망경동 일원 ❍ 사업기간 : 2021~2026년 ❍ 사 업 량 : L=445m, B=8~20m ❍ 사 업 비 : 17,000백만 원	□ 추진사항 ❍ 2021. 5. : 보상업무 위수탁 ❍ 2023. 5. : 공사 착공(중로1-154호) □ 향후계획 ❍ 2024. 5. : 공사 준공(중로1-154호) ❍ 2025. 3. : 공사 착공 (중로1-163호, 소로남강2-49호) ❍ 2026. 2. : 공사 준공 (중로1-163호, 소로남강2-49호)

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
대로3-64호선 외 1개노선 도시계획도로 개설	❍ 위 치 : 강남동 일원 ❍ 사업기간 : 2022~2025년 ❍ 사 업 량 : L=252m, B=15~29m ❍ 사 업 비 : 7,600백만 원	□ 추진사항 ❍ 2022.11. : 지방재정투자심사 ❍ 2023. 7. : 실시설계 완료 □ 향후계획 ❍ 2025. 1. : 보상 협의 ❍ 2025. 6. : 공사 착공 ❍ 2025.12. : 공사 준공
선학산 터널 조성	❍ 위 치 : 옥봉동, 초장동 일원 ❍ 사업기간 : 2021~2028년 ❍ 사 업 량 : L=1.93km (터널2개소 L=810m) ❍ 사 업 비 : 105,000백만 원	□ 추진사항 ❍ 2022.12. : 타당성 조사 및 기본구상 용역 완료 ❍ 2023. 3. : 기본계획 수립용역 착수 □ 향후계획 ❍ 2024.10. : 타당성조사 신청 ❍ 2025. 3. : 투자심사(자체) ❍ 2025. 5. : 기본 및 실시설계 용역 착수 ❍ 2026. 6. : 공사 착공 ❍ 2028.12. : 공사 준공
제2금산교 가설	❍ 위 치 : 하대동, 금산면 송백리 일원 ❍ 사업기간 : 2021~2028년 ❍ 사 업 량 : L=520m ❍ 사 업 비 : 118,165백만 원	□ 추진사항 ❍ 2022.12. : 타당성 조사 및 기본구상 용역 완료 ❍ 2023. 2. : 기본계획 수립용역 착수 ❍ 2023. 7. : 타당성 조사신청 □ 향후계획 ❍ 2024. 5. : 투자심사(자체) ❍ 2024.10. : 기본 및 실시설계 용역 착수 ❍ 2025. 6. : 공사 착공 ❍ 2028.12. : 공사 준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
혁신도시~제2 금산교 도로 확·포장	❍ 위 치 : 금산면 송백리~ 충무공동 일원 ❍ 사업기간 : 2018~2028년 ❍ 사 업 량 : L=2.4km, B=25m ❍ 사 업 비 : 58,460백만 원	□ 추진사항 ❍ 2019. 1. : 자체타당성조사용역 ❍ 2019. 9. : 타당성조사 검토 (LIMAC) ❍ 2022.11. : 지방재정투자심사 ❍ 2023. 2. : 실시설계 보완 용역 착수 □ 향후계획 ❍ 2023.12. : 도로구역 결정고시 ❍ 2025. 1. : 보상협의 ❍ 2026. 3. : 공사 착공 ❍ 2028.12. : 공사 준공
시도20호선 (명석,판문)보도 개설공사	❍ 위 치 : 명석면 우수리 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 8.~2024. 4. ❍ 사 업 량 : 보도개설 L=1.0㎞ ❍ 사 업 비 : 600백만 원	□ 추진사항 ❍ 2022. 7. : 실시설계완료 ❍ 2022. 8. : 사업발주 ❍ 2022. 8. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2024. 4. : 준공
어린이보호구역 무인단속장비 설치공사	❍ 위 치 : 어린이보호구역 12개소 ❍ 사업기간 : 2023. 5.~11. ❍ 사 업 량 : 무인단속장비 설치 12대 ❍ 사 업 비 : 442백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 5. : 실시설계 ❍ 2023. 8. : 사업착공 ❍ 2023.11. : 사업준공

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

❍ 미래지향적 도시 도로 체계 구축

- 지역 발전과 연계하여 시가지 내 주요 간선 도로 확․포장으로 교통 불편을 해소하고 장기미집행 도시계획도로의 계획적 투자로 원활한 교통환경 조성

❍ 농촌 지역 도로망 확충으로 지역균형 발전 도모

- 농촌 지역의 도로 확․포장으로 교통불편 해소

❍ 노면 불량 차도 등 정비사업으로 쾌적한 도로환경조성

- 도로유지관리 및 위험도로 개선사업으로 안전하고 쾌적한 도로 조성

2. 총    괄

(단위 : 백만 원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	15	416,712	6	1	1	-
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	15	416,712	6	1	1	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

남강변 다목적 문화센터 주변 도시계획도로 개설

남강변 다목적 문화센터 건립, 진주지식산업센터의 건립, 구)진주역 지구 단위계획구역 개발, 강남지구 도시재생 뉴딜사업 등에 따른 교통량 증가 대비 및 개발사업 이용활성화를 위한 도시계획도로를 개설하여 노후된 도심생활환경 개선과 지역균형발전 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 망경동 일원

❍ 사업기간 : 2021~2026년

❍ 사 업 량 : 도로 개설 L=445m, B=8~20m

❍ 사 업 비 : 17,000백만 원(시비)
* 공사비 4,890, 설계비 100, 부대비 10, 용지보상비 12,000

□ 추진상황

❍ 2021.  2. : 주거환경개선사업지구 정비계획(변경) 수립 보고(도시재생과)

❍ 2021.  5. : 보상업무 위수탁 협약 체결(한국부동산원)

❍ 2021.  7. : 도시계획시설 결정

❍ 2021. 12. : 실시계획인가

❍ 2022.  6. : 실시설계용역 완료

❍ 2023.  5. : 공사 착공(중로1-154호)

□ 추진계획

❍ 2024.  5. : 공사 준공(중로1-154호)

❍ 2025.  3. : 공사 착공(중로1-163호, 소로남강2-49호)

❍ 2026.  2. : 공사 준공(중로1-163호, 소로남강2-49호)

하촌교차로~하촌마을 간 도로 확․포장

하촌교차로~하촌마을 간 도로를 확장하여 말티고개~장재도로 확장 및 하촌 회전교차로 설치로 인해 증가하는 교통량을 집현면 사촌 방향으로 분산하고 보도가 없어 생활불편을 겪고 있는 하촌마을 간 보행환경 개선 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 하촌동 일원

❍ 사업기간 : 2022~2025년

❍ 사 업 량 : 도로 개설 L=1.05㎞, B=8m→20m

❍ 사 업 비 : 11,800백만 원(시비)

* 공사비 7,936, 설계비 100, 부대비 20, 토지보상비 3,744

□ 추진상황

❍ 2021. 11. : 지방재정 투자심사

❍ 2021. 12. : 중기 지방재정계획 반영

❍ 2022.  9. : 문화재 지표조사, 소규모 환경영향평가

❍ 2023.  3. : 실시설계용역 완료

❍ 2023.  4. : 도시관리계획 결정(경미한 변경) 및 실시계획인가 고시

❍ 2023.  7. : 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2025.  7. : 공사 준공

장재동 도시계획도로(대로3-11호) 개설공사

말티고개~장재도로 확장 공사로 증가하는 교통량을 분산하여 교통체증을 해소하고 안전사고 예방 및 보행환경 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 장재동 일원

❍ 사업기간 : 2021~2024년

❍ 사 업 량 : 도로 확·포장 L=675m, B=25m

❍ 사 업 비 : 8,000백만 원(시비)

* 공사비 2,900, 설계비 110, 용지보상비 4,990

□ 추진상황

❍ 2022.  2. : 편입토지 및 지장물 보상협의(30필지, 5,798㎡)

❍ 2022. 10. : 주민설명회 개최

❍ 2023.  2. : 실시설계 용역 완료

❍ 2023.  7. : 실시계획 인가

❍ 2023.  7. : 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2024.  7. : 공사 준공

신진주역세권~국도2호선 간 연결도로 개설

국도 3·33호선 노선분리를 위해 선제적으로 정촌면 화개리(리도 203호선)와 역세권을 연결하는 도로 개설사업으로 국도3호선 대체우회도로 역할수행과 병목구간의 교통체증 및 교통혼잡을 개선하여 도로이용자의 교통편의 제공 및 지역 간 균형발전을 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 가좌동, 정촌면 화개리 일원

❍ 사업기간 : 2017~2027년

❍ 사 업 량 : 도로 개설 L=1.83㎞, B=9.5m

❍ 사 업 비 : 45,000백만 원(시비)

* 공사비 33,200, 설계·감리비 5,200, 부대비 600, 용지보상비 6,000

□ 추진상황

❍ 2018.  5. : 타당성평가 및 기본계획 용역 완료

❍ 2018. 10. : 도시계획시설(도로) 결정(중로1-155)

❍ 2020. 12. : 철도 입체교차시설 심의(국가철도공단)

❍ 2022. 11. : 경상남도 건설기술심의

❍ 2023.  3. : 기본 및 실시설계 용역 완료, 도로 노선지정(시도 27호선)

❍ 2023.  7. : 도로구역 결정 고시(사업인정 고시)

❍ 2023. 11. : 공사 착공(1차분)

□ 추진계획

❍ 2027. 12. : 공사 준공

대로3-64호선 외 1개노선 도시계획도로 개설

구)진주역 인근 도시계획도로 개설을 통해 복합문화공원, 공립 전문과학관, 국립진주박물관, 문화의 거리 등의 편리한 이용

□ 사업개요

❍ 위    치 : 강남동 일원

❍ 사업기간 : 2022~2025년

❍ 사 업 량 : 도로 개설 L=252m, B=15~29m

❍ 사 업 비 : 7,600백만 원(시비)

* 공사비 1,000, 설계비 90, 용지보상비 6,510

□ 추진상황

❍ 2018. 10. : 구)진주역 지구단위계획구역 결정(최초)

❍ 2022.  9. : 지방재정투자심사(자체)

❍ 2022. 10. : 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시

❍ 2023.  7. : 실시설계 용역 완료

□ 추진계획

❍ 2025.  1. : 편입토지 및 지장물 보상협의(4필지, 4,310㎡)

❍ 2025.  6. : 공사 착공

❍ 2025. 12. : 공사 준공

선학산 터널 조성

진주시 옥봉동과 하대동을 연결하는 선학산 터널을 통하여 동부지역의 균형있는 지역발전을 위한 교통체계를 구축하여 도시교통난 해소

□ 사업개요

❍ 위    치 : 옥봉동, 초전동 일원

❍ 사업기간 : 2021~2028년

❍ 사 업 량 : 도로 개설 L=1.93km(터널 2개소 L=810m)

❍ 사 업 비 : 105,000백만 원(시비)

* 공사비 86,000, 설계·감리비 3,400, 부대비 11,800, 용지보상비 3,800

□ 추진상황

❍ 2022. 12. : 진주시 도시관리계획 타당성 조사 및 기본구상 용역 완료

❍ 2023.  3. : 기본계획 수립 용역 착수( ~2024. 11.)

□ 추진계획

❍ 2024. 10. : 타당성 조사 신청

❍ 2025.  3. : 투자심사(자체)

❍ 2025.  5. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2026.  6. : 공사 착공

❍ 2028. 12. : 공사 준공

제2금산교 가설

진주시의 하대동과 금산면을 연결하는 제2금산교를 통하여 동부지역의 균형있는 지역발전을 위한 교통체계를 구축하여 도시교통난을 해소

□ 사업개요

❍ 위    치 : 하대동, 금산면 송백리 일원

❍ 사업기간 : 2021~2028년

❍ 사 업 량 : 교량 신설 L=520m

❍ 사 업 비 : 118,165백만 원(시비)

* 공사비 97,220, 설계·감리비 4,620, 부대비 78, 용지보상비 16,247

□ 추진상황

❍ 2021. 11. : 진주시 도시관리계획 타당성 조사 및 기본구상 용역 착수

❍ 2022. 12. : 진주시 도시관리계획 타당성 조사 및 기본구상 용역 완료

❍ 2023.  2. : 기본계획 수립 용역 착수( ~2023. 11.)

❍ 2023.  7. : 타당성조사 신청(진주시→행정안전부)

❍ 2023.  9. : 타당성조사 과제선정 및 약정체결(LIMAC)

□ 추진계획

❍ 2024.  5. : 투자심사(자체)

❍ 2024. 10. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2025.  6. : 공사 착공

❍ 2028. 12. : 공사 준공

혁신도시~제2금산교 도로 확·포장

금산지역 도시팽창 및 혁신도시 완성에 따라 교통량은 증가하였으나, 연결 도로망이 협소하고 굴곡이 심하여 이를 해소코자 확·포장 사업을 시행하여 도심 내 교통난 해소

□ 사업개요

❍ 위    치 : 충무공동 ~ 금산면 송백리 일원

❍ 사업기간 : 2018~2028년

❍ 사 업 량 : 도로 확·포장 L=2.4km, B=25m(교량 2개소)

❍ 사 업 비 : 58,460백만 원(시비)

* 공사비 37,593, 설계·감리비 4,500 부대비 1,505, 용지보상비 14,862

□ 추진상황

❍ 2020.  5. : 타당성조사 결과 사업 필요성 인정(B/C 0.63)

【한국지방행정연구원 지방투자사업관리센터(LIMAC)】

❍ 2022.  9. : 중기지방재정 계획 반영

❍ 2022. 11. : 지방재정투자심사(자체) 조건부 승인

❍ 2023.  2. : 실시설계 보완 용역 착수( ~2023. 12.)

□ 추진계획

❍ 2023. 12. : 도로구역 결정 고시(사업인정 고시)

❍ 2025.  1. : 편입토지 및 지장물 보상협의(159필지, 104,718㎡)

❍ 2026.  3. : 공사 착공

❍ 2028. 12. : 공사 준공

도시계획도로 개설

❍ 도시계획도로 개설로 시가지 주거환경 개선

❍ 차량 및 주민 통행 불편 해소로 주민생활 편익 증진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 시 관내

❍ 사 업 량

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업량	사업비	기투자	2023	2024	2025이후
계	L=4.9㎞	81,390	29,900	5,700	18,900	27,190
대로 1-4호선 도시계획도로 개설	L=484m, B=35m	10,000	6,660			3,340
구)진주역 도시계획도로 (대로3-64, 중로2-165) 개설	L=250m, B=15m	7,600	150			7,450
대로 3-11호선 도시계획도로 개설	L=700m, B=20m	8,000	4,300		3,700
판문 중로2-7호선 도시계획도로 개설	L=600m, B=15m	8,800	4,200		2,000	2,600
중로1-56호선 (여중오거리~숯골교차로) 도시계획도로 개설	L=440m, B=20m	11,000			200	10,800
중로 2-121호선 도시계획도로 개설	L=30m, B=15m	800	500	300
소로문산 1-6호선 도시계획도로 개설	L=120m, B=10m	2,500	1,800	700
소로문산 2-11호선 (서정마을) 도시계획도로 개설	L=125m, B=8m	3,800	2,000	1,800
소로문산 2-9호선 도시계획도로 개설	L=296m, B=8m	2,850	2,850
소로가호 2-2호선 도시계획도로개설	L=280m, B=8m	4,000			4,000

사 업 명	사업량	사업비	기투자	2023	2024	2025이후
소로남강 3-1호선 도시계획도로 개설	L=126m, B=8m	2,300	1,800	500
소로남강 3-4호선 도시계획도로 개설	L=102m, B=8m	2,050	800	550	700
소로남강 2-9호선 도시계획도로 개설	L=135.5m, B=8m	2,000			1,200	800
소로남강 2-19호선 도시계획도로 개설	L=48m, B=8m	1,200			1,200
소로남강 3-21호선 도시계획도로 개설	L=250m, B=6m	1,800			1,500	300
소로상평 3-16호선 도시계획도로 개설	L=187m, B=6m	1,600			1,200	400
소로상평 3-9호선 도시계획도로 개설	L=145m, B=6m	3,050	1,500	200	1,350
소로평거2-85호선 도시계획도로 개설	L=58m, B=8m	1,800	1,000		800
소로상평 2-29호선 도시계획도로 개설	L=63.6m, B=8m	1,700		200		1,500
소로금산 2-9호선 도시계획도로 개설	L=135m, B=8m	1,300	500	800
소로금산 3-4호선 도시계획도로 개설	L=262m, B=6~8m	2,000	500	500	1,000
소로집현 2-1호선 도시계획도로 개설	L=64m, B=8m	1,540	1,340	150	50

□ 추진계획

❍ 연차별, 단계별 사업추진

장기미집행 도시계획시설(도로) 단계별 시행 추진

2020. 7. 1. ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제48조에 따른 장기  미집행 도시계획시설 결정의 실효에 따른 존치시설(도로)의 단계별 시행계획 수립

□ 주요내용

❍ (관련근거) 장기미집행 도시계획시설 실효 일몰제
- 「국토계획법」 제48조(도시․군계획시설의 실효 등) 제1항

❍ 시설결정 실효 시기(실효 기산일)
- 2000년 7월 1일 이전 결정 고시 : 2020년 7월 1일
※ 2000년 7월 2일 이후 결정 고시 : 고시일로부터 20년 되는 다음날

▷ 국토계획법 법률안 일부개정 : 2019. 8. 20.[2020. 1. 1. 시행]
⇒ 장기미집행시설은 실시계획 고시일로부터 5년 이후 실효
⇒ 시행자가 토지면적의 2/3 이상을 확보한 경우 7년 이후 실효
⇒ 시행자가 모든 토지 및 물건을 확보한 경우 효력유지

□ 추진현황 및 추진계획

❍ 2019.  3. : 장기미집행 도시계획시설 정비 및 관리방안 수립 용역(도시계획과)

❍ 2019.  4.~ 9. : 미집행 도시계획시설 전수 조사 및 존치여부 결정

❍ 2019. 10. : 존치결정 시설 실시계획 인가 용역 발주

❍ 2020.  3.~ 6. : 존치결정 장기미집행시설 실시계획 인가 신청

❍ 2020.  6. : 장기미집행 실효고시 및 존치결정시설 실시계획인가고시 완료

❍ 2020.  7.~ 2025.  6. : 보상협의 통지 및 사업시행

□ 장기미집행 도시계획도로 현황

(단위 : 억 원)

합 계		기 완료		추진 중		미집행		비고
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
58	1,842	30	314	20	1,308	8	220

□ 미집행시설 연도별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	합 계	기투자	2023년	2024년		2025년 이 후
				본예산	추 경
시 비	50,000	28,000	6,000	500	12,500	3,000

□ 추진방안

❍ 장기미집행시설 13개소에 대해서는 인가일(2020. 6. 30.)로부터 5년간 실효가 유예됨에 따라 2025. 6월까지 소유권 확보가 필요

⇒ 총사업비 500억 원 중 2024년 당초예산 5억 원 확보하고, 2025년까지 연차적으로 사업비 확보하여 장기미집행시설 해제 대비

읍․면지역 도로망 확충

차량 및 주민 통행 불편해소로 주민생활 편익 증진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 시 관내

❍ 사업기간 : 2024년

❍ 사 업 량

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업량	사업비	기투자	2023	2024	2025이후
계		290			290
주민불편해소사업	2개소	240			240
주민참여예산사업	2개소	50			50

□ 세부사항

❍ 주민불편해소사업

- 금산 석교마을 안길정비공사 (80백만 원)

- 장재동 대승선원주변 안길정비공사 (160백만 원)

❍ 주민참여예산사업

- 대곡 용암마을 안길 배수로 정비사업 (30백만 원)

- 대곡 유곡마을 안길 정비공사 (20백만 원)

□ 추진계획

❍ 2024.  1.~ 12. : 착공 및 준공

도로유지관리사업

관내 도로의 보수 및 시설개선을 위한 유지관리 사업을 시행하여 시민에 쾌적하고 안전한 도로환경 제공

□ 사업개요

❍ 위    치 : 시 관내

❍ 사업기간 : 2024년

❍ 사 업 비 : 9,897백만 원

❍ 사 업 량

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요		비고
	사 업 량	사업비
3개 사업		9,897
도로보수 및 유지 관리	∘위치 : 관내 일원(연중) ∘내용 : 도로 배수 개선, 인도정비, 긴급 보수, 풀베기, 표지판 외	6,087
도로덧씌우기 사업	∘위치 : 이현동 이현웰가~유곡한보아파트 외 24개소 ∘내용 : 덧씌우기 25개소	3,360
위험도로개선 (교통 사고 잦은 곳 개선)	∘위치 : 내동면 양옥마을(시도2호선) 외 1개소 ∘내용 : 굴곡도로 개선, 교차로 개선 등	450

□ 추진계획

❍ 2023.  1.~  2. : 실시설계

❍ 2023.  3.~ 12. : 착공 및 준공

도로안전시설물 유지관리

❍ 도로안전시설물 정비로 안전한 도로환경 조성 및 사고예방

❍ 미비한 도로안전시설물 설치·보완으로 도로 이용자의 편의 증진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 시 관내

❍ 사업기간 : 2024년

❍ 사 업 비 : 1,500백만 원

❍ 사 업 량

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사 업 개 요		비고
	사 업 량	사업비
4개 사업		1,500
위험도로 가드레일 설치	∘위 치 : 관내 일원 ∘낙하위험도로 가드레일 설치 등	400
차선분리대 설치	∘위 치 : 관내 일원 ∘차선분리대 설치 및 유지보수	400
미끄럼방지 포장 및 낙석방지시설 설치	∘위 치 : 관내 일원 ∘굴곡도로, 급경사지 정비 등	300
과속방지턱, 반사경 설치	∘위 치 : 관내 일원 ∘보행자 보호, 교차로 반사경 설치 등	400

□ 추진계획

❍ 2024.  1.~  2. : 실시설계

❍ 2024.  3.~ 12. : 착공 및 준공

어린이·노인보호구역 개선사업

어린이·노인보호구역 내 도로안전시설물 정비를 통해 교통약자들이 안전하게 통행할 수 있는 환경 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 관내 어린이·노인보호구역 76개소

❍ 사업기간 : 2024년

❍ 사 업 량 : 노란색 횡단보도 및 안전시설물 설치, 도로 재포장 등

❍ 사 업 비 : 600백만 원

□ 추진상황

❍ 2023. 11.~ 12. : 사업대상지 조사

□ 추진계획

❍ 2024. 1. : 실시설계용역 착수

❍ 2024. 2. : 실시설계용역 완료

❍ 2024. 3. : 사업 착공

❍ 2024. 6. : 사업 완료

도로시설물(교량, 옹벽 등) 유지관리

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 종별 시설물(교량, 옹벽, 복개도로, 급경사지 등)을 점검하고 필요 시 보수·보강하여 안전한 도로 통행환경 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 시 관내

❍ 사업기간 : 2024년

❍ 사 업 량 : 정밀안전점검(진단) 18개소, 보수·보강 7개소

❍ 사 업 비 : 1,500백만 원

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 안전점검 도래 1, 2종 시설물 점검용역 시행

❍ 2024.  4. : 안전점검 도래 1, 2종 시설물 점검용역 완료

❍ 2024.  5. : 우수기 대비 3종 시설물 정기 안전점검 실시

❍ 2024. 10. : 용역결과에 따른 시설물 보수보강공사 시행

❍ 2024. 11. : 동절기 대비 3종 시설물 정기 안전점검 실시

❍ 2024. 12. : 시설물 보수보강공사 완료

시민안전과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원 현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	28	1	6	10	7	4	공무직 10 임기제 3
현 원	27	1	8	7	8	3
증 감	△1		2	△3	1	△1

□ 민방위대 현황

(단위 : 대, 명)

총 계		통․리대		직장대		지원대
대수	대원수	대수	대원수	대수	대원수	대수	대원수
853	19,428	817	17,714	35	1,663	1	51

□ 민방위 시설․장비 현황

시 설 현 황		장 비 현 황
비상급수시설	비상대피시설	민방위장비	화생방장비	방독면장비
54개소/9,571톤	145개소/1,151㎢	6종/2,209개	5종/ 528개	1종/17,610개

□ 민방위 교육장 현황

위 치	규 모	준 공	조 성 비
상봉대룡길 42	건 물 : 720㎡ 주 차 장 : 1,020㎡ 수용인원 : 350명	2010. 6. 28.	사업비 : 959백만 원 - 국비 150 - 도비 105 - 시비 704

□ 배수장 및 우수저류시설 관리 현황

구분	시 설 명	위 치		규 모		시설물관리자
		읍면	동리
	합 계			배수장 10개소 우수저류시설 1개소
1	삼곡배수장	문산	삼곡	- 전동기 - 원동기 - 펌 프	350마력×2대 320마력×3대 1,200mm×5대	김양호
2	가방배수장	금산	가방	- 전동기 - 펌 프	75마력×3대 500mm×3대	이재오
3	월평배수장	집현	장흥	- 원동기 - 펌 프	320마력×1대 150마력×1대 850mm×1대 1,200mm×1대	김상도
4	향양배수장	집현	덕오	- 전동기 - 펌 프	175마력×3대 700mm×3대	이창수
5	삭평배수장	명석	관지	- 원동기 - 펌 프	400마력×2대 450마력×2대 1,200mm×2대 900mm×2대	김남헌
6	덕천강배수장	수곡	원내	- 전동기 - 펌 프	100마력×2대 60마력×1대 800mm×2대 600mm×1대	박창민
7	나불천배수장	진주시	성북 (인사)	- 전동기 - 펌 프	500마력×7대 1,200mm×7대	전재만
8	장대배수장	진주시	중앙 (옥봉)	- 전동기 - 원동기 - 펌 프	60마력×1대 320마력×2대 500mm×1대 1,200mm×2대	정효윤
9	상대배수장	진주시	상평	- 전동기 - 펌 프	330마력×3대 1,200mm×3대	곽수호
10	상평배수장	진주시	초장	- 전동기 - 원동기 - 펌 프	300마력×3대 320마력×4대 1,200mm×7대	구상훈
11	상평우수 저류시설	진주시	상평	- 전동기 250마력×1대 120마력×1대 - 펌 프 800mm×1대 500mm×1대		정효윤

□ 재난안전상황실 장비 현황

품 명	단위	수량	비 고
기상관측장비	식	1	강우량 9개소, AWS 15개소, 수위계 7개소, 적설계 2개소
강우상황 표출기	식	2	기상관측 현황 및 남강댐 방류현황 표출
모사전송기(FAX)	대	1	자연재난팀 내 전용 전송기 (749-2834)
전화기	대	39	행정전화 14대, 위성전화 6대, 재난안전통신망단말기 19대
상황용 PC	대	15	컴퓨터 15대
배수장 가동 모니터링	대	9	나불천, 상평, 삼곡, 가방, 상대, 덕천강, 장대, 향양배수펌프장 및 상평우수저류시설
영상회의 시스템	식	1	대형LED모니터, 월 컨트롤러 1식, 음향장비 1식, 영상회의시스템 1식
CCTV	대	72	재난상황모니터링
지진가속도계측기	식	1	시청사

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추진중	시기 미도래	미착공	비 고
계	34	24	10	-	-
예 산 사 업	33	23	10	-	-
비예산사업	1	1	-	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업 --- 24건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
코로나19 대응 재난대책본부 구성․운영	❍ 운영기간 : 2020. 2. ~ 2023. 5. ❍ 구 성 - 상황총괄반 및 재대본 반별 편성 - 12개 실무반(협업부서) 운영	□ 추진사항 ❍ 중대본, 도․시 재대본 영상회의 ❍ 일일상황 보고 및 언론 브리핑 ❍ 자가격리 및 재택치료자 관리 ❍ 역학조사 및 예방접종 관리 ❍ 재택치료 행정상담센터 운영 ❍ 중점관리시설 점검 ❍ 안심숙소 관리 및 해외 입국자 수송지원 등 ※ 2023. 6. 1. ~ 보건행정과 운영	각종 시설물 안전점검 실시로 재해 예방
재난대응 안전한국훈련	❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. ❍ 참여대상 : 진주시, 국토안전 관리원, 진주소방서, 진주경찰서 등 ❍ 장 소 : 구)미천초등학교 ❍ 내 용 : 건축물붕괴 및 화재 ❍ 사 업 비 : 15,148천 원	□ 추진사항 ❍ 2023.4. : 행안부 훈련 방향 시달 ❍ 2023.7. : 기본계획 수립 ❍ 2023 7. ~ 8. : 민간전문가 컨설팅 ❍ 2023.8. : 실행계획 수립 ❍ 2023.9. 7. : 훈련 실시	사고 대응 체계 확립

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
명석 신기세천 소규모 공공시설 정비공사	❍ 위 치 : 명석면 신기리 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 8. ~ 2023. 5. ❍ 사 업 량 : 세천정비 1식 ❍ 사 업 비 : 1,434백만 원 (특별교부세)	□ 추진사항 ❍ 2022. 8. 17. : 공사 착공 ❍ 2023. 5. 22. : 공사 준공	재해 사전 예방
동절기 보일러 안전사고 예방 시설개선사업	❍ 위 치 : 시 관내 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2. ❍ 사 업 량 : 보일러 점검 및 수리 (100세대) ❍ 사 업 비 : 6.5백만 원 (재난관리기금)	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. 16. : 사업 착공 ❍ 2023. 2. 21. : 사업 준공	재해 사전 예방
2023년 상반기 우수저류시설 환경정비공사	❍ 위 치 : 우수저류시설 17개소 ❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 6. ❍ 사 업 량 : 제초 등 환경정비 1식 ❍ 사 업 비 : 18백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 5. 22. : 공사 착공 ❍ 2023. 6. 8. : 공사 준공	재해 사전 예방
명석 가화마을 재해위험지 정비공사	❍ 위 치 : 명석면 가화리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 5. ❍ 사 업 량 : 세천정비 L=51.5m ❍ 사 업 비 : 60백만 원 (재난관리기금)	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. 27. : 공사 착공 ❍ 2023. 5. 22. : 공사 준공	재해 사전 예방
봉래 사면 재해 위험지 정비사업(2차)	❍ 위 치 : 봉래동 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 6. ❍ 사 업 량 : 노후 건축물 철거 공사 1개소 ❍ 사 업 비 : 70백만 원 (재난관리기금)	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. 13. : 공사 착공 ❍ 2023. 6. 9. : 공사 준공	재해 사전 예방

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
상평배수펌프장외 1개소 옥상 방수공사	❍ 위 치 : 초장동, 명석면 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 5. ❍ 사 업 량 : 우레탄 방수 691㎡ ❍ 사 업 비 : 57백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. 31. : 공사 착공 ❍ 2023. 5. 15. : 공사 준공	재해 사전 예방
10월 축제 인파 밀집 시뮬레이션 용역	❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 8. ❍ 용역내용 - 진주성 촉석문 통로 및 내측 광장 인파 밀집 시뮬레이션 - 시뮬레이션 결과에 따른 안전관리 대책 제시 ❍ 용역업체 : 금오공과대 산학협력단 ❍ 사 업 비 : 18,400천 원 (관광진흥과 예산)	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. 4. : 용역 착수 ❍ 2023. 8. 1. : 용역 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 9. : 10월 축제 안전 관리 계획 반영 (관광진흥과)	재해 사전 예방
승강기사고 대응 합동훈련	❍ 사업기간 : 2023. 7. ~ 9. ❍ 참여대상 : 진주시, 진주소방서, 유지관리 업체, 승강기 관리 주체 등 ❍ 사 업 비 : 10백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 5. : 자체 훈련계획 수립 ❍ 2023. 5. : 국·도비 교부 ❍ 2023. 8. : 실시계획 수립 ❍ 2023. 9. 11. : 훈련 실시 및 평가	사고 대응 체계 확립
나불천 배수펌프장 특고압인입케이블 교체공사	❍ 위 치 : 성북동 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ❍ 사 업 량 : 노후 인입케이블 철거 및 재설치 (450m, 3가닥) ❍ 사 업 비 : 20백만 원 (재난관리기금)	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. 6. : 공사 착공 ❍ 2023. 3. 30. : 공사 준공	재해 사전 예방
삼곡배수펌프장 옥상방수공사	❍ 위 치 : 문산읍 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 4. ❍ 사 업 량 : 우레탄 방수 283㎡ ❍ 사 업 비 : 20백만 원 (재난관리기금)	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. 27. : 공사 착공 ❍ 2023. 4. 11. : 공사 준공	재해 사전 예방

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
명석 동전마을 재해위험지 정비공사	❍ 위 치 : 명석면 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 6. ❍ 사 업 량 : 세천정비 L=100m ❍ 사 업 비 : 32백만 원 (재난관리기금)	□ 추진사항 ❍ 2023. 5. 10. : 공사 착공 ❍ 2023. 6. 12. : 공사 준공	재해 사전 예방
나불천배수펌프장 외 2개소 저류지 준설공사	❍ 위 치 : 성북동, 상대동 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 5. ❍ 사 업 량 : 저류지 준설 321㎥ ❍ 사 업 비 : 51백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. 28. : 공사 착공 ❍ 2023. 5. 8. : 공사 준공	재해 사전 예방
대곡 마진마을 재해위험지 정비공사	❍ 위 치 : 대곡면 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 6. ❍ 사 업 량 : 세천정비 L=45m ❍ 사 업 비 : 30백만 원 (재난관리기금)	□ 추진사항 ❍ 2023. 5. 10. : 공사 착공 ❍ 2023. 6. 5. : 공사 준공	재해 사전 예방
소규모 재해위험지 정비사업	❍ 위 치 : 문산읍 외 20개 읍면동 ❍ 사 업 량 : 문산 이곡마을 재해 위험방지 정비 외 34개소 ❍ 사 업 비 : 935백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. : 사업 착공 ❍ 2023. 8. : 사업 준공 ※ 읍면동 재배정 시행	재해 사전 예방
가방배수펌프장 옥상방수공사	❍ 위 치 : 금산면 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 5. ❍ 사 업 량 : 우레탄 방수 237㎡ ❍ 사 업 비 : 17백만 원 (재난관리기금)	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. 13. : 공사 착공 ❍ 2023. 5. 8. : 공사 준공	재해 사전 예방
나불천배수펌프장 원격제어설비 정비공사	❍ 위 치 : 성북동 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 7. ❍ 사 업 량 : 배수장 원격제어 구축 1식 ❍ 사 업 비 : 256백만 원 (특별교부세)	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. 11. : 공사 착공 ❍ 2023. 7. 10. : 공사 준공	재해 사전 예방
삼곡배수펌프장 외부도색공사	❍ 위 치 : 문산읍 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 4. ❍ 사 업 량 : 외벽 도색 706㎡ ❍ 사 업 비 : 18백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. 9. : 사업 착공 ❍ 2023. 4. 5. : 사업 준공	재해 사전 예방

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
작업환경측정 위탁용역(상반기)	❍ 대 상 : 20개 부서 ❍ 사업기간 : 2023. 3. 23. ~ 6. 13. ❍ 사 업 비 : 12백만 원(시비) ❍ 내 용 : 각 사업장별 특성에 따른 유해위험 요인 확인 및 개선 ❍ 사 업 자 : ㈜경상고려산업환경연구소	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. 23. : 착수 ❍ 2023. 6. 13. : 완료 □ 주요내용 ❍ 유해인자별 작업환경측정 및 분석 ❍ 작업환경측정 결과 및 개선대책 수립	재해 사전 예방
재난 예경보시설(관측) 노후장비 교체공사	❍ 위 치 : 사봉면사무소 외 39개소 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 6. ❍ 사 업 량 : - 기상관측시설(AWS) 교체 : 3대 - 예경보시설 노후 배터리 교체 : 76대 ❍ 사 업 비 : 101백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. 27. : 사업 착공 ❍ 2023. 6. 24. : 사업 준공	재해 사전 예방
나불천배수펌프장 전기시설 정비공사	❍ 위 치 : 성북동 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 5. ❍ 사 업 량 : 예비 인입선로 정비 1식 ❍ 사 업 비 : 20백만 원 (재난관리기금)	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. 19. : 공사 착공 ❍ 2023. 5. 16. : 공사 준공	재해 사전 예방
상평 배수장 법면 보강공사	❍ 위 치 : 초전동 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 9. ~ 10. ❍ 사 업 량 : 법면 정비(옹벽쌓기) - L = 29m, H=1.5m, A=435㎡ ❍ 사 업 비 : 15백만 원 (재난관리기금)	□ 추진사항 ❍ 2023. 9. 20. : 공사 착공 ❍ 2023. 10. 17. : 공사 준공	재해 사전 예방
2023년 하반기 우수저류시설 환경정비공사	❍ 위 치 : 우수저류시설 17개소 ❍ 사업기간 : 2023. 9. ~ 10. ❍ 사 업 량 : 제초 등 환경정비 1식 ❍ 사 업 비 : 19백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 9. 21. : 공사 착공 ❍ 2023. 10. 10. : 공사 준공	재해 사전 예방

□ 추진중 사업 --- 10건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
지역안전 관리단 상시 안전점검 실시	❍ 사 업 비 : 16백만 원 ❍ 사업기간 : 연중 ❍ 사 업 량 : 관내 재난 취약 시설 150여 개소	□ 추진사항 ❍ 2021. 7 : 안전관리팀 신설 ❍ 2022. 1. ~ 12. : 106개소 점검 ❍ 2023. 1. ~ 10. : 130개소 점검 □ 향후계획 ❍ 연간계획에 따라 재난 취약 시설 상시 안전점검 실시
장재·장흥 자연재해 위험지구 정비사업	❍ 위 치 : 장재동 ~ 집현면 장흥리 ❍ 사업기간 : 2019 ~ 2025년 ❍ 사 업 량 : - 배수장 및 유수지 설치 1식 - 서원못 준설 등 L=2.3km ❍ 사 업 비 : 33,573백만 원 (국 50%, 도 25%, 시 25%)	□ 추진사항 ❍ 2018. 1. : 지구지정 고시 ❍ 2020. 6. : 보상협의 착수 ❍ 2022. 2. : 공사 착공 ❍ 2023. 10. : 공사 중지(90일간) □ 향후계획 ❍ 2025. 12. : 공사 준공
상평배수장 제진기 정비사업	❍ 위 치 : 초장동 2번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ❍ 사 업 량 : 제진기 교체 3대 ❍ 사 업 비 : 800백만 원 (도 50%, 시 50%) (재난관리기금)	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. 13. : 사업시행 (제진기 3기 제작) ❍ 2023. 4. 19. : 선금 지급(제진기) □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 부대공사 발주(기 제진기 철거) ❍ 2023. 12. : 설치 및 완료
상평배수장 노후 배수펌프 교체공사	❍ 위 치 : 초장동 2번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 7. ~2024. 4. ❍ 사 업 량 : 배수펌프 교체 1식 ❍ 사 업 비 : 800백만 원 (특별교부세)	□ 추진사항 ❍ 2023. 7.18. : 사업시행 (관급자재 계약) ❍ 2023.10.16. : 부대공사 착공(노후펌프 철거) □ 향후계획 - 2024. 4. : 현장설치 및 완료
자연재해저감 종합계획 재수립용역	❍ 위 치 : 시 관내 일원 ❍ 용역기간 : 2021.6.10. ~ 2023. 12. 7. ❍ 과 업 량 : 종합계획 재수립 1식 ❍ 용 역 비 : 1,084백만 원	□ 추진사항 ❍ 2021. 6.10. : 용역 착수 ❍ 2021.11.15. : 주민, 관련부서 의견 취합 ❍ 2022. 6. : 주민공청회 실시 ❍ 2023. 7. : 의회 의견 청취 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 행정안전부 승인신청 ❍ 2023. 12. : 용역 완료

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
재해사전대비	❍ 사업기간 : 2023년 연중 ❍ 사 업 량 : 표준행동매뉴얼 및 주민홍보물 제작, 배수장유지 관리 1식 ❍ 사 업 비 : 1,176백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. ~ 10 : 배수장, 예경보시설 등 방재시설 재해대비 시설물‧장비 점검 및 정비 ❍ 2023. 5. ~ 8. : 자연재난 대비 주민 홍보물 제작 배포(여름철) ❍ 2023. 5. ~ 9. : 폭염 대비 그늘막 쉼터 운영 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. ~ 12 : 한파대비 홍보물 제작 및 배부
2023년 연차별 민방위 교육 실시 및 용역 시행	❍ 사 업 비 : 54백만 원 ❍ 교육방법 : 집합, 사이버 ❍ 교육장소 - (집합교육) 진주시 민방위체험센터 - (사이버교육) 스마트민방위사이트 ❍ 위탁업체 - ㈜콘텐츠팩토리상상역 ❍ 교육대상 - 시 전 민방위 대원 (20,331명) ❍ 집합교육기간 - (본 교육) 4. 10. ~ 5. 3. - (1차보충) 9. 11. ~ 17. - (2차보충) 11. 6. ~ 11. ❍ 사이버교육기간 - (본 교육) 4. 10. ~ 6. 30. - (1차보충) 8. 1. ~ 9. 17. - (2차보충) 10. 2. ~ 11. 15.	□ 추진사항 ❍ 2023. 2. : 시스템 위탁업체 위탁 용역 시행 ❍ 2023. 3. : 읍면동 담당자 교육 ❍ 2023. 4. : 본 교육 시작 (집합, 사이버) ❍ 2023. 8. : 1차 보충교육 (사이버) ❍ 2023. 9. : 1차 보충교육(집합) ❍ 2023. 10. : 2차 보충교육(사이버) □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 2차 보충교육(집합) ❍ 2023. 12. : 사업 종료

사 업 명	사 업 개 요	추 진 사 항	문제점 및 대책
위험성평가 위탁용역	❍ 대 상 : 34개 부서 및 읍면동 ❍ 사 업 비 : 50백만 원 (시비) ❍ 내 용 : 각 사업장별 특성에 따른 유해위험 요인 확인 및 개선 ❍ 사업기간 : 2023. 9. 7. ~ 12. 5. ❍ 사 업 자 : (사)대한산업 안전협회	□ 추진사항 ❍ 2023. 9. 7. : 착수 ❍ 2023. 12. 5. : 완료예정 □ 주요내용 ❍ 유해‧위험요인 파악 ❍ 위험성 추정 ❍ 위험성 결정 ❍ 위험성 감소 대책수립
작업환경측정 위탁용역 (하반기)	❍ 대 상 : 20개 부서 ❍ 사 업 비 : 13백만 원 (시비) ❍ 내 용 : 각 사업장별 특성에 따른 유해위험 요인 확인 및 개선 ❍ 사업기간 : 2023. 9. 7. ~ 12. 5. ❍ 사 업 자 : ㈜경상고려 산업환경	□ 추진사항 ❍ 2023. 9. 7. : 착수 ❍ 2023. 12. 5. : 완료예정 □ 주요내용 ❍ 예비조사 ❍ 유해인자별 작업환경측정 및 분석 - 작업환경측정 결과 및 개선 대책 수립
산업안전보건의 위탁용역	❍ 대 상 : 현업업무종사자 ❍ 사 업 비 : 17백만 원 (시비) ❍ 내 용 : 현업업무 종사자 직업병 발생 예방을 위한 의학적관리 정보 제공 등 건강 및 보건관리 ❍ 사업기간 : 2023. 2. 1. ~ 12. ❍ 사 업 자 : 제일병원직업 환경 의학센터	□ 추진사항 ❍ 2023. 2. 20. : 착수 ❍ 2023. 12. 20. : 완료예정 □ 주요내용 ❍ 작업관련성 위험요인 지도 ❍ 업무상 사고예방지도 ❍ 현장방문점검 및 보건관리 업무

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

❍ 안전의식 제고를 위한 안전문화운동

- 안전문화운동 정기적 실시로 관심을 제고시켜 안전하고 건강한 사회구축

- 시민참여 활성화로위험․사고․재난 사전에 예방

❍ 사회⸱자연재난 예방을 위한 재난안전대책본부 운영으로 재난 수습 등에 관한 사항을 총        괄․조정하여 조기 대응

❍ 현장 중심의 안전점검을 통한 각종 시설물 재난 사전예방

❍ 자연재해위험지구 지속적 정비로 지역주민의 생명과 재산 보호

- 장재․장흥 자연재해위험지구 정비사업 시행

- 소규모 재해 위험지 정비 사업으로 호우 및 태풍 피해 예방 만전

❍ 중대재해 예방을 위한 안전‧보건 관리체계 구축

❍ 사회재난 예방을 위한 시설물 안전 점검 및 안전관리계획 수립으로 안전관리

체계 확립 및 각종 재난 대비

❍ 민방위 교육 추진으로 비상 대비 위기관리 역량 강화

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만 원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	8	3,200	7	-	-	1
일반시책사업	7	-	6	-	-	1
주요예산사업	1	3,200	1	-	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

2024년 재난대응 안전한국훈련

재난관리책임기관의 재난 대응체계 확립과 재난 대비 대응능력을 점검하고 시민의 안전 문화 확산을 위한 훈련 실시

□ 훈련개요

❍ 근    거 :「재난 및 안전관리기본법」제35조(재난대비훈련 실시)

❍ 기    간 : 2024년 하반기

❍ 주    관 : 진주시

❍ 참여기관 : 진주시, 진주소방서, 진주경찰서, 유관기관, 민간단체,

민간기업

❍ 훈련목표

- 현장조치 행동 매뉴얼 기반 토론・현장 연계 훈련으로 대응능력 강화

- 다양한 상황 속에 발생하는 다중 재난 대응능력 향상

□ 추진계획

❍ 중점훈련

- 훈련유형 : 다중밀집시설 대형화재

- 토론훈련 : 상황 판단 회의 및 재난안전대책본부 운영

- 현장훈련 : 실제 재난 유사 상황 설계 및 현장 대응 훈련

❍ 훈련일정

계획 수립	⇨	역량교육·컨설팅	⇨	훈련 실시	⇨	평가 및 환류
주관 : 행정안전부 ▶ 기본계획 수립 ▶ 시행계획 수립 (10월)		주관 : 행정안전부 ▶ 훈련담당자, 민간 전문가 역량교육(3월~8월) ▶ 기관별 민간 전문가 컨설팅 지원(9월~10월)		주관 : 훈련 주관기관 ▶ ‘24년 안전한국훈련 (10월~11월)		주관 : 행정안전부 ▶ 사전평가(D-1) ▶ 현장평가(D-day) ▶ 사후평가(D+14)
컨설팅·평가		▶ 훈련 全 과정에 대하여 매뉴얼을 바탕으로 민간 전문가가 컨설팅 및 평가∙환류

지역안전관리단 상시 안전점검

시민이 안전하고 행복한 진주 건설을 위해 재난 취약시설에 대한 현장 중심의 상시적이고 체계적인 안전점검을 수행하는 지역안전관리단 운영

□ 사업개요

❍사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 주요업무

- 재난 취약 시설의 안전관리를 위한 상시적인 안전점검 계획 수립․시행 및 긴급

안전점검

- 재난·재해 사전 예방을 위해 유관기관과의 공조 체계 강화

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 설 연휴 대비 다중이용시설 등 안전점검

❍ 2024.  2. : 해빙기 대비 옹벽 및 절토 사면 안전점검

❍ 2024.  3. : 재난 취약 시설물 안전점검

❍ 2024.  4. : 봄 행락철 다중이용시설 등 안전점검

❍ 2024.  5. : 장마 및 집중호우 대비 안전점검

❍ 2024.  6. : 숙박시설, 의료시설 등 안전점검

❍ 2024.  7. : 장마 및 집중호우 대비 안전점검

❍ 2024.  8. : 어린이집 안전점검

❍ 2024.  9. : 추석 연휴 대비 다중이용시설 등 안전점검

❍ 2024. 10. : 행락철 대비 야영장 안전점검

❍ 2024. 11. : 안전취약계층 재난예방 시설물 안전점검

❍ 2024. 12. : 동절기 사회복지시설 등 안전점검

제3종 시설물 지정을 위한 실태조사

재난 발생 위험이 높거나 지속적인 관리가 필요한 시설물을 제3종 시설물로 신규 지정․고시하여 체계적으로 관리하기 위한 실태조사 실시

□ 사업개요

❍ 근    거

-「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제8조(제3종 시설물의 지정 등)

-「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」제100조(실태조사)

❍ 계획수립 : 2024. 6. 30. 한

❍ 조사기간 : 2025. 1. 1. ~ 11. 30.

❍ 대상시설

- 토목분야(2015. 1. 1. 이전 준공된 교량, 터널 등)

- 건축분야(2010. 1. 1. 이전 사용승인된 공동주택 및 다중시설 등)

❍ 조사방법 :『제3종 시설물 지정을 위한 실태조사 매뉴얼』에 의거 실시

❍ 조사주체 : 소관부서(해당 시설물 관리부서)

□ 추진계획

❍ 2024.  6. : 실태조사 기본계획 수립(총괄부서–시민안전과)

❍ 2024.  6. : 실태조사 시행계획 수립(소관부서)

❍ 2025.  1. ~ 10. : 실태조사 및 지정고시(소관부서)

❍ 2025. 10. ~ : 시설물통합정보시스템 등록 및 체계적인 관리

지역축제 및 행사 안전관리

지역축제 및 행사 개최 시 안전에 관한 계획을 심의하고 축제장 및 행사장의 안전에 관한 사항을 사전에 점검하여 해당 축제 및 행사가 안전하게 진행되도록 하기 위함

□ 사업개요

❍ 근    거 :「재난 및 안전관리 기본법」제66조의 11, 「공연법」제11조,

「진주시 옥외행사의 안전관리에 관한 조례」제5조

❍ 기    간 : 지역축제 및 행사 개최 21일 전 ~ 종료 시

❍ 점검위원 : 안전관리자문단 중 건축, 전기, 가스, 소방 분야 위원

□ 추진계획

❍ 안전관리계획 및 재해대처계획 수립 대상 축제 또는 행사

❍ 지역축제 및 옥외행사 안전관리 절차

지역축제	안전관리계획 수립 (지역축제 주최‧주관자)	심의요청	안전관리계획 심의 (시 안전관리 실무위원회)	제 출	안전관리계획 검토 (도 사회재난과)	통 보	안전점검 (안전관리자문단)
	- 모든 지역축제 - 의견수렴(시민안전과, 소방서, 경찰서)	소관부서 → 시민안전과	- 순간참여인원 1,000명 이상 - 고위험 축제	시민안전과 → 도 사회재난과, 행안부	- 검토 및 보완	도 사회재난과 → 시민안전과, 도 주관부서	- 현장 안전점검 (도 표본점검 병행)
옥외행사	안전관리계획 수립 (옥외행사 주최‧주관자)	심의요청	안전관리계획 심의 (시 안전관리 실무위원회)	제 출	안전관리계획 검토 (도 사회재난과)	통 보	안전점검 (안전관리자문단)
	- 순간참여인원 500명 이상 - 의견수렴(시민안전과, 소방서, 경찰서)	읍면동, 실과소 → 시민안전과	- 순간참여인원 1,000명 이상	시민안전과 → 도 사회재난과	- 검토 및 보완	도 사회재난과 → 시민안전과, 도 주관부서	- 현장 안전점검 (도 표본점검 병행)

□ 주요 추진내용

❍ 지역축제 및 행사 안전관리계획 심의

❍ 지역 축제장 또는 행사장 안전관리자문단 합동 안전 점검 추진

❍ 유관기관 협조체계 유지 등 신속 상황 대응 체계 마련

민간 다중이용시설 위기상황 매뉴얼 지도⸱점검

민간 다중이용시설에 대한 안전관리를 강화하고 재난에 대비한 선제적 예방 조치 활동의 상시화 도모

□ 사업개요

❍ 근    거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제34조의6 제3항

- 다중이용시설 등의 위기 상황 매뉴얼 작성․관리 및 훈련

❍ 점검대상 : ｢건축법 시행령｣ 제2조 제17호 가목에 따른 판매․문화 등의 시설로 사용하는 바닥면적 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축물(15개소)

❍ 점검시기 : 상‧하반기 전수 지도‧점검

❍ 점검내용

- 매뉴얼 작성 여부, 매뉴얼 구성 적정성

- 훈련계획서 및 결과보고서 등을 확인하여 실제 훈련내용 적정성 여부 등

□ 추진계획

❍ 상반기 민간 다중이용시설에 대한 매뉴얼 작성 및 훈련 실적 점검

❍ 상반기 훈련 미실시 시설에 대한 하반기 훈련계획 확인 및 훈련 독려

❍ 민간전문가 컨설팅 참여 희망 시설 조사 및 컨설팅 실시

장재･장흥 자연재해위험지구 정비사업

자연재해위험지구에 대한 근원적 예방대책 수립 추진으로 저지대 상습 침수 피해지역 주민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

❍ 위    치 : 장재동, 집현면 장흥리 일원

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2025년

❍ 사 업 량

- 배수펌프장 및 유수지 설치 1식

- 서원못 준설 및 정비

- 교량 5개소

- 가동보 1개소 등

❍ 사 업 비 : 33,573백만 원

* 공사비 22,753, 폐기물처리비 220, 설계·감리비 2,700, 보상비 7,900

□ 추진상황

❍ 2021.  6. : 행정안전부 사전 설계검토 완료

* 행정안전부 협의하여 총사업비 변경(당초 105억 원 → 변경 336억 원)

❍ 2022.  2. : 공사 착공

❍ 2023. 10. : 공사 중지(90일간)

□ 추진계획

❍ 2023. 12. : 토지 및 지장물 보상 협의 완료

❍ 2025. 12. : 공사 준공

민방위 비상대비 역량 강화

민방위 사태 발생 시 즉각 대처할 수 있는 능력 함양 및 비상 대비 위기관리 역량 강화를 통하여 시민의 생명과 재산 보호

□ 민방위 교육·훈련 실시 계획

❍ 민방위 기본교육(집합교육)

- 교육대상 : 민방위대원 1 ~ 2년차(교육시간 : 4시간)

- 교육장소 : 진주시 민방위체험센터

❍ 민방위 사이버교육

- 교육대상 : 민방위대원 3 ~ 4년차(교육시간 : 2시간)

민방위대원 5년차 이상(교육시간 : 1시간)

- 교육방법 : 사이버교육(PC 또는 모바일)

❍ 민방위 훈련

- 훈련대상 : 민방위대원 포함 전 시민

- 훈련목표 : 비상사태 및 각종 재난 대비를 위한 실전 훈련 실시

- 훈련장소 : 관내 공공기관 및 다중이용시설 등

- 훈련일정 : 연 6회(전국 단위 3, 5, 9, 10월 / 지역 단위 4, 7월)

□ 2024년 을지연습 실시 계획

❍ 연습일자 : 2024. 8.

❍ 연습방법 : 전시 전환절차 연습, 도상연습, 전시 현안과제 토의,

실제훈련 병행

❍ 주요내용

- 민·관·군 합동 국가총력전 연습을 통한 완벽한 비상대비 태세 확립

- 실제 전쟁 상황을 고려한 실질적 전시 전환 절차 훈련 실시

- 지역별 주민참여 맞춤형 실제 훈련 확대 실시

- 최근 테러 양상에 따른 대응훈련 강화

중대재해예방 추진

중대재해예방을 위한 안전ㆍ보건 관리체계구축 및 의무 이행사항 점검을 통하여 종사자의 생명과 신체를 보호하는 등 중대재해 예방

□ 사업개요

❍ 법적근거

-「중대재해처벌법」제4조 및 제9조

-「산업안전보건법」

제29조(교육), 제36조(위험성평가), 제125조(작업환경측정),

「산업안전보건법 시행령」제29조(산업보건의의 선임),

규칙 제210조(사후관리) 등

❍ 주요내용

- 위험성 평가, 근골격계 유해요인 조사, 작업환경 측정 등을 통해

잠재된 재해요인 발굴 및 안전‧보건관리체계 구축

□ 추진계획

❍ 반기 1회 이상 사업장 순회점검으로 지속적인 안전·보건 관리

❍「산업안전보건법」상 안전보건 의무교육 이수 여부 수시 점검

❍ 위험성평가 실시

- 대 상 :「위험성평가에 관한 지침」해당 사업장

- 내 용 : 각 사업장별 특성에 따른 유해 위험 요인 확인 및 개선

❍ 작업환경 측정

- 대 상 :「산업안전보건법 시행규칙」에 따른 유해물질 사용 사업장

- 내 용 : 연 2회 사업장 작업환경 유해요인 제거 및 감소

❍ 산업안전보건 관리

- 대 상 : 진주시 소속 현업종사자

- 내 용 : 현업종사자 등의 건강관리 및 안전한 업무환경 조성

건 축 과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	20	1	3	7	6	3
현 원	20	1	6	5	2	6
증 감			3	△2	△4	3

□ 건축물 현황

(’23.10.31 / 단위 : 동)

구 분	계	주거용	상업용	농업용	공업용	기타
2023년	64,439	43,440	12,193	2,280	1,581	4,945

□ 건축물대장 관리 현황

(’23.10.31 / 단위 : 건)

구 분	계	일반건축물	집합건축물	총괄표제부	비 고
2023년	173,861	63,152	105,668	5,041	도면 : 230,070

□ 건축허가 현황

(단위 : 건, ㎡)

구 분		계	주거용	공업용	상업용	기타
2022년	건수	575	201	28	157	189
	면적	682,278	210,244	32,884	257,820	181,330
2023년	건수	352	164	12	82	94
	면적	204,962	36,062	46,280	46,355	76,265

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추진중	시기 미도래	미착공	비 고
계	9	3	6	-	-
예 산 사 업	7	3	4	-	-
비예산사업	2	-	2	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업 --- 3건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
소규모 공동주택 지원사업	❍ 지원대상 - 중산빌라 외 19개소 공동주택(20세대미만) ❍ 지원기준 - 총사업비의 80%(단지당 2천만 원 한도) ❍ 내 용 - 옥상 방수, 도장, 주차장 보수 등 ❍ 사 업 비 : 300백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 신청접수 ❍ 2023. 3. : 지원대상자 선정 ❍ 2023. 4.~10. : 사업시행 및 완료 - 20개 단지 ·옥상방수, 도장 : 12개 ·주차장 보수 : 3개 ·승강기 및 cctv설치 : 2개 ·배수로 정비 : 2개 ·담장보수 : 1개	쾌적하고 안전한 주거환경 조성

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
나눔주택 사업 (도비보조사업)	❍ 사업내용 - 빈집 등 소유자에게 리모델링 공사비 80% 지원(자부담20%) - 의무임대기간(2~4년) 동안 반값 전·월세 임대조건 ❍ 사 업 량 : 1동 - 리모델링 비용 지원 ❍ 사업대상 - 빈집, 65세 이상 노인거주 주택 등 ❍ 사 업 비 : 15백만 원 - 도비 50%, 시비 50%	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. : 사업시행계획 수립 임대희망자 모집 ❍ 2023. 4. : 현장조사 ❍ 2023. 5. : 임차인 모집 ❍ 2023. 6. : 나눔주택 선정 (임대·임차인 선정) 입주 및 사업완료	노후주택 활용 으로 주거복지 사각 지대 최소화
노후건축물 점검 (목욕탕 굴뚝)	❍ 근거법령 - ｢건축물관리법｣ 제15조 - ｢진주시 건축물관리조례｣ 제6조 ❍ 점검대상 - 20년 이상 경과한 목욕탕굴뚝 53개소 ❍ 사 업 비 : 15백만 원 ❍ 사업내용 : 균열 및 경사도 등 안전점검	□ 추진사항 ❍ 2023. 6. : 노후굴뚝 안전점검 시행계획 수립 ❍ 2023. 7. : 안전점검 용역 시행 ❍ 2023. 9. : 노후 굴뚝 정비지원 사업 추진계획 수립 ❍ 2023. 10. : 점검 완료 ※‘24년 노후굴뚝정비 지원사업 추진 시 기초자료 활용예정

□ 추진중 사업 --- 6건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
건축물 유지관리 점검	❍ 근거법령 - 「건축물관리법」 제13조 ❍ 점검대상 - 다중이용건축물 - 연면적 3,000㎡ 이상 집합건축물 등 ❍ 점검시기 - 사용승인 후 5년 이내 최초, 이후 3년마다 1회 실시 ❍ 점검개소 : 62개소 - 민간관리자가 점검 실시	□ 추진사항 ❍ 2023. 2. : 점검대상 통보 ❍ 2023. 4.~ 6. : 점검 촉구 ❍ 2023. 10. : 43개소 완료(69%) ❍ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 점검 완료(100%)
건축지도원 지정 및 운영	❍ 근거법령 - ｢건축법｣ 제37조 - ｢진주시 건축조례｣ 제29조 ❍ 구성인원 : 20명(건축사 등) ❍ 사 업 비 : 22백만 원 ❍ 주요업무 - 건축행정 건실화 점검 - 위반건축물 단속 및 현장 지도	□ 추진사항 ❍ 2023. 5. : 상반기 건축행정 건실화 점검(79건) ❍ 2023. 6. : 위반건축물 기획 점검 (95건) □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 하반기 건축행정 건실화 점검
농촌빈집 정비사업 (도비보조)	❍ 사업대상 - 1년이상 방치된 농촌 빈집 ❍ 사업내용 : 철거 비용 일부 지원 - 슬레이트 빈집 0.6백만 원 - 일반 빈집 1.2백만 원 ❍ 사 업 비 : 9,600천 원 (도비 30%, 시비 70%) ❍ 사 업 량 : 빈집 15동	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 시행계획 수립 ❍ 2023. 4. : 사업대상자 선정 ❍ 2023. 7. : 사업물량 변경통보 (경남도 10→15동) ❍ 2023. 10. : 완료 5동, 추진 중 10동 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 사업완료

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
농촌빈집 정비사업 (자체사업)	❍ 사업대상 - 1년이상 방치된 농촌 빈집 ❍ 사업내용 : 농촌지역 내 빈집 철거 비용 지원 ❍ 사 업 비 : 315백만 원 ❍ 사 업 량 - 철거 21동 (동당 최대 15백만 원 지원)	□ 추진사항 ❍ 2023. 7. : 추진계획 수립 ❍ 2023. 9. : 추경예산 편성 시행계획 수립 ❍ 2023. 9. : 사업공고 ❍ 2023. 10. : 사업자 선정(1차) · 철거 6건 추진 중 · 추가 접수 20건 검토 중 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 사업자 선정(2차) ❍ 2023. 12. : 사업완료
도시빈집 정비사업 (자체사업)	❍ 사업대상 - 1년이상 방치된 도시 빈집 ❍ 사업내용 : 도시지역 내 빈집의 철거, 안전조치 비용 지원 등 ❍ 사 업 비 : 265백만원 ❍ 사 업 량 - 철 거 : 11동, 165백만원 - 안전조치 : 2동, 10백만 원 - 리모델링 : 2동, 40백만 원 - 철거 후 활용 : 5동 50백만 원 ❍ 동당 최대 지원금액 - 철거 15백만 원, 안전조치 5백만 원, 리모델링 20백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 시행계획 수립 ❍ 2023. 2. : 사업공고 ❍ 2023. 4. : 사업자 선정(1차) ❍ 2023. 5. : 시행계획 변경 (대상 확대) ❍ 2023. 6. : 사업자 선정(2차) ❍ 2023. 8. : 빈집 활용계획 수립 ❍ 2023. 9. : 사업자 선정(3차) ❍ 2023. 10. : 사업자 선정(4차) · 철거 10건 (7건 완료, 3건 추진 중), 리모델링 (1건 추진 중) · 빈집 활용사업(2건 추진 중, 주차장 활용 및 안전휀스설치) □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 사업자 선정(5차) ❍ 2023. 12. : 사업 완료

사 업 명	사 업 개 요	추 진 사 항	문제점 및 대책
농촌주택 개량사업	❍ 사업대상 - 농촌지역의 주택규모 연면적 150㎡이하의 신축, 증축, 대수선 등을 하려는 자 ❍ 사업내용 : 주거환경 개선을 위한 융자지원사업 ❍ 사업기간 : 2023. 2.~ 12. ❍ 사업량 : 32동(선정28동) ❍ 대출한도 : 신축,개축,재축(2억), 증축,대수선(1억) ❍ 대출금리 : 고정금리(연리2%) 또는 변동금리 중 선택	□ 추진사항 ❍ 2023. 2. : 시행계획 수립 ❍ 2023. 2. : 물량배정(경남도) 및 사업대상자 모집 ❍ 2023. 3. : 사업자 선정 및 1차 추가 선정 ❍ 2023. 4. : 사업자 선정(2차 및 3차 추가) ❍ 2023. 5. : 사업자 선정(4차 및 5차 추가) ❍ 2023. 6. : 사업자 선정(6차 및 7차 추가) ❍ 2023. 7. : 사업자 선정(8차 추가) ❍ 2023. 10. : 사업자 선정(9차 추가) □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 사업자 선정(10차) ❍ 2023. 12. : 사업 완료

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

❍ 소규모 공동주택의 노후 공용 부분 보수비 지원을 통해 쾌적하고 살기 좋은 주거환경을 조성하고, 투명하고 책임감 있는 건축 행정수행으로 시민 만족도 극대화

❍ 농촌 주택개량사업을 통한 주거환경 개선으로 농촌 주민의 삶의 질 향상

❍ 건축물 유지관리점검 및 노후 굴뚝 안전점검 실시로 기존 건축물의 체계적 유지관리, 민간      건축전문가의 건축지도원 활동으로 건축행정의 전문성 강화 및 건축법 질서 확립에 기여

❍자체재원을 활용한 선제적인 빈집 정비로 각종 사회문제 예방 및 쾌적한 주거환경 조성, 반값 임대주택의 공급으로 주거취약계층 주거비 경감

⇒ 투명하고 책임감 있는 건축 행정 수행과 건축물 안전성 확보를 통해 쾌적하고 살기 좋은 주거환경을 조성

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만 원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	8	582	8	10	20	-
일반시책사업	2	-	-	-	-	-
주요예산사업	6	582	8	10	20

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

농촌 빈집정비 사업(도비보조)

❍농촌 지역의 노후․불량주택을 정비하여 미관 향상 및 범죄 발생 예방

❍ 환경부 슬레이트처리 지원사업과 연계하여 정주여건 개선

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 1년 이상 방치된 농촌 빈집

❍ 사업내용 : 빈집 철거 시 철거비용 일부 지원

❍ 사 업 비 : 3백만 원(도비 30%, 시비 70%)

- 슬레이트지붕 : 동당 0.6백만 원

- 일반지붕: 동당 1.2백만 원

❍ 사 업 량 : 5동

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 추진계획 및 지침 수립(경남도)

❍ 2024.  3. : 물량배정(경남도) 및 사업공고, 대상자 선정

❍ 2024.  4. ~ 12. : 사업시행 및 완료

□ 기대효과

❍ 농촌 빈집으로 인한 사회문제 해결 및 정주환경 개선

도시 및 농촌 빈집 실태조사

진주시 빈집정비계획 수립(2026년~2030년)을 위한 빈집 실태조사 실시

□ 사업개요

❍ 관련법령

- ｢빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법｣ 제5조(빈집 등 실태조사)

- ｢농어촌정비법｣ 제64조의2(빈집실태조사)

- ｢진주시 빈집 정비를 위한 지원조례｣

❍ 조사대상 : 1년 이상 거주·사용하지 않고 방치되어 있는 주택

❍ 실태조사 주기 : 5년마다 실시(필요 시 수시)  * 빈집정비계획 수립 : 5년마다

❍ 사 업 비 : 124백만 원(국비 44 시비 80)

❍ 사 업 량 : 도시빈집 600호, 농촌빈집 1,200호 추정

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 빈집 실태조사계획 수립

❍ 2024.  3. : 빈집 실태조사 시행(전문기관에 위탁)

❍ 2024. 10. : 빈집 실태조사 완료

❍ 2024. 12. : 빈집 정비계획 수립 용역비 예산 편성

❍ 2025.  2. : 빈집 정비계획 수립 용역 시행

□ 기대효과

❍ 빈집 통계의 균질성과 정확성을 제고하고, 진주시 빈집정비계획 수립을 위한 기초자료

마련

빈집정비 사업(자체사업)

❍매년 증가하는 빈집의 신속한 정비를 위하여 자체재원을 활용하여

철거 및 안전조치, 철거 후 활용사업을 추진

❍ 빈집의 체계적인 관리로 다양한 사회문제 예방 및 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

❍ 사업내용 : 관내 빈집의 철거, 안전조치 등 정비 비용 지원 및

철거 후 활용사업 시행

❍ 사 업 비 : 243백만 원(보조금 200, 시설비 43)

❍ 사 업 량 : 빈집 15동

- 철    거 : 13동, 195백만 원(동당 15백만 원)

- 안전조치 : 1동, 5백만 원(동당 5백만 원)

- 철거 및 활용 : 1동, 40백만 원

- 빈집 철거 활용사업지 유지관리 : 3백만 원

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 사업계획 수립 및 신청 공고

❍ 2024.  3. : 신청서 접수 및 현장조사 실시

❍ 2024.  4. : 지원대상 선정 및 사업 시행

❍ 2024. 12. : 사업 완료

□ 기대효과

❍ 빈집 등 노후주택의 사회적 문제 해소 및 정주환경 개선

❍ 빈집정비·관리에 요구되는 행정, 협력체계 등 종합적 대책 마련

건축물 유지관리 점검 시행

❍다중이용 건축물 등의 정기적인 점검을 통하여 건축물의 안전성 확보

❍건축물 생애이력 정보 플랫폼 구축으로 체계적인 유지․관리 지도   및 건축물의 효율적 관리

□ 사업개요

❍ 근거법령 : ｢건축물관리법｣ 제13조(정기점검의 실시)

❍ 점검대상 : 다중이용건축물, 연면적 3,000㎡ 이상인 집합건축물 등

* 2024년 점검대상 : 117개소

❍ 점검시기 : 사용승인 후 5년 내 최초 실시, 이후 매 3년마다 실시

❍ 점검주체 : 건축물 관리자(소유자 또는 관리계약 등에 따른 관리자)

□ 추진계획

❍ 2024.  2. : 2024년 정기점검 대상 선정 후 민간관리자에게 통보

❍ 2024.  6. : 상반기 50% 점검 완료

❍ 2024.  7. : 미점검 시설 정기점검 촉구 및 행정지도

❍ 2024. 12. : 정기점검 대상 건축물 점검 완료

□ 기대효과

❍ 건축물의 정기적 점검을 통한 성능향상 및 안전성과 기능성 확보

소규모 공동주택 지원사업

20세대 미만의 소규모 공동주택을 대상으로 노후된 공용 부분의  보수비를 지원하여 입주민의 경제적 부담을 줄이고 안전하고 쾌적한주거환경 조성

□ 사업개요

❍ 지원대상 : 준공 후 10년이 경과된 20세대 미만의 공동주택
(아파트, 연립주택, 다세대주택)

❍ 지원기준 : 총 사업비의 80% 범위 내(2천만 원 한도)

❍ 지원사업 : 보안등, 상․하수도시설, 단지 내 도로, 주차장 등의 공동주택 공용 부분 및 부대․복리시설의 유지보수

❍ 사 업 비 : 140백만 원(시비)

❍ 사업기간 : 2024년

□ 추진상황

추진연도	추진실적(개소)	집행액(백만 원)	비고
2020	16	200
2021	15	200
2022	22	374
2023	20	288

□ 추진계획

❍ 2024. 1. : 지원대상 및 지원절차 공고(홈페이지 및 읍면동)

❍ 2024. 2.~3. : 보조금 지원신청(입주자 대표가 신청)

❍ 2024. 3. : 현장조사 실시 및 공동주택지원심의위원회 심의, 대상자 선정

❍ 2024. 4.~12. : 지원대상 선정 통보 및 사업 시행

□ 기대효과

❍ 20세대 미만 소규모 공동주택의 주거환경 개선

❍ 공용부분의 보수로 노후 된 건축물의 안전성 증대

❍ 생활환경 개선으로 시민들의 삶의 질 향상

건축지도원 운영 활성화

❍ 전문성을 갖춘 건축지도원을 활용하여 건축물에 대한 각종 점검 및 지도를 통한 위반 건축물 발생 사전 차단 및 도시 미관 개선

❍ 선제적인 위법 사항 조사․처분 병행으로 건축행정 질서 확립

□ 사업개요

❍ 근거법령 : ｢건축법｣ 제37조 및 ｢진주시 건축조례｣ 제29조

❍ 구성인원 : 20명(건축사 19, 건축관련기술사 1)

❍ 사 업 비 : 16백만 원

❍ 주요업무

- 건축허가(신고) 후 건축 중인 건축물의 관리 및 기존 건축물 유지·관리

- 허가나 신고 없이 건축하거나 용도 변경한 건축물의 단속

□ 추진계획

❍ 2024.  2. : 해빙기 옹벽 및 절개지 긴급점검

❍ 2024.  4. : 2024년 상반기 건축행정건실화 점검

❍ 2024.  6. : 2024년 위반건축물 기획점검

❍ 2024.  7. : 우수기 옹벽 및 절개지 긴급 점검

❍ 2024. 11. : 2024년 하반기 건축행정건실화 점검

□ 기대효과

❍ 지속적 운영으로 건축행정 질서 확립 및 건전하고 안전한 건축문화 정착

노후 굴뚝 정비지원사업

도심에 위치해 붕괴사고 등 대형재난 발생 우려가 있는 노후 목욕탕

굴뚝에 대하여 안전점검을 실시하고, 그 결과에 따라 정비지원사업 추진

□ 사업개요

❍ 근거법령

- ｢건축물관리법｣ 제15조(소규모 노후 건축물 등 점검의 실시)

- ｢진주시 건축물관리조례｣ 제6조(소규모 노후 건축물 등 점검의 대상)

❍ 사업대상 : 관내 20년 이상 경과된 노후 위험 굴뚝

❍ 사업내용 : 점검 결과 정비가 필요한 굴뚝에 대하여 철거비용 일부 지원

❍ 사 업 비 : 100백만 원(보조금 50%, 자부담 50%)

❍ 사 업 량 : 5개소(1개소당 최대 20백만 원)

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 사업 대상자 공고 및 홍보(홈페이지, 신문 등)

❍ 2024.  3. : 사업 대상자 선정 및 사업 시행

❍ 2024.  7. : 사업 완료

□ 기대효과

❍ 안전사각지대에 놓인 노후 굴뚝을 정비하여 시민 안전과 재산 보호

❍ 재난 발생이 높은 위험시설을 조기 정비하여 재난 안전 대응체계 구축

❍ 도심지 내 흉물로 방치되었던 노후 굴뚝 철거로 도시경관 향상

농촌 주택개량사업

❍ 도시민의 농촌 유입을 촉진하여 농촌지역 활성화 도모

❍ 주택개량·신축에 소요되는 비용을 대출기관(농협)에서 저금리로 융자 지원

□ 사업개요

❍ 대상지역(｢농어촌정비법｣제2조에 의한 농어촌지역)

- 읍·면지역/시의 동지역은 주거·상업·공업지역을 제외한 용도지역

❍ 대 상 자

- 농촌지역에서 본인소유 노후·불량주택을 개량하고 있는 세대주 또는 배우자

- 농촌지역에서 거주하고 있는 무주택자로서 세대주 또는 배우자

- 도시지역에서 농촌지역으로 이주하려는 자

※ 1가구 2주택 소유자 및 사업완료 후 2주택 이상이 되는 자는 신청 불가

(근로자 숙소 신축하는 경우, 농촌빈집개량 시 1가구 2주택 허용)

❍ 주택규모 : 연면적 150㎡ 이하

- 단독주택의 신축, 개축, 재축, 증축, 대수선

- 다세대주택, 다가구주택, 다중주택, 농어촌민박 등 숙박시설은 해당없음

❍ 대출한도 : 사업실적확인서 금액 범위 내에서 대출심사 결과에 따라 한도 결정

- 신축·개축·재축 최대 2억, 증축·대수선 최대 1억

-선금(중도금) : 당해 사업장의 담보가능 한도 내에서 선금과 중도금을

합하여 최대 6,000만 원 이내 대출(증축, 대수선은 3,000만 원 이내)

구 분	선금	중도금	완공대출금
신축·개축·재축	선금 + 중도금 = 최대 6,000만 원 이내		최대 2억 원 한도
증축·대수선	선금 + 중도금 = 최대 3,000만 원 이내		최대 1억 원 한도

- 대출금리 : 고정금리(연리 2%) 또는 변동금리 중 선택, 청년 대상 고정금리 1.5%적용

- 상환조건 : 1년 거치 19년 분할상환 또는 3년 거치 17년 분할상환 중 선택

- 토지구입비용 : 7천만 원 한도, 면적 660㎡ 이내(농촌거주 무주택자에 한함)

❍ 세제혜택

- 주거전용면적 150㎡ 이하는 취득세를 2024. 12. 31.까지 감면

□ 추진계획

❍ 사업 홍보 강화로 차질 없는 사업 추진

□ 기대효과

❍ 노후·불량주택 개량으로 농어촌 생활환경 개선 및 정주여건 조성

주택경관과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	26	1	6	10	7	2	임기제1 공무직4
현 원	27	1	9	8	5	4
증 감	1		3	△2	△2	2

□ 주거급여 현황

❍ 일반현황                                                          (단위 : 가구, 명)

총 계		일반수급자								시 설 수급자
가 구	수급권자	소 계		자 가		임 차		기 타
		가구	인원	가구	인원	가구	인원	가구	인원
11,908	16,235	11,609	15,936	726	969	9,300	12,810	1,583	2,157	299

※ 기 타 : 주택조사중, 장기입원 등 급여 미지급 대상

❍ 주거유형별 현황                                                     (단위 : 가구)

총 계	자 가				임 차								기타
가구	소계	전체	부분	기타	소계	영구	국민	매입	전세	민간 임대	사용대차	개인운영시설
11,908	726	455	23	248	9,300	812	609	1,100	1,005	3,696	2,024	54	1,882

※ 자가 기타(248가구) : 사실상 소유자(미등기 등)

※ 기타(1,882가구) : 시설수급자 + 주택조사중 + 장기입원 등

❍ 연도별 대상자 현황                                                (단위 : 가구, 명)

구 분	가 구	가구원	증 감	비 고
2022년	10,999	15,191	(증) 5%
2023년	11,908	16,235	(증) 7%

□ 공동주택 사업계획 승인 현황

구 분	건	동	세 대	연면적(㎡)	비 고
2021년	6	61	3,313	575,694
2022년	1	4	840	201,271
2023년

□ 주택보급률 현황

(단위 : 가구, %)

구 분	일 반 가 구	주 택 수					주 택 보급률	비고
		합 계	아파트	연립	다세대	단독
2021년	149,288	163,179	83,516	1,309	2,236	76,118	109.30
2022년	151,916	163,808	83,867	1,309	2,236	76,396	107.83

□ 가로등․보안등 시설 현황

(단위 : 개)

총 계				동 지 역			읍․면 지역			터널등외
계	가로등	보안등	터널등외	소계	가로등	보안등	소계	가로등	보안등
33,855	16,447	15,785	1,623	19,951	12,808	7,143	12,281	3,639	8,642	1,623

□ 시 지정 현수막 게시대 현황

(단위 : 개)

계	읍․면	동	비 고
193	70	123	1단 행정용 88

※ 게시기간 : 7일, 게시수수료 : 1매당 3,000원, 매주 화요일 시 홈페이지 통합예약시스템에서 추첨

□ 시 지정 벽보 게시판 현황

(단위 : 개)

계	조명식	비조명식	비 고
69	34	35

□ 광고업 등록 현황

(단위 : 개)

계	개인업체	법인업체	비 고
178	160	18

□ 대형 옥상간판 현황

(단위 : 개)

계	동성동	대안동	칠암동	강남동	상대동	장대동	비 고
13	6	1	3	1	1	1

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미착공	비 고
계	20	12	8
예 산 사 업	20	12	8
비 예산사업

2. 추진실적

□ 완료 사업 --- 12건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
다자녀가정 주택 전세자금 대출이자 지원사업	❍ 사업대상 : 기준중위소득 180% 이하 무주택 다자녀 가정 ❍ 사업기간 : 2023. 1.~ 3. ❍ 사업내용 : 대출 잔액의 1.5% 지원(최대 100만 원) ❍ 사 업 비 : 50백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1.~ 2. : 공고 및 접수 ❍ 2023. 3. : 사업비 지급 - 지원대상 : 51가구, 50백만 원	다자녀 가정의 주거비 부담 완화, 안정적인 주거생활 지원
신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원	❍ 사업대상 : 무주택 신혼 부부중 혼인신고 7년이내, 기준 중위소득 180% 이하 ❍ 사업기간 : 2023. 6.~ 8. ❍ 사업내용 : 대출 잔액의 1.5% 지원(최대 100만 원) ※ 자녀 1인당 지원금액의 20% 가산(최대 150만 원) ❍ 사 업 비 : 400백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 6.~ 7. : 공고 및 접수 - 접수 : 388가구 ❍ 2023. 8. : 사업비 지급 - 지원대상 : 367가구, 400백만 원	주거비 부담 완화 및 안정적 주거 생활 지원, 결혼 장려 및 출산율 제고
제10기 진주시 공공디자인 자율봉사단 도시경관 개선사업	❍ 위 치 : 진양교 하부 ❍ 사업기간 : 2023. 5.~ 9. ❍ 사 업 량 : 2개소 ❍ 사업내용 : 보수 작업 및 벽화 제작 ❍ 사 업 비 : 19.6백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 5.~ 6. : 봉사단 공개모집 ❍ 2023. 7. : 봉사단 발대식(23명) ❍ 2023. 7.~ 8. : 기존벽화 정화, 보수 및 벽화 제작 ❍ 2023. 9. : 결과보고서 제작	민관협치를 통해 시민의 도시경관 개선사업 참여 및 공공디자인 작품창출로 아름다운 도시경관 조성

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
주요도로 가로등 추가 설치공사	❍ 위 치 : 오죽광장 ~ 부산교통삼거리 외 3구간 ❍ 사업기간 : 2023. 2. ~ 5. ❍ 사업내용 : 가로등 21본 추가 설치 ❍ 사 업 비 : 78백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 2. : 계약 및 착공 ❍ 2023. 5. : 준공	가로등 보식으로 야간 도로변 조도 개선
관내 LED 가로등기구 교체공사	❍ 위 치 : 충무공동 외 5개소 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 5. ❍ 사업내용 : LED등기구 286등 교체 ❍ 사 업 비 : 201백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. : 계약 및 착공 ❍ 2023. 5. : 준공	LED가로등기구 교체를 통한 조도 개선으로 주행환경 개선
망경동 강변 경관조명 개선사업	❍ 위 치 : 망경동 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 5. ❍ 사업내용 : 경관조명등 142등 설치 ❍ 사 업 비 : 170백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. : 계약 및 착공 ❍ 2023. 5. : 준공	경관조명 교체 및 설치로 촉석루 주변 미관 개선 및 안전성 확보
통로박스 조명설치공사	❍ 위 치 : 문산읍 외 7개 읍면동 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 6. ❍ 사업내용 : 통로박스 조명 29개소 설치 ❍ 사 업 비 : 147백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. : 계약 및 착공 ❍ 2023. 6. : 준공	통로박스 조명 설치로 야간 통행환경 개선
사봉산업단지 노후 가로등 교체공사	❍ 위 치 : 사봉면 일반산업단지 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 5. ❍ 사업내용 : 가로등 164본 교체 ❍ 사 업 비 : 78백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 계약 및 착공 ❍ 2023. 5. : 준공	사봉산업단지 노후 가로등 교체를 통한 도로 미관 개선 및 안전성 확보

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
금산교 경관조명 설치공사	❍ 위 치 : 금산교 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 4.~ 9. ❍ 사업내용 : 경관조명등 218등 설치 ❍ 사 업 비 : 392백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 계약 및 착공 ❍ 2023. 9. : 준공	금산교 경관 조명 설치로 야간 경관개선 및 주민복지 향상
상평교 회차지 주변 경관조명 설치 공사	❍ 위 치 : 상평교 회차지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 4.~ 9. ❍ 사업내용 : 경관조명등 및 조형채널 설치 ❍ 사 업 비 : 454백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 계약 및 착공 ❍ 2023. 9. : 준공	관문지역인 상평교 회차지 주변 경관 조명 설치로 품격 있는 도시 이미지 조성
시지정 현수막게시대 신설 및 교체	❍ 위 치 : 시 관내 ❍ 사업기간 : 2023. 2.~ 3. ❍ 사 업 량 : 6개 - 신설 1개, 교체 5개 ❍ 사 업 비 : 63백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 2. : 계획 수립 ❍ 2023. 3. : 착공 및 준공	노후 게시대 교체 및 신설을 통한 옥외광고물 관리
무연고간판 정비	❍ 위 치 : 시 관내 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 6. ❍ 사 업 량 : 53개 ❍ 사업내용 : 무연고 노후· 위험간판 철거 ❍ 사 업 비 : 17백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 사업 홍보 및 대상 간판 조사 ❍ 2023. 5. : 착공 ❍ 2023. 6. : 준공	간판 정비를 통한 도시경관 개선

□ 추진중 사업 --- 8건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
주거급여 지원사업	❍ 임차급여(현금) 지원 - 사업대상 : 임차가구 - 사업기간 : 연중 - 사업내용 : 임차료 지원 - 사 업 비 : 15,456백만 원 ❍ 수선유지급여(현물) 지원 - 사업대상 : 자가가구 101가구 - 사업기간 : 2023. 3.~12. - 사업내용 : 주택 개보수 - 사 업 비 : 893백만 원	□ 추진사항 ❍ 임차급여 - 사업대상 : 월 8,700가구 - 지 원 액 : 월 1,210백만 원 ❍ 수선유지급여(현물) 지원 - 2023. 3. ~ 11. : 사업 시행 (완료 50가구, 수리중 51가구) □ 향후계획 ❍ 2023.12. : 사업 완료
신혼부부 주택구입 대출이자 지원	❍ 사업대상 : 주택을 구입하여 살고 있는 혼인 신고 5년 이내 신혼부부, 부부 합산 연소득 8,000만 원 이하 ❍ 사업기간 : 2023. 3.~ 11. ❍ 사 업 량 : 200가구 ❍ 사업내용 : 주택구입 대출 잔액(5,000만 원 한도)의 이자 지원(3%이내), 연최대 150만 원 지원 ❍ 사 업 비 : 104백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 3.~ 5. : 공고 및 접수 ❍ 2023. 6. : 상반기 사업비 지급 - 지원대상 : 64가구, 32백만 원 ❍ 2023. 9. ~ 10. : 공고 및 접수 - 접수 : 166가구 - 지원대상 : 150가구 정도 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 하반기 사업비 지급 - 지원 : 150가구, 72백만 원
장애인주택 개조사업	❍ 사업대상 : 등록장애인 중 전년도 도시 근로자 가구당 월평균 소득액 100% 이하 ❍ 사업기간 : 2023. 3.~12. ❍ 사 업 량 : 12가구 ❍ 사업내용 : 주택 내 장애인 편의시설 설치 ❍ 사 업 비 : 46백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. : 사업계획수립 및 대상자 모집 ❍ 2023. 4. : 위탁업체 계약 ❍ 2023. 5. ~ 10. : 10가구 확정 및 주택 수선 □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 대상자 추가모집 (2가구) 및 주택 수선 ❍ 2023.12. : 사업 완료 및 정산

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
청년월세 한시 특별 지원사업 (국토부)	❍ 사업대상 : 만19세~34세이하 무주택 청년 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. ❍ 사 업 량 : 1,000가구 ❍ 사업내용 : 월 최대 20만 원 월세지원(12개월) ❍ 사 업 비 : 1,681백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 사업 홍보 ❍ 2023. 1. ~ 8. : 신청·접수 (1,935건) ❍ 2023. 1. ~ 10. : 지원금 지급 (981가구, 1,399백만 원) □ 향후계획 ❍ 2023.11. ~ 12. : 추가 선정 (19가구) 및 지원금 지급 ❍ 2023.12. : 사업 완료 및 정산
청년 월세 지원사업 (경상남도)	❍ 사업대상 : 만18세~39세이하 무주택 청년 ❍ 사업기간 : 2023. 6. ~ 12. ❍ 사 업 량 : 100가구 ❍ 사업내용 : 월 최대 15만 원 월세지원(10개월) ❍ 사 업 비 : 141백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 6. : 사업 홍보 ❍ 2023. 6. : 신청·접수(157건) ❍ 2023. 7. : 대상자 선정(94가구) ❍ 2023. 8. ~ 10. : 지원금 지급 (103가구, 109백만 원) ※ 4가구 중지(전출 등), 9가구 추가 선정 □ 향후계획 ❍ 2023.11. ~ 12. : 지원금 지급 ❍ 2023.12. : 사업 완료 및 정산
고령자 복지주택 건설사업	❍ 위 치 : 평거동 359 일원 ❍ 사업기간 : 2019. 4.~2024. 1. ❍ 사업내용 : 임대주택 140호 - 영구임대104호, 국민임대36호 (청년주택 18호 포함) - 복지시설 1,452.75㎡ - 국․공립어린이집 533.66㎡ ❍ 사 업 비 : 20,370백만 원 (국비 9,950, 도비 225, 시비 6,253, 민자(LH) 3,942)	□ 추진사항 ❍ 2019. 4. : 사업공모 선정 ❍ 2019. 6. : 투자심사 승인 ❍ 2019.12. : 사업계획 승인 ❍ 2021. 4. : 착공 ❍ 2021. 4. : 사업계획 변경승인 (어린이집, 청년주택 공급) ❍ 2023. 7. : 입주자모집공고 □ 향후계획 ❍ 2024. 1. : 준공 예정 및 입주자 추가모집 공고 ❍ 2024. 2. : 입주 예정

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
공동주택 관리지원사업	❍ 사업대상 : 20세대 이상 10년 이상 경과된 공동주택 ❍ 사 업 량 : 34개소 ❍ 사업내용 : 노후 공용시설 등 유지보수 ❍ 사 업 비 : 850백만 원	□ 추진사항 ❍ 2022.12. : 사업 공고 ❍ 2023. 3. : 대상자 선정 ❍ 2023.10. : 완료 (32개소, 758백만 원) □ 향후계획 ❍ 2023.11. : 추진 중 (2개소, 92백만 원) ❍ 2023.12. : 사업 완료 및 정산
불법광고물 수거보상제	❍ 사업대상 : 일반 시민 ❍ 사업기간 : 2023. 3.~ 12. ❍ 사업내용 : 벽보, 전단 등 불법 유동광고물을 수거, 제출한 시민에게 보상금 지급 ❍ 사 업 비 : 100백만 원	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. : 사업 홍보 ❍ 2023. 4.~10. : 신청 접수 및 보상금 지급 (91백만 원) □ 향후계획 ❍ 2023.12. : 사업 완료

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

❍ 저소득층 및 다자녀 가정·신혼부부·청년 주거복지 지원사업 추진

- 저소득층 주거급여 및 저소득 맞춤형 주택 개·보수 사업으로 양질의 주거 수준 확보

- 다자녀 가정, 신혼부부의 주택 전세자금 대출이자 지원으로 주거비 부담

완화 및 청년들이 학업, 취업 등 본업에 충실하고 안정적으로 사회에

진입할 수 있는 주거수준 확보

❍ 고령자뿐만 아니라 청년대상 임대주택, 어린이집 등 주민 공동이용 시설 확충으로 지역사회 융화 및 생애주기 통합형 진주형 고령자 복지주택 추진

❍ 공동주택 노후시설 정비로 입주민의 쾌적한 생활환경을 조성하고 공동주택

활성화 사업으로 소통․공감 및 입주민 간 유대 강화

❍ 진주시 도시․공동디자인 작품공모전과 공공디자인 자율봉사단 운영으로

시민들의 참여를 높이고 품격있는 도시경관 형성에 기여

❍ 가로등 및 보안등 유지관리로 시민통행 불편해소 및 범죄사고 등의 위험요인

사전 제거

❍ 시 지정 현수막 게시대를 교체하고 불법광고물 수거보상제 실시 등 옥외

광고물 정비사업을 시행하여 안전하고 쾌적한 생활환경 조성

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만 원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	16	23,383.6	10	5	1	-
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	16	23,383.6	10	5	1	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

저소득층 주거급여 지원사업

주거가 불안정한 저소득 취약계층에게 실질적인 생활지원 강화를 통해 주거 생활안정 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 국민기초생활보장수급자 중 주거급여 수급자

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 사업내용 : 임차가구 임차급여 및 자가가구 수선유지급여 지원

❍ 사 업 비 : 17,009백만 원(국비 15,308, 도비 1,191, 시비 510)

□ 추진계획

❍ 임차급여(현금) 지원

- 대상가구/사업비 : 임차 8,900가구/16,116백만 원

- 지원내용 : 기준임대료 금액 이내 임차료 지원

(단위 : 원/월)

가구원 수	1인	2인	3인	4인	5인	6인
기준임대료	178,000	201,000	239,000	278,000	287,000	340,000

❍ 수선유지급여(현물) 지원

- 한국토지주택공사 협약 체결 : 2024. 3월 중

- 대상가구/사업비 : 자가 101가구/893백만 원

- 지원내용 : 자가소유 주택 보수

구 분	경보수	중보수	대보수
수선비용	457만 원 이내	849만 원 이내	1,241만 원 이내
수선주기	3년	5년	7년
수선예시	도배, 장판 등	오･급수, 난방 등	지붕, 기둥 등

다자녀 가정 주택 전세자금 대출이자 지원사업

무주택 다자녀 가정의 주거비 부담 완화 및 안정된 주거생활 지원

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 만18세 이하 자녀가 2명 이상인 무주택 다자녀 가정

❍ 사업기간 : 2024. 1.~ 3.

❍ 사 업 량 : 50가구

❍ 지원기준 : 기준중위소득 180% 이하, 주택 전세자금 대출을 받은 가구

❍ 사업내용 : 주택 전세자금 대출 잔액의 1.5% 지원(연 1회, 최대 100만　원)

❍ 사 업 비 : 50백만 원(시비)

□ 추진계획

❍ 2024. 1.	: 사업 공고

❍ 2024. 2.	: 신청·접수

❍ 2024. 3. : 대상자 확정 및 사업비 지급

신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원사업

무주택 신혼부부의 주거비 부담 완화 및 안정된 정주 여건 조성으로

결혼 장려

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 진주시 거주 혼인신고 7년 이내, 기준중위소득 180% 이하인  무주택 신혼부부

※ 기준중위소득 180% (2023년 기준)

구 분	소득기준(원)	건강보험료 본인부담금(원)
		직장가입자	지역가입자	혼합
2인 가구	6,222,000	222,624	187,378	226,361
3인 가구	7,983,000	284,769	264,991	291,898
4인 가구	9,722,000	346,067	335,569	359,887

❍ 사업기간 : 2024. 6. ~ 8.

❍ 사 업 량 : 350가구

❍ 사업내용 : 주택 전세자금 대출 잔액의 1.5% 지원(연 1회, 최대 100만　원)

※ 단, 자녀가 있는 가정은 지원금에서 자녀 1인당 20% 가산 지원(최대 150만　원)

❍ 사 업 비 : 400백만 원(시비)

□ 추진계획

❍ 2024.  6. : 사업공고 및 홍보

❍ 2024.  7. : 신청·접수

❍ 2024.  8. : 대상자 확정 및 사업비 지급

신혼부부 주택 구입 대출이자 지원사업

신혼부부의 주거비 부담 완화 및 안정된 정주 여건 조성으로 결혼 및 출산 장려

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 진주시 거주 신혼부부 중 혼인신고 5년 이내,
부부합산연소득 8천만 원이하,
주택가격 4억이하(전용면적 85㎡이하)인 1주택 신혼부부

❍ 사업기간 : 2024. 4.~ 11.

❍ 사 업 량 : 200가구

❍ 사업내용 : 주택구입 대출잔액(5천만 원)의 3%지원(연 최대 150만 원)

❍ 사 업 비 : 120백만 원(도비 36, 시비 84)

□ 추진계획

❍ 2024.  4. ~  5. : 상반기 사업 공고 및 접수

❍ 2024.  6.       : 상반기 대상자 확정 및 사업비 지급

❍ 2024.  9. ~ 10. : 하반기 사업 공고 및 접수

❍ 2024. 11.       : 하반기 대상자 확정 및 사업비 지급

청년월세 한시 특별지원사업

경제적 어려움을 겪고 있는 청년층의 주거비 부담 경감을 위해 청년월세를 한시적으로 지원

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 진주시에 거주하는 만19세 ~ 34세 이하 무주택 청년

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
❍ 사 업 량 : 600명

❍ 지원기준

- 소득기준 : (원가구) 기준중위소득 100% 이하 및 재산가액 3억8천만 원 이하

(청년가구) 기준중위소득  60% 이하 및 재산가액 1억7백만 원 이하

- 거주기준 : 임차보증금 5천만 원 이하 및 월세 60만 원 이하 주택 거주

❍ 사업내용 : 월 최대 20만 원 월세 지원(최대 12개월, 생애 1회)

❍ 지원방법 : 최대 12개월 동안 매월 분할 지급

❍ 사 업 비 : 643백만 원(국비 321.5, 도비 96.5, 시비 225)

□ 추진계획

❍ 2024. 1. ~ 12. : 대상자 자격 관리 및 지원금 지급

청년 월세 지원사업

청년들의 경제적 부담 중 큰 비중을 차지하는 주거비 부담 경감으로 안정적 주거생활 지원

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 진주시에 거주하는 만18세 ~ 39세 이하 무주택 청년

❍ 사업기간 : 2024. 2. ~ 12.

❍ 사 업 량 : 140명

❍ 지원기준

- 소득기준 : 기준중위소득 60% 초과 150% 이하 무주택 청년

(건강보험료 본인부담금 기준)

- 거주기준 : 임차보증금 1억원 이하, 월세 60만 원 이하 주택거주자

❍ 사업내용 : 월 최대 15만 원 월세 지원(10개월, 생애 1회)

❍ 지원방법 : 월세 납부내역 확인 후 지급(매월 분할 지급)

❍ 사 업 비 : 216백만 원(도비 108, 시비 108)

□ 추진계획

❍ 2024.  2. ~  3. : 사업 홍보 및 대상자 모집

❍ 2024.  4.      : 자격 심사 및 대상자 선정

❍ 2024.  5. ~ 12. : 월세 지원 및 대상자 관리

청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업

무주택 청년 임차인의 전세보증금반환보증 가입을 적극 유도하여 전세사기 피해 예방

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 전세보증금반환보증에 가입한 진주시 거주 만19세 ~ 39세 이하 무주택 청년

❍ 사업기간 : 2024. 1.~ 12.

❍ 사 업 량 : 233가구

❍ 지원기준

- 주택기준 : 임차보증금 3억 이하 주거용 주택 전세 계약

- 소득기준 : 연소득 5천만 원 이하(※ 신혼부부 7천만 원 이하)

❍ 사업내용 : 실제 납부한 보증료 지원(1회, 최대 30만 원)

❍ 사 업 비 : 70백만 원(국비 35, 도비 10.5, 시비 24.5)

□ 추진계획

❍ 2024. 1. ~     : 신청·접수

❍ 2024. 2. ~ 12. : 대상자 확정 및 사업비 지급

고령자 복지주택 건설사업

❍ 고령자를 위한 특화 설계로 입주민의 복지 증진 및 주거환경 개선

❍ 지역주민이 공동으로 이용 가능한 노인복지시설과 국․공립어린이집 확충으로 지역사회 융화 및 생애주기 통합형 고령자 복지주택 사업 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 평거동 359 일원(평거 벽산동신A 옆)

❍ 사업기간 : 2019. 4.~2024. 1.

❍ 사업내용 : 임대주택 140호(청년주택 18호 포함),

복지시설 1,986.41㎡(국‧공립 어린이집 533.66㎡ 포함)

❍ 사 업 비 : 20,370백만 원

〔국비 9,950, 도비 225, 시비 6,253, 민자(LH) 3,942〕

❍ 사업시행자 : 진주시, LH 공동시행

※ 진주시 : 부지제공과 기반시설 설치 및 복지시설 운영,  LH : 건설 및 임대주택 운영

□ 추진상황

❍ 2019.  4. : 사업 공모 선정(국토부)

❍ 2019.  6. : 지방재정 투자심사 승인(경상남도)

❍ 2021.  2. : 부지매입 완료(진주시)

❍ 2021.  4. : 착공

❍ 2021.  4. : 사업계획 변경승인(어린이집 설치 및 청년주택 18호 공급)

❍ 2023.  7. : 입주자모집공고[LH]

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 준공예정[LH], 입주자 추가모집 공고[LH]

❍ 2024.  2. : 입주예정[LH]

공동주택관리 지원사업

노후된 공동주택의 공용시설 유지보수에 필요한 비용을 일부 지원하여 입주민의 경제적 부담 완화 및 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 사업내용

- 공동주택관리 지원사업 : 20세대 이상 10년 이상 경과된 공동주택의  공용부분 및 부대․복리시설 유지․보수

※ 지원기준 : 공동주택 단지의 규모에 따라 차등 지원(전체공사비 50% 이내)

단지 규모(세대수)	20~149	150~299	300~499	500~999	1,000이상
최대지원금(백만 원)	20	30	40	45	50

- 영구임대주택 공용전기료 지원 : 3개소(가좌주공1, 평거주공2, 혁신LH3)

❍ 사 업 비 : 840백만 원(시비)

- 공동주택관리 지원사업 : 800백만 원

- 영구임대주택 공용전기료 지원 : 40백만 원

□ 추진계획

❍ 2023. 12. : 2024년도 지원 대상 및 지원절차 공고

❍ 2024.  1. : 보조금 지원 신청 접수

❍ 2024.  2. : 현장 조사 실시, 위원회 심의 및 대상자 선정

❍ 2024.  3. : 지원 대상 선정 통보 및 사업 시행

❍ 2024. 12. : 사업 완료 및 정산

공동주택 공동체 활성화 추진

❍ 공동주택 단지 내 주민참여 프로그램 운영을 지원하여 입주민 교류 활성화의 장 마련

❍ 이웃 간 소통과 나눔으로 갈등을 해소하고 더불어 사는 공동체 문화 조성

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 관내 150세대 이상 의무관리대상 아파트

❍ 사업기간 : 2024. 3.~ 12.

❍ 사업내용 : 공동주택의 주민참여 프로그램 공모사업 추진

- 공동주택 입주민들의 긴밀한 접촉과 지속적인 참여를 통해 유대감을 형성하고 함께 살기 좋은 마을 만들기 프로그램 발굴 및 지원

- 주민 소통․화합, 주거환경 개선, 여가․취미․교양, 사회봉사활동, 친환경․재활용․에너지 절약, 공동체 역량강화 프로그램 등

❍ 사 업 비 : 15백만 원(시비)

□ 추진계획

❍ 2024.  3. : 사업공모

❍ 2024.  4. : 위원회 심의 및 대상자 선정

❍ 2024.  5. : 사업 시행

❍ 2024. 12. : 사업 완료 및 정산

제3종 시설물 지정을 위한 실태조사

❍ 제3종 시설물 지정 대상인 관내 건축물에 대하여 시설물 실태조사

❍ 재난발생 위험이 높거나 지속적인 관리가 필요한 시설물은 제3종 시설물로 지정·고시하여     공공의 안전을 확보

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 준공 후 15년이 경과된 15층 이하 아파트 및 연립주택*

*관내 공동주택 7개 단지 20개동

❍ 사업기간 : 2024. 3.~ 8.

❍ 사업내용 : 실태조사 용역 시행(안전진단 전문기관)

- 재난발생 위험이 높거나 지속적인 관리가 필요한 시설물을 실태조사

- 실태조사 결과에 따라 제3종 시설물로 지정·고시하여 체계적인 안전관리

❍ 사 업 비 : 14백만 원(시비, 2백만 원 × 7개 단지)

□ 추진계획

❍ 2024.  3. : 제3종 시설물 실태조사 용역 시행

❍ 2024.  6. : 제3종 시설물 실태조사 용역 완료

❍ 2024.  7. : 제3종 시설물 지정·고시 및 관리주체 통보

❍ 2024.  8. : 제3종 시설물 FMS 입력 완료

진주시 경관기본계획 재정비 및

공공디자인 가이드라인 수립 용역

진주시 경관 및 공공디자인의 정책방향, 기본구상 및 계획을 재정비 및 실행방안을 제시하는 재정비 용역을 시행(경관법 제15조, 5년 기준 재정비, 2013. 9월 정비, 2018. 3월 정비)

□ 사업개요

❍ 위    치 : 시 전역

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 7.

❍ 사 업 량

- 경관기본계획 수립 1식

- 공공디자인 가이드라인 수립 1식

❍ 사업내용 : 진주시 경관 및 공공디자인의 정책방향 및 기본구상 등 계획 재정비 용역

❍ 사 업 비 : 340백만 원(시비)

□ 추진계획

❍ 2024.  1. ~ 3. : 시행 품의, 계약심사 및 조달청 의뢰

❍ 2024.  4. : 용역착수

❍ 2024. 12. : 주민공청회 및 의회 의견 청취

❍ 2025.  2. : 경관위원회 심의

❍ 2025.  5. : 경관기본계획 경남도 승인

❍ 2025.  7. : 용역 완료

제12기 진주시 공공디자인 자율봉사단 운영

공공디자인을 접목한 아름답고 세련된 도시경관 조성으로‘디자인 도시 진주’위상 확립

□ 사업개요

❍ 위    치 : 미정

❍ 사업기간 : 2024. 5.~ 10.

❍ 사 업 량 : 공공디자인 사업 1식

❍ 사업내용

- 참가대상 : 진주시에 주소를 둔 만19세 이상

- 공공디자인 자율봉사단 공개모집(20명)

- 공공장소 및 시설물 등을 대상으로 디자인 개선사업 추진

- 사업 작품집 제작 및 결과보고회(토론회) 개최

❍ 사 업 비 : 19.6백만 원(시비)

□ 추진계획

❍ 2024. 5. ~  6. : 자율봉사단 공개모집

❍ 2024. 6. ~  7. : 자율봉사단 발대식, 사업대상지 및 디자인(안) 확정

❍ 2024. 7. ~  8. : 벽화 작업

❍ 2024. 9. ~ 10. : 작품집 제작 및 결과보고회 개최

제9회 진주시 도시․공공디자인 작품공모전

진주 고유의 정체성과 문화를 반영한 미래지향적이고 창의적인 아이디어작품을 공모하여 시민들의 참여를 높이고 품격높은 도시경관 형성에 이바지

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2024. 2. ~ 9.

❍ 사업내용 : 도시․공공디자인 작품 공모전

- 참가대상 : 전국 만19세 이상의 성인

- 참가분야 : 공공공간 및 공공시설물·공공미술

- 17개 작품 시상 및 전시

❍ 사 업 비 : 20백만 원(시비)

□ 추진계획

❍ 2024.  2. ~ 7. : 작품공모전 공고 및 홍보

❍ 2024.  8. : 작품 접수 및 심사

❍ 2024.  9. : 시상식 및 전시, 작품집 발간

가로등․보안등 설치 및 정비공사

❍ 가로등․보안등 유지관리로 야간 시간대 시민통행 불편 해소

❍ 안정적인 조도 확보로 도로안전 및 범죄사고 등의 위험요인 사전 제거

□ 사업개요

❍ 위    치 : 시 일원

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 사업내용

(단위 : 백만 원)

구분	사 업 명	사 업 량	사업비	비고
계	3개 사업		1,437
1	가로등 및 보안등 설치	가로등 설치 50등 보안등 설치 250등	610
2	가로등 유지관리 단가계약	연간 단가계약 1식	320
3	노후 가로등 교체 및 유지관리	가로등 교체․유지관리 225개소 노후 점멸기 교체 395개소 등	507

❍ 사 업 비 : 1,437백만 원(시비)

□ 추진계획

❍ 2024. 1.~ 12. : 취약지역 민원 해소, 노후 시설물 교체 및 사업 시행

옥외광고물 정비 사업

❍ 불법광고물 단속 및 수거를 통한 깨끗한 거리 조성 및 도시 미관 개선

❍ 노후·위험 간판 정비 및 광고물 안전점검 실시로 안전한 생활환경 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 시 관내

❍ 사업기간 : 2024. 2. ~ 11.

❍ 사업내용 : 불법광고물 야간 단속 및 수거보상제, 무연고 간판 정비,

옥외광고물 안전점검

❍ 사 업 비 : 80백만 원(시비)

- 불법광고물 수거보상제 : 50백만 원

- 무연고 간판 정비 : 20백만 원

- 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 : 10백만 원

□ 추진계획

❍ 불법광고물 야간 단속 : 월 2회(19:00~21:00)

❍ 불법광고물 수거보상제

- 2024.  2. : 보상기준 마련(벽보, 전단지 대상 보상금액 등)

- 2024.  3.~11. : 사업 시행(주소지 읍면동 행정복지센터 접수 및 보상금 지급)

❍ 무연고 간판 정비

- 2024.  3. : 사업 공고 및 신청 접수

- 2024.  4. : 현장 조사 및 대상 선정

- 2024.  5.~ 6. : 사업 시행

❍ 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검

- 2024.  6.  : 계획 수립

- 2024.  7. ~ 8. : 사업 시행

공공시설추진단

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	14	1	3	6	4
현 원	16	1	7	4	2	2
증 감	2		4	△ 2	△ 2	2

□ 위원회 현황                                                           (단위 : 명)

구 분 위원회명	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원중 여성위원수	％
			계	공무원	％	민간인	％
공 공 건 축 심의위원회	7	1	6	-	-	6	100	2	33

□ 공공건축가 현황

구 분	계	대학교수	건축사	기술사	비 고
계	32	11	20	1
총괄계획가	1		1
공공건축가	31	11	19	1

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄                                                              (단위 : 건)

구 분	계	완 료	추진중	시기 미도래	미착공	비 고
계	12	-	12	-	-
예 산 사 업	12	-	12	-	-
비 예 산 사 업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

□ 추진중 사업 --- 12건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
공공 건축가 제도	❍ 근거법령 - 「건축기본법」 제23조 (민간전문가의 참여) - 「건축서비스산업 진흥법」 제13조(건축서비스 전문 인력 양성) ❍ 구 성 - 총괄계획가 1명 - 공공건축가 31명 (교수11, 건축사19, 조경기술사1) ❍ 사 업 비 : 181백만 원 ❍ 운영형태 - 총괄계획가 : 주 1 ~ 2일 근무 - 공공건축가 : 사업별 수시 ❍ 주요역할 - 사업의 기획에서 준공까지 사업 전반에 대한 자문․조정	□ 추진사항 ❍ 2019. 7.~ : 총괄․공공건축가 자문 55건(완료 26건, 추진 중 29건) ❍ 2019. 5. : 국토부 공모사업 선정 (국비 256백만 원 지원) ❍ 2019. 6. : 공공건축가 1기 위촉 ❍ 2019. 9.~2020. 4. : 공간환경 전략계획 수립 ❍ 2020. 3. : 국토부 2차 공모사업 선정(국비 60백만 원 지원) ❍ 2021. 7. 8. : 공공건축가 2기, 발대식 1기 성과보고회 개최 ❍ 2022. 12. 8. : 2022년도 공공건축가 성과 보고회 개최 ❍ 2023. 6. 12. : 공공건축가 3기 위촉식 개최 ❍ 2023. 8. 25.~9. 5. : 제2회 진주 건축 문화제 개최 ❍ 2023. 11. 1.~11. 5. - 2023 경남건축문화제 진주부스 연계 전시

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
2023 진주 건축 문화제	❍ 위 치 : 철도문화공원 (구.진주역) 차량정비고 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. - 행사기간 : 2023. 8. 25.~ 9. 5. ❍ 사 업 비 : 98백만 원 ❍ 사업내용 - 도시재생을 주제로 진주시의 공공건축물 우수성 홍보 전시 - 시민․학생․어린이 등 모두가 참여할 수 있는 건축관련 프로그램 운영	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 계획 수립 ❍ 2023. 2.~4. : 용역 발주 ❍ 2023. 5.~6. : 참여기관 모집 ❍ 2023. 7.~8. : 세부 프로그램 운영 계획 수립 ❍ 2023. 8. 25.~9. 5. : 제2회 진주 건축 문화제 개최 ❍ 2023. 11. 1.~11. 5. : 제13회 경남 건축 문화제 진주부스 연계 전시
공공건축 역량강화 워크숍	❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. ❍ 장 소 : 전국 우수건축물 대상지 ❍ 사 업 비 : 32백만 원 ❍ 사업내용 - 공공 건축물 건립 사업의 발주 부서, 공사감독, 건축직공무원 등 사업 관계자의 견문을 넓혀 품격있는 공공 건축 건립 추진 시 활용	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. : 상반기 건축 워크숍 용역 발주 및 계약 ❍ 2023. 5. 24.~5. 26. : 상반기 건축워크숍 ․ 장소 : 제주도 ․ 대상 : 관련부서 담당자 20명 ․ 내용 : 알뜨르비행장, 일본군 비행기 격납고, 김창열 미술관, 방주교회, 수풍석 뮤지엄, 포도호텔, 본태 박물관 답사 ❍ 2023. 8. : 하반기 건축 워크숍 용역 발주 및 계약 ❍ 2023. 10. 26.~10. 27. : 하반기 건축 워크숍 ․ 장소 : 경기도 수원 ․ 대상 : 관련부서 담당자 20명 ․ 내용 : 남양성모성지, 수원화성, 복합문화공간 111cm, 앨리웨이광교 답사

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
진주대첩 광장 조성사업	❍ 위 치 : 본성동 8-1 일원(진주성 촉석문 앞) ❍ 사업기간 : 2007 ~ 2024년 ❍ 사 업 량 : 19,870㎡ - 주요시설 : 역사공원, 지하주차장 (149면) 등 ❍ 사 업 비 : 940억 원 (균특전환 40, 도비 12, 시비 888)	□ 추진사항 ❍ 2007.5.: 타당성조사 및 기본계획 수립 ❍ 2015.2.: 지방재정 투자 사업 중앙심사 조건부 승인 ❍ 2017. 7. : 보상 및 건물철거 완료 ❍ 2018. 4. ~ 2019. 8. : 문화재 정밀발굴 조사 ❍ 2020. 9. : 문화재 보존방안 심의 완료 ❍ 2020. 11. ~ 2021. 7. : 현상변경 허가 신청(문화재청) 및 심의(3회) ❍ 2021. 8. ~ 11. :지방재정투자 2단계 심사 완료 ❍ 2022. 3. ~ 6. :북측 보도부 문화재 시굴조사 및 가설 펜스 설치 완료 ❍ 2022.7. : 유구 보존 및 정비 관련 전문가 자문(3회) ❍ 2022. 8. ~ 12. : 북측 보도부 문화재 발굴 조사 및 도시 관리 계획 결정(변경) ❍ 2023. 2. : 문화재청 사적분과위원회 개최 [현상변경허가 : 승효상 건축 가 참여 구상안] ❍ 2023. 3. : 문화재 발굴조사 완료 및 문 화재 현상변경허가심의 (조건부 가결) ❍ 2023. 6. : 문화재 현상변경 허가완료(문화재청) ❍ 2023. 7. : 공원조성계획 변경 ❍ 2023.12. : 지하주차장 조성 완료 □ 향후계획 ❍ 2024. 1. : 상부 공원 조성 ❍ 2024. 5. : 공사 준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
성북동 아동･ 복지센터 건립사업	❍ 위 치 : 인사동 9-1 일원 [구)영남백화점] ❍ 사업기간 : 2020 ~ 2025년 ❍ 사 업 량 : 부지 2,914.7㎡, 건축연면적 7,710㎡ - 주요시설 : 성북동행정복지센터, 영유아 놀이체험실, 어린이하모건강 동산, 공동 육아 나눔터, 주차장(75면) 등 ❍ 사 업 비 : 425억 원 (국비 50, 도비 10, 시비 365)	□ 추진사항 ❍ 2020. 2.~11. : 타당성조사 ❍ 2021. 1.~３. : 실시계획 인가, 성북동 청사 이전 타당성 조사 용역 ❍ 2021. 4. : 도시재생인정사업 선정 ※ 국·도비 60억 확보 ❍ 2021. 4.~8. : 건축기획 사전검토 및 건축 설계 공모 ❍ 2021. 10. : 부지보상 완료 [(1차 구)영남백화점)] ❍ 2021. 11. : 기본 및 실시설계 착수 ❍ 2022. 2. : 기존 건축물철거 구)영남백화점 지상부 ❍ 2022. 6. : 원룸 3동 추가 보상 ❍ 2022. 10. : 건축물 해체 허가 ❍ 2023. 1. : 원룸 3동 철거 ❍ 2023. 2.~4. : 경남도 지방건설 기술 심의 ❍ 2023. 5. : 총사업비 증액보고 ❍ 2023. 6. : 조달원가검토 및 계약 의뢰 ❍ 2023. 9. : 도시재생 활성화 계획 변경(국토부), 공사입찰 ❍ 2023. 10. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2025. 11. : 공사 준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
진주시 복합문화공간조성	❍ 위 치 : 본성동 7-1 일원 (청소년수련관 앞) ❍ 사업기간 : 2020 ~ 2027년 ❍ 사 업 량 : 부지 3,170㎡, 건축연면적 5,450㎡ - 주요시설 : 문화원, 청년문화교실, 공연장, 지하주차장(70면) 등 ❍ 사 업 비 : 400억 원(시비)	□ 추진사항 ❍ 2021. 3. : 타당성 조사 및 기본 계획 수립 용역 ❍ 2021. 6. : 지방재정 투자사업 심사 ⇒ 조건부(실시설계 완료 후 재심사) ❍ 2021. 7. : 도시관리계획(문화시설) 결정 및 지형도면 고시 ❍ 2022. 6.~9. : 공유재산심의 및 승인 ❍ 2023. 2. : 편입부지 감정평가 ❍ 2023. 3. : 보상협의 착수 ❍ 2023. 7. : 실시계획인가 고시, 수용재결 신청 (지방토지수용위원회) ❍ 2023. 8. : 수용재결 감정평가 ❍ 2023. 9. : 수용위원회 재결심의 ❍ 2023. 10. : 재결 확정 ❍ 2023. 11. : 수용 개시 □ 향후계획 ❍ 2024. 1.~ 4. : 수용 후 부지 안전 펜스 설치 ❍ 2025. 7.~12. : 건물 철거 및 문화재 표본조사 ❍ 2025. 1.~2026. 5. : 설계공모, 기본 및 실시 설계, 경제성(VE) 검토, 지방건설기술심의, 조달청 원가검토 및 계약 의뢰 ❍ 2026. 6.~2027. 12. : 공사 착공 및 준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
안락공원 현대화 사업	❍ 위 치 : 장재동 245 일원(안락공원 주변) ❍ 사업기간 : 2012 ~ 2024년 ❍ 사 업 량 : 131,156㎡ - 주요시설 : 화장로(7기),봉안당신축(22,300위), 봉안담(1,200위), 자연장지 (14,096위), 주차장(176면) 등 ❍ 사 업 비 : 633억 원(국비 159, 도비 17, 시비 457)	□ 추진사항 ❍ 2013. 3.~9. : 기본계획수립 용역 ❍ 2013. 6. : 편입부지 보상 시행 ❍ 2019. 4. : 지방재정 투자 심사 조건부 승인 ❍ 2020. 5. : 실시설계용역 착수 ❍ 2021. 5. : 경상남도 지방건설 기술심의 ❍ 2021. 8. : 도시계획시설(장사시설) 결정 ❍ 2022. 1. : 공사 착공 ❍ 2022. 6. : 건축협의 및 편입부지 보상완료(67필지, 131,156㎡) ❍ 2022. 10. :「안락공원현대화 올바른 추진위원회」 현장설명회 개최 ❍ 2023. 3. : 건축 변경 협의 ❍ 2023. 5. : 2차분 공사 착공 ❍ 2023. 12. : 기계실, 전기실, 관리 동 골조 완료, 화장장 2층 슬래브 철근 가공 조립 □ 향후계획 ❍ 2024. 12.:공사 준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
진주실크 박물관 건립	❍ 위 치 : 문산읍 삼곡리 1672-2(실크전문 단지 내) ❍ 사업기간 : 2019 ~ 2025년 ❍ 사 업 량 : 부지면적 4,477㎡, 연면적 2,932.31㎡ - 주요시설 : 상설·기획 전시실, 체험교육실, 카페·아트샵, 파노라마 영상실, 주차장(30면) 등 ❍ 사 업 비 : 215억 원 (국비 5, 도비 39, 시비 171)	□ 추진사항 ❍ 2019. 3.~11. : 타당성조사 및 기본계획 수립 ❍ 2020. 7.~2021. 5. : 공립박물관 설립 타당성 사전평가 완료 ❍ 2021. 3. : 지방재정투자 심사 완료 ❍ 2021. 4.~5. : 공유재산심의, 공유재산관리계획 승인 ❍ 2021. 7.~2023. 5. : 건축설계공모 및 실시설계 용역 ❍ 2022. 10.~11. : 지방재정투자 재심사 및 경남도 건설기술심의 완료 ❍ 2023. 1. : 업무이관(기업통상과 → 공공시설추진단) 및 일상감사 완료 ❍ 2023. 2. : 조달청 원가검토 및 계약의뢰 ❍ 2023. 3.~4. : 공유재산 변경심의, 공유재산 관리계획 변경승인 ❍ 2023. 6. : 지방재정 중앙투자 심사 완료 ❍ 2023. 7. : 공사 계약 및 착공 □ 향후계획 ❍ 2024. 12. : 공사 준공 ❍ 2025. 1.~ 2. : 전시공사 및 개관 (기업통상과)

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 항	문제점 및 대책
행복드림 센터 건립	❍ 위 치 : 정촌면 예하리 1369(뿌리일반 산단 내) ❍ 사업기간 : 2019 ~ 2024년 ❍ 사 업 량 : 부지면적 7,031㎡, 연면적 2,933.09㎡ - 주요시설 : 다목적체육관, 주민자율공간, 어린이도서관, 주차장(82면) 등 ❍ 사 업 비 : 233억 원 (국비 45, 도비 14, 시비 174)	□ 추진사항 ❍ 2020. 8. : 2021년 지역사회 활성화 기반조성사업 선정(행안부) ❍ 2021. 2. : 기본계획 수립 ❍ 2021. 4.~5. : 공유재산 심의, 공유재산관리 계획 승인 ❍ 2021. 6. : 지방재정투자심사 완료 ❍ 2021. 9. : 사업부지 매입 ❍ 2021. 12.~2022. 10. : 건축 설계공모 및 실시설계 용역 완료 ❍ 2023. 1. : 업무 이관(기업통상과 → 공공시설추진단) ❍ 2023. 1.~3. : 조달청 원가검토 및 계약의뢰 ❍ 2023. 3.~4. : 공유재산 변경심의, 공유재산 관리계획 변경승인 ❍ 2023. 4. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2024. 4. : 공사 준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
사봉농공단지 근로자 지원시설 건립사업	❍ 위 치 : 사봉면 봉곡리 1107-1 (사봉농공단지 내) ❍ 사업기간 : 2022 ~ 2023년 ❍ 사 업 량 : 부지면적 3,873㎡, 연면적 535.48㎡ - 주요시설 : 구내식당, 다목적 공간 ❍ 사 업 비 : 28억 원(시비)	□ 추진사항 ❍ 2022. 3. : 시민과의 데이트 건의사항 수렴 ❍ 2022. 5. : 기획설계 및 공공건축 심의 완료 ❍ 2022. 8. : 기본 및 실시설계 용역 실시 ❍ 2022. 11. : 지방재정투자심사 완료 ❍ 2022. 12. : 구.식당 철거 완료 ❍ 2023. 1. : 업무이관(기업통상과 → 공공시설추진단) ❍ 2023. 3. : 기본 및 실시설계 용역 완료 ❍ 2023. 4. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 공사 준공

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
중안지구 공영 주차타워 조성	❍ 위 치 : 중안동 14-1 외 1필지 ❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024년 ❍ 사 업 량 : 부지면적 2.109.8㎡, 연면적 5,250.62㎡ 주차면수 218 ❍ 사 업 비 : 165억 원(시비)	□ 추진사항 ❍ 2022. 4. : 성북동 공영주차장 조성 건의 ❍ 2022. 10. ~ 12. : 공유재산 심의 및 관리계획 승인 ❍ 2022. 10. ~ 2023. 3. : 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 ❍ 2022. 11. : 지방재정투자심사 완료 ❍ 2023. 4. ~ 6. : 설계공모 ❍ 2023. 6. : 기본 및 실시설계 착수 ❍ 2023. 7 : 업무이관(교통행정과 → 공공시설추진단) □ 향후계획 ❍ 2023. 10. : 기본 및 실시설계 완료 ❍ 2023. 11. : 일상감사 및 계약심사 ❍ 2023. 12. : 시공 및 감리업체 선정 ❍ 2024. 1. ~ 10. : 공사 착공 및 준공
보건소 신청사 건립	❍ 위 치 : 초전동 360-1 일대 (초전신도심 1단계 발사업 부지 내) ❍ 사업기간 : 2021 ~ 2026년 ❍ 사 업 량 : 부지면적 8,400㎡, 연면적 12,500㎡ - 주요시설 : 보건소, 치매·안심센터, 지하주차장(151면) 등 ❍ 사 업 비 : 673억 원 (국비 49, 도비 13, 시비 611)	□ 추진사항 ❍ 2021. 12. ~ 2022. 12. : 기본구상 및 건축기획 용역 ❍ 2023. 2. ~ 6. : 설계공모 ❍ 2023. 3. : 부지 계약, 부지 변경 승인 신청(보건복지부) ❍ 2023. 5. : 보건복지부 시설변경 (부지변경) 승인 ❍ 2023. 7. : 기본 및 실시설계 용역 착수 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 시설 설계심의 (한국건강증진개발원) ❍ 2024. 7. ~ 11. : 도 건설기술심의, 조달청 원가 검토, 계약 의뢰 ❍ 2024. 12. ~ 2026. 7. : 공사 착공 및 준공

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

❍ 공공건축 업무의 집중화

-기술직렬 공무원이 부족한 부서에서 진행 중인 공공건축 사업 일원화

-업무 전문성 및 집중도 향상, 체계적 관리 및 신속 추진

❍품격 높은 공공건축물을 통한 도시경관 개선

- 공공건축가제도(민간전문가) 활성화

-공공건축물 디자인 역량 강화 및 효율적 운영 관리 체계 구축

❍ 공공시설 건립을 통한 원도심 활성화와 정주 여건 개선

-진주대첩광장, 아동·복지 지원센터, 복합문화 공간 등 조성

-정주 여건 개선 및 유네스코 창의도시 이미지 제고

❍전문실크박물관 건립을 통한 지역 랜드마크 조성

-진주실크박물관 건립을 통해 진주의 역사성 및 고유성 보존

❍안락공원 현대화사업 마무리 추진

-기존 노후화된 화장시설 개선 및 부족한 봉안시설 확보

-친환경적 추모공원 조성으로 시민 복지 제고

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만 원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	10	17,384	-	-	-	-
일반시책사업	2	271	연	중	추	진
주요예산사업	8	17,113	연	중	추	진

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

진주대첩광장 조성사업

❍ 진주대첩의 역사성 제고 및 호국충절 고장 진주의 얼 고취

❍국난극복의 역사현장 관광 자원화로 관광객 증대 및 원도심 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 본성동 8-1 일원(진주성 촉석문 앞)

❍ 사업기간 : 2007 ~ 2024년

❍ 사 업 량 : 19,870㎡〔역사공원, 공원지원시설, 지하주차장(149면) 등〕

❍ 사 업 비 : 94,000백만 원(균특전환 4,000 도비 1,200 시비 88,800)

□ 추진상황

❍ 2007.  5. : 타당성조사 및 기본계획 수립

❍ 2017.  7. : 보상 및 건물철거 완료(부지 108필지 13,000㎡, 건물 81동)

❍ 2020. 11. ~ 2021. 7. : 광장 내부 문화재 발굴 및 심의(문화재청 3회)

❍ 2021.  8. ~ 11. : 지방재정투자 2단계 심사 완료(행안부)

❍ 2022.  2. : 공사 착공

❍ 2022.  8. ~ 2023.  3. : 북측 보도부 문화재 발굴조사

❍ 2023.  6. : 문화재 현상변경 허가 완료

❍ 2023.  7. : 공원 조성계획 변경

❍ 2023. 12. : 지하주차장 완료

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 상부 공원 조성

❍ 2024.  5. : 공사 준공

성북동 아동·복지센터 건립사업

❍원도심 내 부족한 육아·돌봄 시설을 구)영남백화점 부지에 건립함으로써 지역별 균형 있는 아동복지 지원체계 구축

❍성북동 청사 이전과 주차 공간 제공으로 효율적인 행정업무 수행 및 지역민 편의 도모·원도심 활성화 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 인사동 9-1 일원(구. 영남백화점)

❍ 사업기간 : 2020 ~ 2025년

❍ 사 업 량 : 부지 2,914.7㎡, 건축연면적 7,710㎡ / 1동

〔아동·복지시설, 성북동행정복지센터, 주차장(75면) 등〕

❍ 사 업 비 : 42,500백만 원(국비 5,000, 도비 1,000, 시비 36,500)

□ 추진상황

❍ 2020.  2. ~ 11. : 타당성조사

❍ 2021.  4. : 도시재생 인정사업(위험건축물 재생사업) 선정(국·도비 60억 확보)

❍ 2022.  2. : 기존 건축물 철거 (구)영남백화점 지상부)

❍ 2022.  6. ~ 2023. 1. : 원룸 3동 추가 보상 및 철거 완료

❍ 2023.  2. ~ 4. : 경상남도 지방건설 기술심의

❍ 2023.  6. : 조달청 원가 검토 및 공사계약 의뢰

❍ 2023.  9. : 도시재생 활성화 계획 변경(국토부), 공사 입찰

❍ 2023. 10. : 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2025. 11. : 공사 준공

진주실크박물관 건립

국내 유일의 실크산업 가치를 보존하는 기념비적인 공간으로 대한민국  실크의 랜드마크로 건립

□ 사업개요

❍ 위    치 : 문산읍 삼곡리 1672-2(실크전문단지 내)

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2025년

❍ 사업규모 : 부지면적 4,477㎡, 건축연면적 2,932.31㎡(지하 1층 ~ 지상 3층)

❍ 주요시설 : 상설·기획 전시실, 체험교육실, 카페·아트샵,

파노라마 영상실, 주차면수 30면 등

❍ 사 업 비 : 21,500백만 원(국비 500, 도비전환 3,861, 시비 17,139)

□ 추진상황

❍ 2019.  3. ~ 11. : 실크박물관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립

❍ 2021.  7. : 건축 설계공모 및 실시설계 용역 시행 (2023. 5. 완료)

❍ 2023.  1. : 업무 이관(기업통상과 → 공공시설추진단)

❍ 2023.  2. ~ 3. : 조달청 원가검토 및 계약의뢰

❍ 2023.  6. : 지방재정 중앙투자심사 완료 (198억 → 215억)

❍ 2023.  7. : 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2024. 12. : 공사 준공

❍ 2025.  1. ~ 2. : 전시공사 및 개관(기업통상과)

행복드림센터 건립

정촌면 내 정촌산단, 뿌리산단, 국가항공산단의 집적에 따라 근로자와 지역 주민이 함께 이용할 수 있는 복합문화시설 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 정촌면 예하리 1369(뿌리일반산단 내 지원시설 4 용지)

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2024년

❍ 사업규모 : 부지면적 7,031㎡, 건축연면적 2,933.09㎡(지하 1층 ~ 지상 2층)

❍ 주요시설 : 다목적체육관, 주민자율공간, 어린이도서관, 주차면수 82면 등

❍ 사 업 비 : 23,260백만 원(국비 4,500, 도비 1,350, 시비 17,410)

□ 추진상황

❍ 2020.  8. : 2021년 지역사회활성화 기반 조성 사업 선정(행안부)

❍ 2021.  4. ~ 5. : 공유재산 심의, 공유재산관리계획 승인

❍ 2021.  6. : 지방재정투자심사 완료

❍ 2021.  9. : 사업부지 매입

❍ 2021. 12. ~ 10. : 건축 설계공모 및 실시설계 용역

❍ 2023.  1. : 업무 이관(기업통상과 → 공공시설추진단)

❍ 2023.  1. ~ 3. : 조달청 원가검토 및 계약의뢰

❍ 2023.  4. : 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2023. 12. : 운영 방법 결정(기업통상과)

❍ 2024.  4. : 공사 준공

중안지구 공영주차타워 조성

도심지 주차시설 대폭 확충 사업 중 하나로 구 도심지 내 만성적인 주차난 해소로 시민들의 주차 편의 제고 및 지역경제 활성화를 도모하기 위해 중안지구 내 공영주차타워 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 중안동 14-1 외 1필지

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

❍ 사업규모 : 부지면적 2,109.8㎡, 건축연면적 5,250.62㎡

❍ 주요시설 : 주차전용타워 1식(주차타워 3층 4단 / 주차면수 218면)

❍ 사 업 비 : 16,500백만 원(시비)

□ 추진상황

❍ 2022.  4. : 성북동 공영주차장 조성 건의

❍ 2022. 10. ~ 12. : 공유재산 심의 및 관리계획 의회 승인

❍ 2022. 10. ~  2023. 3. : 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역

❍ 2022. 11. : 지방재정투자심사 완료(적정)

❍ 2023.  4. ~  6. : 설계공모

❍ 2023.  6. : 기본 및 실시설계 착수

❍ 2023.  7. : 업무 이관 (교통행정과 → 공공시설추진단)

□ 추진계획

❍ 2023. 10. : 기본 및 실시설계 완료

❍ 2023. 12. : 시공 및 감리업체 선정

❍ 2024.  1. : 공사 착공

❍ 2024. 10. : 공사 준공

보건소 신청사 건립

포스트 코로나 시대의 보건소 역할과 기능을 새롭게 정립하고 감염병 대응에 효율적인 단독 청사 건립

□ 사업개요

❍ 위    치 : 초전동 360-1 일원(초전신도심 1단계 개발사업 부지 내)

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2026년

❍ 사업규모 : 부지면적 8,400㎡, 건축연면적 12,500㎡(지하1층~지상4층)

❍ 주요시설 : 보건소, 치매안심센터, 지하주차장 151면 등

❍ 사 업 비 : 67,300백만 원(국비 4,907, 도비 1,252 시비 61,141)

□ 추진상황

❍ 2021. 12. ~ 2022. 12. : 기본구상 및 건축기획 용역

❍ 2023.  2. ~ 6. : 설계공모

❍ 2023.  3. : 부지 계약, 부지 변경 승인 신청(보건복지부)

❍ 2023.  5. : 보건복지부 시설변경(부지변경) 승인

❍ 2023.  7. : 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 추진계획

❍ 2023. 11. : 시설 설계심의(한국건강증진개발원)

❍ 2024.  7. ~ 11. : 도 건설기술심의, 조달청 원가 검토, 계약 의뢰 등

❍ 2024. 12. : 공사 착공

❍ 2026.  7. : 공사 준공

진주시 복합문화공간 조성사업

❍복합문화공간 조성으로 문화, 향토민속 등 천년고도 진주의 유네스코

창의 도시 이미지 제고

❍문화예술에 대한 시민들의 다양한 욕구 충족

□ 사업개요

❍ 위    치 : 본성동 7-1 일원(청소년수련관 앞)

❍ 사업기간 : 2020 ~ 2027년

❍ 사 업 량 : 부지 3,170㎡, 건축연면적 5,450㎡

〔문화원, 청년문화교실, 공연장, 지하 주차장(70면) 등〕

❍ 사 업 비 : 40,050백만 원(시비)

□ 추진상황

❍ 2021.  3. : 타당성 조사 및 기본계획수립용역

❍ 2021.  6. : 지방재정 투자사업 심사 ⇒ 조건부(실시설계 완료 후 재심사)

❍ 2021.  7. : 도시관리계획(문화시설) 결정 및 지형도면 고시

❍ 2022.  6. ~ 9. : 진주시 공유재산 심의, 진주시의회 승인

❍ 2022.  9. : 편입부지 보상관리 용역 착수 및 주민설명회 개최

❍ 2023.  6. : 복합문화공간 및 청소년수련관 이전 연계 타당성 조사 용역 시행

❍ 2023.  7. : 복합문화공간 조성사업(부지조성) 실시계획 인가 고시, 수용재결신청

❍ 2023. 11. : 토지 수용 개시, 소유권 이전 등기

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 편입토지 수용 후 부지 안전휀스 설치

❍ 2025.  1. : 건물철거 및 문화재 표본 조사, 설계공모 관리용역, 공공건축 심의

❍ 2025.  5. ~ 2026. 5. : 설계 공모, 실시설계 변경 인가, 기본 및 실시설계,

설계VE, 건설기술심의, 조달청 원가검토 및 계약

❍ 2026.  6. : 공사 착공

❍ 2027. 12. : 공사 준공

안락공원 현대화사업

❍ 화장중심의 장사시설 수요 대비와 기존 안락공원의 노후화된 화장시설 개선

❍부족한 봉안시설 확보 및 친환경적 현대화 추모공원 조성을 통한 시민·복지 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 장재동 245 일원(안락공원 주변)

❍ 사업기간 : 2012 ~ 2024년

❍사업량 : 화장로(7기), 봉안당 신축(22,300위), 봉안담(1,200위),

자연장지(14,096위), 주차장(176면) 등

❍ 사 업 비 : 63,347백만 원(국비 15,886  도비 1,736 시비 45,725)

□ 추진상황

❍ 2013.  3. ~  9. : 기본계획수립 용역

❍ 2013.  6. ~ 2022. 6. : 편입부지 보상 (67필지 131,156㎡)

❍ 2019.  4. : 지방재정 투자 심사(중앙:재심사) 조건부 승인⇒민원최소화, 633억 원

❍ 2020.  5. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2020.  9. ~ 12. : 총괄․공공건축가 자문(1~6차) 및 한국장례문화진흥원 자문

❍ 2021.  8. ~ 10. : 도시계획시설(장사시설) 결정 및 주민설명회 개최

❍ 2022.  1. ~  6. : 공사착공 및 건축협의

❍ 2022. 10. : ｢안락공원 현대화 올바른 추진위원회｣ 현장 설명회 개최

❍ 2023.  3. ~  5. : 건축변경협의 및 2차분 공사 발주

❍ 2023. 12. : 기계실, 전기실, 관리동 골조 완료, 화장장 2층 슬래브 철근 가공조립

□ 추진계획

❍ 2024.  2. : 1단계 공사분 준공, 신설 화장로 가동

❍ 2024. 12. : 공사 준공

공공건축가 제도 운영

공공건축 사업의 기획․설계 단계에서 민간전문가를 참여시켜 디자인  관리 체계 개선

□ 사업개요

❍ 근거법령

- 「건축기본법」제23조(민간전문가의 참여)

- 「건축서비스산업 진흥법」제13조(건축서비스 전문인력 양성)

❍ 구    성 : 총괄계획가 1명 및 공공건축가 31명(교수 11, 건축사 19, 조경기술사 1)

❍ 사 업 비 : 173백만 원

❍ 근무형태 : 총괄계획가 비상근(주 1 ~ 2일) 및 공공건축가 비상근(필요 시)

❍ 역    할 : 공간환경 및 공공건축 사업의 기획, 설계 및 시공에 대한 자문

□ 추진상황

❍ 2019.  5. : 국토교통부 공모사업 선정(국비 256백만 원 지원)

❍ 2019.  7. ~ 현재 : 총괄․공공건축가 자문 55건(완료 26건, 진행 중 29건)

❍ 2020.  3. 24. : 국토교통부 2차 공모사업 선정(국비 60백만 원 지원)

❍ 2023.  6. 12. : 공공건축가 3기 위촉(총괄계획가 1명, 공공건축가 31명)

❍ 2023.  8. 25. ~ 9. 5. : 제2회 진주 건축문화제 개최

❍ 2023. 11. 1. ~ 11. 5. : 경남건축문화제 진주 부스 연계 전시

□ 추진계획

❍ 공공건축물 및 공간환경에 대한 총괄계획가 ․ 공공건축가 자문 지속 시행

❍ 사업 관련 공무원 ․ 민간전문가(총괄 ․ 공공건축가) 간담회 등 실시

진주 건축문화제 개최

우리 시 공공건축물과 공간환경의 우수성을 알리고 문화예술도시로서 위상 제고를 위해 건축문화제를 개최하여 공공기관․학교․민간 등의    정보 공유로 건축 디자인 향상, 공공건축가의 활동과 성과 홍보

□ 사업개요

❍ 위    치 : 우리 시 공공건축물 내

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 98백만 원

❍ 사업내용

- 진주시 공공건축물의 우수성 홍보 및 전시

- 시민, 학생, 어린이 등 전 세대가 참여할 수 있는 건축 관련 프로그램 운영

- 공공기관, 학교 등 유관 기관 참여 전시

□ 추진상황

❍ 2023.  8. ~ 9. : 제2회 진주 건축문화제 개최

❍ 2023. 11. : 경남건축문화제 진주 부스 연계 전시

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 제3회 진주 건축문화제 계획 수립

❍ 2024.  2. ~ 3. : 행사 용역 발주

❍ 2024.  4. ~ 9. : 프로그램 준비 및 참여기관 모집 등 세부 운영 계획 수립

❍ 2024. 10. : 제3회 진주 건축문화제 개최

	부강한 진주 행복한 시민	제252회 진주시의회(제2차 정례회)

시정 주요업무 보고

(2023년 실적 및 2024년 계획)

진   주   시

(교통환경국)

보  고  순  서

□교통행정과

□환경관리과

□	청소과

□산  림  과

□	공워관리과

□	매립장사업소

□	차량등록사업소

교통행정과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황	(단위 : 명)

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	28	1	1	6	10	7	3
현 원	28	1	1	6	15	2	3
증 감	-	-	-	-	5	△5	-

□ 위원회	(2023. 11. 1. 현재)

구 분 위원회명	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원중 여 성 위원수	％
			계	공무원	％	민간인	％
교통약자이동편의 증진위원회	19	5	14	2	14	12	86	8	57
교통발전위원회	14	3	11	3	27	8	73	1	9
교통안전정책 심의위원회	20	8	12	2	17	10	83	2	17
교통영향평가 심의위원회	24	5	19	7	37	12	63	4	21
진주시 택시 감차위원회	9	3	6	-	-	6	100	-	-

□ 예산규모	(단위 : 억원)

구 분	2022년	2023년	증 감	비 고
총 계	664	1,010	346
일반회계	580	761	181
특별회계	84	249	165

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	14	-	14	-	-	-
예산사업	14	-	14	-	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-	-

2. 추진실적

□ 추진중 사업  ---  14건

사  업  명

사  업  개  요

추  진  상  황

문제점 및 대책

특별교통

수단

휠체어

콜택시

운영

❍ 위탁관리 차량 : 38대
(동진 19대, 일진 19대)

❍ 위탁기간 : 2년간
(2023. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)

❍ 이용대상 : 중증 장애인,
65세 이상, 동반가족 등

❍ 운행지역 : 경상남도,

부산광역시

❍ 운행시간 : 24시간 연중무휴

❍ 이용요금

- 시내지역 : 1,100~2,000원

- 시외지역 : 시외버스 요금 1.5배

❍ 사업비 : 2,975백만원
(대당 78백만원×38대)

□ 이용현황

구 분	이용인원(명)
2023년 6월	65,552
2022년	85,974
2021년	94,288

□ 추진사항

❍ 2023. 7. 휠체어 콜택시 4대 추가 구입 및 운행시작

□ 향후계획

❍ 진주시의 교통약자이동편의 증진 조례 개정

바우처

콜택시

운영

❍사업목적 : 휠체어 콜택시의 배차시간 지연 등 불편사항 발생으로, 비휠체어 이용자 대상 바우처택시 도입

❍ 운영대수 : 50대 (개인택시 30, 법인택시 20)

❍ 운영기간 :
2023. 1. 1. ~ 12. 31.

❍ 이용대상 : 특별교통수단 회원 중 비휠체어 이용자

❍ 운행시간 : 06:00 ~ 22:00

❍ 이용요금 : 2,000원

❍ 사 업 비 : 348백만원

□ 이용현황

구 분	운행건수(건)
합 계	23,483
2023. 1월	1,607
2023. 2월	1,713
2023. 3월	2,342
2023. 4월	2,242
2023. 5월	2,542
2023. 6월	2,985
2023. 7월	3,275
2023. 8월	3,583
2023. 9월	3,194

□ 향후계획

❍2024. 3. 휠체어 콜택시 추가모집

❍2024. 4. 휠체어 콜택시 100대 운행(50대 증차)

시내버스

재  정  지  원  금

지원

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 26,125백만원

❍ 사업대상 : 94개 노선, 268대
(부산 31, 부일 49, 삼성 100, 시민 88)

❍ 지원방법 : 표준운송원가적용, 수입금 차감 후 지원

□ 추진사항

❍ 재정지원금 지원(1 ~ 10월)

: 23,425백만원

❍ 2023. 2. ~ 12. : 암행평가단 운영

(3단계, 120명)

❍ 2021~2022년 시내버스 업체 경영
및 서비스·경영 평가 용역
진행 중

(2021~2022년 실적 차등지원 근거)

□ 향후계획

❍ 표준운송원가 적용 업체별
재정지원금 지원 : 2023. 1. ~ 12.

❍ 용역결과 평가를 통한 업체별 차등지원 : 2023. 12.

시내버스

국비

공모사업

추진

(중·고생

통학노선,

동부지역

순환버스)

❍ 사업내용

- 중·고생 통학노선 : 2개 노선

(10번, 20번)

- 동부지역 순환버스 : 8개

노선

(1번, 2번, 2-1번, 3번, 3-1번,

4번, 5번, 6번)

❍ 사업비 : 2,122백만원

(국비 330, 시비 1,792)

□ 추진사항

❍ 중·고생 통학노선 운행

- 2020. 3. 2. ~ : 본 운행 개시

- 2021. 1. 1. ~ 현재 : 계속 사업

※ 23년 9월 말 이용객 현황 : 9만 2천명

❍ 동부지역 순환버스 운영

- 2020. 7. 30. : 본 운행 개시

- 2021. 1. 1. ~ 현재 : 계속 사업

※ 23년 9월 말 이용객 현황 : 3만 7천명

□ 향후계획

❍ 2023. 1. ~ 12. : 표준운송원가 적용 매월 재정지원금 지원 시 통합 지원

진주~사천 간

광역

환승할인

시행

❍ 사업대상 : 시내버스 299대
(진주 268, 사천 31),

시외버스 17대(경상남도)

❍ 사업내용 : 진주·사천 간 시내

버스와 시외버스 간 무료

환승

❍ 사업비 : 167백만원

(도비 49, 시비 118)

□ 추진사항

❍ 2020. 11. 1. : 진주~사천 간 광역환승할인제 시행

❍ 2021. 1. 1. ~ 현재 : 계속 사업

※ 23년 9월 말 이용객 현황

: 8만 2천명

□ 향후계획

❍ 2023. 1. ~ 12. : 매월 시내·시외 손실보상금 산정 후 익월 업체 정산

저상버스

구입 및

운행 지원

❍ 사업내용

- 구입지원 : 92백만원/대

- 운행지원 :  7백만원/대

❍ 사업대상 : 저상버스 운행 시내버스 업체

❍ 사 업 비 : 2,986백만원

- 구 입 비 : 2,576백만원(28대)
(국 1,288, 도 644, 시 644)

- 운 영 비 : 42백만원(6대)
(도 13, 시 29)

※ 전기저상버스 제외

❍ 지원방법

- 저상버스 구매 시 지원금 지급

- 연간 운행지원비 반기별 지급

□ 추진사항

❍ 2023년 구입비 : 31대 지원(2,852백만원)

❍ 2023년 운영비 : 6대 지원 (42백만원)

□ 향후계획

❍ 2024년 구입비 : 출고 시기에 따라 28대 지원(2,576백만원)
(국도비 추가 배정 시 지원대수 증가)

❍ 2024년 운영비 : 6대 지원(42백만원)

시내버스

공 영

차 고 지

조성

❍ 위치 : 진주시 집현면 신당리 106번지 일원

❍ 사업기간 : 2023. ~ 2024.

❍ 사 업 량 : 시내버스 공영

차고지 조성 1식

- 부지면적 25,483㎡, 건축면적 1,195㎡(관리동, 정비고 등)

- 버스 박차 주차공간(100면)

❍ 사 업 비 : 15,900백만원
(국비 1,340, 시비 14,560)

□ 추진사항

❍ 2021.  7. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료

❍ 2022. 10. : 중기지방재정계획 반영

❍ 2023.  2. : 지방재정 투자심사(道) 승인

❍ 2023.  7. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시

❍ 2023.  9. ~ : 토지 등 보상계획 공고 및 보상절차 이행

❍ 2023.  9. ~ : 기본구상용역 착수

□ 향후계획

❍ 2024.  1. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2024.  7. ~ : 공사 착공 및 준공

브라보

행복택시

운영

❍ 대상마을 : 13개 읍면

41개 마을

❍ 추진기간 : 2019. 10. ~

- 운영방법 : 노선형

※ 57대(개인 35, 법인 22)

- 탑승요금 : 100원

- 운행구간 : 마을 ⇔ 면소재지

- 사업자선정 : 공개모집

❍ 지원방법 : 운행지원금 지원 (협정요금 – 탑승요금)

❍ 사업비 : 600백만원

□ 추진사항

❍ 2018. 12. : 지역별 순회간담회

❍ 2019.  1. : 택시업계 대표 간담회

❍ 2019.  4. ~ 5. : 대상마을 현지실사

- 12개 면 31개 마을(택시업계 합동)

❍ 2019.  8. : 운송사업자 공개모집

❍ 2019. 10. : 31개 마을 시범운영

❍ 2020.  1. : 31개 마을 정상운영

❍ 2020.  2. : 운영평가 및 확대방안
용역 실시

❍ 2020.  9. ~ 10. : 신규 수요마을(8개)

확대 주민설명회 등 의견수렴

❍ 2020. 11. : 신규 수요마을 확대 운영

❍ 2021. 10. ~ 12. : 운송사업자

공개모집 및 교육

❍ 2022.  3. : 신규 수요마을 일부 확대 운영

❍ 2023.  3. ~ : 수요응답형 개편 운영 준비

❍ 2023.  7. : 수요응답형 시범 실시

□ 향후계획

❍ 2023. 11. ~ : 수요응답형 개편 운영

택시감차

추진

❍ 사업내용 : 택시 감차 보상을 통한 택시총량제 추진

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 계속

❍ 사 업 비 : 2,066백만원

❍ 사 업 량 : 법인택시 100대

- 2022년 : 16대

- 2023년 : 40대

□ 추진사항

❍ 2022. 4. :	2022년 택시감차보상 사업 국비 보조금 확보(16대분)

❍ 2022. 7. :	진주시 택시감차위원회 구성 계획 수립

❍ 2022. 8. ~ 9. : 진주시 택시 감차 위원회 개최 및 감차 심의 확정

❍	2022. 9. ~ 10. : 2022년 택시 감차 계획 수립

❍ 2022. 10. : 진주시 택시 감차 계획 고시 및 감차대상자 모집 공고

❍ 2022. 11. :	택시감차보상사업 계약 체결 및 감차 보상금 지급

❍ 2022. 11. :	택시 면허대수 감차 조치 및 계약자 인센티브 지급 신청

❍ 2023. 3. : 2023년 택시 감차대상자 모집 공고

❍ 2023. 4. : 택시 감차보상사업 계약 체결 및 보상금 지급

❍ 2023. 5. : 택시 면허대수 감차 조치 및 인센티브 지급 신청

□ 향후계획

❍ 2024. 1. ~ : 택시 감차위원회 개최 및 수정 계획 수립

교통안전

시설물

설치 및 정비

❍ 위    치 : 진주시 관내

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 2,617백만원

❍ 사업내용

- 교통안전시설물 설치 및 정비 1식

□ 추진사항

❍ 신호등 설치 및 교체
: 14개소(설치 9, 교체 5)

❍ 횡단보도 LED 바닥 신호등 설치 : 3개소

❍ 읍면동 노후 차선 도색 : 18개소(66km)

❍ 기타 교통시설물(시선유도봉, 표지판 등) 설치 및 정비

□ 향후계획

❍ 2023. 11. : 횡단보도 LED 바닥 신호등 설치

❍ 2023. 12. : 노후차선 도색(2개소)

❍ 교통시설물 설치 및 정비 상시 추진

우수저류

시설

상부활용

공영주차장

조성

❍ 위치 : 초전동 1679번지 외 2개소

❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 2023. 11.

❍ 사 업 비 : 7,708백만원

❍ 사업내용

- 공영주차장 조성 : 3개소 255면

(초전 59, 평거 76, 가좌 120)

□ 추진사항

❍ 2022.  8. : 준공(평거)

❍ 2022. 10. : 준공(초전)

❍ 2022. 10. : 추경예산편성(30억원)

❍ 2023.  1. : 착공(가좌)

❍ 2023. 11. : 준공(가좌)

공영주차 장

조성

(소규모)

❍ 소규모 노상･노외 공영주차장 조성

- 대 상 지 : 진주시 관내

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

- 사 업 비 : 200백만원

❍ 유휴지 활용, 부설주차장 개방

- 대 상 지 : 관내 유휴지 및 학교, 공공기관 등

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

- 사 업 비 : 110백만원

□ 추진사항

❍ 노상주차장 설치(2개소/36면)

❍ 노외주차장 설치(8개소/106면)

❍ 유휴지 활용(5개소/53면)

❍ 부설주차장 개방(2개소/74면)

□ 향후계획

❍ 소규모 공영주차장 조성사업 상시 추진

오목내

문화시설

조성

(주차시설)

❍ 위치 : 평거동 660-5번지 일원

❍ 사업기간 : 2020. ~ 2025.

❍ 사 업 량 : 노외주차장 조성

- 2개소, 면적 14,233㎡, 227면

❍ 사 업 비 : 16,000백만원

□ 추진사항

❍ 2022.  2. : 타당성 재조사 완료

❍ 2022.  3. : 지방재정투자심사 완료

❍ 2023.  6. : 부지보상비 지급(7명 56억원)

□ 향후계획

❍ 2023. 11. : 실시계획인가 변경

❍ 2024.  6. : 부지보상 완료

❍ 2024.  7. : 실시설계용역 착수

❍ 2024. 12. : 실시설계용역 완료

❍ 2025.  1. : 착공

❍ 2025. 12. : 준공

구)하대1동

공 영 주 차 장

조성

❍ 위치 : 하대동 343-17번지

❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 3,300백만원

❍ 사업내용

- 노외주차장 조성

: 43면, A=1,334㎡

□ 추진사항

❍ 2023.  4. : 제1회 추경예산편성

❍ 2023.  6. : 부지보상 완료

❍ 2023.  7. : 실시설계용역 착수

❍ 2023.  9. : 실시설계용역 완료

❍ 2023. 10. : 착공

□ 향후계획

❍ 2023. 12. : 준공

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 부강한 진주 건설을 위한 안전 교통도시 만들기

❍ 교통안전도시 시책 추진, 교통안전시설 확충 및 어린이 교통안전교육 강화

□ 인구 50만 자족도시 대비한 대중교통 체계 구축

❍ 대중교통 광역시스템 구축 추진

□ 시민이 행복한 대중교통 기반체계 정비

❍ 시내버스 운송관리·운행기록·정보관리 시스템 개선

□ 원활한 교통 소통 등 쾌적한 안전한 교통환경 조성

❍ 교통신호 제어시스템 구축과 불법 주정차 근절 추진

□ 도심지 주차시설 조성으로 주민 불편 해소 및 삶의 질 향상

❍ 공영주차장 조성 등 주차공간 확보를 위한 장·단기 대책 추진

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	11	92,290	7	-	3	1
일반시책사업	2	4,100	1	-	1	-
주요예산사업	9	88,190	6	-	2	1

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

청소년 시내버스 무료 승차 시행

청소년을 대상으로 시내버스 무료 승차를 시행하여 청소년의 이동권을 보장하고 우리 시의 대중교통 활성화 및 저비용 사회 구현

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 관내 시내버스를 이용하는 만 18세 이하 청소년(어린이 포함)

❍ 사업기간 : 2022년 ~ (계속)

❍ 사 업 비 : 4,100백만원(매년)

□ 추진상황

❍ 2021. 9. ~ 2023. 12. : 진주시 제4차 지방대중교통계획 수립 용역

- 주요내용 : 광역환승할인제 특화도시 조성, 청소년 시내버스 요금 할인 등

□ 추진계획

❍ 2023. 9. ~ 12. : 사회보장제도 신설 협의(보건복지부)

❍ 2024. 상반기  : 결제시스템 개발 완료, 관련 조례 제정

❍ 2024. 하반기  : 청소년 대상 시내버스 무료화 시행

□ 기대효과

❍ 어린이 및 청소년의 기본적인 교통 이동권을 보장하는 교통복지 제공

❍ 대중교통 활성화로 탄소 배출 절감에 기여하는 친환경 교통정책 실현

불법 주·정차 단속 및 주차 질서 확립

도로 위의 불법 주·정차로 발생하는 교통상의 위험과 장해를 제거하여 안전하고 원활한 교통흐름을 확보하기 위함

□ 사업개요

❍ 단속장비현황	(단위 : 대)

구분	고정식CCTV	이동식CCTV	시내버스탑재형CCTV (130번, 251번, 350번)	비 고
대수	72	4	9 (노선별 3대)	연중무휴 단속
단속시간	08:00 ~ 20:00	07:00 ~ 20:00	08:00 ~ 20:00
점심시간 유예	일부구간 실시 (어린이보호구역, 주요간선도로 제외)

❍ ｢안전신문고｣ 앱 운영 : 시민 누구나 앱을 이용하여 주민신고 가능

- 신고대상 :6대 불법 주·정차 금지구역, 이중주차, 안전지대, 황색복선구간

※ 6대 불법 주·정차 금지구역 : 어린이보호구역, 소화전, 교차로 모퉁이, 버스정류장, 횡단보도, 인도

- 신고방법 : 1 ~ 5분 이상 불법 주·정차 차량 동일방향 사진 2장 촬영 신고

□ 추진상황(2023. 1. 1. ~ 10. 31.)

❍ 단속현황	(단위 : 건)

계	고정식	이동식	버스탑재형	주민신고제	비 고
75,498	43,143	11,846	1,182	19,327

❍ 과태료 부과·징수현황	(단위 : 백만원)

부과액	징수액	미납액	징수율 (%)	비 고
2,642	2,094	548	79.26

□ 추진계획

❍ 교통흐름 방해로 안전사고 발생 우려가 있는 주요 간선도로변 단속강화

❍ 주택가 이면 도로는 계도 위주의 단속 및 홍보활동 병행

❍ 주민신고제(안전신문고 앱) 활성화

□ 기대효과

❍ 교통흐름을 방해하는 불법 주·정차 단속으로 주차질서 확립

❍ 보행권 확보 및 원활한 교통소통으로 시민의 안전 확보

어린이교통공원 및 청소년모험공원 운영

어린이 교통안전 교육 실시로 교통안전에 대한 경각심 고취 및 준법질서 의식을 함양시켜 건전한 교통문화 환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

❍ 위치 및 규모 : 진주시 삼계로 531(평거동) / 부지 20,312㎡

❍ 주요시설

- 어린이교통공원 : 실내·외교육장(전시실 및 영상 홍보관 외 5개소)

- 청소년모험공원 : 인라인스케이트장, X게임장, 자전거 전용도로

❍ 이용대상 : 관내·외 어린이 및 청소년

❍ 이용방법 : 홈페이지 예약 또는 방문접수 / 무료

❍ 운 영 비 : 210백만원

□ 이용현황	(단위 : 명)

구 분	계	어린이	청소년	일 반
2023년 10월	19,920	13,492	1,292	5,136
2022년	25,677	16,110	1,957	7,610
2021년	9,610	6,448	635	2,527

□ 추진계획

❍ 2023. 12. : 민간위탁 재위탁(2024 ~ 2025년) 수탁자 공개입찰

❍ 어린이 교통안전교육 실시(연중) : 초등학교, 유치원, 어린이집 대상

❍ 찾아가는 어린이, 어르신 교통안전 교실 : 비수기(7 ~ 8월 / 12 ~ 2월)

□ 기대효과

❍ 어린이 교통안전 교육 실시로 건전한 교통문화 정착

❍ 다양하고 특색 있는 교통안전 체험 학습 환경 제공으로 교육효과 극대화

시내버스 재정지원금 지원사업

업체 간 과다한 운송경쟁과 불친절 개선 등 운수업체의 안정적인 시내버스 운행을 위하여 재정지원금을 지원하고자 함

□ 사업개요

❍ 지원근거 : 여객자동차 운수사업법 제50조(재정 지원)

❍ 지원대상 : 4개 업체 94개 노선 268대(부산 31, 부일 49, 삼성 100, 시민 88)

❍ 지원방법

- 진주시 표준운송원가에 따라 수입금 제외한 재정지원
(2024년 평일 일반차량 기준 표준운송원가 683천원/대)

- 서비스 및 경영평가에 따라 평가 재정지원금 차등 지원
(표준운송원가의 인건비 5% 적립 → 2023년도 1,800백만원 예상)

❍ 사업비 : 24,500백만원(시비 100%)

□ 추진상황

❍ 2023. 1. ~ 12. : 매월 경유, CNG, 차량변동 등을 반영한 재정지원

❍ 2023. 2. ~ 12. : 암행평가단 운영(3단계, 120명)

❍ 2023. 5. ~ 12. : 2021~2022년 시내버스업체 회계 및 경영서비스평가 용역 시행

□ 추진계획

❍ 2021~2022년분 업체별 차등지원금 정산 및 지급 : 2023. 12.

❍ 표준운송원가 적용 업체별 재정지원금 지원     : 2024. 1. ~ 12.

❍ 평가 및 분석결과를 통한 재정지원금 차등 지원 : 2024. 하반기

□ 기대효과

❍ 재정지원금 합리적 지원으로 업체의 안정적인 경영에 기여

❍ 재정지원금 차등 지원으로 업체별 대중교통 서비스 향상 유도

광역환승할인제 특화도시 조성

지리적으로 사통팔달의 교통 중심 도시로서 역할과 스마트 시스템을 이용한 전국 최고의 대중교통 이용 특화도시 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 전국 단위

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2025년(계속)

❍ 사업내용 : 대중교통을 이용해 진주시를 방문한 외래 방문객 환승 시
요금할인 혜택 제공

- 교통수단 : 철도, 시외·고속버스, 시내버스, 택시, DRT, PM 등

- 할인금액 : 일반 1,450원, 청소년 950원, 어린이 700원 / 시내버스 카드요금 기준

❍ 사 업 비 : 2,700백만원(시스템 개발비 1,200, 손실보상금 1,500)

- 사업비는 국·도비, 민자 등 확보 여건에 따라 변동될 수 있음

□ 추진상황

❍ 2021. 9. ~ 2023. 12. : 진주시 제4차 지방대중교통계획 수립 용역

- 주요내용 : 광역환승할인제 특화도시 조성, 청소년 시내버스 요금 할인 등

□ 추진계획

❍ 2024. 1. ~  6. : 관련기관 추진 협의(국토부, 도, 코레일 등)

❍ 2024. 7. ~  8. : 세부 추진 계획 수립(예산 확보 등)

❍ 2024. 9. ~ 12. : 시스템 개발

❍ 2025. 상반기  : 시행

□ 기대효과

❍ 진주시민 및 외래 방문객의 교통요금 절감으로 대중교통 이용 활성화

❍ 전국 최고의 스마트 대중교통 인프라 구축으로 머물고 싶은 도시여건 마련

시내버스 공영차고지 조성

권역별 기점지를 겸할 수 있는 시내버스 공영차고지의 부족상황 및 위치불균형을 해결하기 위하여 공영차고지를 신설·확충하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 집현면 신당리 106번지 일원

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2024년

❍ 사 업 량 : 시내버스 공영차고지 조성(부지면적 25,483㎡, 건축연면적 1,195㎡)

* 주요시설 : 관리동, 정비고, 세차시설, 충전시설, 버스박차공간(100면) 등

❍ 사 업 비 : 15,900백만원(국비 1,340, 시비 14,560)

□ 추진상황

❍ 2021.  7. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료

❍ 2022. 11. : 진주시 중기지방재정계획 반영

❍ 2023.  2. : 지방재정 투자심사(도) 승인

❍ 2023.  4. : 시내버스 공영차고지 국토교통부 지원사업 신청(균특)

❍ 2023.  7. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시

❍ 2023.  9. ~ : 기본구상용역 착수

❍ 2023.  9. ~ : 토지 등 보상계획 공고

□ 추진계획

❍ 2023. 11. ~ : 사업부지 감정평가 및 부지매입 절차 이행

❍ 2024.  1. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2024.  7. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

❍ 시내버스 차고지 주차 부족 문제를 해소하고 차고지 위치 불균형 해소를 통한 노선 운용 및 공차 운행의 비효율성 개선

수요응답형 브라보 행복택시 운영

대중교통 소외지역의 주민 요구에 맞춘 브라보 행복택시 확대 운영을 통해 주민 교통복지를 실현하고자 함

□ 사업개요

❍ 대    상 : 13개 읍·면 41개 마을(금곡, 일반성, 대평면 제외)

❍ 운영기간 : 2019. 10. ~ 계속

- 운행구간 : 마을회관 ⇔ 면소재지 또는 인근 생활권

- 운행방법 : 수요응답형(1인당 8회 부여)

- 운행대수 : 57대(개인 35, 법인 22)

- 탑승요금 : 100원/1인

- 운행지원 : 노선별 협정요금 - 탑승요금 = 운행지원금 지원

❍ 사 업 비 : 연간 600백만원

□ 추진상황

❍ 2019. 10. ~ 12. : 브라보 행복택시 시범운영(12개 면 31개 마을)

❍ 2020.  2. ~  9. : 브라보 행복택시 운영평가 및 확대방안 용역 시행

❍ 2020. 10. ~ 11. : 확대 요구마을 주민 순회간담회 및 현지 실사를 통한 계획 수립

❍ 2020. 12. : 브라보 행복택시 확대 운영(6개 읍·면 7개 마을)

❍ 2021. 10. ~ 12. : 운송사업자(한정면허) 공개모집 및 교육

❍ 2022.  3. ~ : 브라보 행복택시 일부 확대(대곡면 2개, 이반성면 1개 마을)

❍ 2023.  3. ~ : 수요응답형 개편 운영 준비

❍ 2023.  7. : 수요응답형 시범 운영(대곡면)

□ 추진계획

❍ 2023. 11. ~ : 수요응답형 개편 정상 운영

❍ 브라보 행복택시 추가 대상마을 지속 발굴

□ 기대효과

❍ 주민 맞춤형 교통편의 제공으로 교통복지 혜택 확대 실현

❍ 택시업계 수익 보장으로 경영난 해소 및 지역 내 택시 초과공급 완화에 기여

택시 운수종사자 행복키움 사업

법인택시 종사자 중 장기근속자에게 인센티브를 지급하여 시민에게 더 나은 양질의 서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 400여 명

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 계속

❍ 사업내용 : 5년 이상 근속자 중 법규준수자에게 반기별 30만원 인센티브 지급

❍ 사 업 비 : 360백만원

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 2023년 택시 운수종사자 행복키움 사업 시행계획 수립

❍ 2024.  2. : 2023년 2분기 대상자 서류 접수 및 심사 확정

❍ 2024.  2. : 대상자 인센티브 지급

❍ 2024.  7. : 2024년 1분기 대상자 서류 접수 및 심사 확정

❍ 2024.  7. : 대상자 인센티브 지급

❍ 2024. 12. : 2024년 2분기 대상자 서류 접수 및 심사 확정

❍ 2024. 12. : 대상자 인센티브 지급

□ 기대효과

❍ 부제 해제로 인해 어려움을 겪고 있는 법인택시 운수종사자의 고용안정

❍ 법규준수 유도를 통한 교통사고 예방 및 대시민 서비스 향상

사업용자동차 유가보조금 지원사업

정부의 에너지 세제개편에 따른 유류세 인상분의 일부(전부)를 여객 및 화물 운송사업자에게 사업용자동차 유가보조금으로 지원하고자 함

□ 사업개요

❍ 지원시기 : 2002년부터 지속

❍ 지원대상 : 4,646대(버스 463 / 택시 1,362 / 사업용 화물자동차 2,821)

계	버 스			택 시		화 물
	시내	시외	전세	개인	법인	일반	개인
4,646	209 (CNG 122)	253	1	773	589	1,549	1,272

※ 전기자동차 제외(미포함) : 392대(시내버스 59, 개인택시 233, 법인택시 50, 개인화물 50)

❍ 사 업 비 : 28,000백만원

※ 재원 : 정유회사 유류 출고 시 자동차주행세 징수액의 지자체별 안분액

□ 추진상황

❍ 유가보조금 지급 : 월 1회	(2023. 11. 1. 현재, 단위 : 백만원)

연 도	총사업비	집행금액	집행잔액	비 고
2023년	28,000	8,573	19,427

※ 2023년 11월 현재 지급기준 단가(ℓ, ㎥, ㎏당) : 국토교통부 고시

- 경유 : 시내·시외·일반고속버스 167.60원, 우등고속버스·화물 152.37원

- LPG : 택시 120.73원 / CNG : 노선버스 65.30원, 전세버스 32.65원

- 수소 : 노선 및 전세버스 3,500원

※ 유류세 인하(37%)로 유가보조금 지급단가 인하 및 집행잔액 과다 발생
→ 3차 추경 시 15,000백만원 감액

□ 추진계획

❍ 매월 신청 접수한 유가보조금 정기적 지급 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 유가보조금 부정수급 조사 및 행정처분 : 수시

오목내 문화시설 조성(주차시설)

｢오목내 유원지 개발사업｣의 추진에 따라 유원지 내 각종 시설을 이용하는 관광객들의 이용 편의 증진을 위한 공영주차장 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 평거동 660-5번지 일원

❍ 사업기간 : 2020 ~ 2025년

❍ 사 업 량 : 노외주차장 조성(2개소, 면적 14,233㎡, 주차면수 227면)

❍ 사 업 비 : 16,000백만원(시비 16,000)

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2023년 하반기	2024년		2025년 이 후
				본예산	추 경
시 비	16,000	6,500	3,500		4,000	2,000

□ 추진상황

❍ 2021.  3. ~ 2022.  2. : 행정안전부 타당성 재조사(도시계획과)

❍ 2022.  3. : 지방재정투자심사 완료

❍ 2023.  6. : 부지보상비 지급(7명 56억원)

□ 추진계획

❍ 2023. 11. : 실시계획인가 변경

❍ 2024.  6. : 부지보상 완료

❍ 2024.  7. : 실시설계용역 착수

❍ 2024. 12. : 실시설계용역 완료

❍ 2025.  1. : 착공

❍ 2025. 12. : 준공

□ 기대효과

❍주차 공간 확보로 유원지 내 각종 시설물 이용자 및 관광객들의 이용 편의 증진

이현동 공영주차장 조성

도심지 내 주차 공간 확보로 시민들의 주차 편의 제고 및 불편 해소를 위해 이현동 주민자치센터 인근에 공영주차장을 조성하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 이현동 11-3번지 등 7필지

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 사 업 량 : 공영주차장 조성 1개소(A=1,120㎡, 40면)

❍ 사 업 비 : 2,500백만원(도비(전환) 1,250, 시비 1,250)

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2024년
		본예산	추 경
계	2,500	2,500
도 비	1,250	1,250
시 비	1,250	1,250

※ 사업비는 국ㆍ도비, 민자 등 확보 여건에 따라 변동될 수 있음

□ 추진상황

❍ 2023.  4. : 공영주차장 조성 건의 및 주민의견 수렴

❍ 2023.  7. : 2024년도 지방전환사업(주차환경개선지원) 예산 신청

❍ 2023. 10. : 지방재정투자심사 및 공유재산 심의 의뢰

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 당초 예산 확보

❍ 2024.  4. : 부지보상 완료

❍ 2024.  7. : 실시설계용역 완료

❍ 2024.  8. : 착공

❍ 2024. 12. : 준공

□ 기대효과

❍ 주차시설 확보로 시민들의 주차 편의 제고 및 정주 여건 개선

불법주정차 단속 문자알림서비스 구축

불법주정차 최초 적발 시 단속안내문자를 발송하여, 시민들과 관광객들이 주정차금지구역을 인지하게끔 하여, 올바른 주정차 문화 정착과 안전한 교통·보행환경을 만들기 위함

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 불법주정차 단속용 CCTV 76대(고정식 72대, 이동식 4대)

❍ 수혜대상 : 주정차단속 알림서비스 앱 가입자(거주지 무관)

❍ 사업내용 : 불법주정차 단속 문자알림서비스 1식

※ 불법주정차 단속 문자알림 서비스란? 불법주정차 단속용 CCTV에 최초 단속된 차량 운전자에게 단속문자를 발송하여 자발적으로 차량을 이동할 수 있도록 안내하는 서비스

❍ 사 업 비 : 120백만원

❍ 도내 사업추진 현황  ※ 전국 243개 지자체 중 150개 지자체 서비스 시행

도입(12)		미도입(6)
시부(6)	군부(6)	시부(2)	군부(4)
창원, 김해, 양산, 통영, 거제, 사천	함양, 함안, 창녕, 고성, 남해, 하동	진주, 밀양	산청, 거창, 합천, 의령

□ 추진상황

❍ 2023. 9. : 불법주정차 문자알림 서비스 계획 수립

□ 추진계획

❍ 2024. 1. : 사업 시행(조달계약 등)

❍ 2024. 2. : 서비스 시범운영

❍ 2024. 3. : 서비스 제공

□ 기대효과

❍ 주정차금지구역에 대해 시민이 스스로 인지하며 올바른 주정차 문화 확립

환경관리과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황(6개 팀 : 환경행정, 대기개선, 생활환경, 수질개선, 수계관리, 자전거도시)

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	31	1	8	9	7	6
현 원	31	1	7	10	6	7	공 무 직 5 환경공무직 1
증 감	-	-	△1	1	△1	1

□ 위원회	(2023. 10. 31. 현재)

구 분 위원회명	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원중 여 성 위원수	％
			계	공무원	％	민간인	％
진주시지속 가능발전 협의회	50	4	46	-	-	46	100	26	57
진주시2050 탄소중립녹색성장위원회	20	6	14	-	-	14	100	6	43

□ 예산규모	(단위 : 억원)

구 분		2022년	2023년	증 감	비 고
총 계		979	763	△216
일반회계		848	609	△239
특별회계	소 계	131	154	23
	수질개선	103	119	16
	지하수관리	4	3	△1
	공공폐수	24	32	8

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄	(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	49	10	39	-	-
예산사업	44	10	34	-	-
비예산사업	5	-	5	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업  ---  10건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주 요 성 과
자전거도로 개설	❍ 구)수목원역 ~ 함안경계 자전거도로 개설 - 위 치 : 일반성면, 이반성면 일원 - 사업량 : L=7.3km, B=5.5m - 사업비 : 3,800백만원 - 기 간 : '21. 7. ~ '23. 8.	□ 추진사항 ❍ '21. 7. : 공사 착공 ❍ '23. 8. : 공사 준공	❍ 경전선 폐부지를 활용하여 동서축을 잇는 자전거 도로망 구축
	❍ 금산 속사제 자전거도로 정비공사 - 위 치 : 금산면 속사리 일원 - 사업량 : 자전거도로 개설 L=450m - 사업비 : 800백만원 - 기 간 : '23. 2. ~ '23. 5.	□ 추진사항 ❍ '23. 2. : 공사 착공 ❍ '23. 5. : 공사 준공	❍ 자전거도로와 농로를 분리함으로써 차와 자전거의 안전 사고 위험 최소화
자전거도로 개설	❍ 초전동 농업기술원 인근 자전거도로 보수 - 위 치 : 초전동 일원 - 사업량 ·흙콘크리트 A=957㎡ ·칼라아스콘 A=711㎡ - 사업비 : 200백만원 - 기 간 : '23. 5. ~ '23. 8.	□ 추진사항 ❍ '23. 5. : 공사 착공 ❍ '23. 8. : 공사 준공	❍ 노후된자전거도로를 보수하여 자전거 이용 안전 개선
	❍ 충무공동 자전거도로 보수공사 - 위 치 : 충무공동 일원 - 사업량 ·자전거도로 보수 2,772㎡ ·볼라드 설치 12개소 - 사업비 : 260백만원 - 기 간 : '23. 5. ~ '23. 8.	□ 추진사항 ❍ '23. 5. : 공사 착공 ❍ '23. 8. : 공사 준공	❍ 노후된자전거도로를 보수하여 자전거 이용 안전 개선
	❍ 내동면사무소~유동마을 가로등 설치공사 - 위 치 : 내동면 일원 - 사업량 : 가로등 설치 122개소 - 사업비 : 450백만원 - 기 간 : '23. 3. ~ '23. 6.	□ 추진사항 ❍ '23. 3. : 공사 착공 ❍ '23. 6. : 공사 준공	❍ 가로등설치를 통해 자전거 야간 통행의 편의성 증대
	❍ 문산 LH행복주택~신촌마을 조명 설치공사 - 위 치 : 문산읍 삼곡리 일원 - 사업량 : 조명 설치 55개소 - 사업비 : 150백만원 - 기 간 : '23. 4. ~ '23. 7.	□ 추진사항 ❍ '23. 4. : 공사 착공 ❍ '23. 7. : 공사 준공	❍ 가로등설치를 통해 자전거 야간 통행의 편의성 증대
자전거도로 개설	❍ 나불천 자전거도로 안전개선공사 - 위 치 : 이현동 일원 - 사업량 : 자전거도로 포장 1식 - 사업비 : 200백만원 - 기 간 : '23. 8. ~ '23. 10.	□ 추진사항 ❍ '23. 8. : 공사 착공 ❍ '23. 10. : 공사 준공	❍ 자전거도로 안전시설을 보강함으로써 자전거이용 안전 개선
	❍ 희망교 자전거도로 자동차단시설 설치 - 위 치 : 내동면 일원 - 사업량 : 자동차단시설 설치 1식 - 사업비 : 200백만원 - 기 간 : '23. 5. ~ '23. 9.	□ 추진사항 ❍ '23. 5. : 공사 착공 ❍ '23. 9. : 공사 준공	❍ 집중호우 및 남강댐 방류 시 사전 정보안내를 통해 안전과 생명 보호
	❍ 진주~사천 광역자전거도로 개설 - 위 치 : 정촌면 일원 - 사업량 : L=0.9km, B=3.0m - 사업비 : 500백만원 - 기 간 : '22. 11. ~ '23. 9.	□ 추진사항 ❍ '22. 11. : 공사 착공 ❍ '23. 9. : 공사 준공	❍ 진주시와 사천시를 연결하는 광역 자전거도로 개설을 통한 지역 간 교류 활성화 및 자전거 이용 활성화
쿨 루 프 지 원 사업	❍ 쿨루프 지원사업 - 대 상 : 단독주택 - 사 업 량 : 9가구 - 사 업 비 : 13.5백만원 - 지원기준 : 150만원/세대	□ 추진사항 - 쿨루프 지원사업 : 9가구, 13.3백만원 □ 향후계획 - 보조금 정산 : 2023. 12.	❍ 쿨루프 지원 사업을 통해 냉방비 절감 및 폭염 피해예방

□ 추진중 사업  ---  39건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
야생동물 피해예방 및 보상지원 사업	❍ 피해예방시설 설치비 지원사업 - 사 업 비 : 304백만원 - 지원금액 : 설치비의 60% (최대 5백만원)	□ 추진사항 ❍ 지원사업 신청서 접수 및 지원대상자 심의 확정 : '23. 2. ~ 3. - 확정현황 : 107건/299백만원 ❍ 준공검사 및 보조금 지원 : '23. 4. ~ 12. - 지원시설 : 철망울타리 103, 전기목책기 4 □ 향후계획 ❍ 보조금 지급 : '23. 11. ~ 12.
	❍ 야생동물로 인한 농작물 피해보상 지원 - 사 업 비 : 17백만원 - 지원금액 : 피해액의 40~80%	□ 추진사항 ❍ 피해보상 신청 : 65건/26백만원 ❍ 피해보상금 지급 : 52건/15백만원 □ 향후계획 ❍ 피해보상신청 접수 및 보상금 지급 : '23. 11. ~ 12.
환경개선 부담금 부과·징수	❍ 부과대상 : 경유자동차 ❍ 부과횟수 : 연간 2회 - 1기분 : 3월 - 2기분 : 9월	□ 추진사항 ❍ 2023년도 부과 현황 - 28,984건/1,344백만원 ❍ 2023년도 징수 현황 - 23,444건/1,107백만원(82%) □ 향후계획 ❍ 체납자 납부독려 및 압류 조치 : '23. 12.
탄소배출량 감축을 통한 기후변화 대응	❍ 폐기물 부문 온실가스 배출권 관리 용역 - 목 적 : 공공분야 온실가스 배출량 관리 - 대 상 : 53개 시설 (하수처리장, 매립장, 정수장 등) - 사 업 비 : 44백만원 ※ 배출권 : 이산화탄소 1톤당 12,000원 거래	□ 추진사항 ❍ 지정일 : '15. 7. 25. ❍ 1차 계획기간 : '15 ~ '17년 - 할당량 준수 ❍ 2차 계획기간 : '18 ~ '20년(3년) - 할당량 준수 ❍ 3차 계획기간 : '21 ~ '25년(5년) - 대상시설 : 53개 시설 ❍온실가스 배출량 산정 및 모니터링 용역 시행 - 업 체 명 : 카이트엔지니어링 외 1 - 용 역 비 : 44백만원 - 용역기간 : '23. 1. ~ 12. □ 향후계획 ❍ 배출량 명세서 검증 용역 진행
	❍ 탄소중립포인트제 운영 - 대상 : 공동, 일반주택 - 항목 : 전기,수도,도시가스 - 참여방법 : 탄소중립포인트 홈페이지 이용 또는 서면신청 - 인센티브 지급 : 2회/년 ※ 1포인트 = 1~2원으로 환산 지급 - 사업비 : 94백만원	□ 추진사항 ❍ 가입자 수 : 9,920세대 ❍ 상반기 인센티브 지급 : 3,204세대/40백만원 ❍ 아파트 내 가입 홍보부스 운영 □ 향후계획 ❍ 탄소중립포인트제 가입 홍보 : 공동주택 순회 홍보 ❍ 하반기 인센티브 지급 : '23. 12.
	❍ 자동차 탄소중립포인트제 운영 - 대상 : 비사업용 승용･ 승합차 ※ 주행거리 감축률에 따라 2~10만원 - 사 업 량 : 492대 - 사 업 비 : 25백만원 - 지급주기 : 연 1회	□ 추진사항 ❍ 가입자 수 : 492대 ※ 우리 시 할당대수 100% 가입 □ 향후계획 ❍ 인센티브 지급 : '23. 12.
가정용 친환경 보일러 설치지원	❍ 가정용 친환경보일러 설치 지원 - 지원대상 : 주택소유자 - 사 업 량 : 4,600대 - 지원금액 ·일반 10만원/세대 ·저소득 60만원/세대 - 사 업 비 : 510백만원	□ 추진사항 ❍ 친환경보일러 설치 지원 : 2,650가구/276백만원 □ 향후계획 ❍ 대상자 추가 선정 및 보조금 지급 : '23. 11. ~ 12.
슬레이트 처리지원 및 지붕개량사업	❍ 지원대상 : 슬레이트 건물 ❍ 슬레이트 처리 - 사 업 량 : 241세대 - 사 업 비 : 897백만원 - 지원기준 ·주 택 : 3,520천원/세대 ·비주택 : 200㎡ 이하/세대 ❍ 지붕개량 - 사 업 량 : 20세대 - 사 업 비 : 125백만원 - 지원기준 ·일반 : 300만원/세대 ·우선지원가구 : 1,000만원/세대	□ 추진사항 ❍ 지원대상 접수 : '23. 1. ~ 2. ❍위탁업체 선정 및 슬레이트 해체 공사 발주 : '23. 3.(10개 권역) ❍ 슬레이트 처리 및 지붕 개량 - 주택 슬레이트 처리 : 220세대 - 비주택 슬레이트 처리 : 19세대 - 지붕 개량 : 15세대 □ 향후계획 ❍ 슬레이트 처리 공사 준공 : '23. 12.
전기버스 구매지원	❍ 전기버스 보급 확대 - 사업대상 : 시내버스 - 사 업 량 : 34대 - 지원금액 : 140백만원/대 - 사 업 비 : 4,760백만원	□ 추진사항 ❍ 전기버스(시내버스) 보급 : 21대/2,940백만원 □ 향후계획 ❍ 대상자 추가 선정 및 보조금 지급 : '23. 11. ~ 12.
전기자동차 보급사업	❍ 전기승용차 보급 확대 - 사 업 량 : 525대 - 지원금액 : 최대 12.8백만원/대 - 사 업 비 : 5,579백만원	□ 추진사항 ❍ 전기자동차 보급 : 460대/4,911백만원 □ 향후계획 ❍ 보조금 지급 : '23. 11.
	❍ 전기화물차 보급 확대 - 사 업 량 : 630대 - 지원금액 : 18백만원/대 - 사 업 비 : 10,754백만원	□ 추진사항 ❍ 전기화물차 보급 : 483대/9,828백만원 □ 향후계획 ❍ 대상자 추가 선정 및 보조금 지급 : '23. 11. ~ 12.
	❍ 전기이륜차 보급 확대 - 사 업 량 : 115대 - 지원금액 : 평균 160만원/대 - 사 업 비 : 182백만원	□ 추진사항 ❍ 전기이륜차 보급 : 19대/37백만원 □ 향후계획 ❍ 대상자 추가 선정 및 보조금 지급 : '23. 11. ~ 12.
수소자동차 보급사업	❍ 수소자동차 보급 확대 - 사 업 량 : 48대 - 지원금액 : 33.1백만원/대 - 사 업 비 : 1,588백만원	□ 추진사항 ❍ 수소자동차 보급 : 18대/595백만원 □ 향후계획 ❍ 대상자 추가 선정 및 보조금 지급 : '23. 11. ~ 12.
수소차 충전시설 운 영	❍ 수소차 충전시설 운영 - 위치 : 판문로 194 (서진주충전소 부지 내) - 사 업 비 : 293백만원 - 위탁업체 : ㈜진주 수소충전소	□ 추진사항 ❍ 수소충전소 운영 : '21. 4. ~ 계속
운행차 배출가스 저감사업	❍ 노후경유차 조기폐차 지원 - 사업대상 : 배출가스 4, 5등급 경유차 - 사 업 량 : 1,839대 - 사 업 비 : 5,806백만원 - 지원금액 : 차종별 최대 300~10,000만원	□ 추진사항 ❍ 노후경유차 조기폐차 선정 : 1,596대/5,606백만원 ❍ 노후경유차 조기폐차 지원 : 1,303대/3,391백만원 □ 향후계획 ❍ 보조금 지급 : '23. 11. ~ 12.
	❍ 경유차 저감장치 부착사업 - 사업대상 : 배출가스 5등급 경유차 - 사 업 량 : 200대 - 사 업 비 : 660백만원 - 지원금액 : 차종별 최대 292~632만원	□ 추진사항 ❍ 저감장치 부착지원 대상자 선정 : 179대/590백만원 ❍ 저감장치 부착지원 : 89대/284백만원 □ 향후계획 ❍ 선정자 보조금 지급 : '23. 11. ~ 12.
운행차 배출가스 저감사업	❍ LPG 화물차 신차구입 지원 - 사업대상 : 경유차 폐차 후 LPG 1톤 화물차 구매자 - 사 업 량 : 179대 - 사 업 비 : 223백만원 - 지원금액 : 100만원/대 ※ 2022년 지원금액:200만원/대	□ 추진사항 ❍ LPG 화물차 신차 구매 선정 : 19대/19백만원 ❍ LPG 화물차 신차 구매 지원 : 14대/24백만원 (※ 2022년 대상 포함 : 10명×200백만원) □ 향후계획 ❍ 선정자 보조금 지급 : '23. 11. ~ 12.
	❍ 건설기계 엔진교체 사업 - 사업대상 : Tier-1 이하 엔진을 탑재한 지게차, 굴착기 - 사 업 량 : 113대 - 사 업 비 : 2,449백만원 - 지원금액 : 차종별 9,628 ~ 19,295천원	□ 추진사항 ❍ 건설기계 엔진교체 대상자 선정 : 107대/1,532백만원 ❍ 건설기계 엔진교체 지원 : 114대/1,435백만원 (※ 2022년 대상 포함 : 43대) □ 향후계획 ❍ 보조금 지급 : '23. 11. ~ 12.
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	❍ 지원대상 - 대기배출업소 1~5종 사업장 (중소기업) ❍ 사 업 량 : 30개소 ❍ 사 업 비 : 218백만원 ❍ 지원기준 - 방지시설 종류·용량별 산정금액 기준별 지원 - 사물인터넷 부착기기 설치비 지원 - 저녹스버너 설치 지원 ❍ 지원금액 - 시설(기기) 교체비용의 90% 지원	□ 추진사항 ❍ 사업 신청 공고 : '23. 2. ❍ 사업 승인 현황 : 26개소, 183백만원 ❍ 사업 완료 현황 - 소규모 방지시설 교체 지원 : 2개소, 38백만원 - 사물인터넷 부착 지원 : 14개소, 76백만원 - 저녹스버너 설치 지원 : 1개소, 7백만원 □ 향후계획 ❍ 사업완료 확인 후 보조금 지급
대기･소음 배출업소 관리	❍ 배출업소 현황 : 354개소 - 대기 : 252개소 - 소음·진동 : 102개소 ❍ 정기 점검 - 대상업소 수 : 139개소 ·대기 : 102개소 ·소음·진동 : 37개소 ❍ 환경기술인 교육 : 133명	□ 추진실적 ❍ 배출업소 점검 실적 - 점검업소 : 109개소 - 위반업소 : 10개소 (대기 8개소, 소음･진동 2개소) - 행정조치 : 10개소 (사용중지 1, 과태료 8, 고발 1) ❍ 환경기술인 교육 : 113명 □ 향후계획 ❍ 하반기 지도점검 : 30개소 ❍ 환경기술인 교육 : 20명
비산먼지 발생 사업장 관리	❍ 사업장 현황 : 155개소 - 건설업 : 126개소 - 비금속물질 채취 제조 가공업 : 16개소 - 시멘트 제조업, 가공 및 저장업 : 10개소 - 1차금속 제조업 : 2개소 - 폐기물매립시설 : 1개소	□ 추진실적 ❍ 사업장 점검 실적 - 점검업소 : 110개소 - 위반업소 : 12개소 - 행정조치 : 12개소 (경고 5, 개선명령 2, 조치명령 5) □ 향후계획 ❍ 하반기 점검 : 25개소 ❍ 민원발생 사업장 위주 집중점검
수질오염원 관 리	❍ 대상 : 1,218개소 (폐수 531, 기타수질 215, 가축분뇨 472) ❍ 정기점검 - 대상업소 : 441개소 (폐수 193, 기타수질 81, 가축분뇨 167) ※ 점검 제외 : 246개소 - 자율점검 업소 : 24개소 - 우수관리 업소 : 209개소 - 신규 업소 : 13개소 ❍ 환경기술인 교육 : 169명	□ 추진사항 ❍ 배출업소 점검실적 - 지도점검 업소 : 286개소 (폐수 165,기타수질 45,가축분뇨 76) - 위반업소 : 34개소(폐수 24, 가축분뇨 10) - 행정조치 : 34개소 ·개선명령 : 1개소 ·경 고 : 13개소 ·과 태 료 : 11개소(7,800천원) ·조치명령 : 5개소 ·사용중지 : 1개소(병과 1) ·고 발 : 3개소 ❍ 환경기술인 교육 : 133명 □ 향후계획 ❍ 지도점검 지속 추진 ❍ 환경기술인 교육 : 36명
지하수 관리	❍ 지하수 이용실태 조사 - 대 상 ·환경부 조사 대상 : 549공 ·미천면 : 173공 - 용역기간 : '23. 5. ~ 9. - 용 역 비 : 48백만원 - 용역내용 ·불용공 위치 및 상태 파악 ·불용공 소유자 등의 원상복구에 대한 의견 수렴 등	□ 추진사항 ❍ 용역기간 : '23. 5. ~ 9. ❍ 조사업체 : GMC㈜ ❍ 조사결과 : 불용공 71공 □ 향후계획 ❍ 방치공 원상복구 사업 추진
	❍ 지하수 방치공 원상복구 사업 - 사 업 량 : 10공 - 사업기간 : '23. 11. ~ 12. - 사 업 비 : 20백만원	□ 추진사항 ❍ 사업기간 : '23. 11. ~ 12. ❍ 용역업체 : 토성개발㈜ □ 향후계획 ❍ 방치공 원상복구 공사 완료 : '23. 12.
	❍ 보조지하수 관측망 모니터링 실시 - 사 업 량 : 68개소 - 기 간 : '23. 1. ~ 12. - 측정항목 : 수위, 온도, 전기전도도 등 - 사 업 비 : 102백만원	□ 추진사항 ❍ 보조지하수 관측망 모니터링 용역 - 용역기간 : '23. 1. ~ 12. - 대행기관 : 한국농어촌공사 □ 향후계획 ❍ 용역 준공 : '23. 12.
	❍ 지하수 이용부담금 부과·징수 - 대상 : 629개소 [생활용수(가정용 제외), 공업용수] - 부과기준 : 85원/톤 - 부과주기 : 매월	□ 추진사항 ❍ 지하수 이용부담금 부과·징수 - 부과금액 : 166백만원 - 징수금액 : 148백만원(89%) □ 향후계획 ❍ 이용부담금 부과·징수 : 매월
가축분뇨 공공처리시설 설치	❍ 가축분뇨 공공처리시설 설치 - 위 치 : 내동면 유수리 산294번지 일원 - 사업량 : 통합바이오가스화 시설 160톤/일 - 사업비 : 45,700백만원 - 기 간 : '22.6.~'27.6.	□ 추진사항 ❍ '23. 2. : 타당성조사 용역 준공 ❍ '23. 7. : 사업 타당성 협의 회신 ❍ '23. 9. : 국고보조사업 확정 □ 향후계획 ❍ '24. 1. : 기본 및 실시설계 용역 ❍ '25. 1. : 공사 착공 ❍ '27. 6. : 공사 준공
일반산업단지 공공폐수처리시설 운영·관리	❍ 대 상 : 공공폐수 처리시설 - 정촌일반산업단지 - 진주(사봉)일반산업단지 ❍ 사 업 비 : 4,395백만원 ❍ 사업기간 : 연중 ❍ 사업내용 - 공공폐수 처리시설 위탁 운영·관리 - 오·폐수 처리비용 부담금 부과 및 징수	□ 기본현황 ❍ 공공폐수처리시설 위탁운영 - 정촌·사봉 공공폐수처리시설 ·정촌 시설용량 : 4,500㎥/일 ·사봉 시설용량 : 1,000㎥/일 ·계약금액 : 1,527백만원/년 ※ 위탁기간 : 2022.~2024.(3년간) ·위탁업체 : 환경시설관리(주) 외 2개소 □ 추진실적(2023. 1.~ 9.) ❍ 오･폐수처리 사용료 부과 및 징수 - 부과주기 : 매월 - 정촌 공공폐수처리시설 ·대상건수 : 221건 ·부과 : 307백만원 ·징수 : 304백만원(99%) - 사봉 공공폐수처리시설 ·대상건수 : 77건 ·부과 : 119백만원 ·징수 : 118백만원(99%) □ 향후계획 ❍ 정촌·사봉 공공폐수처리시설 유지 관리 및 부담금 부과·징수
낙동강 수계 주민지원사업 추진	❍ 대상지역 : 5개 면·동 ❍ 사 업 비 : 3,157백만원 ❍ 사업내용 : 40건 - 중장기사업 : 1건 ·대평면 LPG 배관망 집단 공급사업 ·사업비(기금) : 520백만원 - 특별지원사업 : 2건 ·진양호 폐양액 수질개선사업 (환경관리과) ·진양호 수생태 관리개선사업 (공원관리과) ·사업비(기금) : 1,359백만원 - 일반지원사업 : 32건 ·내평마을 진입로 정비 공사 외 31건 ·사업비(기금) : 742백만원 - 직접지원사업 : 5건 ·낙동강수계 직접지원사업 ·사업비(기금) : 536백만원	□ 추진실적 ❍ '23. 3. : 2023년도 주민지원사업 계획 승인 및 확정 (낙동강유역환경청) ❍ '23. 3. ~ 추진 중 □ 향후계획 ❍ '23. 12. : 완료
자전거 이용활성화 추진	❍ 공영 자전거 대여소 운영 ❍ 전 시민 자전거보험 가입 ❍ 남강과 함께하는 자전거 투어 및 자전거 환경 순찰반 운영 ❍시민 자전거 안전 교육장 운영 ❍ 찾아가는 자전거 수리 ❍ 자전거 동호회 활성화	□ 추진사항 ❍ 자전거 대여소 운영 : 4개소 296대 ❍ 자전거보험 지원 : 483건/213백만원 ❍ 자전거 순찰반 : 21개 읍면동 운영 ❍ 자전거 교육장 운영실적 : 시민 348명 ❍ 찾아가는 자전거 수리 - 장소 : 22개소(읍·면, 학교, 아파트) - 실적 : 408대/935건 ❍ 자전거 동호회 구성 : 21개 읍면동 동호회(409명) □ 향후계획 ❍ 21개 읍면동 자전거 이용 활성화 추진
자전거도로 개설	❍ 진양호 순환 자전거도로 개설 - 위 치 : 대평면 일원 - 사업량 : 자전거도로 개설 L=9.7km - 사업비 : 8,000백만원 - 기 간 : '23.11.~'24.12.	□ 추진사항 ❍ '21. 10. : 오미마을~청동기 박물관 구간 (L=8km) 완료 ❍ '23. 11. : 공사 착공 (잔여구간 L=1.7km) ※ 공정률 : 5% □ 향후계획 ❍ '24. 12. : 공사 준공
	❍ 금산교~남강둔치 연결로 설치 - 위 치 : 금산면 일원 - 사업량 : 연결로 개설 L=220m - 사업비 : 250백만원 - 기 간 : '22.11.~'23.11.	□ 추진사항 ❍ '22. 11. : 공사 착공 ※ 공정률 : 90% □ 향후계획 ❍ '23. 11. : 공사 준공
	❍ 진주시 공영자건거 공유형 운영시스템 구축 - 위 치 : 충무공동, 남강 일원 - 사업량 : 공영자전거 운영시스템 구축 1식 - 사업비 : 1,000백만원 - 기 간 : '23.1.~'24.12.	□ 추진사항 ❍ '23. 1. ~ 8. : 타당성 용역완료 □ 향후계획 ❍ '23. 11. : 사업 착수 - 소프트웨어개발 및 자전거 구입 ❍ '24. 12. : 사업 준공
	❍ 남강댐~오목교 자전거 도로 정비 - 위 치 : 내동면 일원 - 사업량 : 도로확장 L=220m - 사업비 : 500백만원 - 기 간 : '23.9.~'24.1.	□ 추진사항 ❍ '23. 9. : 공사 착공 ※ 공정률 : 15% □ 향후계획 ❍ '24. 1. : 공사 준공
자전거도로 개설	❍ 장흥교~덕오교 자전거 도로 조명 설치 - 위 치 : 집현면 일원 - 사업량 : 경관조명 설치 208개소 - 사업비 : 300백만원 - 기 간 : '23. 10. ~ '23. 12.	□ 추진사항 ❍ '23. 10. : 공사 착공 ※ 공정률 : 10% □ 향후계획 ❍ '23. 12. : 공사 준공
	❍ 평촌역 폐역사 공원화 사업 - 위 치 : 이반성면 평촌리 일원 - 사업량 : 공원조성 1식 - 사업비 : 900백만원 - 기 간 : '23.9.~'24.1.	□ 추진사항 ❍ '23. 9. : 공사 착공 ※ 공정률 : 15% □ 향후계획 ❍ '24. 1. : 공사 준공
	❍ 남문산역 폐역사 공원화 사업 - 위 치 : 문산읍 삼곡리 일원 - 사업량 : 공원조성 1식 - 사업비 : 900백만원 - 기 간 : '23.9.~'24.1.	□ 추진사항 ❍ '23. 9. : 공사 착공 ※ 공정률 : 10% □ 향후계획 ❍ '24. 1. : 공사 준공
	❍ 태양광 자전거길 조성사업 - 위 치 : 남문산역, 갈촌역, 반성역, 평촌역(4개소) - 사업량 : 태양광발전 설비 설치 및 가로등 설치 - 사업비 : 400백만원 - 기 간 : '23.8.~'24.1.	□ 추진사항 ❍ '23. 8. : 공사 착공 ※ 공정률 : 50% □ 향후계획 ❍ '24. 1. : 공사 준공
	❍ 에나로 일원 자전거도로 보수공사 - 위 치 : 충무공동 에나로 일원 - 사업량 : 자전거도로 재포장 1식 - 사업비 : 200백만원 - 기 간 : '23.10.~'24.1.	□ 추진사항 ❍ '23. 10. : 실시설계용역 □ 향후계획 ❍ '23. 11. : 공사 착공 ❍ '24. 1. : 공사 준공

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 건강하고 지속가능한 생태환경 및 친환경 도시 조성

❍ 야생동물로 인한 인명 및 농작물 피해 최소화로 인간과 야생동물이 공존하는 건강한    생태환경 조성

❍ 탄소중립녹색성장을 위한 환경정화활동 지원 및 환경교육으로 시민 의식 개선

□ 2050 탄소중립 달성과 녹색성장 실현

❍ 탄소중립센터 지정·운영 및 친환경차 전환 확대 등을 통한 탄소중립 달성

❍ 탄소중립 생활 실천운동 등을 통한 시민의식 개선

□ 수질오염 예방과 수계 관리를 통한 수질환경 및 수생태계 보전

❍ 수질오염원 및 지하수 개발·이용의 체계적인 관리를 통한 수질오염 예방

❍ 진양호 상수원 및 남강수계 수질관리로 깨끗한 식수 공급 및 수생태계 보전

❍ 비점오염원관리지역 지정을 통한 하천·호소 등의 오염 예방 및 수질환경 보전

□ 건강한 시민, 친환경적 도시 조성을 위한 자전거도로 인프라 구축

❍ 진양호와 남강의 수려한 자연경관을 활용한 생활형 자전거도로 구축

❍ 자전거 이용 활성화 및 국가생태문화탐방로 조성을 통한 친환경 도시 조성

2. 총    괄	(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	7	256,002	7	-	-	-
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	7	256,002	7	-	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

야생동물로 인한 농작물 피해예방 및 보상

야생동물로 인한 인명 및 농작물 피해를 최소화하여 인간과 야생동물이 공존하는 건강한 생태환경 조성

□ 사업개요

❍ 사 업 비 : 485백만원(국 48, 도 20, 시 417)

❍ 사업내용

- 야생동물 피해예방 및 보상 지원사업

- 유해야생동물 구제 및 생태계 교란생물 퇴치사업

□ 추진계획

❍ 야생동물 피해예방시설 설치비용 지원 : 304백만원(국 32, 도 10, 시 262)

- 2024. 2. ~  3. : 지원대상자 신청서 접수 및 대상자 확정

- 2024. 4. ~ 12. : 피해예방시설 설치비 지원

❍ 야생동물로 인한 피해보상 지원 : 17백만원(도 5, 시 12)

- 2024. 2. ~ 12. : 신청자 접수 후 지급

❍ 포획틀 설치·운영 : 47백만원

- 2024. 2. : 포획틀 구입

- 2024. 1. ~ 12. : 희망농가를 대상으로 포획틀 설치·운영

❍ 유해야생동물 수확기 피해방지단 운영 : 85백만원

- 2024. 1. ~ 12. : 수확기 피해방지단 운영

- 2024. 1. ~ 12. : 포획 포상금 지급

❍ 생태계 교란생물 퇴치사업 : 20백만원(국 10, 도 3, 시 7)

- 2024. 2. ~ 12. : 뉴트리아, 가시박 등 생태계 교란생물 퇴치사업 실시

❍ 멸종위기종 공존문화 조성사업 : 12백만원(국 6, 도 2, 시 4)

- 2024. 2. ~ 12. : 올무 수거 및 홍보

□ 기대효과

❍ 농작물 피해 예방을 통한 농가의 안정적 소득 보장과 생태계 유지에 기여

진주형 그린 모빌리티(뉴딜) 보급 확대

저탄소·친환경 경제기반 전환(그린뉴딜)을 위한 전기·수소차 보급 및 노후 경유 차량의 친환경차 전환 확대

□ 사업개요

❍ 대상사업

- 수소충전소 구축 : 4개소(판문동, 호탄동, 문산읍, 공영차고지 예정지)

- 수소·전기차 보급 : 10,178대

- 노후경유차량 등 전환 : 16,820대

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2025년

❍ 소요예산 : 200,683백만원

□ 추진상황

❍ 친환경차 보급 : 전기자동차 983대, 수소차 18대 보급

❍ 친환경 대중교통 보급 : 전기 저상시내버스 21대, 전기택시 66대

❍ 노후경유차 친환경차 전환 : 1,541대

- 조기폐차 1,303대, 매연저감장치 89대, 어린이 통학차량 LPG차 전환 21대,

LPG 화물차 신차구입 지원 14대, 노후 건설기계 엔진교체 114대

□ 추진계획	(단위 : 대)

구 분	계	기시행	2023년	2024년	2025년
수소충전소(개소)	4	1	1	2
수소차 보급	477	207	50	70	150
전기차 보급	9,701	4,470	1,386	1,845	2,000
노후경유차 친환경 전환	16,820	12,617	1,430	1,473	1,300

□ 기대효과

❍ 친환경 교통수단 보급을 통해 그린경제로 전환 가속화, 시민의 삶의 질 개선

대기오염원 관리 강화

대기오염 저감사업 및 오염원 관리 강화로 깨끗한 대기 환경 조성

□ 사업개요

❍ 대기오염원 관리 : 407개소(대기배출업소 252, 비산먼지발생업소 155)

❍ 대기오염 저감사업 추진 : 1,211백만원 / 241개소

□ 추진상황

❍ 대기 배출업소 점검 : 109개소[행정처분 8개소(사용중지 1, 과태료 6, 고발 1)]

❍ 비산먼지 발생업소 점검 : 110개소[행정처분 12개소(경고 5, 개선명령 2, 조치명령5)]

❍ 대기오염 저감사업 추진

- 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 : 218백만원 / 30개소

- 가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착 지원사업 : 185백만원 / 59개소

- 굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원사업 : 25백만원 / 3개소

□ 추진계획

❍ 대기오염원 지도점검 : 220개소(대기배출업소 120, 비산먼지발생업소 100)

- 대기 배출업소 : 민원 다발업소 및 상습 위반업소 중점 단속실시

- 비산먼지 발생업소 : 봄철(3~5월) 및 가을철(10~11월) 집중 단속실시

❍ 2024년도 대기오염 저감사업 지속 추진

- 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 : 908백만원 / 149개소

- 가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착 지원사업 : 280백만원 / 89개소

- 굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원사업 : 23백만원 / 3개소

□ 기대효과

❍ 대기오염물질 저감으로 깨끗한 대기 환경 조성

❍ 영세사업장의 경제적 부담 경감

수질오염원 및 지하수 관리

폐수, 가축분뇨 등 오염원 관리 및 지하수 개발·이용 체계적 관리로 수질 오염 사전예방

□ 사업개요

❍ 수질오염원 관리 : 1,218개소

- 폐수배출시설 : 531, 기타 수질오염원 : 215, 가축분뇨 배출시설 : 472

❍ 지하수 관정 관리 : 8,180공(허가대상 : 118, 신고대상 : 8,062)

❍ 지하수 개선 사업 : 3건 242백만원

□ 추진상황

❍ 수질오염원 점검 286개소(폐수 165, 기타 수질오염 45, 가축분뇨 76)

- 행정조치 : 34개소(사용중지 1, 조업정지 5, 개선명령 1, 고발 3, 경고 13, 기타 11)

❍ 가축분뇨 공공처리시설 설치사업 타당성 조사 용역 준공 : 2022. 6. ~ 2023. 2.

❍ 축사 및 퇴비공장 주변 무인 악취자동포집기 설치운영 : 229백만원 / 15개소

❍ 지하수 개발·이용 관련 사업

- 보조지하수 관측망 모니터링(68개소) : 102백만원

- 지하수 이용 실태조사 용역 : 48백만원

- 지하수 방치공 원상복구 공사 : 20백만원(사업량 : 10공)

- 지하수 관리계획 수립 용역 : 300백만원(2021. 11. ~ 2023. 6.)

□ 추진계획

❍ 수질오염원 관리 : 420개소(폐수 210, 기타 수질오염 55, 가축분뇨 155)

※ 축산 악취 민원 적극 대응 및 강력한 조치(개선명령 및 과태료 부과)

❍ 통합바이오가스화시설 기본 및 실시설계 용역 등 : 2024. 1. ~ 2025. 1.

❍ 보조지하수 관측망 모니터링(68개소) : 130백만원

❍ 지하수 이용실태조사 및 지하수 방치공 원상복구 : 112백만원

□ 기대효과

❍ 수질오염원 및 지하수 체계적 관리로 깨끗한 수질보전

가축분뇨 공공처리시설 설치

가축분뇨 안정적 처리 및 액비 살포 최소화로 수질오염 예방

축사 인근 주민들의 악취로 인한 생활불편 최소화

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 내동면 유수리 산294번지 일원(쓰레기매립장 내)

❍ 사업기간 : 2022. 6. ~ 2027. 6.(5년)

❍ 사업내용 : 통합바이오가스화시설 160톤/일(가축분뇨 110, 음식물 50)

❍ 총사업비 : 45,700백만원(국비 36,560, 기금 2,742, 도비 1,828, 시비 4,570)

□ 추진상황

❍ 2022. 6. ~ 2023. 2. : 타당성조사 용역 착공 및 준공

❍ 2023. 2. : 타당성조사 보고서 검토 협의(경남도, 낙동강유역환경청)

❍ 2023. 3. : 재원협의 및 국고 보조사업 신청(환경부)

❍ 2023. 7. ~ 2023. 9. : 사업 타당성 검토 협의 회신 및 국고보조사업 확정

□ 추진계획

❍ 2024. 1. ~ 2025. 1. : 기본 및 실시설계 용역, 재해영향평가 용역

❍ 2025. 1. ~ 2027. 6. : 공사 착공(공사기간 22개월, 시운전 8개월)

❍ 2027. 6. : 공사 준공

□ 기대효과

❍가축분뇨 및 음식물류폐기물의 친환경적인 처리를 통한 쾌적한 환경조성 및 주민 보건 위생 향상

❍가축분뇨 공공처리시설에서 재생에너지(바이오가스) 생산으로 수익 창출

낙동강수계 주민지원사업

진양호 상수원관리지역 지정으로 인해 제약을 받고 있는 지역주민에 대해 직접지원 및 간접지원 사업 추진으로 생활환경 개선

□ 사업개요

❍ 대    상 : 5개 면·동(내동면, 명석면, 대평면, 수곡면, 판문동)

❍ 총사업비 : 2,781백만원	(단위 : 백만원)

계	일반지원사업	중장기사업	특별지원사업
2,781	1,281	500	1,000

[일반지원사업]

- 직접 및 간접 지원사업 : 1,281백만원

[중장기사업]

- 대평면 LPG 배관망 집단공급사업 : 총 2,700백만원

·사업기간 : 2023 ~ 2027년

·2024년 사업비 : 500백만원

[특별지원사업]

- 진양호 폐양액 개선사업 : 총 1,400백만원

·사업기간 : 2023 ~ 2024년

·2024년 사업비 : 800백만원

- 수곡면 폐양액 처리 개선사업 : 총 1,000백만원

·사업기간 : 2024 ~ 2025년

·2024년 사업비 : 200백만원

□ 추진계획

❍ 2023. 9. : 2024년도 주민지원사업 사업계획 수립 및 승인 신청

❍ 2024. 3. : 2024년도 주민지원사업 사업계획 확정

□ 기대효과

❍ 상수원관리지역 주민의 숙원사업 해결 및 생활환경 개선

나불천 국가생태문화탐방로 조성사업

나불천 일원은 국가 강길 탐방권역 중 낙동강(남강) 소유역으로 남강 소유역의 우수한 생태자원을 효율적으로 탐방(체험, 학습, 감상 등)할 수 있도록 도보 중심의 친환경 힐링 공간으로 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 이현동 ~ 명석면(나불천 : 지방하천)

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2026. 12.

❍ 사 업 비 : 4,900백만원(국비 2,200, 도비 660, 시비 2,040)

□ 추진상황

❍ 2023.  8. : 사업계획서 제출

❍ 2023.  9. : 환경부 현장 확인

❍ 2023. 10. : 2024 국가생태탐방로 신규사업 선정

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 실시설계용역 착수 및 부지 보상

❍ 2024. 12. : 실시설계용역 준공

❍ 2025.  1. : 공사 착공

❍ 2026. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

❍자연경관과 생태자원을 지속 가능한 생태체험공간으로 조성하여 인간과 자연이 공존하며 살 수 있는 환경 제공

❍탐방로를 산책로 등 운동공간으로 조성하여 시민 건강 증진 및 여가 선용 기회 확대

청 소 과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황

❍ 일반직	(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	24	1	7	8	5	3
현 원	24	1	7	9	5	2
증 감	-	-	-	1	-	△1

※ 별도인원 : 시간선택임기제(불법투기 단속원) 4명

❍ 공무직	(단위 : 명)

구 분	계	단 순 노 무 원					도 로 보수원	환 경 공무직
		소 계	시설물․장비유지 관리인부	현장공사 ․작업등 현업인부	현장지도 단속․ 감시인부	단순잡역 조무인부
정 원	39	2	-	2	-	-	-	37
현 원	33	2	-	2	-	-	-	31
증 감	△6	-	-	-	-	-	-	△6

□ 위원회	(2023. 11. 1. 현재)

구 분 위원회명	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원중 여 성 위원수	％
			계	공무원	％	민간인	％
생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원회	9	2	7	-	-	7	100	3	43

□ 예산규모	(단위 : 억원)

구 분	2022년	2023년	증 감	비 고
총 계	504	536	32
일반회계	305	335	30
특별회계	199	201	2

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄	(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	8	-	8	-	-
예산사업	8	-	8	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

□ 추진중 사업  ---  8건

사 업 명

사 업 개 요

추  진  상  황

문제점 및 대책

청소대행

업무

효율적

관리체계

확립

❍ 청소대행용역

- 예산액 : 21,507백만원

- 청소대행구역

구역	업체	읍면동
1 구역	진주 환경	대곡·집현· 미천면, 상대·하대· 상평·초장동
2 구역	경남 환경	명석·대평· 수곡면, 성북·중앙· 상봉·이현동
3 구역	현대 환경	내동·정촌· 금곡면, 천전·평거· 신안·판문동
4 구역	이엔 에프	문산읍, 진성· 일반성·이반성· 사봉·지수· 금산면, 가호· 충무공동

□ 추진사항

❍ 2022년 청소대행용역비 정산

- 용역기관

: 경남경영경제연구원

❍ 2023년 청소대행용역 시행

- 대행업체 : 진주환경 외 3개사

- 대행금액 : 20,751백만원

- 대행기간 : 2023.1.1.~2023.12.31.

- 대행분야 : 생활폐기물 수집·운반, 가로청소

❍ 2023년 청소대행업체 평가 용역(진행 중)

- 대상 업체 : 진주환경 외 3개사

- 평가항목

·주민만족도 및 현장 평가 등

- 평가결과 활용

·가산점, 용역비 감액, 계약해지 등 인센티브 및 패널티 부여

대형폐기물

수집·운반·

처리

민간대행

❍ 대형폐기물 수집･운반･ 처리 민간 대행

- 예 산 액 : 3,937백만원

- 대행업무

·대형폐기물 수집･운반･처리

- 대행폐기물 수거 구역

구역	업체	읍면동
1 구역	경동 산업	문산읍, 금곡·진성· 일반성·이반성· 사봉·지수·대곡·금산·집현·미천면, 하대·상평·초장·가호·충무공동
2 구역	시민 환경	내동·정촌·명석·대평·수곡면, 천전·성북·중앙·상봉·상대·평거·신안·이현·판문동

□ 추진사항

❍ 2023년 대형폐기물 수집·운반· 처리 민간대행용역 시행

- 대행업체 : 시민환경, 경동산업

- 대행금액 : 3,937백만원

·대행기간 : 2023.1.1.~2023.12.31.

·대행분야 : 대형폐기물 수집· 운반·처리

❍ 폐가전 무상 수거 및 처리

- 한국전자제품 자원순환 공제 조합 협약 : 9,304건
(TV, 세탁기, 에어컨 등)

□ 향후계획

❍ 2024년 대형폐기물 수집·운반 ·처리 민간대행 용역 시행

영 농

폐 기 물

수거처리지원사업

❍ 영농폐기물 수거처리 지원 사업

- 예 산 액 : 315백만원

- 사 업 량 : 900톤

- 대상지역 : 진주시 전역

□ 추진실적

❍ 2월 : 대평면 70톤 처리

❍ 4월 : 문산읍 외 12개소
840톤 처리

❍ 7월 : 수곡면 66톤 처리

❍ 9월 : 금곡면 54톤 처리

클린(clean)

진주 가꾸기

사업추진

❍ 깨끗한 시가지 조성

- 시민대청소의 날 운영

- 클린 진주 가꾸기 홍보

- 쓰레기 불법투기 단속

·단속반 : 2개 반 4명

·중앙시장 주변지역

·상습투기 지역 관리

- 청소인력 운영

·구역배치 : 분기별 순환

□ 추진사항

❍ 시민대청소의 날 : 월 1회

❍ 행복홀씨 입양사업 추진

- 환경정비 및 꽃길 조성
(70개 단체 / 70개소 운영)

❍ 시민수사대 발족 및 운영

- 30개 읍･면･동 / 300명

- 매월 1~2회 합동 순찰 및 자체활동

❍ 쓰레기 불법투기 단속

- 상시단속반 운영 : 2개조 4명

- 야간 합동단속 실시 : 월 1회

- 과태료 부과 : 312건/46,900천원

❍ 불법투기 단속용 이동식 CCTV 운영

- 시 : 10대 → 취약지역 배치

·설치지역 : 일반성(1대), 이반성(1대), 중앙동(4대), 상대동(1대), 초장동(3대)

- 읍면동 : 335대
(고정식/90, 이동식/245)

❍ 시민홍보 강화

- 청소종합안내서 등 4종 14만장 배부

□ 향후계획

❍ 불법투기 상습지역 단속강화

- 읍면동 이동식 CCTV 지속 확대 설치

- 투기 상습지역 불법투기 단속반 운영을 통한 집중 단속 실시

- 각종 봉사단체를 활용 홍보

❍ 불법투기 방지 홍보 및 단속에도 시민 준법의식 부족

❍ 지속적인 야간단속 및 불법투기 단속반 운영으로 불법투기에 대한 경각심 고취

사업장

폐기물

관리 강화

❍ 폐기물사업장 지도점검

- 점검대상 : 1,454개소

·폐기물처리업소 : 53개소

·처리시설업소 : 10개소

·배출업소 : 1,391개소

- 점검기간 : 연중

- 점검내용

·폐기물 보관·관리상태

·폐기물 배출자 신고사항

·법규 준수여부

·기타 환경오염 행위

□ 추진사항

❍ 폐기물 사업장 지도점검

- 점검기간 : 연중 수시

❍ 점검업소 : 203개소

- 위반업소 : 19개소

- 조치사항

·고    발 : 5개소

·조치명령 : 2개소

·과 태 료 : 12개소/9,200천원

❍ 불법폐기물(투기, 방치) 발생 예방 대책 수립

- 기간 : 연중

- 계획

·대시민 홍보활동 강화

·시민 합동 감시 활동

·읍면동장회의 시 상황 전파

·취약지역 순찰 강화

·폐기물처리업 점검 강화
: 방치폐기물 발생 예방

□ 추진사항

❍ 불법폐기물 발생 적발

- 이반성면 발산리

- 대곡면 마진리

❍ 불법폐기물 발생 예방 홍보

- 현수막 게첨 : 읍면동 46개

- 읍면동장 회의자료 홍보 1회

□ 향후계획

❍ 언론 및 홈페이지 등 홍보

❍ 불법폐기물 발생 취약 지역 (나대지, 빈공장 등) 예찰활동 강화

❍ 폐기물처리업소 수시 점검 강화

자원순환

운동확산

및

재활용

활성화

❍ 공동주택 음식물쓰레기 감량화

-	RFID 음식물 종량제 시행 공동주택 관리

-	RFID 음식물 종량제 미시행 공동주택 감량 인센티브제 추진

□ 추진사항

❍ 공동주택 음식물쓰레기 감량화       추진

- RFID 음식물 종량제 추진

·대상 : 97개소 62,298세대 6,453톤

- RFID 음식물 종량제 미시행   공동주택 감량 인센티브제 추진

·대상 : 12개소(국민주택 외 11개소)

·인센티브 제공 내역 : 음식물수거 납부필증(120ℓ) 280매 제공

·평균감량율 : 3.23%

❍ 자원순환운동 활성화 사업 추진

- 재활용품 매각 및 자원 순환 체계 구축

- 배출원별 재활용품 분리배출 홍보

□ 추진사항

❍ 자원재활용 활성화사업 추진

- 재활용품 매각

·종류 : 페트병 외 11종

·매각대금 : 2,880톤/1,100백만원

- 종이팩, 폐전지 수거보상제 실시

·종이팩 수거량 : 19톤

·폐전지 수거량 : 7톤

·보상 : 종량제봉투 46,654장

- 영농폐비닐 수거보상금 지급

·실적 : 346백만원(3,428톤)

- 폐현수막 재활용 사업

·장바구니 제작 : 2,034개

·손가방   제작 : 3,066개

·백팩     제작 :  500개

- 재활용품 분리 배출 및 음식물쓰레기 배출 홍보

·홍보물 배부(4만장) 및 안내문 발송(8만장)

·홍보도우미 운영 : 3개조(5명)

자원순환

운동확산

및

재활용

활성화

❍ 녹색생활실천과 나눔 문화 추진

- 나눔 장터 운영

- 1회용품 줄이기

□ 추진사항

❍ 녹색생활 실천 및 나눔 문화 추진

- 상설 나눔 장터 운영 : 5개 동

- 횟수 : 월 4회

❍ 2023년 새마을 알뜰 나눔 장터 운영

- 일자 : 2023. 10. 31.(화)

- 장소 : 시청 앞 광장

- 참여인원 : 400여 명

- 내용 : 중고물품 수집 및 판매, 폐건전지 교환행사, 폐현수막 이용 장바구니 배부, 농산물 직거래장터 운영 등

❍ 1회용품 줄이기 추진

- 식품접객업소 등 1회용품 사용 억제제도 안내 및 홍보 : 1,500개소

□ 향후계획

❍ 음식물쓰레기 감량화 지속 추진

❍ 재활용품 분리배출 지속 홍보

❍ 자원 재활용 활성화사업추진

- 폐건전지, 종이팩, 투명페트병  집중 수거

- 폐비닐 수거보상금 지급

재활용품

품목별

수거요일

지정 운영

❍ 투명페트병·비닐 요일제 수거 시행

구 역 별	재활용 쓰레기 품목별 배출요일
	배출요일	예외
천전･상봉･하대･ 초장･이현･충무공동 상대동 일부 (동진로 북쪽) 읍･면 일부	❍월·수 : 투명페트병, 비닐 제외한 품목 ❍금 : 투명페트병, 비닐	스티로폼 지정요일 관계없이 배출
성북･중앙･상평･ 평거･신안･판문･ 가호동, 상대동 일부 (동진로 남쪽)	❍일·화 : 투명페트병, 비닐 제외한 품목 ❍목 : 투명페트병, 비닐

□ 추진사항

❍ 2023년 1월부터 재활용품 요일제 수거 시행

- 생활폐기물분리배출 홍보도우미 운영 : 5명 2개조

- 홍보물 배부(12만장) 및 분리배출 안내 등

□ 향후계획

❍ 홍보 도우미를 통한 생활폐기물 분리 배출 안내 및 홍보물 배부

❍ 이통장 회의 및 단체회의를 통한 지속적 홍보

120기동대

운영

❍	120기동 순찰반 시민 생활 불편 사항 처리

❍ 홈페이지 견문신고 방 운영

❍	내부 행정시스템 견문신고제 운영

❍ 120기동대 합동순회봉사 실시

□ 추진사항

❍ 120기동대 : 2개조 4명

- 순찰 및 시민불편사항 처리

- 추진실적 : 2,898건

❍ 홈페이지 시민 견문신고방 운영

- 추진실적 : 459건

❍ 내부 직원의 시민생활불편 신고

- 추진실적 : 3,052건

❍ 120기동대 합동순회봉사 실시

- 회수 : 연 4회

- 분야 : 노후 전등 교체,
전기시설 안전점검, 방충망 교체, 어르신 이·미용 봉사

- 참여기관 : 한국전력공사 등 유관기관 및 단체

- 추진실적 : 3회
(문산읍, 진성면, 집현면)

□ 향후계획

❍ 읍면동 오지 및 취약 지역 순찰강화

❍ 견문신고제 연간 목표 달성

❍ 합동순회봉사 실시

- 11월(미천면)

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 2024년 청소 대행업체 지도 및 평가 강화로 질 높은 청소 서비스 제공

□ 대형폐기물 수집·운반·처리 민간 대행 일원화로 신속처리 및 주민 불편 해소

□ 생활폐기물 직매립 금지에 따른 생활폐기물 소각시설 설치

□ 재활용품선별장 현대화를 통한 폐기물 감량 및 자원순환 경제 활성화

□ 자원순환센터 조성사업 실시를 통한 폐기물 처리의 집약화

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	8	35,699	8	-	-	-
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	8	35,699	8	-	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

청소 대행업무의 효율적 관리

청소 대행업무의 체계적 관리로 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성

청소 대행업체 지도 및 평가 강화로 질 높은 서비스 제공

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 23,023백만원

❍ 대행분야 : 생활폐기물(종량제봉투, 음식물류, 재활용품) 수집운반 및 가로청소

□ 추진계획

❍ 2024년 청소 민간대행 용역 시행

※ 중앙시장 주위 대로변 주 6일 → 주 7일 용역 실시로 주민불편 해소

❍ 2023년 청소 민간대행 용역비 정산검사

- 정산검사 결과에 따라 부당 집행액 환수 및 위법 시 고발조치

❍ 2024년 청소대행업체 평가

- 평가결과에 따른 인센티브 부여로 깨끗한 거리 조성 만전

❍ 2025년 ~ 2026년 생활폐기물 수집·운반 및 가로청소 원가 산정 용역 시행

□ 기대효과

❍ 청소 대행업체 실적평가 강화로 질 높은 서비스 제공

❍ 청소 대행업체의 효율적 관리에 따른 청소업무의 투명성 확보

대형폐기물 수집·운반·처리 민간대행

대형폐기물 대행 과정 일원화로 운영의 효율성 및 연속성 도모

기존 대형폐기물 수집·운반 환경 공무직 읍·면·동 배치로 쾌적한 도시 환경 조성

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 5,387백만원

❍ 사업내용 : 대형폐기물(종량제봉투에 담을 수 없는 생활폐기물) 수집･운반･처리

- 수거 대행구역을 2개 권역으로 나누어 대형폐기물 처리

- 각 읍·면·동 수거 일자 지정으로 주 2회 이상 정기 수거

- 대형폐기물이 적체 및 방치되지 않도록 기동 수거반 편성·운영

□ 추진상황

❍ 2023.  5. : 2024~2025년 대형폐기물 수집·운반·처리비 원가산정용역시행

❍ 2023. 10. : 계약심의위원회 심의 통과

□ 추진계획

❍ 2023. 12. : 입찰공고 및 계약

❍ 2024.  1. ~ 12. : 대형폐기물 수집·운반·처리 용역 시행

□ 기대효과

❍ 대형폐기물 관련 민원 처리의 효율성 및 신속성 증가

❍ 태풍·장마 등 특수상황에 대응력 증가

영농폐기물 수거·처리

농지 등에 투기·방치된 영농폐기물 적기에 집중 수거·처리

농촌지역 환경오염 방지 및 쾌적한 환경조성 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 315백만원(도비 30%, 시비 70%)

❍ 위    치 : 진주시 관내

❍ 사 업 량 : 900톤

□ 추진계획

❍ 2024.  1.    : 영농폐기물 수거 물량 조사

❍ 2024.  2.    : 영농폐기물 집중수거 운영계획 수립

❍ 2024.  3.    : 영농폐기물 수거 위탁처리 원가산정 및 용역 계약 심사

❍ 2024.  4.~6. : 영농폐기물 수거 처리 시행

❍ 2024. 11.    : 사업 정산

□ 기대효과

❍ 방치된 영농폐기물 수거 처리로 깨진 유리창 효과 방지

❍ 농촌지역 환경오염 방지를 통한 깨끗한 영농환경 조성

진주시 생활폐기물 소각시설 설치사업

폐기물관리법 시행규칙 개정(2021. 7. 6.)으로 2030년부터 생활폐기물 직매립 금지에 따라 생활폐기물 소각시설 설치사업을 추진하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 내동면 유수길75번길 63 일원(매립장사업소 내)

❍ 시설규모 : 280ton/일

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2029년(7년 계속사업)

❍ 총사업비 : 139,440백만원(국비 37,347, 도비 26,143, 시비 61,100, 예치금 14,850)

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2024년		2025년 이 후
			본예산	추 경
계	139,440	100	300		139,040
국 비	37,347				37,347
도 비	26,143				26,143
시 비	61,100	100			61,000
예치금	14,850		300		14,550

※ 폐기물처리시설사업 특별회계 : 20,000백만원(혁신도시, 역세권 개발사업 부담금 등)

□ 추진상황

❍ 2023.  3. : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 착수

❍ 2023.  8. ~ : 입지선정 절차 수행

□ 추진계획

❍ 2023. 11. : 입지선정위원회 구성

❍ 2024.  3. : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 완료

❍ 2024.  4. ~ 12. : 전략환경영향평가, 입지결정·고시 등 절차 수행

❍ 2025.  1. ~ 12. : 환경부 및 기재부 예산협의

❍ 2026.  1. ~ 12. : 기본 및 실시설계

❍ 2027.  1. ~ 2029. 12. : 공사 착·준공 및 시운전

□ 기대효과

❍ 국가 환경정책(2030년부터 생활폐기물 직매립 금지)에 발맞춰 폐기물 처리 가능

❍ 기존 매립시설(진주권 광역쓰레기매립장)의 사용수명 연장

진주시 자원순환센터 조성사업

진주시 신설 폐기물처리시설(소각시설, 통합바이오가스화시설, 재활용품선별시설 등)의 합리적인 설치를 위한 자원순환센터 조성사업

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 내동면 유수길75번길 63 일원

❍ 시설규모

- 소각시설 : 280톤/일

- 통합바이오가스화시설 : 160톤/일

- 재활용품 선별시설 : 50톤/일

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2029년(7년 계속사업)

❍ 총사업비 : 40,000백만원  ※ 향후 용역 결과에 따라 사업비 변동 예정

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2024년		2025년 이 후
			본예산	추 경
계	40,000	14	700		39,286
국 비
도 비
시 비	40,000	14	700		39,286

※ 향후 사업 세부 내용 확정시 국도비 추가 확보 및 사업비 변경 예정

□ 추진상황

❍ 2023.  8. ~ 10. : 자원순환센터 조성사업 기본구상 계획수립 용역 시행

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 자원순환센터 주변지역 조성 기본계획 수립 용역 시행

❍ 2024.  7. : 자원순환센터 도시계획시설사업 실시계획인가 용역 시행

❍ 2024. 12. : 자원순환센터 부지조성공사 설계 및 시행

❍ 2028.  1. : 주민지원시설 및 주변지역 조성공사 설계 및 시행

❍ 2029. 12. : 자원순환센터 조성 완료

□ 기대효과

❍ 통합 사업부지 조성 및 현실성 있는 주민지원시설 설치로 사업비 절감

음식물류폐기물 공공처리시설 개선사업

음식물류폐기물 공공처리시설 기술진단 결과 및 시설 노후화에 따른   개선방안을 이행하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 내동면 유수길75번길 63 일원

❍ 시설내역 : 악취저감시설 설치, 소화조 개선 등

❍ 사업기간 : 2024 ~ 2025년(2년)

❍ 총사업비 : 6,300백만원(폐기물처리시설사업 특별회계 100%)

- 퇴비화시설 : 음식물 투입 → 파쇄·선별·혼합 → 발효·후숙 → 퇴비

- 음폐수바이오가스화시설 : 음폐수 투입 → 혐기성소화 → 가스저장 → 발전

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2024년		2025년 이 후
			본예산	추 경
계	6,300	500	5,800
국 비
도 비
시 비
예치금	6,300	500	5,800

※ 폐기물처리시설사업 특별회계 : 20,000백만원(혁신도시, 역세권 개발사업 부담금 등)

□ 추진상황

❍ 2021. 3. ~ 2023. 2. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2022. 9.           : 중간보고회(사업방향 결정)

- 1처리장은 가축분뇨와 통합바이오가스화 시설을 설치한 후 철거하고,
2처리장은 개선사업 시행으로 시설개선

❍ 2023. 3.           : 기본 및 실시설계 용역 완료

□ 추진계획

❍ 2024. 1. ~ 2024. 12. : 공사시행

□ 기대효과

시설물 개선 및 악취저감시설 추가 설치 등으로 음식물류폐기물의 안정적 처리

인근지역 주민의 악취 등 생활 불편 해소

진주시 재활용품선별장 현대화사업

｢폐기물관리법｣ 시행규칙 일부개정(2025. 12. 31. 시행)으로 플라스틱류 광학선별기 도입이 의무화되어 선별장 노후시설 개선과 함께 광학선별기 도입 등 현대화사업을 통해 폐기물 원천 감량 및 자원 순환 경제 실현에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 내동면 유수길75번길 63 일원(매립장사업소 내)

❍ 시설규모 : 50ton/일

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2025년(3년 계속사업)

❍ 사 업 비 : 17,420백만원(국비 5,220, 도비 3,654, 시비 8,546)

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2023년 하반기	2024년		2025년 이 후
			본예산	추 경
계	17,420	20		1,000	16,400
국 비	5,220				5,220
도 비	3,654				3,654
시 비	8,546	20		1,000	7,526

□ 추진계획

❍ 2023.  9. 21. : 타당성조사 기본계획수립 용역 발주

❍ 2023. 12.    : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 준공

❍ 2024.  1.    : 지방재정투자심사 실시

❍ 2024.  5. ~ 2024. 12. : 기본 및 실시설계, 소규모 환경영향평가

❍ 2025.  1. ~ 2025. 12. : 공사 시행

□ 기대효과

❍재활용 선별 처리 효율 증진 및 자원순환 경제 기여

시민중심 찾아가는 120기동대 운영

시민 불편사항의 신속한 처리로 시민 중심의 현장 행정 구현

농촌지역 순회봉사로 오지마을 주민편의 향상

□ 사업개요

❍ 120기동 순찰반 상시 운영

❍ 직원 견문신고제 및 홈페이지 시민 견문신고방 운영

❍ 120기동대 합동순회봉사 실시

□ 추진계획

❍ 120기동 순찰반 상시 운영

- 본청 기동 순찰반 운영 : 2개조 4명

- 읍·면·동 기동 순찰반 운영 : 30개조 60명

❍ 견문신고제 활성화

- 내부 행정시스템 □120기동대 견문신고제□ 운영

- 시민 참여를 위한 시 홈페이지 □120기동대 견문신고방□ 운영

❍ 120기동대 합동순회봉사 실시

- 대상지역 : 일반성면, 이반성면, 대곡면, 명석면(연 4회)

- 참여기관 : 한국전력공사, 한국전기안전공사, (사)대한미용사회 진주시지부

- 활동내용 : 노후 전등 및 방충망 교체, 전기 안전점검, 어르신 이·미용 봉사

□ 기대효과

❍ 시민중심 현장 행정 실현

❍ 농촌 취약지역 주민생활 편의 및 삶의 질 향상 도모

산  림  과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황	(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	(기타)	비고
정 원	23	1	7	6	6	3	-
현 원	23	1	7	5	7	3	-
증 감	-	-	-	△1	1	-	-	육아휴직 1명(8급) 미포함

□ 위원회	(2022. 11. 1. 현재)

구 분 위원회명	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원중 여 성 위원수	％
			계	공무원	％	민간인	％
시립공원 위원회	11	4	7	-	-	7	100	3	43
정원 문화 조성 및 진흥위원회	25	2	23	3	13	20	87	10	43
산사태취약지역 지정위원회	8	3	5	2	40	3	60	1	20

□ 예산규모	(단위 : 억원)

구 분	2022년	2023년	증 감	비 고
총 계	381	399	18
일반회계	381	399	18
특별회계	-	-	-

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	51	30	21	-	-
예산사업	51	30	21	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업  ---  30건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주 요 성 과
2023년 조림사업 (산림경영)	❍ 위 치 : 이반성면 가산리 1115번지 외 62필지 ❍ 사 업 량 : 86.25ha ❍ 사업기간 : '23. 2. ~ '23. 5. ❍ 사 업 비 : 615백만원	❍ 착 공 : '23. 2. ❍ 준 공 : '23. 5.	❍ 경제수 식재로 산림자원 조성
2023년 정책숲 가꾸기 사업 (산림경영)	❍ 위 치 : 명석면 덕곡리 산162번지 외 74필지 ❍ 사 업 량 : 어린나무가꾸기 150.4ha ❍ 사업기간 : '23. 6. ~ '23. 7. ❍ 사 업 비 : 224백만원	❍ 착 공 : '23. 6. ❍ 준 공 : '23. 7.	❍ 산림자원 육성
2023년 조림지 가꾸기 사업 (산림경영)	❍ 위 치 : 대곡면 단목리 산38번지 외 330필지 ❍ 사 업 량 : 풀베기 1차 216.85ha 풀베기 2차 263.20ha ❍ 사업기간 : '23. 6. ~ '23. 10. ❍ 사 업 비 : 784백만원	❍ 착 공 : '23. 6. ❍ 준 공 : '23. 10.	❍ 조림목 활착률 제고
2023년 덩굴제거 1차사업 (산림경영)	❍ 위 치 : 사봉면 방촌리 464-1번지 외 32필지 ❍ 사 업 량 : 304ha ❍ 사업기간 : '23. 7. ~ '23. 8. ❍ 사 업 비 : 603백만원	❍ 착 공 : '23. 7. ❍ 준 공 : '23. 8.	❍ 건강한 산림 자원 조성
2023년 공익림숲가꾸기 1차사업 (산림경영)	❍ 위 치 : 금곡면 검암리 산17번지 외 34필지 ❍ 사 업 량 : 148.04ha ❍ 사업기간 : '23. 8. ~ '23. 10. ❍ 사 업 비 : 316백만원	❍ 착 공 : '23. 8. ❍ 준 공 : '23. 10.	❍ 미세먼지 저감 등 건강한 숲 조성
월아산 진성 동산지구 공영주차장 조성공사 (산림휴양)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 1204-1번지 ❍ 사업내용 : 공영주차장 설치 (소형 253면, 대형 21면) ❍ 사업기간 : '22. 3. ~ '23. 9. ❍ 사 업 비 : 5,908백만원 (국비 50%, 시비 50%)	❍ 착 공 : '22. 3. ❍ 준 공 : '23. 9.	❍ 월아산 숲속의 진주 내 공영주차장 설치
방어산 시립 공원 탐방로 및 관리임도 (청원지구) 조성사업 (산림휴양)	❍ 위 치 : 지수면 청원리 산20번지 외 ❍ 사업내용 : 탐방로 및 관리임도 신설 1.08km ❍ 사업기간 : '23. 2. ~ '23. 10. ❍ 사 업 비 : 300백만원(시비 100%)	❍ 착 공 : '23. 2. ❍ 준 공 : '23. 10.	❍ 산림 내 쾌적한 탐방 환경 제공
월아산 질매재 등산로 연결사업 (산림휴양)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 116-1번지 ❍ 사업내용 : 등산로 연결(L=1,360m, B=2.0 ~ 3.0m) ❍ 사업기간 : '22. 6. ~ '23. 5. ❍ 사 업 비 : 1,900백만원 (전환 50%, 도비 15%, 시비 35%)	❍ 착 공 : '22. 6. ❍ 준 공 : '23. 5.	❍ 쾌적하고 안전한 등산 환경 제공
2022년 간선임도 조성사업 (용산지구) (산림휴양)	❍ 위 치 : 명석면 용산리 산229번지 일원 ❍ 사 업 량 : 임도 신설 1.21km ❍ 사업기간 : '22. 12. ~ '23. 6. ❍ 사 업 비 : 300백만원	❍ 착 공 : '22. 12. ❍ 준 공 : '23. 6.	❍ 병혜충방제, 산불방지 및 예방을 위한 임도 개설
월아산 산림 레포츠 시설 확충사업 (산림휴양)	❍ 위 치 : 월아산 숲속의 진주 ❍ 사 업 량 : 짚와이어, 키즈어드벤처 1식 ❍ 사업기간 : '22. 10. ~ '23. 7. ❍ 사 업 비 : 1,376백만원	❍ 착 공 : '22. 10. ❍ 준 공 : '23. 7.	❍ 월아산 내 레포츠 시설 확충
망진산 등산로 데크정비사업 (산림휴양)	❍ 위 치 : 주약동 산48-6번지 ❍ 사 업 량 : 데크 및 울타리 정비 1식 ❍ 사업기간 : '23. 5. ~ '23. 8. ❍ 사 업 비 : 205백만원	❍ 착 공 : '23. 5. ❍ 준 공 : '23. 8.	❍ 노후 데크 정비를 통한 시민들의 불편해소
월아산 등산로변 식재공사 (산림휴양)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 일원 ❍ 사 업 량 : 식재공사 1식 ❍ 사업기간 : '23. 6. ~ '23. 8. ❍ 사 업 비 : 128백만원	❍ 착 공 : '23. 6. ❍ 준 공 : '23. 8.	❍ 월아산 등산로변 주변 경관 개선
월아산 레포츠 단지 조성공사 (조 경) (산림휴양)	❍ 위 치 : 월아산 숲속의 진주 내 ❍ 사 업 량 : 등산로변 플랜트 및 식재공사 1식 ❍ 사업기간 : '23. 6. ~ '23. 8. ❍ 사 업 비 : 45백만원	❍ 착 공 : '23. 6. ❍ 준 공 : '23. 8.	❍ 월아산 레포츠 단지 주변 경관 개선
가좌산 등산로 보안등 정비공사 (산림휴양)	❍ 위 치 : 가좌산 140-3번지 일원 ❍ 사 업 량 : 등산로변 식재공사 1식 ❍ 사업기간 : '23. 6. ~ '23. 7. ❍ 사 업 비 : 45백만원	❍ 착 공 : '23. 6. ❍ 준 공 : '23. 7.	❍ 가좌산 등산로 보안등 정비를 통한 시민들의 불편 해소
자연 휴양림 야간 등산로 정비 공사 (산림휴양)	❍ 위 치 : 월아산 숲속의 진주 내 ❍ 사 업 량 : 야간 조명 설치 1식 ❍ 사업기간 : '23. 5. ~ '23. 6. ❍ 사 업 비 : 50백만원	❍ 착 공 : '23. 5. ❍ 준 공 : '23. 6.	❍ 등산로 내 조명 설치를 통한 안전한 산행 여건 조성
등산로 훼손지 정비 대행사업 (산림휴양)	❍ 위 치 : 비봉산 등산로 외 ❍ 사 업 량 : 등산로 편의시설 정비 - 등산로 개설, 침목계단 및 난간 설치 등 ❍ 사업기간 : '23. 6. ~ '23. 10. ❍ 사 업 비 : 209백만원	❍ 착 공 : '23. 6. ❍ 준 공 : '23. 10.	❍ 관내 등산로 정비를 통한 시민들의 안전한 산행 여건 조성
월아산 국가 (지방)정원 마스터플랜 수립 및 타당성 조사 용역 (정 원)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 일원 ❍ 사업내용 : 마스터플랜 수립 및 타당성 조사 ❍ 사업기간 : '22. 7. ~ '23. 8. ❍ 사 업 비 : 294백만원	❍ 착 수 : '22. 7. ❍ 완 료 : '23. 8.	❍ 마스터플랜 수립 및 타당성 조사
2023 월아산 정원박람회 기획운영 대행용역 (정 원)	❍ 위 치 : 월아산 숲속의 진주 ❍ 사업내용 : 정원박람회 기획운영 대행용역 ❍ 사업기간 : '23. 1. ~ '23. 7. ❍ 사 업 비 : 250백만원	❍ 착 수 : '23. 1. ❍ 완 료 : '23. 7.	❍ 2023년 월아산 정원박람회 개최
2023년 상반기 시민정원사 양성교육 위탁 운영 (정 원)	❍ 위 치 : 월아산 숲속의 진주 내 정원교육실 등 ❍ 사업내용 : 시민정원사 양성교육 (기초과정 2개 반, 특강과정 1개 반) ❍ 사업기간 : '23. 3. ~ '23. 8. ❍ 사 업 비 : 67백만원	❍ 협 약 : '23. 3. ❍ 완 료 : '23. 8.	❍ 시민정원사 기초과정 49명, 특강과정 35명 교육 수료
진주 월아산 작가정원 조성사업 (1구역) (정 원)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 산116-34번지 일원 ❍ 사업내용 : 작가정원 조성 1식 ❍ 사업기간 : '23. 4. ~ '23. 9. ❍ 사 업 비 : 634백만원	❍ 착 공 : '23. 4. ❍ 준 공 : '23. 9.	❍ 월아산 내 지형적 특성을 살린 작가정원 조성
진주 월아산 작가정원 조성사업 (2구역) (정 원)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 산116-34번지 일원 ❍ 사업내용 : 작가정원 조성 1식 ❍ 사업기간 : '23. 4. ~ '23. 9. ❍ 사 업 비 : 565백만원	❍ 착 공 : '23. 4. ❍ 준 공 : '23. 9	❍ 월아산 내 지형적 특성을 살린 작가정원 조성
진주 월아산 작가정원 조성사업 (3구역) (정 원)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 산116-34번지 일원 ❍ 사업내용 : 작가정원 조성 1식 ❍ 사업기간 : '23. 4. ~ '23. 9. ❍ 사 업 비 : 600백만원	❍ 착 공 : '23. 4. ❍ 준 공 : '23. 9.	❍ 월아산 내 지형적 특성을 살린 작가정원 조성
월아산 주제정원 경관조명 설치공사 (정 원)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 산116-34번지 일원 ❍ 사업내용 : 경관조명 설치 1식 ❍ 사업기간 : '23. 6. ~ '23. 9. ❍ 사 업 비 : 320백만원	❍ 착 공 : '23. 6. ❍ 준 공 : '23. 9.	❍ 월아산 숲속정원 내 경관조명 설치
월아산 자연휴양림 수목관리 관수시설 정비공사 (숲속의 진주)	❍ 위 치 : 월아산 자연휴양림 ❍ 사업내용 : 관수시설 정비 1식 ❍ 사업기간 : '23. 3. ~ '23. 4. ❍ 사 업 비 : 60백만원	❍ 착 공 : '23. 3. ❍ 준 공 : '23. 4.	❍ 자연휴양림 주변 조경지의 체계적인 관수 관리
월아산 유아숲 체험원 정비사업 (숲속의 진주)	❍ 위 치 : 월아산 우드랜드 ❍ 사업내용 : 유아숲체험원 정비 1식 ❍ 사업기간 : '23. 9. ~ '23. 10. ❍ 사 업 비 : 40백만원	❍ 착 공 : '23. 9. ❍ 준 공 : '23. 10.	❍ 월아산 유아숲체험원 (딱따구리숲) 환경 개선
숲속어린이 도서관 옥상 전망데크 정비사업 (숲속의 진주)	❍ 위 치 : 월아산 숲속어린이도서관 ❍ 사업내용 : 데크 정비 1식 ❍ 사업기간 : '23. 9. ~ '23. 10. ❍ 사 업 비 : 132백만원	❍ 착 공 : '23. 9. ❍ 준 공 : '23. 10.	❍ 어린이도서관 옥상 데크 정비로 이용자 편의 증진
복합산림 관리시설 부속동 신축공사 (산림보호)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 1200-1번지 일원 ❍ 사업내용 - 산불대응센터 1동 - 차고 1동 ❍ 사업기간 : '22. 12. ~ '23. 8. ❍ 사 업 비 : 1,000백만원	❍ 착 공 : '22. 12. ❍ 준 공 : '23. 8.	❍ 효율적 산불대응 기반 마련
책임방제구역 재선충병 방제사업 (산림보호)	❍ 위 치 : 미천면 반지리 산100번지 외 154필지 ❍ 사업내용 : 피해목 제거 ❍ 사업기간 : '23. 2. ~ '23. 4. ❍ 사 업 비 : 400백만원	❍ 착 공 : '23. 2. ❍ 준 공 : '23. 4.	❍ 피해목 제거 : 5,268본
상반기 재선충병 방제사업 (산림보호)	❍ 위 치 : 관내 재선충병 발생지역 ❍ 사업내용 : 피해목 제거 ❍ 사업기간 : '23. 1. ~ '23. 5. ❍ 사 업 비 : 1,522백만원	❍ 착 공 : '23. 1. ❍ 준 공 : '23. 5.	❍ 피해목 제거 : 14,588본
2023년 상반기 보호수 및 노거수 생육환경 개선 사업 (산림보호)	❍ 위 치 : 금곡면 동례리 산11번지 외 31개소 ❍ 사 업 량 : 32개소 ❍ 사업내용 : 외과수술, 브레싱 설치, 영양공급 등 ❍ 사업기간 : '23. 4. ~ '23. 6. ❍ 사 업 비 : 126백만원	❍ 착 공 : '23. 4. ❍ 준 공 : '23. 6.	❍ 보호수 정비 17개소 ❍ 노거수 정비 15개소

□ 추진중 사업  ---  21건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
임업·산림 공익직접 지불사업 (산림경영)	❍ 대 상 자 - 농업 외 종합소득금액 3,700만원 미만 - 매년 90일 이상 임업에 종사 - 산지소재지 동일 또는 연접 시·군·구 농촌에 주소를 둔 임업인 (그 외에는 주업기준 충족하여야 지급 가능) ❍ 대상산지 : 2022. 9. 30.까지 임야 대상 농업경영체에 등록한 산지 ❍ 사업내용 : 임산물생산업 및 육림업 직불금 지급 ❍ 사업기간 : '23. 3. ~ '24. 2. ❍ 사 업 비 : 669백만원	□ 추진사항 ❍ 신청 430건 서류 검토 후 지급 대상자 확정 □ 향후계획 ❍ 지급대상자 확정 : '23. 11. ❍ 임업직불금 지급 : '23. 11. ~ '24. 2.
2023년 덩굴제거 2차사업 (산림경영)	❍ 위 치 : 금곡면 가봉리 산195-2번지 외 98필지 ❍ 사 업 량 : 176ha ❍ 사업기간 : '23. 10. ~ '23. 11. ❍ 사 업 비 : 603백만원	□ 추진사항 ❍ 착 공 : '23. 10. 20. ❍ 실무회의 후 작업 진행 □ 향후계획 ❍ 준 공 : '23. 11.
2023년 큰나무 가꾸기 사업 (산림경영)	❍ 위 치 : 금곡면 검암리 산25번지 외 2필지 ❍ 사 업 량 : 큰나무가꾸기 30ha ❍ 사업기간 : '23. 10. ~ '23. 11. ❍ 사 업 비 : 49백만원	□ 추진사항 ❍ 착 공 : '23. 10. 20. ❍ 실무회의 후 작업 진행 □ 향후계획 ❍ 준 공 : '23. 11.
2023년 산불예방 숲가꾸기 사업 (산림경영)	❍ 위 치 : 진성면 구천리 산201-1번지 외 42필지 ❍ 사 업 량 : 120.97ha ❍ 사업기간 : '23. 9. ~ '23. 11. ❍ 사 업 비 : 511백만원	□ 추진사항 ❍ 착 공 : '23. 10. 20. ❍ 민원 및 일시사용 변경 후 착수 □ 향후계획 ❍ 준 공 : '23. 11.
2023년 공익림숲가꾸기 2차 사업 (산림경영)	❍ 위 치 : 사봉면 부계리 산87번지 외 13필지 ❍ 사 업 량 : 48.18ha ❍ 사업기간 : '23. 11. ~ '23. 12. ❍ 사 업 비 : 219백만원	□ 추진사항 ❍ 일상감사 및 계약심사 □ 향후계획 ❍ 착 공 : '23. 11. ❍ 준 공 : '23. 12.
2023년 하반기 산불예방 숲가꾸기 사업 (산림경영)	❍ 위 치 : 금산면 가방리 산51번지 외 26필지 ❍ 사 업 량 : 113ha ❍ 사업기간 : '23. 11. ~ '23. 12. ❍ 사 업 비 : 494백만원	□ 추진사항 ❍ 일상감사 및 계약심사 □ 향후계획 ❍ 착 공 : '23. 11. ❍ 준 공 : '23. 12.
등산로 정비 대행사업 (산림휴양)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 산116-9번지 외 ❍ 사 업 량 - 등산로변 임시주차장 개설 - 등산로 경관개선 및 정비 1식 ❍ 사업기간 : '23. 6. ~ '23. 12. ❍ 사 업 비 : 218백만원	□ 추진사항 ❍ 착 공 : '23. 6. □ 향후계획 ❍ 준 공 : '23. 12.
광제산 및 선학산 정비 대행사업 (산림휴양)	❍ 위 치 : 광제산, 선학산 ❍ 사 업 량 : 야자매트, 목계단 및 난간 설치 등 ❍ 사업기간 : '23. 6. ~ '23. 12. ❍ 사 업 비 : 396백만원	□ 추진사항 ❍ 착 공 : '23. 6. □ 향후계획 ❍ 준 공 : '23. 12.
2023년 숲길 훼손지 정비사업 (산림휴양)	❍ 위 치 : 비봉산, 월아산, 숙호산 ❍ 사업내용 : 등산로 정비 1식 ❍ 사업기간 : '23. 9. ~ '23. 11. ❍ 사 업 비 : 260백만원	□ 추진사항 ❍ 착 공 : '23. 9. □ 향후계획 ❍ 준 공 : '23. 11.
방어산 시립공원 탐방로 및 관리임도 조성사업 (청원지구) (산림휴양)	❍ 위 치 : 지수면 청원리 산20번지 외 1 ❍ 사 업 량 : 탐방로, 임도 신설 1.08km ❍ 사업기간 : '23. 2. ~ '23. 11. ❍ 사 업 비 : 254백만원	□ 추진사항 ❍ 착 공 : '23. 2. □ 향후계획 ❍ 준 공 : '23. 11.
2023년 간선임도 조성 사업 (외율~용산지구) (산림휴양)	❍ 위 치 : 명석면 외율리 산72번지 외 5필지 ❍ 사 업 량 : 임도 신설 0.92km ❍ 사업기간 : '23. 6. ~ '23. 12. ❍ 사 업 비 : 308백만원	□ 추진사항 ❍ 착 공 : '23. 6. □ 향후계획 ❍ 준 공 : '23. 12.
2023년 임도 유지보수사업 (산림휴양)	❍ 위 치 : 명석 신기임도 외 2필지 ❍ 사 업 량 : 임도유지보수 1식 ❍ 사업기간 : '23. 6. ~ '23. 12. ❍ 사 업 비 : 267백만원	□ 추진사항 ❍ 착 공 : '23. 6. □ 향후계획 ❍ 준 공 : '23. 12.
선학산 등산로변공영주차장 조성공사 (산림휴양)	❍ 위 치 : 하대동 711-8번지 일원 ❍ 사업내용 : 주차장 조성 (A=5,686㎡, 98면) ❍ 사업기간 : '23. 6. ~ '24. 12. ❍ 사 업 비 : 839백만원	□ 추진사항 ❍ 착 공 : '23. 6. □ 향후계획 ❍ 준 공 : '24. 12.
월아산 치유의 숲 조성사업 (산림휴양)	❍ 위 치 : 진성면 동산리 산116-9번지 ❍ 사업내용 : 치유의 숲 조성 50ha - 치유센터 1동, 오행치유원, 숲길 등 ❍ 사업기간 : '23. 11. ~ '24. 12. ❍ 사 업 비 : 13,600백만원	□ 추진사항 ❍ 일상감사 및 계약심사 □ 향후계획 ❍ 착 공 : '23. 11. ❍ 준 공 : '24. 12.
하모 유아숲 체험원 조성사업 (산림휴양)	❍ 위 치 : 판문동 산181번지 일원 ❍ 사업내용 : 유아숲 체험원 조성 1ha ❍ 사업기간 : '23. 11. ~ '23. 12. ❍ 사 업 비 : 281백만원	□ 추진사항 ❍ 계약심사 □ 향후계획 ❍ 착 공 : '23. 11. ❍ 준 공 : '23. 12.
2023년 등산로변 공영화장실 청소용역 (산림휴양)	❍ 위 치 : 진주시 관내 ❍ 사 업 량 : 등산로변 공영화장실 9개소 ❍ 사업기간 : '23. 2. ~ '24. 1. ❍ 사 업 비 : 52백만원	□ 추진사항 ❍ 착 공 : '23. 2. □ 향후계획 ❍ 준 공 : '24. 1.
월아산 산림경관 조성사업 (숲속의 진주)	❍ 위 치 : 월아산 숲속의 진주 ❍ 사업내용 : 석축 공사, 수목 식재 등 ❍ 사업기간 : '23. 2. ~ '23. 11. ❍ 사 업 비 : 496백만원	□ 추진사항 ❍ 협약체결 : '23. 2. ❍ 착 공 : '23. 2. □ 향후계획 ❍ 준 공 : '23. 11.
월아산 시유림 유지관리사업 (숲속의 진주)	❍ 위 치 : 월아산 숲속의 진주 ❍ 사 업 량 : 93.90ha ❍ 사업내용 : 예초, 제초, 덩굴제거 등 ❍ 사업기간 : '23. 5. ~ '23. 11. ❍ 사 업 비 : 378백만원	□ 추진사항 ❍ 협약체결 : '23. 5. ❍ 착 공 : '23. 5. □ 향후계획 ❍ 준 공 : '23. 11.
월아산 플랜트 설치공사 (숲속의 진주)	❍ 위 치 : 월아산 숲속의 진주 ❍ 사업내용 : 플랜트 설치공사 1식 ❍ 사업기간 : '23. 10. ~ '23. 11. ❍ 사 업 비 : 62백만원	□ 추진사항 ❍ 협약체결 : '23. 10. ❍ 착 공 : '23. 10. □ 향후계획 ❍ 준 공 : '23. 11.
하반기 재선충병 방제사업 (산림보호)	❍ 위 치 : 관내 재선충병 발생지역 ❍ 사업내용 : 피해목 제거, 예방나무주사 ❍ 사업기간 : '23. 11. ~ '23. 12. ❍ 사 업 비 : 1,081백만원	□ 추진사항 ❍ 계약체결 : '23. 11. □ 향후계획 ❍ 착 공 : '23. 11. ❍ 준 공 : '23. 12.
집현면 덕오리 땅밀림 복구 공사 (산림보호)	❍ 위 치 : 집현면 덕오리 1388번지 일원 ❍ 사업내용 : 쏘일네일링, 옹벽 설치 등 ❍ 사업기간 : '22. 12. ~ '24. 3. ❍ 사 업 비 : 900백만원	□ 추진사항 ❍ 착 공 : '22. 12. □ 향후계획 ❍ 준 공 : '24. 3.

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 건전하고 지속 가능한 산림자원 육성을 위한 조림사업 및 숲가꾸기 사업 시행

□ 지역주민과 시민의 심신회복 및 건강증진을 위한 치유의 숲 조성

□ 등산로 정비를 통한 쾌적하고 안전한 등산환경 조성

□ 월아산 숲속의 진주 국가정원 추진 및 정원박람회 개최

□월아산 숲속의 진주 및 진양호 우드랜드 운영으로 복합 산림복지서비스 제공

□ 산불방지종합대책 수립으로 산불예방 추진 및 초동진화 태세확립

□ 소나무재선충병 방제사업 추진

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	10	53,578	9	-	-	1
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	10	53,578	9	-	-	1

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

조림 및 숲가꾸기 사업

산림의 경제적, 환경적 가치를 높이고, 산림기능 증진 및 건전하고 지속 가능한 산림자원 육성에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 전읍면, 농촌동

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 사 업 량 : 1,270ha(조림 47ha, 풀베기 300ha, 덩굴제거 350ha, 숲가꾸기 573ha)

❍ 사 업 비 : 3,949백만원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)

□ 추진상황

❍ 2023. 9. ~ 10. : 조림 대상지 신청 접수

□ 추진계획

❍ 2023. 11. : 조림 대상지 선정

❍ 2023. 11. ~ 12. : 2024년 조림사업 실시설계용역

❍ 2024.  1. ~  4. : 조림 대상지 정리 및 식재 작업

❍ 2024.  6. ~  9. : 풀베기 및 덩굴제거 착공 및 준공

❍ 2024.  8. ~ 11. : 산불예방, 공익림가꾸기 등 숲가꾸기 사업 착공 및 준공

□ 기대효과

❍ 지역 특성에 맞는 수목 식재로 산림경영 기반 구축

❍ 산림 경제림단지 육성 및 산림휴양 인프라 활용으로 산림소득 향상 제고

선학산 등산로변 주차장 조성

시 중심에 위치한 대표적인 등산로 주변 주택지 이용 불편 민원 해소 및 낙후된 생활환경 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 하대동 711-1번지 일원(상대 한주그린아파트 인근)

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2024년

❍ 사 업 량 : 등산로변 주차장 설치(5,686㎡, 98면)

❍ 사 업 비 : 3,800백만원(시비 100%)

□ 추진상황

❍ 2021.  4. : 도시계획시설 결정

❍ 2021.  7. : 선학산 등산로변 공영주차장 실시설계 완료

❍ 2022.  3. : 손실보상 계획 열람 공고

❍ 2022.  6. : 손실보상금 산정 및 보상협의 요청

❍ 2022.  8. : 실시계획인가 고시

❍ 2023.  5. : 보상협의 요청(4차)

❍ 2023.  6. : 공사 착공

❍ 2023.  8. : 수용재결 열람 공고

□ 추진계획

❍ 2023. 11. : 경상남도지방토지수용위원회 수용재결 심의

❍ 2024.  1. : 수용개시(공탁·등기) 및 실 착공

- 토지수용(상대동 397-1, 435㎡), 기 발주 공사 이월 추진

❍ 2024. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 등산로변 주차공간 확보를 통해 선학산 이용객 및 인근 거주자 불편 해소

월아산 치유의 숲 조성사업

최근 아토피, 알레르기 비염 등 환경성질환과 우울증 등 현대병 증가에 따른 자연치유의 관심이 증가하고 있어 지역주민과 시민의 심신회복 및 건강증진을 위한 치유의 숲 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 진성면 동산리 산116-9번지 일원

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2024년

❍ 사업규모 : 치유의 숲 조성 50ha

❍ 주요내용 : 치유센터 1동, 치유숲길, 오행치유원, 풍욕테라스 등

❍ 사 업 비 : 13,600백만원(전환 2,500, 도비 750, 시비 10,350)

□ 추진상황

❍ 2019.  4. : 타당성 평가 용역 완료

❍ 2020. 12. : 기본계획 수립 용역 완료

❍ 2021.  1. : 토지 및 지장물 등 보상계획 열람 공고

❍ 2021.  8. : 건축분야 기본 및 실시설계 용역 시행

❍ 2021. 12. : 산림분야 실시설계 용역 시행

❍ 2022. 10. : 경상남도 지방재정투자심사 재심사

❍ 2022. 12. : 보상협의 완료

❍ 2023.  7. : 경상남도 치유의 숲 조성계획 승인 고시

□ 추진계획

❍ 2023. 11. : 공사 착공

- 치유센터 1동(2층·952㎡), 야외화장실 1동(91㎡), 주차장 56면, 진입로 등

❍ 2024. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

❍월아산 산림자원을 활용한 산림치유 공간을 조성하여 월아산 숲속의 진주와 연계하여 장기적인 종합 산림복지 서비스 제공

임도시설사업

산불예방 및 진화, 산림보호, 산림경영에 필수적인 산림기반시설인 임도의 신설 및 유지 관리를 통해 산림자원을 효율적으로 관리

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 관내 일원

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 사 업 량 : 산불예방임도 및 간선임도 신설, 기존 임도 구조개량 및 보수

❍ 사 업 비 : 903백만원(국비 265, 도비 248, 시비 390)

- 산불예방임도 : 167백만원(국비 117, 도비 25, 시비 25)

- 간선임도 : 210백만원(국비 148, 도비 31, 시비 31)

- 구조개량 및 보수 : 526백만원(도비 192, 시비 334)

□ 추진계획

❍ 2024.  3. : 2024년 산불진화임도 및 간선임도 신설 사업 착공

❍ 2024.  4. : 2024년 임도 구조 개량 및 보수 사업 착공

❍ 2024. 12. :2024년 산불진화임도 및 간선임도 신설 사업, 2024년 임도 구조개량 및 보수 사업 준공

□ 기대효과

❍산림기반시설인 임도의 신설 및 임도유지보수를 통하여 임업경영기반 확충 및 산림재해예방 효과

월아산 숲속의 진주 국가정원 추진

타 도시와 차별화되는 우리시만의 고유한 역사･문화･예술적 역량을 종합한 국가정원 조성으로 미래세대를 위한 열린 생태와 정원교육의 장 마련

국립난대수목원, 순천만국가정원, 태화강국가정원에 이은 월아산 국가정원 조성으로 남해안 신문화 관광벨트 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진성면 동산리 산116-34번지 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2029년

❍ 사 업 비 : 17,024백만원(시비 100%)  *공사비 등 16,024, 보상비 1,000

※ 사업비는 국·도비, 민자 등 확보 여건에 따라 변동될 수 있음

□ 추진상황

❍ 2021. 11. : 진주시-경상국립대‘월아산 국가정원 추진’업무 협약

❍ 2021. 12. : 진주시 정원문화 조성 및 진흥에 관한 조례 제정

❍ 2022.  7. ~ 2023.  8. : 월아산 국가(지방)정원 조성 마스터플랜 및 타당성 조사 용역

❍ 2022. 10. ~ 2023.  2. : 지방정원 예정지 지정 신청 관련 관계부서 등 사전협의

❍ 2023.  4. ~  5. : 지방정원 예정지 지정 신청 및 주민의견수렴 등 행정절차 이행

❍ 2023.  5. : 월아산 국가(지방)정원 조성 마스터플랜 수립을 위한 시민공청회 개최

❍ 2023.  6. : 지방정원 예정지 신청(경남도)

❍ 2023.  8. : 월아산 국가(지방)정원 조성 마스터플랜 및 타당성 조사 용역 최종보고회

❍ 2023.  9. : 월아산 작가정원 조성사업 설계공모 관리용역 시행

□ 추진계획

❍ 2023. 11. : 지방정원 예정지 지정 승인·고시(산림청, 진주시)

❍ 2023. 11. ~ 2025.  4. : 지방정원 조성 기본 및 실시설계용역 시행

❍ 2023. 11. ~ 2024.  1. : 1차 사업 실시설계

❍ 2024.  2. ~  3. : 지방정원 조성계획 수립

❍ 2024.  2. ~ 12. : 지방정원 도시관리계획(용도지역) 결정(변경)

❍ 2024.  2. ~  7. : 환경·재해 영향평가 시행 및 승인 신청·승인

❍ 2024.  7. ~ 11. : 지방정원 조성계획 승인 신청·승인(진주시⇒경남도)

❍ 2024. 11. ~ 2025.  4. : 지방정원 조성공사(1차사업) 시행

❍ 2025.  5. ~  6. : 지방정원 등록 신청·승인(진주시⇒경남도)

❍ 2025.  7. ~  8. : 지방정원 조성계획 변경 승인 신청·승인(진주시⇒경남도)

❍ 2025.  9. ~ 2026. 10. : 지방정원 조성공사(2차사업) 시행

❍ 2026.  9. ~ 2026. 11. : 지방정원 등록 변경 신청·승인(진주시⇒경남도)

❍ 2026. 12. ~ 2029. 11. : 지방정원 운영 및 평가(3년간)

❍ 2029. 11. ~ 12. : 국가정원 지정 신청 및 승인(산림청)

	<2024년 주요계획 : 월아산 작가정원 조성>
◆ 사업기간 : 2023년 ~ 2024년 ◆ 사업내용 : 주제(작가)정원 조성(2개소, 약 4,000㎡ 내외) ◆ 사 업 비 : 1,200백만원(23년 200백만원, 24년 1,000백만원)

□ 기대효과

❍시민들의 생활수준 및 삶의 질 향상으로 정원에 대한 관심이 꾸준히 증가하고 있으며, 정원 자원을 활용하여 일상 생활문화 증진, 지역 관광 및 경제 활성화를 도모할 수 있음

❍국가(지방) 차원에서 공공정원의 조성을 통해 시민들에게 녹색 복지를 실현하고 생태관광 수요를 충족하여 정원문화를 시민들 일상에 깊이 침투시켜 ‘정원문화도시 진주’의 기틀 마련

❍타 도시와 차별화되는 우리시만의 고유한 역사·문화·예술적 역량을 종합한 국가정원 조성으로 미래세대를 위한 열린 생태와 정원교육의 장 마련 역할

월아산 정원박람회 개최

월아산 국가정원 조성사업과 연계한 정원박람회를 매년 개최하여 2029년 진주 국제정원박람회 기반 조성

국가정원 조성사업과 정원박람회 개최를 연계 추진하여 조기에 정원 문화 산업 발전 성과 달성 및 정원도시로 발돋움

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 진성면 동산리 일원

❍ 사업기간 : 2023 ~ 매년 추진  ※ 2029년 국제정원박람회 유치 목표

❍ 사 업 비 : 300백만원(시비 100%)

❍ 주요내용 : 정원산업전, 정원 전시, 콘퍼런스, 정원페스티벌, 부대행사 등

□ 추진상황

❍ 2022. 5. : 진주 국제 정원문화 산업박람회 개최 경남 국정과제 항목 제출

※ 2028년 6월 진주 국제 정원문화 산업박람회 개최 위한 기반시설 구축 및 정원문화 산업박람회를 위한 총사업비 900억원 국도비 반영 건의

❍ 2023. 7. : 2023년 월아산 정원박람회 행사 개최

□ 추진계획

❍ 2024. 1. : 2024년 월아산 정원박람회 기획운영 대행용역 발주

❍ 2024. 6. : 2024년 제2회 월아산 정원박람회 행사 개최(매년 개최)

❍ 2029. 4. : 진주 국제정원박람회 개최

□ 기대효과

❍ 서부경남지역의 고유한 산림자원인 월아산 중심의‘정원 문화도시, 진주’조성 홍보

❍ 역사·문화·생태적 가치를 지닌 지역 정원문화 발굴 소개 및 지역 명소 홍보

❍ 정원박람회 개최로 시민의 여가생활 향상과 정원산업 발전 기초 마련, 관광객 유입 등 지   역경제 활성화에 기여

월아산 숲속의 진주·진양호 우드랜드 운영

산림자원을 활용한 복합 산림복지시설 운영과 휴양·교육·체험 등 쾌적한 산림서비스 제공으로 늘어나는 산림휴양 수요 대응

진양호 우드랜드 운영으로 균형 있는 목재문화 체험 기회 제공

□ 운영개요

구 분	월아산 숲속의 진주			진양호 우드랜드
	우드랜드	자연휴양림	산림레포츠단지
위 치	진성면 달음산로 313 일원			판문오동길 99-7 일원
기 간	연중 운영 ※ 휴관일 : (공통) 매주 화요일 / (우드랜드) 1월 1일, 설 및 추석 연휴
주요시설	□목재문화체험장 □목공체험장 □숲속어린이도서관 □유아숲체험원 등	□방문자센터 □숲속의집 □산림휴양관 □글램핑 □야영데크	□산림체험안내소 □곡선형짚와이어 □네트어드벤처 □에코라이더 □하늘숲길	□전시홀 □체험전시실 □목재가공체험실 □목공체험실
운 영 비	3,912백만원(시비 100%)			600백만원(시비 100%)

□ 추진계획

❍ 2024. 1. :월아산 숲속의 진주(우드랜드, 자연휴양림, 산림레포츠) 및 산림교육 프로그램

운영

❍ 2024. 1. : 진양호 우드랜드 및 우드버닝 작품 전시 운영

❍ 2024. 4. ~ 12. : 계절별 문화행사 추진

□ 기대효과

❍양질의 산림복지서비스 제공하여 삶의 질 향상 및 외부 방문객 유입을 통한 지역경제 활성화 기여

❍ 다양한 목재문화 체험 기회 제공 및 목재 친화 도시 이미지 제고

산불방지 대책 추진

시기별 산불방지대책 상황실을 운영하여 산불방지 역량 집중과 초동진화 태세 확립으로 산불피해 최소화 및 산림자원 보호에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산림과 및 전읍면, 농촌동

❍ 사업기간

- 상반기 : 2024.  1. 1. ~  5. 15.

- 하반기 : 2024. 11. 1. ~ 12. 31.

❍ 산림면적 : 41,454ha

❍ 사 업 비 : 4,148백만원(국비 10%, 도비 4%, 시비 86%)

□ 추진상황

❍ 2023. 10. : 2023년 추기 및 2024년 춘기 산불방지인력 선발

❍ 2023. 11. ~ 12. : 2023년 추기 산불방지대책 추진

□ 추진계획

❍ 2024.  1. ~  5. : 2024년 춘기 산불방지대책 추진

❍ 2024. 11. ~ 12. : 2024년 추기 산불방지대책 추진

	<산불방지대책 주요 추진내용>
◆ 산불방지대책 상황실 운영 : 27개소(산림과, 26개 읍면, 농촌동) ◆ 산불방지인력 사역 : 175명(전문예방진화대 59, 초소 18, 일반진화대 98) ◆ 산불진화 헬기임차 : 권역별 1대(진주·사천·남해권역)

□ 기대효과

❍ 산불예방·진화를 통한 산림자원 보호 및 건강한 생태환경 조성 기여

소나무재선충병 방제사업

소나무재선충병 피해확산 차단 및 생태적으로 건강한 산림자원 육성에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 전읍면, 농촌동

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 사업내용

- 피해목 및 의심목 제거 10,000본

- 예방나무주사 450ha

❍ 사 업 비 : 1,845백만원(국비 46%, 도비 6%, 시비 45%)

□ 추진계획

❍ 2023. 11. ~ 12. : 상반기 피해목 제거 사업, 책임방제구역 실시설계

❍ 2024.  1. ~  2. : 상반기 피해목 제거 사업, 책임방제구역 착공 및 준공

❍ 2024.  9. ~ 10. : 하반기 피해목 제거 사업, 예방나무주사 사업 실시설계

❍ 2024. 11. ~ 12. : 하반기 피해목 제거 사업, 예방나무주사 사업 착공 및 준공

□ 기대효과

❍피해목·의심목 제거 및 직영 방제단을 통한 예방나무 주사를 실시함으로써 소나무재선충병 재발생률 최소화

❍소나무재선충병 방제를 통한 소나무 임상 피해 최소화 및 건강한 산림자원 육성에 기여

보호수 및 노거수의 생육환경 개선

보호수 및 노거수의 기능 유지증진, 보호 관리를 위하여 보호수 및 노거수의 생육환경을 개선하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 관내 일원

❍ 관리수량 : 311본(보호수 73본, 노거수 238본)

❍ 사업기간 : 연중

❍ 사업내용

- 고사지 및 위험지 제거

- 지지대 설치 및 외과수술

❍ 사 업 비 : 136백만원(도비 7%, 시비 93%)

□ 추진상황

❍ 2023.  3. ~ 6. : 상반기 보호수 및 노거수 생육환경 개선 사업 실시설계 및 착·준공

❍ 2023. 10. : 하반기 보호수 및 노거수 생육환경 개선 사업 실시설계

□ 추진계획

❍ 2023. 11. ~ 12. : 하반기 보호수 및 노거수 생육환경 개선 사업 착공 및 준공

❍ 2024.  8. ~  9. : 보호수 및 노거수 자연재해 피해 현황 조사

❍ 2024.  9. : 생육환경 개선 사업 실시설계·착공

❍ 2024. 11. : 생육환경 개선 사업 준공

□ 기대효과

❍보호수 및 노거수의 생육환경 개선을 통해 시민들에게 건강한 쉼터를 제공함으로써 생활환경 개선에 기여

공원관리과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황	(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	24	1	6	7	6	4
현 원	25	1	8	4	5	7	휴직 2명 포함
증 감	-	-	2	△3	△1	3

※ 별도 인원 : 임기제 6명(일반 1명/ 시간선택제 5명), 공무직 16명(일반공무직 12명/ 환경공무직 4명)

□ 위원회	(2023. 11. 1. 현재)

구분 위원회수	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원중 여 성 위원수	％
			계	공무원	％	민간인	％
도시공원 위원회	15	5	10	-	-	10	100	5	50
도시숲 등의 조성·관리 심의위원회	13	3	10	-	-	10	100	4	40

□ 예산규모	(단위 : 억원)

구 분	2022년	2023년	증 감	비 고
총 계	370	406	36
일반회계	370	406	36
특별회계	-	-	-

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	120	71	49	-	-
예산사업	120	71	49	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업  --- 71건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
진양호 가족공원 숲가꾸기사업	❍ 위 치 - 내동면 삼계리 산176번지 일원 ❍ 사업기간 : 2022.2.~2023.4. ❍ 사 업 량 - 숲가꾸기 16.35ha - 잡관목 제거 등 수목정비 ❍ 사 업 비 : 430백만원	❍ 착공 : 2022. 2. 7. ❍ 준공 : 2023. 4. 30.	❍ 공원 내 수목의 원활한 성장 및 임내 환경 조성
진양호 환상의 숲 조성 (MR, 홀로그램 기획·제작·설치)	❍ 위 치 - 구역1 : 가족쉼터 일원 - 구역2 : 꿈키움동산 일원 ❍ 사업기간 : 2022.3.~2023.1. ❍ 사업내용 - 진양호 수달 하모와 함께하는 환상의 숲 조성을 위한 디지털 콘텐츠 등 디자인 기획·제작·설치사업 ❍ 사 업 비 : 1,760백만원	❍ 착공 : 2022. 3. 21. ❍ 준공 : 2023. 1. 31.	❍ 진양호공원 내 디지털 기술을 맵핑 및 경관조명 설치로 경관 개선 및 볼거리 제공
진양호 어린이 놀이숲 조성공사	❍ 위 치 - 판문동 465-1번지 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 4. ~ 2023. 2. ❍ 사 업 량 - 놀이공간 조성(A=2,870㎡), 주변 조경 등 - 친자연형 어린이놀이시설 하모 조합놀이대, 네트놀이, 미끄럼틀 등 1식 ❍ 사 업 비 : 974백만원	❍ 착공 : 2022. 4. 15. ❍ 준공 : 2023. 2. 17.	❍ 노후된 가족쉼터 일원을 하모를 활용한 친자연 형 놀이공간 으로 조성해 아이들이 즐길 수 있는 놀이 공간 제공
진양호 편익 모노레일 (차량 및 레일) 제작·설치	❍ 위 치 - 판문오동길 99-7번지 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 5. ~ 2023. 4. ❍ 사업내용 - 경사용 모노레일 차량(1대, 20인승), 3선 레일, 비상대피로 ❍ 사 업 비 : 1,539백만원	❍ 착공 : 2022. 5. 27. ❍ 준공 : 2023. 4. 24.	❍ 모노레일 설치로 이용객의 이동편의 제공
진양호 가족공원 조 성 (대 나 무 숲 산 책 로) 공 사	❍ 위 치 - 내동면 삼계리 산176번지 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 5. ~ 2023. 4. ❍ 사업내용 - 대나무 숲 산책로, 전망데크, 편익시설 등 ❍ 사 업 비 : 226백만원	❍ 착공 : 2022. 5. 27. ❍ 준공 : 2023. 4. 30.	❍ 공원 내 산책로 조성으로 시민들의 휴식 및 정서생활 향상에 기여
진양호 가족공원 조성 (숲체험놀이장) 공사	❍ 위 치 - 내동면 삼계리 산174-25번지 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 6. ~ 2023. 4. ❍ 사업내용 - 숲체험놀이장, 야생화원, 휴게광장, 주차장 등 ❍ 사 업 비 : 535백만원	❍ 착공 : 2022. 6. 16. ❍ 준공 : 2023. 4. 30.	❍ 공원 내 숲체험 편익시설 설치 및 정비로 쾌적한 환경 및 편의 제공
2022년 하반기 진양호 공원 숲가꾸기 및 정비사업	❍ 위 치 - 판문동 173-5번지 외 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 10.~2023. 1. ❍ 사업내용 - 숲가꾸기(수목 및 대나무 등) 1식 ❍ 사 업 비 : 232백만원	❍ 착공 : 2022. 10. 7. ❍ 준공 : 2023. 1. 20.	❍ 공원 내 수목의 원활한 성장 및 임내 환경 조성
진양호공원 우약정 매점 외 1개소 리모델링공사 (건축, 전기, 통신)	❍ 위 치 - 판문동 465-1번지 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 11.~2023. 1. ❍ 사업내용 - 우약정 매점, 화장실 건축, 인테리어, 부대공사 등 ❍ 사 업 비 : 160백만원	❍ 착공 : 2022. 11. 23. ❍ 준공 : 2023. 1. 5.	❍ 노후된 매점, 화장실 정비로 쾌적한 공원 환경 제공 및 이용 편의 증진
진양호공원 가족쉼터 화장실 리모델링 공사(건축, 전기)	❍ 위 치 - 판문동 465-1번지 일원 ❍ 사업기간 : 2022. 11.~2023. 1. ❍ 사업내용 - 가족쉼터 화장실 건축, 인테리어, 부대공사 등 ❍ 사 업 비 : 115백만원	❍ 착공 : 2022. 11. 23. ❍ 준공 : 2023. 1. 9.	❍ 노후된 화장실 정비로 쾌적한 공원 환경 제공 및 이용 편의 증진
집현 스마트 양묘장 실시설계 용역	❍ 위 치 - 집현면 신당리 20-1번지 ❍ 사업기간 : 2022. 12.~2023. 4. ❍ 사업내용 - 스마트양묘장(1,800㎡) 설계 ❍ 사 업 비 : 20백만원	❍ 착공 : 2022. 12. 8. ❍ 준공 : 2023. 4. 5.	❍ 공원·녹지 지역 유지관리 효율성 제고에 기여
소망진산 유등공원 무궁화길 조성사업	❍ 위 치 - 망경동 178-2번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1.~4. ❍ 사업내용 - 무궁화 및 회양목 식재 ❍ 사 업 비 : 242백만원	❍ 착공 : 2023. 1. 9. ❍ 준공 : 2023. 4. 13.	❍ 남강 유등과 함께 나라 사랑하는 마음을 고양시키는 호국의 장 및 무궁화를 쉽게 접할 기회 제공
진주시 가로수 전정공사 임목폐기물 처리 용역 (공원녹지)	❍ 위 치 - 집현면 신당리 547번지 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2. ❍ 사업내용 - 폐기물 110t 운반 및 처리 ❍ 사 업 비 : 20백만원	❍ 착공 : 2023. 1. 26. ❍ 준공 : 2023. 2. 24.	❍ 아름답고 쾌적한 도시경관 형성
신당 양묘장 내 공원, 녹지 수목전정 부산물 파쇄 용역	❍ 위 치 : 신당 양묘장 ❍ 사업기간 : 2023. 2. ❍ 사업내용 - 수목전정부산물 400㎥ 파쇄 ❍ 사 업 비 : 19백만원	❍ 착공 : 2023. 2. 2. ❍ 준공 : 2023. 2. 17.	❍ 아름답고 쾌적한 도시경관 형성
정촌면 연결녹지 데크계단 정비공사	❍ 위 치 - 정촌면 예하리 1297-14, 1265번지 ❍ 사업기간 : 2023. 2. ~ 3. ❍ 사업내용 : 데크 정비 1식 ❍ 사 업 비 : 31백만원	❍ 착공 : 2023. 2. 13. ❍ 준공 : 2023. 3. 8.	❍ 공원 이용자에게 안전한 환경 제공
녹지공원 야외무대 전기인입공사	❍ 위 치 - 녹지공원 야외무대 5개소 ❍ 사업기간 : 2023. 2. ~ 5. ❍ 사업내용 : 전기인입(50kw) ❍ 사 업 비 : 46백만원	❍ 착공 : 2023. 2. 22. ❍ 준공 : 2023. 5. 12.	❍ 행사 시 전기사용 편의 제공
초전공원 시설 재정비사업	❍ 위 치 - 초전동 1583-40번지 ❍ 사업기간 : 2023. 3.~ 9. ❍ 사업내용 - 초전공원 재정비 1식 ❍ 사 업 비 : 1,500백만원	❍ 착공 : 2023. 3. 6. ❍ 준공 : 2023. 9. 19.	❍ 시설 재정비 통한 쾌적한 공원시설 제공
평거유적공원 외 1개소 조경수 전정공사	❍ 위 치 - 평거유적공원, 남가람공원 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ❍ 사업내용 : 가시나무, 소나무 100주 전정 ❍ 사 업 비 : 20백만원	❍ 착공 : 2023. 3. 9. ❍ 준공 : 2023. 3. 31.	❍ 수목의 원활한 생육 발달에 도움
소망진산 유등공원 무궁화 정원 조성사업	❍ 위 치 - 망경동 185-1번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 6. ❍ 사업내용 - 무궁화 및 갈대조명, 초화류 식재 등 ❍ 사 업 비 : 424백만원	❍ 착공 : 2023. 3. 17. ❍ 준공 : 2023. 6. 24.	❍ 남강 유등과 함께 나라 사랑 하는 마음을 고양시키는 호국의 장 및 무궁화를 쉽게 접할 기회 제공
금호지 둘레 경관 지장수목 정비공사	❍ 위 치 - 금호지공원 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 4. ❍ 사업내용 : 지장수목 정비 ❍ 사 업 비 : 27백만원	❍ 착공 : 2023. 3. 20. ❍ 준공 : 2023. 4. 13.	❍ 수목의 원활한 생육 발달에 도움
진주여중 주변환경 정비	❍ 위 치 - 이현동 91번지 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 4. ❍ 사업내용 - 녹지공간 리모델링 1식 ❍ 사 업 비 : 100백만원	❍ 착공 : 2023. 3. 20. ❍ 준공 : 2023. 4. 18.	❍ 녹지공간 정비로 주변 환경 개선
공원, 녹지 내 수목 전정부산물 처리 용역	❍ 위 치 : 신당 양묘장 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 6. ❍ 사업내용 - 수목전정부산물 111t 파쇄 ❍ 사 업 비 : 19백만원	❍ 착공 : 2023. 3. 23. ❍ 준공 : 2023. 6. 11.	❍ 쾌적한 공원 녹지 공간 조성을 위한 부산물 처리
볼래로 문화공원 외 2개소 조경수 전정 공사	❍ 위 치 - 볼래로 문화공원 외 2개소 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 4. ❍ 사업내용 : 소나무류 205주 전정 ❍ 사 업 비 : 37백만원	❍ 착공 : 2023. 3. 24. ❍ 준공 : 2023. 4. 17.	❍ 수목의 원활한 생육 발달에 도움
진주시 청소년수련관 조경수 이식 공사	❍ 위 치 - 하얀울공원 외 1개소 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 4. ❍ 사업내용 : 조경수 이식 및 식재 ❍ 사 업 비 : 20백만원	❍ 착공 : 2023. 3. 29. ❍ 준공 : 2023. 4. 7.	❍ 수목의 원활한 생육 발달에 도움
강주연못공원 수목 보식 공사	❍ 위 치 - 강주연못공원 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 4. ❍ 사업내용 : 수목 239주 보식 ❍ 사 업 비 : 19백만원	❍ 착공 : 2023. 3. 29. ❍ 준공 : 2023. 4. 21.	❍ 공원 내 수목 관리 및 쾌적한 공원 조성
공원 및 녹지 내 관정시설 개발사업 (서남부권)	❍ 위 치 - 정촌면 외 3개소 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 6. ❍ 사업내용 : 지하수 개발 4개소 ❍ 사 업 비 : 145백만원	❍ 착공 : 2023. 4. 5. ❍ 준공 : 2023. 6. 29.	❍ 공원 및 녹지 내 수목의 가뭄 및 기후변화에 선제적 대응
공원 및 녹지 내 관정시설 개발사업 (북 부 권)	❍ 위 치 : 금산면 외 1개소 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 6. ❍ 사업내용 : 지하수 개발 2개소 ❍ 사 업 비 : 172백만원	❍ 착공 : 2023. 4. 5. ❍ 준공 : 2023. 6. 29.	❍ 공원 및 녹지 내 수목의 가뭄 및 기후변화에 선제적 대응
서진주IC 외 2개소 조경수 전정 공사	❍ 위 치 - 서진주IC 외 2개소 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 5. ❍ 사업내용 : 조경수 94주 전정 ❍ 사 업 비 : 19백만원	❍ 착공 : 2023. 4. 18. ❍ 준공 : 2023. 5. 12.	❍ 수목의 원활한 생육 발달에 도움
내동 정주마을 가로수 식재공사	❍ 위 치 - 내동면 독산리 206-27번지 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 5. ❍ 사업내용 - 가로수 식재 L=600m (도로 L=300m) ❍ 사 업 비 : 100백만원	❍ 착공 : 2023. 4. 18. ❍ 준공 : 2023. 5. 17.	❍ 인도변 가로수 식재로 녹지 환경 개선
신안녹지 리모델링공사	❍ 위 치 - 신안동 708-3번지 일원 (신안~평거녹지대) ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 9. ❍ 사업내용 - 녹지공간 리모델링 1식 ❍ 사 업 비 : 500백만원	❍ 착공 : 2023. 4. 18. ❍ 준공 : 2023. 9. 22.	❍ 쾌적한 녹지공간 및 보행환경 개선
갈전교 일원 산책로 조명 설치공사	❍ 위 치 - 갈전교 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 5. ❍ 사업내용 - LED공원등 13등 설치 - LED볼라드조명 30개 설치 ❍ 사 업 비 : 78백만원	❍ 착공 : 2023. 4. 19. ❍ 준공 : 2023. 5. 16.	❍ 갈전교 일원 이용자 야간 보행 환경 개선
스마트가든볼 설치	❍ 위 치 - 동진로 155(진주시청) ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 5. ❍ 사업내용 - 스마트가든 벽면녹화 1개소 ❍ 사 업 비 : 50백만원	❍ 착공 : 2023. 4. 20. ❍ 준공 : 2023. 5. 18.	❍ 청사 내 녹지환경 조성
가호12 어린이공원 시설정비사업	❍ 위 치 - 가좌동 1933번지 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 8. ❍ 사업내용 - 어린이 물놀이시설 1식, 노후시설 정비 1식 ❍ 사업비 : 800백만원	❍ 착공 : 2023. 4. 24. ❍ 준공 : 2023. 8. 16.	❍ 노후시설 정비 및 여름철 물놀이 시설 제공
자녀안심 그린숲 조성	❍ 위 치 - 초전동 1691번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 6. ❍ 사업내용 - 정원조성 및 수목식재 0.15ha ❍ 사 업 비 : 200백만원	❍ 착공 : 2023. 4. 25. ❍ 준공 : 2023. 6. 23.	❍ 초등학교 및 유치원 주변 숲 조성으로 안전하고 쾌적한 보행환경 제공
집현 양묘장 부지조성 공사	❍ 위 치 - 집현면 신당리 20-1번지 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 9. ❍ 사업내용 - 성토 등 부지조성 1식 ❍ 사 업 비 : 190백만원	❍ 착공 : 2023. 4. 25. ❍ 준공 : 2023. 9. 21.	❍ 공원·녹지 지역 유지관리 효율성 제고에 기여
바람모아공원 산책로 조도 개선사업	❍ 위 치 - 바람모아공원 내 산책로 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 5. ❍ 사업내용 - LED볼라드조명 40개 설치 ❍ 사 업 비 : 63백만원	❍ 착공 : 2023. 4. 26. ❍ 준공 : 2023. 5. 19.	❍ 바람모아공원 산책로 이용자 야간 보행환경 개선
신안녹지대 폭염저감시설 설치공사	❍ 위 치 - 신안동 708-3번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 10. ❍ 사업내용 - 폭염저감시설(쿨링포그) 설치 1식 ❍ 사 업 비 : 400백만원	❍ 착공 : 2023. 4. 26. ❍ 준공 : 2023. 10. 12.	❍ 폭염 저감 및 경관조명 개선
상평동동 어린이공원 정비사업	❍ 위 치 - 상평동 313-1번지 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 7. ❍ 사업내용 - 어린이 놀이시설 1식, 노후시설 정비 1식 ❍ 사 업 비 : 200백만원	❍ 착공 : 2023. 4. 27. ❍ 준공 : 2023. 7. 10.	❍ 노후된 시설 및 공원 환경 정비
충무공동 나래공원 바닥분수 설치	❍ 위 치 - 충무공동 75번지 ❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 9. ❍ 사업내용 - 바닥분수 설치 1식 ❍ 사 업 비 : 600백만원	❍ 착공 : 2023. 5. 8. ❍ 준공 : 2023. 9. 15.	❍ 여름철 바닥분수 제공 및 경관 개선
전통예술회관 주변 주차부지 조성공사	❍ 위 치 - 판문동 산178-6번지 외 일원 (전통예술회관 주변) ❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 8. ❍ 사업내용 - 노상 주차장(미포장) 68대, 주차장 조성 대상지 주변 진입 도로 개선 ❍ 사 업 비 : 199백만원	❍ 착공 : 2023. 5. 9. ❍ 준공 : 2023. 8. 18.	❍ 진양호공원 내 주차부지 조성으로 부족한 주차 수요 충족 및 시민이용 편의 제공
석류공원 야간경관 개선사업	❍ 위 치 - 가좌동 산86-3번지(석류공원) ❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 7. ❍ 사업내용 - 투광등 36개 및 라인조명 28개 설치 ❍ 사 업 비 : 48백만원	❍ 착공 : 2023. 5. 18. ❍ 준공 : 2023. 7. 31.	❍ 석류공원 야간경관 개선
평거10 어린이공원 시설정비사업	❍ 위 치 - 평거동 192-2번지 ❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 9. ❍ 사업내용 - 어린이 놀이시설 1식, 노후시설 정비 1식 ❍ 사 업 비 : 200백만원	❍ 착공 : 2023. 5. 19. ❍ 준공 : 2023. 9. 5.	❍ 노후된 시설 및 공원환경 정비
희망교~판문동 구간 공원, 녹지 내 조도개선 공사	❍ 위 치 - 희망교~판문동 구간 공원, 녹지 ❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 7. ❍ 사업내용 - 볼라드조명 51개, 공원등 9개 설치 ❍ 사 업 비 : 66백만원	❍ 착공 : 2023. 5. 30. ❍ 준공 : 2023. 7. 13.	❍ 희망교~판문동 구간 산책로 이용자 야간 보행 환경 개선
유등공원 노약자 램프 설치공사	❍ 위 치 - 망경동 161-1번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 6. ~ 9. ❍ 사업내용 - 램프 설치 1식 ❍ 사 업 비 : 174백만원	❍ 착공 : 2023. 6. 13. ❍ 준공 : 2023. 9. 20.	❍ 노약자 등 보행환경 개선
유등공원 노약자 램프 전기공사	❍ 위 치 - 망경동 161-1번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 6. ~ 9. ❍ 사업내용 - 램프 조명 설치 1식 ❍ 사 업 비 : 18백만원	❍ 착공 : 2023. 6. 22. ❍ 준공 : 2023. 9. 26.	❍ 노약자 등 보행환경 개선
생물산업농공 전문단지 주변 녹지 내 소나무 전정 공사	❍ 위 치 - 문산읍 삼곡리 1661-1번지 외 4개소 ❍ 사업기간 : 2023. 6. ~ 7. ❍ 사업내용 : 소나무 79주 ❍ 사 업 비 : 19백만원	❍ 착공 : 2023. 6. 19. ❍ 준공 : 2023. 7. 13.	❍ 아름답고 쾌적한 도시경관 형성
자전거도로변 가로수 조성 (전 환)	❍ 위 치 - 이반성면 용암리 ~ 이반성면 평촌리 ❍ 사업기간 : 2023. 6. ~ 10. ❍ 사업내용 - 가로수 식재 L=3.2km ❍ 사 업 비 : 200백만원	❍ 착공 : 2023. 6. 20. ❍ 준공 : 2023. 10. 27.	❍ 자전거도로변 가로수 조성으로 쾌적한 녹지환경 제공
공원녹지 내 조명취약지 개선사업	❍ 위 치 - 충무공동 249-1번지 외 2개소 ❍ 사업기간 : 2023. 6. ~ 7. ❍ 사업내용 - 볼라드조명 16개 및 공원등 7개 설치 ❍ 사 업 비 : 33백만원	❍ 착공 : 2023. 6. 21. ❍ 준공 : 2023. 7. 18.	❍ 공원 녹지 내 조명 취약지 이용자 야간 보행환경 개선
2023년 금호지 수변형 테마공원 외 3개소 물놀이형 수경시설 청소용역	❍ 위 치 - 금호지수변형 테마공원 3개소 ❍ 사업기간 : 2023. 6. ~ 9. ❍ 사 업 량 : 물놀이장 청소 1식 ❍ 사 업 비 : 19백만원	❍ 착공 : 2023. 6. 29. ❍ 준공 : 2023. 9. 6.	❍ 어린이들에게 쾌적하고 안전한 물놀이 공간 제공
2023년 물초울 공원 외 3개소 물놀이형 수경시설 청소용역	❍ 위 치 - 물초울공원 외 3개소 ❍ 사업기간 : 2023. 6. ~ 9. ❍ 사 업 량 : 물놀이장 청소 1식 ❍ 사 업 비 : 20백만원	❍ 착공 : 2023. 6. 29. ❍ 준공 : 2023. 9. 6.	❍ 어린이들에게 쾌적하고 안전한 물놀이 공간 제공
2023년 물놀이형 수경시설 운영관리용역	❍ 위 치 - 물놀이장 3개소, 바닥분수 4개소 ❍ 사업기간 : 2023. 6. ~ 9. ❍ 사 업 량 : 수경시설 운영관리 ❍ 사 업 비 : 351백만원	❍ 착공 : 2023. 6. 29. ❍ 준공 : 2023. 9. 24.	❍ 어린이들에게 쾌적하고 안전한 물놀이 공간 제공
진양호 공원 내 관정시설 설치사업	❍ 위 치 - 판문동 산180-2번지 외 ❍ 사업기간 : 2023. 6. ~ 10. ❍ 사 업 량 - 지하수 개발(2공) - 관로매설(PE 40mm) : 100m ❍ 사 업 비 : 84백만원	❍ 착공 : 2023. 6. 29. ❍ 준공 : 2023. 10. 26.	❍ 공원 내 관정시설 설치로 수목의 효율적이고 원활한 관리라인 구축
평거동 공원 녹지 내 먼지떨이기 설치	❍ 위 치 - 평거동 794-1, 794-3번지 ❍ 사업기간 : 2023. 7. ❍ 사업내용 - 먼지떨이시설 제작 및 설치 ❍ 사 업 비 : 19백만원	❍ 착공 : 2023. 7. 4. ❍ 준공 : 2023. 7. 28.	❍ 쾌적한 공원 녹지 이용환경 조성
대평체육공원 시설물 정비공사	❍ 위 치 - 대평면 대평리 1796번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 7. ~ 9. ❍ 사 업 량 : 게이트볼장 조성 1식 ❍ 사 업 비 : 86백만원	❍ 착공 : 2023. 7. 6. ❍ 준공 : 2023. 9. 23.	❍ 시민들에게 다양하고 안전한 체육공간 제공
진양호 노을전망 산책로 편의시설 설치공사 실시설계 용역	❍ 위 치 - 판문동 일원(진양호공원) ❍ 사업기간 : 2023. 7. ~ 8. ❍ 사 업 량 - 실시설계(조사측량 포함) 1식 ❍ 사 업 비 : 20백만원	❍ 착공 : 2023. 7. 13. ❍ 준공 : 2023. 8. 21.	❍ 진양호 르네상스 사업과 연계하여 시민 편의 증진을 위한 절차 이행
진양호 슬라이드 설치 안전성 검토 및 조사 설계 용역	❍ 위 치 - 판문동 477번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 7. ~ 8. ❍ 사 업 량 - 슬라이드 제작 설치(L=140m 정도) 안전성 검토 및 조사 설계 1식 ❍ 사 업 비 : 22백만원	❍ 착공 : 2023. 7. 13. ❍ 준공 : 2023. 8. 21.	❍ 진양호 즐길거리 제공에 따른 진양호 슬라이드 설치를 위한 절차 이행
비봉1공원 공원등 추가 설치 공사	❍ 위 치 - 비봉1공원 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 7. ~ 8. ❍ 사업내용 - 볼라드조명 12개, 폴조명 7개 설치 ❍ 사 업 비 : 32백만원	❍ 착공 : 2023. 7. 17. ❍ 준공 : 2023. 8. 10.	❍ 비봉1공원 이용자 야간보행 환경 개선
오광대 전수관 주변 공원 편익시설 설치공사 실시설계 용역	❍ 위 치 - 판문동 일원(진양호공원) ❍ 사업기간 : 2023. 7. ~ 8. ❍ 사 업 량 - 실시설계(조사측량 포함) 1식 ❍ 사 업 비 : 12백만원	❍ 착공 : 2023. 7. 18. ❍ 준공 : 2023. 8. 25.	❍ 진양호 르네상스 사업과 연계하여 시민 편의 증진을 위한 절차 이행
가호3호 어린이공원 일원 쉼터 정비 공사	❍ 위 치 - 가호3호어린이공원 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 7. ~ 8. ❍ 사업내용 - 사각정자 1개소 철거 및 신설 - 사각쉘터 2개소 철거 및 신설 ❍ 사 업 비 : 20백만원	❍ 착공 : 2023. 7. 19. ❍ 준공 : 2023. 8. 1.	❍ 노후화된 정자 쉼터 보수를 통한 이용객 안전사고 예방
진양호 동물원 주변 배수로 정비공사	❍ 위 치 - 판문동 산171-1번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 8. ~ 10. ❍ 사 업 량 - 배수(수로관 400C) 부설 L=101.5m - 오수관로(D200mm) 부설 L=160.0m - 양어장 퇴수로 정비, 목재데크 교체, 계단부 난간설치 등 ❍ 사 업 비 : 45백만원	❍ 착공 : 2023. 8. 17. ❍ 준공 : 2023. 10. 15.	❍ 진양호 동물원 내 배수로 정비를 통한 쾌적하고 안전한 환경 조성에 따른 동물복지 향상
진양호 전망대 주변 배수로 정비공사	❍ 위 치 - 판문동 산171-5번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 8. ~ 10. ❍ 사 업 량 - 옹벽블록쌓기 L=33.0m - 수로관(400C) 부설 L=157m - 트렌치(400×500) 설치 L=6m - 종배수관(D400, L=23m), 면벽 (D400) 등 ❍ 사 업 비 : 60백만원	❍ 착공 : 2023. 8. 17. ❍ 준공 : 2023. 10. 31.	❍ 진양호 전망대 주변 배수로 정비로 집중호우 및 우수기 재해 예방
진양호 가족공원· 생태 관리센터 기반설치 (상하수도 등) 실시설계 용역	❍ 위 치 - 내동면 삼계리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 8. ~ 10. ❍ 사 업 량 - 진양호 생태 관리센터 조성에 따른 기반시설 설치 실시설계 용역 1식 ❍ 사 업 비 : 20백만원	❍ 착공 : 2023. 8. 24. ❍ 준공 : 2023. 10. 2.	❍ 진양호 가족공원 내 체계적인 관리 및 주민 편익공간 조성을 위한 절차 이행
녹색자금 실외나눔숲 조성	❍ 위 치 - 문산읍 소문리 176번지 ❍ 사업기간 : 2023. 8. ~ 10. ❍ 사업내용 - 정원 조성 및 편의시설 설치 A=1,500㎡	❍ 착공 : 2023. 8. 29. ❍ 준공 : 2023. 10. 27.	❍ 실외나눔숲 조성을 통해 취약계층 삶의 질 향상 및 복지시설 환경개선 기여
하대중앙공원 은행나무 전정공사	❍ 위 치 - 하대중앙공원 내 ❍ 사업기간 : 2023. 9. ~ 10. ❍ 사 업 량 - 은행나무 101주 외 4종 41주 전정 - 임목폐기물 10.25t 처리 ❍ 사 업 비 : 26백만원	❍ 착공 : 2023. 9. 12. ❍ 준공 : 2023. 10. 6.	❍ 은행나무 전정에 따른 하대동 주민 생활 불편 해소
이현~외율간 지방도 가로수 방제사업	❍ 위 치 - 진주시 이현동 ~ 외율리 ❍ 사업기간 : 2023. 9. ❍ 사업내용 - 이팝나무 1,842주 방제 ❍ 사 업 비 : 20백만원	❍ 착공 : 2023. 9. 14. ❍ 준공 : 2023. 9. 20.	❍ 아름답고 쾌적한 도시경관 형성
공원녹지 숲 정비사업 (정촌산업단지)	❍ 위 치 - 정촌면 예하리 1384번지 ❍ 사업기간 : 2023. 9. ~ 10. ❍ 사 업 량 - 풀베기 930㎡, 대나무 제거 2㏊ ❍ 사 업 비 : 31백만원	❍ 착공 : 2023. 9. 18. ❍ 준공 : 2023. 10. 15.	❍ 공원 녹지 숲의 전문적·체계적 관리로 쾌적한 시민 휴식 공간 및 도시경관 제공
공원녹지 숲 정비사업 (따스하리공원, 하얀울공원)	❍ 위 치 - 충무공동 136, 350번지 ❍ 사업기간 : 2023. 9. ~ 10. ❍ 사 업 량 - 풀베기 5.7㏊ ❍ 사 업 비 : 31백만원	❍ 착공 : 2023. 9. 18. ❍ 준공 : 2023. 10. 15.	❍ 공원 녹지 숲의 전문적·체계적 관리로 쾌적한 시민 휴식 공간 및 도시경관 제공
공원녹지 숲 정비사업 (바람모아공원, 생기율공원)	❍ 위 치 - 충무공동 44, 102번지 ❍ 사업기간 : 2023. 9. ~ 10. ❍ 사 업 량 - 풀베기 4.6㏊ ❍ 사 업 비 : 25백만원	❍ 착공 : 2023. 9. 18. ❍ 준공 : 2023. 10. 15.	❍ 공원 녹지 숲의 전문적·체계적 관리로 쾌적한 시민 휴식 공간 및 도시경관 제공
문산~이반성 지방도 가로수 정비공사	❍ 위 치 - 문산 ~ 이반성 지방도 ❍ 사업기간 : 2023. 9. ~ 10. ❍ 사업내용 - 48,703㎡ 녹지 정비 ❍ 사 업 비 : 20백만원	❍ 착공 : 2023. 9. 19. ❍ 준공 : 2023. 10. 11.	❍ 아름답고 쾌적한 도시경관 형성
한터울공원 노후 바닥데크 정비 공사	❍ 위 치 - 한터울공원 내 ❍ 사업기간 : 2023. 9. ~ 11. ❍ 사 업 량 - 노후 바닥데크 2개소(174㎡) 철거 및 신설 ❍ 사 업 비 : 80백만원	❍ 착공 : 2023. 9. 19. ❍ 준공 : 2023. 11. 1.	❍ 시민들에게 안전한 공원 공간 제공
진양호 슬라이드 설치사업 지질조사 용역	❍ 위 치 - 판문동 477번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 9. ~ 10. ❍ 사 업 량 - 슬라이드 설치사업 지질조사 3공 ❍ 사 업 비 : 15백만원	❍ 착공 : 2023. 9. 21. ❍ 준공 : 2023. 10. 18.	❍ 진양호 즐길거리 제공에 따른 진양호 슬라이드 설치를 위한 절차 이행
옥봉금산공원 노후 목재계단 철거 공사	❍ 위 치 - 옥봉금산공원 ❍ 사업기간 : 2023. 10. ~ 11. ❍ 사 업 량 - 노후 목재계단 44m 철거 - 임목폐기물 4.82t 처리 ❍ 사 업 비 : 14백만원	❍ 착공 : 2023. 10. 12. ❍ 준공 : 2023. 11. 1.	❍ 노후 목재계단 철거에 따른 이용객 안전사고 예방 및 공원 시설 유지관리 철저

□ 추진중 사업  ---  49건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
진양호 동물원 이전 타당성조사 및 기본계획 용역	❍ 위 치 - 판문동 일원(진양호 근린공원) ❍ 사업기간 : 2022.3.~2023.11. ❍ 사업내용 - 진양호동물원 이전 타당성 - 기본계획 수립 - 관리·운영방안, 조직 체계 구성 ❍ 사 업 비 : 174백만원	□ 추진사항 ❍ 2022. 3. 15. : 기본계획 용역 착수 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. 4. : 기본계획 용역 완료
진양호 명소화 투자유치 및 타당성조사 수립용역 (마 스 터 플 랜 포 함)	❍ 위 치 - 진양호공원 일원 ❍ 사업기간 : 2022.11.~2023.12. ❍ 사업내용 - 진양호 개발 및 공간특화전략 수립 - 사업추진 및 투자유치 전략 수립, 관리·운영방안 등 ❍ 사 업 비 : 752백만원	□ 추진사항 ❍ 2022. 11. : 우선협상대상자 선정 및 추가 기술협상 → 계약체결 ❍ 2022. 11. : 용역 자문위원회 구성 ❍ 2022. 11. ~ 2023. 10. : 용역 착수보고회 개최 및 자문위원회 개최(4차), 설문조사 시행 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. ~ 12. - 공간구상(마스터 플랜) 및 건축계획 구체화 확정 등 - 운영활성화 방안 검토 등 ❍ 2023. 12. : 용역 완료
귀곡동 방문객 편의시설 설치	❍ 위 치 - 귀곡동 893-4번지 일원 ❍ 사업기간 : 2022.12.~2023.12. ❍ 사 업 량 - 무방류순환식 화장실 2개소 ❍ 사 업 비 : 69백만원	□ 추진사항 ❍ 2022. 12. : 물품구입 (화장실 2개소) 계약 완료 ❍ 2023. 1. : 상수원보호구역 행위허가 완료, 토지매입 협의 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 토지매입 완료 ❍ 2023. 12. : 설치 완료
귀곡동 생태관찰로 및 관찰시설 설치사업	❍ 위 치 - 귀곡동 일원 ❍ 사업기간 : 2023.1.~2024.2. ❍ 사 업 량 - 생태관찰로(데크로드) 700m, 편익시설, 관찰시설 등 ❍ 사 업 비 : 1,500백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. ~ 3. : 실시설계 용역 ❍ 2023. 4. ~ 8. : 행정절차 이행 ❍ 2023. 9. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2024. 2. : 공사 준공
2023년 공원 전기시설 유지보수 단가계약	❍ 위 치 - 관내 공원 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. ❍ 사 업 량 : 전기시설 유지보수 1식 ❍ 사 업 비 : 18백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
2023년 녹지조경지 전기시설 유지보수 단가계약	❍ 위 치 - 관내 녹지조경지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. ❍ 사 업 량 : 전기시설 유지보수 1식 ❍ 사 업 비 : 18백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
금호지 보행교 경관조성사업	❍ 위 치 - 금산면 용아리 1102-1번지 ❍ 사업기간 : 2023.9.~2024.2. ❍ 사업내용 - 금호지 보행교 경관조명 1식 (L=86m, B=3.5m), 분수 2개소 ❍ 사 업 비 : 900백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 실시설계 완료 ❍ 2023. 5. : 경관심의위원회 심의 ❍ 2023. 9. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2024. 2. : 준공
진양호 야생생물 특별보호구역 수달서식현황 모니터링 조사용역	❍ 위 치 - 진양호 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 11. ❍ 사업내용 - 진양호 야생생물특별보호구역 일원 수달 서식현황 조사 - 무인카메라 수달 촬영조사 - 진양호 수달 및 서식환경 위협요인 조사 - 진양호 수달의 지속적 서식을 위한 장기 보호 전략 수립 ❍ 사 업 비 : 49백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. ~ 2. : 협상 의한 계약 추진 ❍ 2023. 3. : 용역 착수 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 용역 완료
봉황교 보수공사	❍ 위 치 - 옥봉동 19번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 11. ❍ 사 업 량 - 데크 교체, 도장 공사 등 ❍ 사 업 비 : 156백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 준공
2023년 비봉· 선학공원 유지 관리사업	❍ 위 치 - 비봉·선학공원 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ❍ 사 업 량 : 139.48ha 예초, 제초 등 ❍ 사 업 비 : 521백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
2023년 공원 및 녹지 유지관리 사업 (가호지구)	❍ 위 치 - 가호동 971번지 외 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ❍ 사 업 량 - 잔디깎기 및 예초 4회 - 관목류 전정 2회 ❍ 사 업 비 : 158백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023. 5. : 1회 작업 완료 ❍ 2023. 6. : 2회 작업 완료 ❍ 2023. 9. : 3회 작업 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
2023년 공원 및 녹지 유지관리 사업 (천전지구)	❍ 위 치 - 망경동 163-13번지 외 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ❍ 사 업 량 - 잔디깎기 및 예초 4회 - 관목류 전정 2회 ❍ 사 업 비 : 144백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023. 5. : 1회 작업 완료 ❍ 2023. 6. : 2회 작업 완료 ❍ 2023. 9. : 3회 작업 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
2023년 공원 및 녹지 유지관리 사업 (문산‧금산지구)	❍ 위 치 - 문산읍 소문리 2420번지 외 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ❍ 사 업 량 - 잔디깎기 및 예초 4회 - 관목류 전정 2회 ❍ 사 업 비 : 129백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023. 5. : 1회 작업 완료 ❍ 2023. 6. : 2회 작업 완료 ❍ 2023. 9. : 3회 작업 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
2023년 공원 및 녹지 유지관리 사업 (사봉 일반산업단지)	❍ 위 치 - 사봉면 사곡리 1802-3번지 외 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ❍ 사 업 량 - 잔디깎기 및 예초 4회 - 관목류 전정 2회 ❍ 사 업 비 : 85백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023. 5. : 1회 작업 완료 ❍ 2023. 6. : 2회 작업 완료 ❍ 2023. 9. : 3회 작업 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
2023년 공원 및 녹지 유지관리사업 (정촌 뿌리산업단지)	❍ 위 치 - 정촌면 예하리 1393-6번지 외 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ❍ 사 업 량 - 잔디깎기 및 예초 4회 - 관목류 전정 2회 ❍ 사 업 비 : 185백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023. 5. : 1회 작업 완료 ❍ 2023. 9. : 3회 작업 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
2023년 공원 및 녹지 유지관리사업 (정촌 일반산업단지)	❍ 위 치 - 정촌면 예하리 1297-14번지 외 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ❍ 사 업 량 - 잔디깎기 및 예초 4회 - 관목류 전정 2회 ❍ 사 업 비 : 149백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023. 5. : 1회 작업 완료 ❍ 2023. 6. : 2회 작업 완료 ❍ 2023. 9. : 3회 작업 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
2023년 공원 및 녹지 유지관리사업 (신진주역세권 공 원 구 역)	❍ 위 치 - 가좌동 1948번지 외 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ❍ 사 업 량 - 잔디깎기 및 예초 4회 - 관목류 전정 2회 ❍ 사 업 비 : 175백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023. 5. : 1회 작업 완료 ❍ 2023. 6. : 2회 작업 완료 ❍ 2023. 9. : 3회 작업 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
2023년 공원 및 녹지 유지관리사업 (신진주역세권 녹 지 구 역)	❍ 위 치 - 가좌동 2010번지 외 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ❍ 사 업 량 - 잔디깎기 및 예초 4회 - 관목류 전정 2회 ❍ 사 업 비 : 154백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023. 5. : 1회 작업 완료 ❍ 2023. 6. : 2회 작업 완료 ❍ 2023. 9. : 3회 작업 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
2023년 공원 및 녹지 유지관리사업 (신 안 ‧ 평 거 녹 지 구 역)	❍ 위 치 - 신안동 458-10번지 외 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ❍ 사 업 량 - 잔디깎기 및 예초 4회 - 관목류 전정 2회 ❍ 사 업 비 : 153백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023. 5. : 1회 작업 완료 ❍ 2023. 6. : 2회 작업 완료 ❍ 2023. 9. : 3회 작업 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
2023년 공원 및 녹지 유지관리사업 (이현‧평거지구)	❍ 위 치 - 이현동 1178번지 외 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ❍ 사 업 량 - 잔디깎기 및 예초 4회 - 관목류 전정 2회 ❍ 사 업 비 : 161백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023. 5. : 1회 작업 완료 ❍ 2023. 6. : 2회 작업 완료 ❍ 2023. 9. : 3회 작업 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
2023년 공원 및 녹지 유지관리사업 (상대‧하대지구)	❍ 위 치 - 상평동 268-3번지 외 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ❍ 사 업 량 - 잔디깎기 및 예초 4회 - 관목류 전정 2회 ❍ 사 업 비 : 82백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023. 5. : 1회 작업 완료 ❍ 2023. 6. : 2회 작업 완료 ❍ 2023. 9. : 3회 작업 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
2023년 공원 및 녹지 유지관리사업 (초전지구)	❍ 위 치 - 초전동 1640-2번지 외 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ❍ 사 업 량 - 잔디깎기 및 예초 4회 - 관목류 전정 2회 ❍ 사 업 비 : 133백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023. 5. : 1회 작업 완료 ❍ 2023. 6. : 2회 작업 완료 ❍ 2023. 9. : 3회 작업 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
2023년 공원 및 녹지 유지관리사업 (충 무 공 동 갈전천 구역)	❍ 위 치 - 충무공동 184-1번지 외 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ❍ 사 업 량 - 잔디깎기 및 예초 4회 - 관목류 전정 2회 ❍ 사 업 비 : 106백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023. 5. : 1회 작업 완료 ❍ 2023. 6. : 2회 작업 완료 ❍ 2023. 9. : 3회 작업 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
2023년 공원 및 녹지 유지관리사업 (충 무 공 동 영천강 구역)	❍ 위 치 - 충무공동 129번지 외 ❍ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ❍ 사 업 량 - 잔디깎기 및 예초 4회 - 관목류 전정 2회 ❍ 사 업 비 : 152백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023. 5. : 1회 작업 완료 ❍ 2023. 6. : 2회 작업 완료 ❍ 2023. 9. : 3회 작업 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
기후대응 도시숲 조성	❍ 위 치 - 정촌면 예하리 1349번지 ❍ 사업기간 : 2023.4.~2024.4. ❍ 사업내용 - 기후대응 도시숲 조성 2ha ❍ 사 업 비 : 1.700백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 착공 ❍ 2023. 9. : 재착공 □ 향후계획 ❍ 2024. 4. : 준공	❍ 4 ~ 8월 여름철 공사 중지
비봉 쌈지공원 조성사업	❍ 위 치 - 상봉동 889-1번지 ❍ 사업기간 : 2023.11.~2024.2. ❍ 사업내용 - 부지매입(269㎡) 쌈지공원 조성 1식 ❍ 사 업 비 : 500백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 4. : 보상 협의 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 착공 ❍ 2024. 2. : 준공
아이누리 어린이공원 조성사업	❍ 위 치 - 신안동 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 12. ❍ 사업내용 - 어린이 놀이터, 화장실 등 ❍ 사 업 비 : 283백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 5. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
진양호 숲가꾸기 및 산림공원 조성사업	❍ 위 치 - 판문동 산167-1번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 11. ❍ 사 업 량 - 숲가꾸기, 잡관목 제거 등 수목정비, 작업로 개설 ❍ 사 업 비 : 600백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 5. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 준공
2023년 진양호 가족공원 숲가꾸기사업	❍ 위 치 - 내동면 삼계리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 12. ❍ 사 업 량 - 숲가꾸기, 잡관목 제거 등 수목정비, 작업로 개설 ❍ 사 업 비 : 163백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 5. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
강주연못공원 수변데크 지붕 설치공사	❍ 위 치 - 강주연못공원 ❍ 사업기간 : 2023. 6. ~ 11. ❍ 사 업 량 - 수변데크 지붕 설치 1식 ❍ 사 업 비 : 67백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 6. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 준공
비봉공원 힐링숲 조성사업	❍ 위 치 - 상봉동 비봉산 일원 ❍ 사업기간 : 2023.10.~2024.3. ❍ 사업내용 - 숲가꾸기 및 수목식재 1.51ha ❍ 사 업 비 : 500백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 7. : 실시설계 완료 ❍ 2023. 10. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2024. 3. : 준공
진양호 노을전망 데크로드 설치 공사	❍ 위 치 - 판문동 산171-5번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 7. ~ 12. ❍ 사업내용 - 데크로드 조성 L=628.21m, 데크전망대 2개소, 트랠리스 5개소, 스텐난간 30m 조성 ❍ 사 업 비 : 1,290백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 3. ~ 5. : 실시설계 용역 ❍ 2023. 6. : 관련부서 인허가 ❍ 2023. 7. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
오죽광장 경관개선사업	❍ 위 치 - 봉곡동 490번지 ❍ 사업기간 : 2023.8.~2025.12. ❍ 사업내용 - 정원조성 1식, 조명시설 설치 1식 ❍ 사 업 비 : 40백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 8. : 기획·구상 기본 계획 용역 착수 □ 향후계획 ❍ 2024. 4. : 구상용역완료 ❍ 2024. 12. : 실시설계 완료 (토목·조경·전기 등) ❍ 2025. 2. : 공사 착공 ❍ 2025. 12. : 공사 준공
와룡끄티공원 산책로 정비공사	❍ 위 치 - 와룡지구 끄티공원 일원 ❍ 사업기간 : 2023.11.~2024.2. ❍ 사업내용 - 정원조성 1식, 대나무 숲 정비 1식 ❍ 사 업 비 : 800백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 8. : 낙동강유역청 협의완료 ❍ 2023. 9. : 실시설계용역 완료 ❍ 2023. 10. : 일상감사 및 계약심사 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 착공 ❍ 2024. 2. : 준공
진양호 가족공원 생태관리센터 전력간선설비 설치공사 실시설계 용역	❍ 위 치 - 내동면 삼계리 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 10. ~ 11. ❍ 사업내용 - 실시설계 1식 ❍ 사 업 비 : 21백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 10. : 용역 착수 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 용역 완료
양묘장 창고시설 공사 실시설계 용역	❍ 위 치 - 집현면 신당리 20-1번지 ❍ 사업기간 : 2023.10.~2024.1. ❍ 사업내용 - 양묘장 창고시설(500㎡) 조성 공사 실시설계 1식 ❍ 사 업 비 : 21백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 10. : 착수 □ 향후계획 ❍ 2024. 1. : 준공
평거4호어린이 공원 어린이놀이시설 노후 바닥재 정비공사	❍ 위 치 - 평거4호어린이공원 내 ❍ 사업기간 : 2023. 10. ~ 11. ❍ 사 업 량 - 고무블럭 철거 및 탄성포장 설치 356㎡ ❍ 사 업 비 : 56백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 10. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 준공
하대중앙공원 어린이놀이시설 바닥재 정비공사	❍ 위 치 - 하대중앙공원 ❍ 사업기간 : 2023. 10. ~ 11. ❍ 사 업 량 - 고무블럭 철거 및 탄성포장 설치 560㎡ ❍ 사 업 비 : 83백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 10. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 준공
공원녹지 거점지역 관리사 리모델링 공사(금 호 지)	❍ 위 치 - 금산면 용아리 1102-26번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 10. ~ 12. ❍ 사 업 량 - 천정･벽체 철거 및 설치 30㎡ 등 - 외부벽 칠공사 221㎡ 등 ❍ 사 업 비 : 42백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 10. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
공원녹지 거점지역 관리사 리모델링공사 (전 기)	❍ 위 치 - 금산면 외 3개소 ❍ 사업기간 : 2023. 10. ~ 11. ❍ 사 업 량 - 냉난방 설치공사, 전등공사 ❍ 사 업 비 : 17백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 10. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 준공
공원녹지 거점지역 관리사 리모델링공사 (초 전 동)	❍ 위 치 - 초전동 1583-38번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023. 10. ~ 12. ❍ 사 업 량 - 천정･벽체 철거 및 설치 등 - 방수공사 62㎡ 등 ❍ 사 업 비 : 17백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 10. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공
진양호공원 상락원 일원 포장 정비공사	❍ 위 치 - 판문동 일원(상락원 주변) ❍ 사업기간 : 2023. 11. ❍ 사업내용 - 터파기 84㎥, 되메우기 91㎥ - 조립식암거설치 L=38m 등 ❍ 사 업 비 : 46백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 10. : 공사 의뢰 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 공사 착공 및 준공
진양호공원 비탈면 보완 식재공사	❍ 위 치 - 판문동 일원(상락원 주변) ❍ 사업기간 : 2023. 11. ~ 12. ❍ 사업내용 - 초화 식재 ❍ 사 업 비 : 18백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 10. : 공사 의뢰 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 착공 ❍ 2023. 12. : 준공
진양호 산림공원 및 산지사면 안정화사업	❍ 위 치 - 판문동 산167-1번지 일원 ❍ 사업기간 : 2023.11.~2024.3. ❍ 사 업 량 - 숲가꾸기, 수목식재, 예초 등 ❍ 사 업 비 : 343백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 11. : 일상감사 완료 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 착공 ❍ 2024. 3. : 준공
진양호 가족공원 숲가꾸기 사업지 보완 공사	❍ 위 치 - 내동면 삼계리 일원 ❍ 사업기간 : 2023.11.~2024.2. ❍ 사 업 량 - 숲가꾸기, 초화식재, 계류정비 등 ❍ 사 업 비 : 106백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 10. : 공사 의뢰 ❍ 2023. 11. : 일상감사 요청 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 착공 ❍ 2024. 2. : 준공
진양호 가족공원 생태관리센터 기반 (상하수도등) 설치공사	❍ 위 치 - 내동면 삼계리 일원 ❍ 사업기간 : 2023.11.~2024.2. ❍ 사업내용 - 상수도 설치 L=796m - 하수도 설치 L=1095.5m - 아스팔트 포장 B=5m, L=220m 등 ❍ 사 업 비 : 995백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 10. : 설계 완료 ❍ 2023. 11. : 계약심사 완료, 입찰 의뢰 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 착공 ❍ 2024. 2. : 준공
가좌공원 기반조성사업	❍ 위 치 - 가좌동 산87-1번지 일원 ❍ 사업기간 - 2018. 8. ~ 2027. 12. ❍ 사업내용 - 공원조성 및 주차장 설치 등 (A=718,203㎡) ❍ 사 업 비 : 48,000백만원	□ 추진사항 ❍ 2022. 10. : 공원조성계획 (변경) 고시 ❍ 2023. 9. : 토지수용 재결 신청(1차) □ 향후계획 ❍ 2024. 6. : 착공 ❍ 2027. 12. : 준공(예정)
망경공원 기반조성사업	❍ 위 치 - 망경동 산29-3번지 일원 ❍ 사업기간 - 2019. 3. ~ 2027. 12. ❍ 사업내용 - 공원조성 및 기반시설 설치 (A=1,012,233㎡) ❍ 사 업 비 : 76,500백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 8. : 전망대 등 기본 및 실시설계 착수 □ 향후계획 ❍ 2024. 2. : 착공 ❍ 2027. 12. : 준공(예정)
상봉동 문 화 (역 사) 공원 조성 사업	❍ 위 치 - 상봉동 651번지 일원 ❍ 사업기간 - 2021. 4. ~ 2027. 12. ❍ 사업내용 - 공원조성 및 주차장 설치 등 (A=19,600㎡) ❍ 사 업 비 : 4,950백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 8. : 공원조성계획 결정 고시 □ 향후계획 ❍ 2025. 9. : 착공 ❍ 2027. 12. : 준공(예정)

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 아름답고 쾌적한 도시경관 조성 및 시민 휴식 공간 제공

❍ 공원을 통한 시민의 건강·휴양 및 정서생활 향상

❍ 시민이 공감하고 즐길 수 있는 도심지 내 친수 공간 조성

❍ 특색 있는 시민 휴식 공간 제공 및 정주여건 개선, 관광기반 구축

❍ 남강변 주요 경관지 정비를 통한 지역 명소 제공

□ 진양호 일원 활성화를 통한 관광인프라 구축

❍ 장기미집행공원 일몰제 시행에 따른 난개발 방지 및 진양호 수변 경관 요충지 보전

❍ 역사문화와 연계한 복합 힐링 문화 공간조성으로 관광인프라 구축

❍ 시설 노후로 외면 받고 있는 진양호 일원 정비를 통한 관광기반 구축

❍ 진양호 일원의 자연적 요소를 활용하여 친환경적 다양한 콘텐츠 개발을 통해 시너지(동반상승)효과 창출 및 다양한 계층이 이용하는 특색 있는 공원 조성

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	9	553,831	9	-	-	-
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	9	553,831	9	-	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

가로수 및 가로화단 정비사업

관내 가로수 및 가로화단을 정비하여 아름다운 도로경관 및 쾌적하고 안전한 환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 관내 가로수 및 가로화단

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 사업내용 : 진주시 관내 가로수 및 가로화단 정비

❍ 사 업 비 : 950백만원

□ 추진상황

❍ 2023. 10. : 2024년 진주시 가로수 전정공사 실시설계 용역 시행

□ 추진계획

❍ 2023. 12. : 가로수 및 가로화단 실시설계 용역 완료

❍ 2024.  1. ~  3. : 가로수 및 화단 전정공사 시행

❍ 2024.  4. ~ 12. : 가로수 및 가로(중앙)화단 보식·제초·방제 작업 시행

□ 기대효과

❍ 시민들에게 쾌적하고 아름다운 시가지 경관 제공

❍ 도로안내판, 신호등 등 가리는 가로수 전정으로 교통사고 예방

❍ 전선, 변압기 등 가로수와 접촉되는 시설물 안전사고 예방

❍ 가로수 및 가로화단 정비로 가로경관 및 도시미관 개선

❍ 도심지 내 미세먼지 저감 및 쾌적한 가로경관 제공

양묘장 기반시설 조성사업

스마트양묘장을 통한 초화류 생산성 향상과 관리 구조 개선으로 아름답고 쾌적한 녹지·공원 조성 및 유지관리 효율성 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 집현면 신당리 20-1(6,705㎡), 547(13,331㎡)번지

❍ 사업기간 : 2022. 12. ~ 2024. 12.

❍ 사 업 량 : 스마트양묘장(1,800㎡) 조성, 편의시설(창고, 쉼터 및 화장실) 설치, 나무 은행 조성

❍ 사 업 비 : 3,000백만원(시비 2,000, 도비 1,000)

□ 추진상황

❍ 2022. 12. : 토지매입 완료 및 스마트양묘장 조성 실시설계 용역 착수

❍ 2023.  4. : 스마트양묘장 실시설계 용역 완료

❍ 2023. 10. : 스마트양묘장 조성 관련 일상감사 및 도 계약심사

❍ 2023. 10. : 편의시설(창고, 쉼터, 화장실) 설치 실시설계 용역 착수

□ 추진계획

❍ 2023. 12. : 스마트양묘장 조성 착공

❍ 2024.  1. : 편의시설(창고, 쉼터, 화장실) 설치 실시설계 용역 완료

❍ 2024.  2. : 편의시설 설치공사 착공

❍ 2024.  6. : 스마트양묘장 조성 준공

❍ 2024.  8. : 편의시설 설치공사 준공

❍ 2024. 12. : 나무은행 조성 준공

□ 기대효과

❍ 스마트양묘장 조성으로 고품질의 우량묘목 생산과 안정적인 공급체계 구축으로 조경수 및 가로수 등의 효율적인 관리 기반 마련

공원녹지 유지관리사업

공원녹지의 효율적이고 전문적인 관리를 통한 대 시민 서비스 제공 및 쾌적한 도시환경을 유지하고자 함

□ 사업개요

❍ 현    황

- 공원녹지 : 388개소 897ha

- 시 설 물 : 화장실(36개소), 어린이놀이시설(76개소), 물놀이형 수경시설(9개소), 야외운동기구(353개소 1,920개), 공원등(174개소 2,593개) 등

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 사업내용 : 공원녹지 내 예초, 제초, 수목 전정·보식, 병해충 방제,
시설물 정비 등 연중 유지관리

❍ 사 업 비 : 2,836백만원

□ 추진계획

❍ 2024. 1. ~ 12. : 공원녹지 및 수목, 시설물 유지관리사업 시행

- 공원녹지 내 예초·제초·수목 전정작업 등

- 조명 시설물, 운동기구, 어린이놀이시설 등 정비

❍ 2024. 7. ~  8. : 여름철 물놀이형 수경시설 운영

□ 기대효과

❍ 시민 생활과 밀접한 공원녹지 및 수목, 시설물 등을 연중 유지관리하여 이용객 만족도 제고 및 도시경관 향상에 기여

❍ 물놀이형 수경시설 운영으로 어린이들에게 여름철 시원하고 안전한 어린이 놀이공간 제공

기후대응 도시숲 조성

사봉 산업단지에서 발생하는 미세먼지를 차단하기 위해 산단 주변 유휴지(완충 녹지)를 활용하여 미세먼지 차단숲 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 사봉면 사곡리 1853번지 일원(사봉산단)

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 6.

❍ 사업내용 : 기후대응 도시숲 조성 약 1ha

❍ 사 업 비 : 1,000백만원(국 500, 도 150, 시 350)

□ 추진계획

❍ 2024. 1. : 실시설계 용역 착수

❍ 2024. 2. : 실시설계 용역 완료, 일상감사

❍ 2024. 3. : 도 계약심사

❍ 2024. 3. : 공사 착공

❍ 2024. 6. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 사봉 산업단지 주변 기후대응 도시숲 조성으로 미세먼지 저감 및 도시 열섬현상을 완화하여 시민들에게 쾌적한 대기질 및 생활환경 제공

망경공원 기반조성사업

도시공원 일몰제 시행에 따라 망경공원 조성사업과 연계하여 망진산 일원 관광 인프라 구축을 통한 관광산업 육성 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 망경동 산29-3번지 일원

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2027년

❍ 사업면적 : 1,012,233㎡

❍ 사업내용 : 공원조성, 도로 및 주차장, 전망대 등

❍ 총사업비 : 76,500백만원  ※ 토지매입비 57,900, 공사비·기타 용역비 등 18,600

- 보상집행 실적 : 사유지 기준 84% 보상완료

❍ 2024년 추진계획	(단위 : 억원)

구분	사 업 명	위 치	사업비	비 고
계	2건		65
1	망경공원 전망대 조성사업	망경동 산29-3번지 일원	50	연면적 600㎡, 2층 이하
2	공원 내 주차장 조성사업	망경동 217-4번지 일원	15	4,158㎡, 81면

□ 추진상황

❍ 2018. 11. : 토지매입을 위한 투자심사 및 공유재산 심의

❍ 2019.  3. : 망경공원 기본구상 및 타당성 검토

❍ 2019. 11. : 망경공원 조성사업 기본계획 수립 용역 시행

❍ 2020.  6. : 실시계획 인가 고시

❍ 2021. 12. : 망경공원 주차장 준공

❍ 2022.  2. : 도시공원위원회 심의 및 변경 고시

❍ 2022. 10. : 기반조성 및 관광명소화 추진방향 보고(사업안 조정)

❍ 2023.  5. : 전망대, 보행육교, 남강잔도길 설계 공모 공고

❍ 2023.  6. ~ : 도시계획시설(도로, 주차장) 협의 보상 실시

❍ 2023.  8. : 전망대 등 설계 공모 당선업체 계약 및 실시설계 시행

□ 추진계획

❍ 2023. 12. : 공원조성계획 변경, 실시계획인가 신청, 건축 허가 및 공사 발주

❍ 2024.  1. : 산림청 소관 국유지 교환 완료

❍ 2024.  2. : 전망대 및 망경공원 내 주차장 공사 착공

❍ 2024.  5. : 토지 수용 및 보상 완료

❍ 2024. 10. : 전망대 공사 준공

❍ 2025.  2. : 보행육교, 잔도길 공사 착공

❍ 2027. 12. : 공사 준공(전체), 운영 개시

□ 기대효과

❍남강의 역사문화권역과 연계한 망진산 일원 관광인프라 구축을 통한 관광산업 육성

진주시 민간공원조성 특례사업

도시공원 일몰제(2020. 7. 1.) 도래에 따라 막대한 재원이 필요한 장재공원에 대해 민간자본을 유치하여 도시공원 확충에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 장재동 산2번지 일원

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2024년

❍ 사업면적 : 232,978㎡

❍ 사업내용 : 공원시설(도시 숲 조성, 주차장 등) 및 비공원시설(공동주택) 설치

❍ 총사업비 : 321,505백만원(민간자본)  * 토지매입비 : 33,000(진주시 시행)

□ 추진상황

❍ 2018.  8. : 우선협상대상자 선정

❍ 2019.  8. ~ 10. : 도시공원위원회 및 도시계획위원회 심의

❍ 2020.  2. : 실시협약 체결(사업시행자 지정 - 예치금 납부 230억원)

❍ 2020.  6. ~  7. : 실시계획 인가 고시 및 보상계획 공고

❍ 2021.  6. ~  7. : 주택건설사업 승인(798세대) 및 수용 재결 신청 완료

❍ 2021.  9. : 수용 재결 공탁 및 아파트 분양

❍ 2022. 10. : 회전교차로 및 분수조형물 설치 완료

❍ 2023.  1. : 도시관리계획 결정(변경) 및 조성계획 결정(변경) 고시

❍ 2023.  4. : 실시계획인가(변경) 고시(사업기간 변경)

❍ 2023.  5. : 장재공원 내 등산로 개설 및 일부 수목 식재

❍ 2023.  7. ~ : 정상부 공원 조성 및 전기 공사 시행

□ 추진계획

❍ 2023. 11. : 실시계획인가(변경) 고시

❍ 2024. 11. : 공원조성 공사 완료

❍ 2024. 12. : 아파트 공사 완료 및 사업 준공

□ 기대효과

❍ 도시공원 일몰제(2020. 7. 1.) 시행에 따라 시민 이용도가 높음에도 불구하고 막대한 재원이 필요하여 공원 조성이 어려운 장재공원에 대해 민간자본을 유치하여 시민들에게 정서생활 함양 등 기여

망진산 전통문화 정원 조성사업

원더풀 남강 프로젝트와 남가람 문화예술특구 지정 및 전통문화 체험관과 연계하여 특색 있는 전통문화 정원 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 망경동 200번지 일원

❍ 사업기간 : 2024 ~ 2025년

❍ 사업내용 : 전통문화 정원 조성(쉼터 및 수목 식재 등)

❍ 총사업비 : 1,840백만원(도(전환) 920, 도 276, 시 644)

□ 추진상황

❍ 2023.  8. : 관광자원개발사업 신규사업 신청

❍ 2023. 11. : 지방재정 자체 투자심사

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 협상에 의한 계약 추진(회계과 및 감사실 협의 등)

❍ 2024.  2. ~ 5. : 협상에 의한 계약 공고 및 협상 대상자 선정

❍ 2024.  6. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2024.  7. ~ 9. : 공원조성계획(변경) 등 행정절차 이행 및 실시설계 용역 완료

❍ 2024. 10. : 공사 착공

❍ 2025.  6. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 지역의 역사·문화·생태적 자원인 망진산의 지역 스토리텔링과 정원문화를 통한 지역 정체성 발굴

❍ 전통문화 체험관과 연계한 전통문화 정원 조성으로 이용객들의 힐링 공간 제공

진양호 근린공원 조성사업

시설 노후 등으로 이용객 감소가 가속화되고 있는 진양호 일원을 남강의 역사문화와 연계한 복합 힐링 문화공간으로 조성하여 관광 인프라 구축을 통한 관광산업육성, 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 판문동 산171-1번지, 진양호 근린공원 일원

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2026년

❍ 사 업 량 : 1,181,115㎡(진양호 근린공원 구역 면적)

❍ 사업내용 : 진양호 복합문화공간, 어린이 놀이숲, 환상의 숲 등 힐링레저/ 문화시설,

힐링숲

❍ 총사업비 : 134,400백만원(관련 용역 및 민간자본 투자에 따라 조정)

□ 추진상황

❍ 2018.  8. : 투자심사 및 공유재산 심의(자체), 편입 토지 손실보상 협의

❍ 2020.  6. : 어린이 물놀이터(에어바운싱돔 포함) 준공

❍ 2022.  2. : 다이나믹 광장(푸드코트, 전기조명 등 전체) 준공

❍ 2022.  8. : 진양호 아천 북카페(독서카페) 개관

❍ 2022. 11. : 진양호 물빛 갤러리 개관·썬셋플라자 준공

❍ 2023.  1. : 환상의 숲(MR, 홀로그램 등) 조성 준공, 우약정화장실 외 2개소

리모델링 완료

❍ 2023.  3. : 어린이 놀이숲, 편익 모노레일 조성 준공

❍ 2023.  8. : 전통예술회관 주변 주차장 설치공사 준공

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 진양호 노을전망대 설계공모 추진

❍ 2024.  6. : 진양호 노을전망 데크로드 설치 준공

❍ 2025. 12. : 진양호 복합문화공간, 진양호전망대 리모델링 조성 완료

❍ 2026.  6. : 진양호 르네상스(활성화) 사업 완료

□ 기대효과

❍ 진양호 일원 정비를 통한 관광기반 구축 및 지역경제 활성화 기여

진양호 가족공원 조성사업

장기미집행 공원 조성을 통한 진양호 일원 난개발 방지 및 경관을 보호하고 진양호의 관광 자원과 연계한 친환경 가족형 공원으로 조성, 관광 인프라 구축을 통한 지역 경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 내동면 삼계리 산179-5번지, 진양호 가족공원 일원

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2025년

❍ 사 업 량 : 245,565㎡(진양호 가족공원 구역 면적)

❍ 사업내용 : 생태놀이터, 대나무숲길, 생태수목원, 탐방로 등

❍ 총사업비 : 11,800백만원(관련 용역 추진에 따라 조정)

□ 추진상황

❍ 2018.  8. : 투자심사 및 공유재산 심의(자체), 편입 토지 손실보상 협의

❍ 2021.  8. : 진양호 가족공원 공원조성계획 변경

❍ 2022.  5. : 가족공원 조성사업(대나무숲 산책로, 숲체험놀이장) 착공 수용재결 위원회 심의에 따른 재결서 통보 및 공탁 완료

❍ 2022. 11. : 진양호 가족공원 조성지 식생조사 용역 완료

❍ 2023.  4. : 가족공원 조성사업(숲체험놀이장, 대나무숲 산책로) 준공

□ 추진계획

❍ 2024.  2. : 진양호 가족공원 기반공사(상하수도, 전기, 통신 등) 완료

❍ 2024.  6. : 생태 수목원 기반조성(숲가꾸기, 산림조성 등) 완료

❍ 2025. 12. : 진양호 가족공원(생태 수목원) 조성사업 완료

□ 기대효과

❍ 장기미집행 공원 실효 방지를 통한 난개발 방지 및 진양호 수변 경관 요충지 보호, 자연자원을 활용한 친환경 관광인프라 구축

매립장사업소

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황(2개 팀 : 관리, 시설)	(단위 : 명)

※ 휴직자 1명(8급:1)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	10	1	4	2	2	1	청원경찰 3 환경공무직 4 공 무 직 5
현 원 (휴직)	9	1	3	2	3	-
증 감	△1	-	△1	-	1	△1

□ 위원회	(2023. 10. 31. 현재)

구 분 위원회명	위원수	당연직 위원수	위촉직 위원수					위촉직 위원중 여 성 위원수	％
			계	공무원	％	민간인	％
기 금 운 영 심 의 위 원 회	9	5	4	-	-	4	100	1	25

□ 예산규모	(단위 : 억원)

구 분	2022년	2023년	증 감	비 고
총 계	126	101	△25
일반회계	122	97	△25
기 금	4	4	-

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	8	2	6	-	-
예산사업	8	2	6	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

□ 완료 사업  ---  2건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주 요 성 과
음식물류폐기물 공공처리시설 민간위탁운영 (2022년도분)	❍ 사업내용 - 음식물류폐기물 처리 ❍ 용 역 비 : 3,072백만원 ❍ 시설용량 - 음식물처리시설 110톤/일 - 음폐수처리시설 110톤/일 ❍ 운영기간(1차년도) - 2022. 2. 1. ~ 2023. 1. 31. ❍ 운 영 자 - ㈜범한엔지니어링 외 1개사 공동도급	❍ 2022. 2. 1. : 용역 착수 ❍ 처리량 : 27,604톤/년 (일평균 89톤 처리) ❍ 2023. 1. : 1차년도(2022년) 용역완료 ※ 계약기간 : 2022. 2. ~ 2025. 1.	❍ 음식물류 폐기물의 원활한 처리와 안정적인 시설운영
재활용품 선별장 민간위탁운영 (2022년도분)	❍ 사업내용 - 재활용품 선별 및 처리 ❍ 용 역 비 : 2,112백만원 ❍ 시설용량 : 50톤/일 ❍ 운영기간 - 2022. 2. 1. ~ 2023. 1. 31. ❍ 운 영 자 : ㈜진사재활용	❍ 2022. 2. 1. : 용역 착수 ❍ 처리량 : 8,235톤/년 (일평균 31.5톤 처리) ❍ 2023. 1. : 1차년도(2022년) 용역완료 ※ 계약기간 : 2022. 2. ~ 2024. 1.	❍ 재활용품의 품목별 분리･선별로 품질 개선 및 자원순환 촉진

□ 추진중 사업  ---  6건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
쓰레기매립장 유지관리	❍ 사업내용 - 매립장 유지관리 시설 정비 - 침출수처리시설 정비 - 매립장시설 운영 물품 구입 - 유공관, 방역약품 및 악취제거제 구입 ❍ 사 업 비 : 300백만원 ❍ 기 간 : 2023. 1. ~2023. 12.	□ 추진사항 ❍ 복토 : 수시 ❍ 방역약품 및 악취제거제 구입 : 수시 ❍ 침출수 배관정비 : 수시 □ 향후계획 ❍ 지속적인 매립장 유지관리 및 점검으로 매립장 시설물의 효율적인 관리
진주권 광역쓰레기 매립장 사후환경영향조사용역	❍ 사업내용 - 환경영향평가 협의에 따른 조사 및 보고서 작성 ❍ 사 업 비 : 161백만원 ❍ 기 간 : 2023.1. ~2023.12. ❍ 용 역 사 : ㈜태영유니온	□ 추진사항 ❍ 2023. 1. : 용역 착수 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 용역 완료 ❍ 2024. 1. : 보고서 승인기관 제출 (낙동강유역환경청, 경상남도)
음식물류폐기물 공공처리시설 민간위탁운영 (2023년도분)	❍ 사업내용 - 음식물류폐기물 처리 ❍ 용 역 비 : 3,072백만원 ❍ 시설용량 - 음식물처리시설 110톤/일 - 음폐수처리시설 110톤/일 ❍ 운영기간(2차년도) - 2023. 2. 1. ~ 2024. 1. 31. ❍ 운 영 자 - ㈜범한엔지니어링 외 1개사 공동도급	□ 추진사항 ❍ 2023. 2. 1. : 용역 착수 ❍ 처리량 : 20,000톤/9개월 (일평균 86톤 처리) □ 향후계획 ❍ 2024. 1. : 2차년도 용역 완료 ※ 계약기간 : 2022. 2.~2025. 1.
재활용품 선별장 민간위탁운영	❍ 사업내용 - 재활용품 선별 및 처리 ❍ 용 역 비 : 2,112백만원 ❍ 시설용량 : 50톤/일 ❍ 운영기간 - 2023. 2. 1. ~ 2024. 1. 31. ❍ 운 영 자 : ㈜진사재활용	□ 추진사항 ❍ 2023. 2. 1. : 용역 착수 ❍ 처리량 : 6,995톤/10개월 (일평균 32.2톤 처리) □ 향후계획 ❍ 2024. 1. : 용역 완료
재활용품 선별장 감용기교체	❍ 사업내용 - 노후 스티로폼감용기 교체 1식 ❍ 사 업 비 : 270백만원 ❍ 기 간 : 2023. 8. ~ 2023. 11.	□ 추진사항 ❍ 2023. 8. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 11. : 준공
쓰레기매립장 주변지역 주민지원사업	❍ 사업내용 - 내동면 가호마을 농로 정비공사 외 4건 ❍ 기 간 : 2023. 10. ~ 2023. 12. ❍ 사 업 비 : 150백만원	□ 추진사항 ❍ 2023. 10. : 착공 □ 향후계획 ❍ 2023. 12. : 준공

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 매립장의 완벽한 관리·운영으로 생활폐기물의 안정적 처리

□ 재활용품선별장 및 음식물류폐기물 공공처리시설의 내실 있는 운영

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	3	5,968	2	1	-	-
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	3	5,968	2	1	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

쓰레기매립장 유지관리 사업

매립장의 완벽한 관리와 운영으로 생활폐기물을 안정적으로 처리하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 내동면 유수길75번길 63

❍ 면    적 : 793,909㎡(매립지 261,500㎡)

❍ 매립량(2023. 7월 말) : 3,166,802㎥(일평균 매립량 : 219㎥)

❍ 매립기간 : 1995년 ~ 사용 종료 시 [매립완료 : 2056년(추정)]

□ 추진계획	(단위 : 백만원)

사 업 명	사업내용	사업비	비 고
쓰레기매립장 유지관리	- 매립장 유지관리 시설 정비 - 침출수처리시설 정비 - 매립장시설 운영 물품 구입 - 유공관, 방역약품 및 악취제거제 구입 - 중계펌프장 수중펌프 교체	360

□ 기대효과

❍ 지속적인 매립장 유지관리로 안정적인 쓰레기 처리

음식물류폐기물 공공처리시설 민간위탁 운영

음식물류폐기물의 원활한 처리와 안정적인 시설운영을 위하여 음식물류폐기물 공공처리시설 민간위탁 운영

□ 시설현황

❍ 위    치 : 내동면 유수길75번길 63

❍ 시설용량 : 퇴비화시설(110톤/일), 음폐수바이오가스시설(110톤/일)

❍ 처 리 량 : 90톤/일

❍ 주요공정

- 퇴비화시설 : 음식물 투입 → 파쇄·선별·혼합 → 발효·후숙 → 퇴비

- 음폐수바이오가스화시설 : 음폐수 투입 → 혐기성소화 → 가스저장 → 발전

□ 사업개요

❍ 위탁기간 : 2022. 2. 1. ~ 2025. 1. 31.(3년)

❍ 사 업 량 : 음식물류폐기물 처리(110톤/일)

❍ 위 탁 비 : 9,216백만원(3,072백만원/년)

❍ 운 영 자 : ㈜범한엔지니어링

(공동도급)  ㈜테크로스환경서비스(지분율 30%)

□ 추진상황

❍ 2023. 2. : 민간위탁 계약 시행(2차년도)

□ 추진계획

❍ 2022. 2. ~ 2025. 1. : 위탁운영

❍ 2024. 7. : 민간위탁 운영방안 및 위탁수수료 산정 용역 착수

❍ 2025. 1. : 민간위탁용역 입찰공고 및 계약

재활용품선별장 민간위탁 운영

재활용품의 원활한 처리와 안정적인 시설운영을 위하여 재활용품선별장 민간위탁 운영

□ 시설현황

❍ 위    치 : 내동면 유수길75번길 27

❍ 시설용량 : 50톤/일

❍ 처 리 량 : 32톤/일

❍ 주요공정 : 재활용품 선별·압축·감용

□ 사업개요

❍ 위탁기간 : 2024. 2. 1. ~ 2026. 1. 31.(2년)

❍ 사 업 량 : 재활용품 처리(32톤/일)

❍ 용 역 비 : 5,072백만원(2024년분 2,536백만원)

❍ 운 영 자 : ㈜진사재활용

□ 추진상황

❍ 2024.  1. : 위탁용역 계약

❍ 2024.  2. ~ 2026.  1. : 위탁운영

□ 추진계획

❍ 2023.  9. : 민간위탁 운영 수수료 산정 용역 착수

❍ 2023. 10. : 계약심의위원회 심의

□ 기대효과

❍ 재활용품 품목별 분리·선별로 품질개선 및 자원순환 촉진 기여

차량등록사업소

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원현황	(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	20	1	4	6	5	4
현 원	20	1	3	8	4	4
증 감	-	-	△1	2	△1	-

□ 자동차 등록현황	(2023. 10. 31. 현재, 단위 : 대)

구 분	계	승용차	승합차	화물차	특수차
총 계	180,171	145,199	4,592	29,456	924
관 용	667	217	177	243	30
자가용	172,790	142,060	3,395	26,869	466
영업용	6,714	2,922	1,020	2,344	428

※ 건설기계 : 5,593대 / 이륜자동차 : 11,814대

□ 예산규모	(단위 : 억원)

구 분	2022년	2023년	증 감	비 고
총 계	5.2	4.9	△0.3
일반회계	1.0	1.1	0.1
특별회계	4.2	3.8	△0.4

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄	(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	3	-	3	-	-	-
예산사업	1	-	1	-	-	-
비예산사업	2	-	2	-	-	-

2. 추진실적

□ 추진중 사업  ---  3건

사  업  명

사  업  개  요

추  진  상  황

문제점 및 대책

차량관리

업무의

원활한 추진

❍ 관련 법규에 따른 차량 소유자 이행사항 안내

❍ 자동차 소유자 이행사항 안내

- 종합검사 사전 : 80,279건

- 검사기간 경과 :  6,969건

- 검사     명령 :  1,284건

❍ 건설기계 소유자 이행사항 안내

- 정기검사 사전 :   2,576건

- 정기검사 최고 :    214건

- 부적합 정비명령 :  150건

❍ 의무보험 가입 촉구 : 3,410건

❍ 법규 위반 과태료 고지 및 독촉 적기 이행

❍ 과태료 고지 및 독촉

(단위 : 건)

구 분	사전 통지	부 과 및 고지	독촉장 발송
계	11,560	3,678	2,928
자동차관리법	3,745	1,795	1,382
자동차손해배상 보장법	7,664	1,838	1,523
건설기계관리법	151	45	23

차량관리

업무의

원활한 추진

❍ 과태료 징수

❍ 징수 현황	(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	금 액
계	7,139	1,115
자동차관리법	3,571	646
자동차손해배상 보장법	3,414	434
건설기계관리법	154	35

❍ 과태료 체납자 차량 압류

❍ 차량 압류 현황	(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	금 액
계	2,685	741
자동차관리법	1,214	386
자동차손해배상 보장법	1,438	342
건설기계관리법	33	13

❍ 의무보험 미가입 운행 차량 범칙금 부과･징수 및 송치

❍ 피의자 조사 및 조치

- 출석요구서 통지 : 107건

- 촉 탁 수 사 : 10건

- 범칙금 징수 : 41건 / 18백만원

- 검 찰 송 치 : 29건

신 속·

정확하고

친절한

차량등록

업무 처리

❍ 차량등록 민원처리

❍ 민원처리 현황	(단위 : 건)

구 분	종 류	건 수
계		299,777
자동차	신규	9,150
	이전	15,457
	변경/말소	23,103
	저당/압류	93,585
	제증명	148,852
이륜 자동차	사용신고	1,693
	변경신고	1,161
	폐지신고	1,678
	제증명	549
건설기계	신규	195
	이전	594
	변경/말소	492
	저당/압류	677
	제증명	2,591

신 속·

정확하고

친절한

차량등록

업무 처리

❍ 차량 취·등록면허세 부과 및 징수

❍ 부과·징수 현황	(단위 : 건, 백만원)

구 분		건 수	금 액
계		75,864	43,452
취득세		34,972	30,703
등록면허세		27,811	794
전국 무관할	취득세	9,738	11,841
	등록 면허세	3,343	114

* 신용카드 수납 : 14,985건 / 8,786백만원

❍ 민원 편의 제공

❍ 효율적인 시스템 구축

- 민원 순번 대기표 운영

- 자동차등록번호 선택을 위한
양방향 모니터 운영(4대)

❍ 민원인 전용 비품 비치

- 복사기, 팩스, 컴퓨터,

문서세단기, 휴대폰 충전기 등

❍ 직원 친절도 및 서비스

향상을 위한 업무추진

❍ 직원 친절교육 실시

- 교 육 일 : 매주 월요일

- 민원인 응대 요령, 전화 예절 등

❍ 직원 청렴교육 실시

- 교 육 일 : 분기별 1회

- 교육을 통한 일상생활 속

청렴 분위기 조성

❍ 민원인 만족도 설문조사 실시

- 기    간 : 상·하반기(2회)

- 설문인원 : 100명(각 50명)

차량등록

사업소

청사신축

❍ 위    치 : 초전동 260-2번지

❍ 사 업 량 : A=830㎡

❍ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2025. 12.

❍ 사 업 비 : 3,333백만원

□ 추진사항

❍ 2023.  9. : 예정부지 검토 용역 완료

□ 향후계획

❍ 2023. 11. : 건축기획 용역

❍ 2024.  8. : 설계 공모

❍ 2024. 11. : 건축실시설계 시행

❍ 2025.  3. : 공사 착공

❍ 2025. 12. : 공사 준공

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 차량관리 업무의 원활한 추진

❍ 관련 법규에 따른 차량 소유자 의무 이행사항 안내

❍ 법규 위반자에 대한 과태료 고지, 독촉 등 조치 철저

❍ 과태료 체납자 차량 압류 및 과태료 징수 철저

□ 신속·정확하고 친절한 차량등록 업무 처리

❍ 업무 연찬을 통한 신속·정확한 차량등록 민원 처리

❍ 직원 친절교육 실시로 시민 만족도 향상

❍ 민원 만족도 설문조사 실시로 시민 편의 행정서비스 제공

□ 차량등록사업소 청사 신축

❍ 신청사 건립으로 행정서비스 질 향상 및 시민 만족도 제고

2. 총    괄	(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	3	172	2	-	1	-
일반시책사업	2	-	2	-	-	-
주요예산사업	1	172	-	-	1	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

차량관리 업무의 원활한 추진

자동차·건설기계 소유자의 이행사항 적기 안내

자동차 관련 법규 위반자에 대한 행정절차 이행 철저

□ 사업개요

❍ 자동차·건설기계 관련 법규 숙지로 시민에게 정확한 정보 제공

❍ 자동차·건설기계 종합(정기)검사 안내 및 의무보험 가입 촉구 철저

❍ 법규 위반자에 대한 과태료 부과 및 독촉 등 행정절차 이행

□ 추진계획

❍ 자동차·건설기계 종합(정기)검사 사전 안내 및 경과 통지·명령

❍ 의무보험 미가입자 촉구서 등 발송(사전 안내 : 보험회사)

❍ 법규 위반자에 대한 행정절차 이행 : 과태료 부과 및 압류

❍ 의무보험 미가입 운행 차량에 대한 사건조사 및 검찰 송치

□ 기대효과

❍ 차량 소유자 의무사항에 대한 정확한 사전 안내로 행정 신뢰도 제고

❍ 적극적인 징수 활동으로 체납액 감소와 세입 증대 기여

신속ㆍ정확하고 친절한 차량등록 업무 처리

❍ 신속하고 정확한 차량등록 관련 업무 처리로 민원 만족도 향상

❍ 친절한 민원 응대로 신뢰받는 봉사행정 구현

□ 사업개요

❍ 자동차 및 건설기계 등록 관련 업무 추진

❍ 다양한 행정서비스 제공으로 민원 만족도 향상

□ 추진계획

❍ 차량 관련 민원 처리

- 자동차 및 건설기계 신규·변경·이전·말소등록 신청 수리

- 이륜자동차 사용·변경·폐지 신고 수리

- 차량 관련 제증명 발급 등

❍ 업무 연찬 및 자체 친절교육 실시 : 매주 월요일

❍ 민원 편의를 위한 시책 추진

- 자동차등록번호 선택을 위한 양방향 모니터 운영

- 공정한 민원 처리를 위한 민원 순번 대기표 운영

- 민원 만족도 설문조사 실시 : 상·하반기 각 1회

□ 기대효과

❍ 정확하고 공정한 업무처리 및 신속한 민원 처리로 행정서비스 향상

❍ 민원 편의 시책 적극 추진으로 신뢰받는 봉사행정 구현

차량등록사업소 청사 신축

청사 노후화 및 사무공간 협소에 따른 방문 민원 불편 해소와 쾌적한 민원실 환경 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 초전동 260-2번지 일원

❍ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2025. 12.

❍ 건축면적 : 연면적 A=830㎡(지상 2층) * 주요시설 : 사무실, 번호판배부창구, 금융기관, 문서고 등

❍ 사 업 비 : 3,333백만원(시비 100%)

□ 추진상황

❍ 2022. 10. : 도시관리계획시설 변경(주차장→공공청사) 용역 착수

❍ 2022. 12. : 지방재정 투자심사의뢰(道 심사)  * 총사업비 20억원 이상 청사 신축

❍ 2023.  9. : 청사 신축 예정부지 검토 용역 완료

□ 추진계획

❍ 2023. 11. : 건축기획 용역 시행

❍ 2024.  3. : 공공건축 사업계획 사전검토

❍ 2024.  3. : 공유재산심의 및 관리계획 승인(의회)

❍ 2024.  7. : 설계 공모 및 실시설계 용역비 2024년 제2추경 예산 편성

❍ 2024.  8. : 설계 공모   * 설계 공모 관리용역 추진

❍ 2024. 11. : 건축 실시설계 용역

❍ 2025.  3. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

❍ 쾌적한 민원실 환경 조성으로 행정서비스 질 향상 및 시민 만족도 제고

❍ 번호판배부창구·금융기관 동시 입주로 원-스톱 민원 서비스 제공