2023년도 수시분 공유재산 관리계획안

의안 번호	3456		제출년월일	2023. 11. 10.
			제 출 자	진 주 시 장

Ⅰ. 제안이유

공유재산 및 물품 관리법 제10조의2 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의거 2023년도 제3회 추경예산안 관련, 취득 예정인 중요한 공유재산에 대하여 수시분 공유재산 관리계획을 수립하여 시의회의 의결을 받아 시행하고자 함.

Ⅱ. 주요내용

❏ 수시분 공유재산 관리계획 수립 대상 : 취득 2건

1. 진주시 내동공영차고지 전기충전소 설치사업

❍ 취득재산 : 공작물 3개 462.3㎡ / 사업비 1,541백만원(기부채납)

2. 그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업

❍ 취득재산 : 건물 신축 1동 5,832㎡ / 사업비 33,870백만원

Ⅲ. 사업현황

1. 진주시 내동공영차고지 전기충전소 설치사업

가. 사업개요

❍ 사 업 명 : 진주시 내동공영차고지 전기충전소 설치사업

❍ 위    치 : 진주시 내동면 내동로 170 내동공영차고지 내

❍ 취득재산

- 공작물(충전소 캐노피) 조성 3개 462.3㎡

❍ 취득방법 : 기부채납   ※준공 후 진주시로 기부채납

❍ 사 업 비 : 1,541백만원

- 건축비 305, 시설물 조성비 1,236

❍ 연도별 사업비 내역

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자현황		비고
		2022년	2023년
계	1,541	606	935
부산교통㈜	453	453	0
삼성교통㈜	935	0	935
진주시민버스㈜	153	153	0

❍ 사업규모 및 주요시설

- 부지면적 : 609.2㎡

- 건축물 연면적 : 462.3㎡(충전소 캐노피 3개동)

- 수배전반(990kW급), 파워뱅크 및 디스펜서, 캐노피 일체

(단위 : ㎡, 백만원)

신청인	기부물건	연면적	재산가액	비 고
합 계		609.2	1,541
부산교통㈜ (대표자 조옥환)	소 계	194.5	453
	수배전반	38.5	160	공작물
	파워뱅크, 디스펜서		208	공작물
	캐 노 피	156.0	85	건축물
삼성교통㈜ (대표자 김성래)	소 계	382.0	935
	수배전반	70.0	323	공작물
	파워뱅크, 디스펜서		392	공작물
	캐 노 피	312.0	220	건축물
진주시민버스㈜ (대표자 이강태)	소 계	32.7	153
	디스펜서(증설)		153	공작물
	캐노피(태양열발전)	32.7		공작물

❍ 사업기간 : 2022년 7월 ~ 2023년 11월

❍ 사업부서 : 교통환경국 교통행정과

나. 사업목적

❍ 전기저상버스의 원활한 전기 충전을 위하여 공영차고지 박차시 충전할 수 있도록 충전공간 마련

❍ 전기저상버스 심야 박차시 충전이 가능한 충전시설 조성, 우천시 안전 확보를 위한 비가림용 캐노피 설치

다. 추진상황

❍ 2022년 6월 : 진주시 공유재산심의회 심의

❍ 2022년 7월 : 전기버스 충전소 착공

❍ 2023년 9월 : 면적 추가에 따른 진주시 공유재산심의회 변경 심의

라. 향후계획

❍ 2023년 11월 : 충전시설 조성사업 완공

❍ 2023년 12월 : 기부채납 진행

2. 그린바이오 벤처 캠퍼스 조성

가. 사업개요

❍ 사 업 명 : 그린바이오 벤처 캠퍼스 조성

❍ 위    치 : 진주시 문산읍 삼곡리 1033번지 / (재)진주바이오산업진흥원 내

❍ 취득재산

- 건물 신축 1동 5,832㎡

(단위 : ㎡, 백만원)

건물용도	구조	연면적	기준가격	사업비	취득시기	비고
교육연구시설	철근콘크리트	5,832	33,870	33,870	2026년

❍ 사 업 비 : 33,870백만 원(국비 16,170, 도비 2,079, 시비 15,621)

- 건축공사비 24,720, 설계비 등 용역비 3,356, 장비구입비 4,000, 예비비 1,794

❍ 연도별 사업비 내역

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자현황			비고
			2024년	2025년	2026년
계	33,870	1,350	2,638	18,609	11,273
국 비	16,170	700	2,394	8,869	4,207
도 비	2,079		244	1,330	505
시 비	15,621	650	-	8,410	6,561

❍ 사업규모 : 건물 신축 1동(캠퍼스관) 및 부대시설 조성

- 부지면적 11,750㎡, 건물 연면적 5,832㎡

❍ 주요시설

- (건물신축) 그린바이오 벤처 캠퍼스관

층별	세부시설 설치계획	면적(㎡)
합 계		5,832
지상 5층	입주공간(연구용), 입주기업제품 공용창고, 게스트룸	972
지상 4층	입주공간(제조실용, 사무실용, 연구용)	972
지상 3층	입주공간(제조실용, 사무실용)	972
지상 2층	표준화공정실(Pilot 생산시설),입주공간(사무실)	972
지상 1층	운영지원실, 비즈니스지원실, 유효성분분석실, 마케팅‧홍보시설 등	972
지하 1층	기자재실, 창고, 기계실, 전기실 등	972

- (부대시설) 주차장, 운동시설, 숲길, 휴게쉼터

❍ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년

❍ 사업부서 : 농업기술센터 농산물유통과

나. 사업목적

❍ 고부가가치 천연물 기반 그린바이오 산업의 글로벌 거점 육성

❍ 그린바이오 산업 육성과 연계한 신산업 성장동력 구축

다. 추진상황

❍ 2023년 6월 : 그린바이오 벤처 캠퍼스 조성 공모사업 최종 선정(6.19)

❍ 2023년 7월 : 기본계획 수립

❍ 2023년 10월 : 공공건축 사업계획 사전검토

❍ 2023년 11월 : 지방재정 투자심사 중앙심사 승인

라. 향후계획

❍ 2023년 11월 : 설계공모 준비(설계공모 과업 및 지침 작성)

❍ 2023년 12월 : 공공건축 심의, 설계공모

❍ 2024년  2월 : 실시설계 착수

❍ 2024년 12월 ~ 2026년 6월 : 공사 착공 및 준공

Ⅳ. 2023년도 수시분 공유재산 관리계획안 목록

❍ 공유재산 관리계획 총괄표   ----------------------   9P

❍ 공유재산 취득재산 목록     ----------------------  10P

❍ 위치도 및 전경사진         ----------------------  11P

공유재산 관리계획 총괄표

구 분			2023년			2024년 이후			합 계			비고
			건수	면적	금액	건수	면적	금액	건수	면적	금액
취득	계	토지
		건물				1	5,832	33,870
		기타	3	462.3	1,541
	매입 (신축)	토지
		건물				1	5,832	33,870				2026년
		기타
	교환 으로 취득	토지
		건물
		기타
	기타 취득	토지
		건물
		기타	3	462.3	1,541							기부채납
처분	계	토지
		건물
		기타
	매각	토지
		건물
		기타
	양여	토지
		건물
		기타
	교환 으로 처분	토지
		건물
		기타
	기타 처분	토지
		건물
		기타
무상사용 및 대부허가		계
		토지
		건물
		기타

(단위 : ㎡, 백만원)

공유재산 취득재산 목록

❏ 진주시 내동공영차고지 전기충전소 설치사업

사 업 명	취 득 재 산 표 시					소요 사업비	취득 시기	취득 방법	비고 (소관 부서)
	구분	소 재 지	지목	(연)면적	기준가격
계		3개소		462.3		1,541
진주시 내동공영 차고지 전기충전소 설치사업	공작물 (캐노피)	내동면 신율리 490-3 (진주시 공영차고지)		462.3		1,541	2023년	기부 채납	교통 행정과

(단위 : ㎡, 백만원)

❏ 그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업

사 업 명	취 득 재 산 표 시					소요 사업비	취득 시기	취득 방법	비고 (소관 부서)
	구분	소 재 지	지목	(연)면적	기준가격
계		건물 1동		5,382		33,870
그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업	건물	진주시 문산읍 삼곡리 1033		5,832		33,870	2026년	신축	농산물 유통과

(단위 : ㎡, 백만원)

진주시 내동공영차고지 전기충전소 설치 부지 위치도

진주시 내동공영차고지 전기충전소 설치 현황사진

그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업 부지 위치도

그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업 부지 현황사진