	부강한 진주 행복한 시민	제252회 진주시의회(제2차 정례회)

시정 주요업무 보고

(2023년 실적 및 2024년 계획)

진   주   시

(맑은물사업소)

보  고  순  서

□	수도과

□	정수과

□	하수시설과

□	하수운영과

수  도  과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원 현황	(단위 : 명)

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	30	1	1	6	7	8	7
현 원	28	1	1	7	10	5	4
증 감	△2	-	-	1	3	△3	△3

※ 기타직 : 13명〔청원경찰 4명(상대배수지), 공무직 5명, 시간선택제 임기제 4명〕

□ 상수도 관로 현황

(2022. 12. 31. 기준)

상수도관(㎞)					노후관 (%)	유수율 (%)
계	도수관	송수관	배수관	급수관
2,275	3	62	775	1,435	847km (37.2)	73.4

□ 상하수도 요금 현황

(2023. 10. 31. 기준, 단위 : 백만원)

합 계		가정용		업무용		영업용		대중탕용
전수	금액	전수	금액	전수	금액	전수	금액	전수	금액
57,089	24,199	40,804	11,557	1,124	4,140	15,073	7,729	88	773

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	34	25	9	-	-
예산사업	34	25	9	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

【완료 사업】……… 25건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주 요 성 과
이현동 이현상가인근 노후상수관로 정비공사 (이월사업)	❍ 위 치 : 이현동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=4.78km ❍ 사업비 : 1,622백만원	❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 준 공 : 2023. 2.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
봉곡로타리~ 상봉아파트간 노후수도관 정비공사 (이월사업)	❍ 위 치 : 상봉동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=4.85km ❍ 사업비 : 2,358백만원	❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 준 공 : 2023. 4.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
인사동 이마트인근 노후상수관로 정비공사 (이월사업)	❍ 위 치 : 인사동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=4.80km ❍ 사업비 : 2,422백만원	❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 준 공 : 2023. 6.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
상봉동 대룡골내 노후상수관로 정비공사 (이월사업)	❍ 위 치 : 상봉동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=4.60km ❍ 사업비 : 1,513백만원	❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 준 공 : 2023. 3.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
신안동 배영초 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 신안동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=0.2km ❍ 사업비 : 69백만원	❍ 착 공 : 2023. 3. ❍ 준 공 : 2023. 4.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
상평동 158-10번지 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 상평동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=0.11km ❍ 사업비 : 65백만원	❍ 착 공 : 2023. 3. ❍ 준 공 : 2023. 4.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
신평공원길 앞 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 평거동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=0.2km ❍ 사업비 : 71백만원	❍ 착 공 : 2023. 4. ❍ 준 공 : 2023. 5.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
집현면 월평마을 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 집현면 장흥리 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=0.21km ❍ 사업비 : 64백만원	❍ 착 공 : 2023. 3. ❍ 준 공 : 2023. 4.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
상대 한보아파트 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 상대동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=0.23km ❍ 사업비 : 83백만원	❍ 착 공 : 2023. 3. ❍ 준 공 : 2023. 4.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
중앙동 중앙병원 북측 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 중앙동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=0.08km ❍ 사업비 : 62백만원	❍ 착 공 : 2023. 3. ❍ 준 공 : 2023. 4.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
삼전3차아파트 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 하대동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=0.24km ❍ 사업비 : 82백만원	❍ 착 공 : 2023. 3. ❍ 준 공 : 2023. 4.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
상평동 삼성정비 앞 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 상평동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=0.24km ❍ 사업비 : 84백만원	❍ 착 공 : 2023. 3. ❍ 준 공 : 2023. 4.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
정촌면 관봉교회~ 화목한교회간 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 정촌면 관봉리 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=0.29km ❍ 사업비 : 79백만원	❍ 착 공 : 2023. 3. ❍ 준 공 : 2023. 4.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
신안동 삼우빌라 부근 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 신안동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=0.6km ❍ 사업비 : 247백만원	❍ 착 공 : 2023. 3. ❍ 준 공 : 2023. 5.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
하대동 쌍용아파트 주변 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 하대동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=1.06km ❍ 사업비 : 590백만원	❍ 착 공 : 2023. 4. ❍ 준 공 : 2023. 8.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
신안동 공설운동장 주변 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 신안동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=0.81km ❍ 사업비 : 349백만원	❍ 착 공 : 2023. 4. ❍ 준 공 : 2023. 7.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
칠암동 경대병원 주변 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 칠암동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=0.6km ❍ 사업비 : 306백만원	❍ 착 공 : 2023. 4. ❍ 준 공 : 2023. 7.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
상봉한주타운 부근 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 상봉동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=0.15km ❍ 사업비 : 69백만원	❍ 착 공 : 2023. 4. ❍ 준 공 : 2023. 7.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
지수면 덕암마을 급수관 인입공사	❍ 위 치 : 지수면 청담리 ❍ 사업량 : 상수관로 매설 L=910m, D30~50mm ❍ 사업비 : 105백만원	❍ 착 공 : 2023. 4. ❍ 준 공 : 2023. 6.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
명석면 신촌마을 상수관로 매설공사	❍ 위 치 : 명석면 관지리 ❍ 사업량 : 상수관로 매설 L=1,020m, D30~80mm ❍ 사업비 : 128백만원	❍ 착 공 : 2023. 4. ❍ 준 공 : 2023. 5.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
내동면 큰밤실마을 상수관로 매설공사	❍ 위 치 : 내동면 신율리 ❍ 사업량 : 상수관로 매설 L=1,730m, D30~80mm ❍ 사업비 : 240백만원	❍ 착 공 : 2023. 4. ❍ 준 공 : 2023. 6.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
정촌면 봉동마을 급수관 매설공사	❍ 위 치 : 문산읍 갈곡리 ❍ 사업량 : 급수관 매설 L=225m, D50mm ❍ 사업비 : 8.7백만원	❍ 착 공 : 2023. 5. ❍ 준 공 : 2023. 6.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
금곡면 정자마을 미사용 급수시설 철거공사	❍ 위 치 : 금곡면 정자리 ❍ 사업량 : 콘크리트 일체형 물탱크 철거 B=3.5m, H=1.8m ❍ 사업비 : 4.7백만원	❍ 착 공 : 2023. 6. ❍ 준 공 : 2023. 6.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
내동면 대지조성사업 대상지 상수관로 매설공사	❍ 위 치 : 내동면 신율리 ❍ 사업량 : 200×80 부단수분기 L=30m, D80mm ❍ 사업비 : 9.1백만원	❍ 착 공 : 2023. 6. ❍ 준 공 : 2023. 6.	❍ 맑은물의 안정적인 공급
이반성면 동촌마을 상수관로 매설공사	❍ 위 치 : 이반성면 하곡리 ❍ 사업량 : 상수관로 매설 L=120m, D80mm ❍ 사업비 : 22.7백만원	❍ 착 공 : 2023. 6. ❍ 준 공 : 2023. 7.	❍ 맑은물의 안정적인 공급

【추진중 사업】……… 9건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
금산교차로~현지 마을간 배수관 매설공사	❍ 위 치 : 금산면 장사리 일원 ❍ 사업량 : 배수관 매설 L=1.2km ❍ 사업비 : 497백만원 ❍ 기 간 : 2023.8.~12.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2023. 8. ❍ 공 정 : 50% □ 향후계획 ❍ 준공(예정) : 2023. 12.	❍ 정상추진
23블록 (신무림제지부근) 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 상평동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=5.96km ❍ 사업비 : 2,300백만원 ❍ 기 간 : 2023. 9. ~ 2024. 6.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2023. 9. ❍ 공 정 : 5% □ 향후계획 ❍ 준공(예정) : 2024. 6.	❍ 정상추진
25블록 (동진초등학교 부근) 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 하대동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=5.24km ❍ 사업비 : 2,372백만원 ❍ 기 간 : 2023. 9. ~ 2024. 6.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2023. 9. ❍ 공 정 : 5% □ 향후계획 ❍ 준공(예정) : 2024. 6.	❍ 정상추진
26블록 (도동초등학교부근) 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 하대동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=8.63km ❍ 사업비 : 3,350백만원 ❍ 기 간 : 2023. 9. ~ 2024. 6.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2023. 9. ❍ 공 정 : 5% □ 향후계획 ❍ 준공(예정) : 2024. 6.	❍ 정상추진
구)진주역~통계청 사거리 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 강남동 일원 ❍ 사업량 - 급배수관 매설 L=0.87km ❍ 사업비 : 675백만원 ❍ 기 간 : 2023. 8. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2023. 8. ❍ 공 정 : 70% □ 향후계획 ❍ 준공(예정) : 2023. 12.	❍ 정상추진
신안성당주변 노후상수관로 정비공사	❍ 위 치 : 신안동 일원 ❍ 사업량 - 급･배수관 매설 L=0.44km ❍ 사업비 : 290백만원 ❍ 기 간 : 2023. 8. ~ 11.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2023. 8. ❍ 공 정 : 80% □ 향후계획 ❍ 준공(예정) : 2023. 11.	❍ 정상추진
진성면 이천교 상수관로 이설공사	❍ 위 치 : 진성면 상촌리 ❍ 사업량 - 상수관 이설 D300 L=0.13km ❍ 사업비 : 352백만원 ❍ 기 간 : 2023. 8. ~ 11.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2023. 8. ❍ 공 정 : 90% □ 향후계획 ❍ 준공(예정) : 2023. 11.	❍ 정상추진
진주시 지방 상수도현대화사업 (노후상수관망)	❍ 위 치 : 진성･일반성･ 이반성･사봉･ 지수면 일원 ❍ 사업량 - 노후관 정비 L=52.3km - 블록시스템 구축 1식 - 유지관리시스템 구축 1식 ❍ 사업비 : 32,048백만원 ❍ 기 간 : 2020.1.~2024.12.	□ 추진사항 ❍ 착 공 : 2022. 6. ❍ 공 정 : 60% □ 향후계획 ❍ 준 공 : 2024. 12.	❍ 정상추진
스마트 검침 시스템 구축사업	❍ 디지털 계량기 교체 ❍ 사업량 : 57,000여전 ❍ 사업비 : 17,000백만원 ❍ 기 간 : 2021. ~ 2028.	□ 추진사항 ❍ 2022년까지 : 21,588전 교체 ❍ 2023년 10월 : 1,245전 교체 □ 향후계획 ❍ 2028년까지 준공 예정	❍ 정상추진

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 지방상수도 현대화사업 추진

❍ 정수장 통합 및 시설 현대화로 수돗물 품질 향상과 운영효율성 제고

❍ 안전한 수돗물 공급을 위한 노후 상수관망 정비사업 지속적 추진

❍ 배수지, 가압장 등 수도시설 확충으로 수돗물 공급 안정성 확보

□ 유수율 제고를 위한 블록별 노후수도관 정비

❍ 노후수도관의 체계적인 정비로 누수저감 및 유수율 제고

❍ 깨끗한 수돗물의 안정적인 공급

□ 합리적인 수도 요금 부과 및 징수

❍계량기 디지털검침시스템 설치사업의 원활한 추진으로 정확한 검침 및 누수 조기 안내에 따른 경제적 손실 최소화

❍ 코로나19 위기 경보 하향에 따른 요금 현실화율 회복(약 90%) 기대

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	5	44,580	4	1	-	-
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	5	44,580	4	1	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

- 지방상수도 현대화사업(정수장 개량 및 통합) -

진주시 노후 정수장 정비사업

이원화된 1･2정수장의 통합 및 시설 현대화로 비효율적인 구조를 개선함으로써 깨끗하고 안전한 수돗물 생산·공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 판문·평거동(1･2정수장)

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2025. 12.(5년간)

❍ 사 업 량 : 정수장 통합 및 개량 175,000㎥/일

❍ 사 업 비 : 96,717백만원(국비 48,358, 시비 48,359)

□ 추진상황

❍ 2020. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2022.  4. : 사전기술검토 승인(환경부)

❍ 2022. 11. : 일반수도사업(변경) 인가(낙동강유역환경청)

❍ 2022. 11. : 공사 입찰 및 계약 의뢰(조달청)

❍ 2023.  4. : 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2025. 12. : 공사 준공

※ 시비부담분 15,930백만원 추경에 편성 예정

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	96,717	9,754	37,020	17,138	32,805
국 비	48,358	8,254	22,020	1,208	16,876
시 비	48,359	1,500	15,000	15,930	15,929

□ 기대효과

❍ 정수장 노후 및 이원화에 따른 비효율성 개선으로 재정 건전성 확보

❍ 수돗물 품질 향상과 정수 기술 확보로 지방상수도 운영 효율성 제고

진주정수장 고도정수처리시설 설치사업

기후변화에 따른 수질 악화로 물관리 취약성이 증가하여 기존의 정수처리 공정으로 제거가 어려운 맛·냄새 물질 등을 처리할 수 있는 고도정수처리 공정을 도입하여 시민에게 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 평거동 산65-1(2정수장)

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.(4년간)

❍ 사 업 량 : 고도정수처리시설 설치 175,000㎥/일

❍ 사 업 비 : 60,000백만원(균특전환 42,000, 도비 5,400, 시비 12,600)

□ 추진상황

❍ 2022.  8. : 2023년 지방전환(균특전환) 사업 신청(경상남도)

❍ 2022. 10. : 2023년 지방전환(균특전환) 사업 선정

❍ 2023.  6. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 추진계획

❍ 2024.  8. : 사전기술검토(환경부) 및 행정절차 이행

❍ 2025.  1. : 공사 착공

❍ 2026. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	60,000		1,714	1,286	57,000
균특전환	42,000		1,200	900	39,900
도 비	5,400		154	116	5,130
시 비	12,600		360	270	11,970

□ 기대효과

❍기존의 정수처리 공정으로 제거가 어려운 맛·냄새 물질 등을 처리할 수 있는 고도정수처리 공정을 도입하여 시민에게 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급

노후수도관 교체사업(계속)

누수가 잦고 내용 연수가 경과한 수도관을 정비하여 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하고 유수율 증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 상수도 공급지역

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2026년(9년간)

❍ 사 업 량 : 441㎞ {237㎞(기술진단) + 204㎞(경년관 등)}

❍ 사 업 비 : 114,000백만원(국비 16,024, 시비 97,976)

□ 추진상황

❍ 2022. 12. : 노후수도관 정비 완료(2018~2022년, L=254.5km)

❍ 2023.  1. : 실시설계 용역 착수(2023년도분 사업)

❍ 2023.  3. : 노후수도관 교체사업 착공(L=75km, 2024년 6월 준공예정)

□ 추진계획

❍ 2024.  1. ~ 2. : 2024년도분 사업 실시설계 용역 착수

❍ 2024.  3. : 공사 착공

❍ 2024. 12. : 공사 준공

※ 시설비 100억원, 실시설계 후 추경에 편성 시행

□ 연도별 투자계획	(단위 : ㎞, 백만원)

구 분		계	기시행	2023년	2024년	2025년 이후
사 업 량		441	254.5	75	80	31.5
사업비	계	114,000	70,352	15,849	12,400	15,399
	국 비	16,024	9,383	3,175		3,466
	시 비	97,976	60,969	12,674	12,400	11,933

□ 기대효과

❍ 노후수도관 정비를 통한 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

❍ 유수율 제고를 통한 경영효율화 도모

진주시 지방상수도 현대화사업(노후상수관망)

광역계통 급수구역 내 노후상수관망 정비로 유수율(85%) 증대

블록 및 유지관리시스템 구축으로 운영 및 관리 효율성 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진성·사봉·일반성·이반성·지수면 일원(광역계통 급수구역)

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년간)

❍ 사 업 량

- 노후상수관로 정비 L=52.3㎞

- 블록시스템 구축 1식

- 유지관리 시스템 구축 1식

❍ 사 업 비 : 32,048백만원(국비 16,024, 시비 16,024)

□ 추진상황 및 계획

❍ 2020.  6. : 진주시 수도정비기본계획(변경) 승인

❍ 2020. 12. ~ 2022. 11. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2022.  4. : 사전기술검토 승인(환경부)

❍ 2022.  6. : 공사 착공

❍ 2024. 10. : 성과 검증(목표 유수율 85% 이상 달성 여부 판단)

❍ 2024. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	32,048	4,821	500	8,722	6,349	11,656
국 비	16,024	2,410	500	4,361	3,175	5,578
시 비	16,024	2,411		4,361	3,174	6,078

□ 기대효과

❍ 누수 저감 및 유수율 제고를 통한 수도사업의 경영개선 도모

❍ 녹물 발생, 이물질 유입 예방 등 깨끗하고 안전한 수돗물 공급

스마트 검침 시스템 구축사업

상수도 스마트 검침 시스템 구축 사업을 통해 상수도 유수율 향상, 업무의 효율성 및 대민 만족도를 제고하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 전역

❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2028년(8년간)  ※ 시범사업 : 2020년

❍ 사 업 량 : 디지털 계량기 교체(57,000여전) 및 서버 구축 1식

❍ 사 업 비 : 17,000백만원(국비 1,692, 시비 15,308)

□ 추진상황 (누적 진도율 40%)

❍ 2020. 2. ~ 12. :  1,081전 교체

❍ 2021. 2. ~ 12. : 13,500전 교체

❍ 2022. 2. ~ 12. :  7,007전 교체

❍ 2023. 2. ~ 10. :  1,245전 교체

□ 추진계획

❍ 2023. 12.     : 대곡면, 명석면, 미천면 일부 3,791전 교체

❍ 2024. ~ 2028. : 매년 7,000전 정도 교체

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구분	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
계	17,000	3,892	2,408	2,100	2,100	2,100	2,100	1,700	600
국 비	1,692	1,692
시 비	15,308	2,200	2,408	2,100	2,100	2,100	2,100	1,700	600

※ 매년 시행 중에 있는 노후(검정)계량기 교체사업비(1,000백만원/연) 포함

□ 기대효과

❍ 난검침 지역 해소 및 스마트 검침 시스템 구축으로 상수도 유수율 제고

❍ IoT 기술을 활용한 정부의 그린뉴딜 정책 실현

인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결하여 정보를 상호 소통하는 지능형 기술 및 서비스

정  수  과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원 현황	(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	연구사	비고
정 원	30	1	5	7	8	7	2
현 원	29	1	10	15	-	1	2
증 감	△1	-	5	8	△8	△6	-

※ 청원경찰 12명(취수장, 1정수장, 2정수장 각 4명), 기간제 1명(조리사)

□ 시설물 현황

구 분	취수장	1정수장	2정수장
위 치	남강로1번길 105-38	남강로1번길 38	진양호로125번길 22-35
시설용량	220,000㎥/일	60,000㎥/일	140,000㎥/일
시설연혁	1992. 5.	·정 수 시 설 : 1977.~1982. ·슬러지시설 : 1995. 10.	·정 수 시 설 : 1987.~2000. ·슬러지시설 : 1996. 10.
부 지	2,086㎡(631평)	34,915㎡(10,562평)	86,956㎡(26,304평)
건 물	3,300㎡	2,392㎡	4,190㎡

□ 정수처리 현황

【2022년도】

구 분	취수유량(㎥)	배수유량(㎥)
		계	1정수장	2정수장
연간총생산량	46,702,936	45,525,167	11,872,868	33,652,299
일평균생산량	127,953	124,726	32,528	92,198

【2023년도】	(9. 30. 기준)

구 분	취수유량(㎥)	배수유량(㎥)
		계	1정수장	2정수장
연간총생산량 (1월~9월)	33,927,248	33,066,786	8,457,788	24,608,998
일평균생산량	124,276	121,124	30,981	90,143

※ 연간 평균 정수처리 수질(탁도 기준) : 0.05 NTU(법정기준 0.5 NTU 이하)

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄	(단위 : 건)

구 분	계	완료	추진중	시기 미도래	미착공	비 고
계	10	4	6	-	-
예산사업	10	4	6	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

【완료 사업】……… 4건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주 요 성 과
취수장 에너지 진단 용역	❍ 위 치 : 취수장 ❍ 사업량 - 설비별 에너지 이용 실태 파악 - 에너지 손실요인 발굴 - 에너지 절감 개선안 제시 등 ❍ 사업비 : 9백만원 ❍ 기 간 : 2023. 2. ~ 3.	❍ 용역착수 : 2023. 2. ❍ 용역완료 : 2023. 3.	❍ 취수장 설비보호 및 에너지 절감
취수장 생물 감시장치 교체 및 조류 감시장치 설치	❍ 위 치 : 취수장 ❍ 사업량 - 생물감시장치 교체 1식 - 취수장 조류감시장치 설치 1식 ❍ 사업비 : 300백만원 ❍ 기 간 : 2023. 1. ~ 12.	❍ 설계 : 2023. 2. ❍ 계약 : 2023. 3. ❍ 착공 : 2023. 4. ❍ 준공 : 2023. 7.	❍ 수질의 상시 모니터링으로 안전하고 깨끗한 수돗물 생산 공급
취수원 수질개선사업	❍ 위 치 : 취수장 취수시설 내 ❍ 사업량 - 조류차단막 개량 및 설치 1식 - 물순환시스템 1식 - 산기시스템 1식 ❍ 사업비 : 1,000백만원 ❍ 기 간 : 2023. 2. ~ 7.	❍ 심의 : 2023. 2. ❍ 계약 : 2023. 3. ❍ 착공 : 2023. 4. ❍ 준공 : 2023. 7.	❍ 조류 발생에 따른 적극적인 대응으로 수질 개선
2정수장 건축물 내진보강 및 안전시설물 설치	❍ 위 치 : 2정수장 ❍ 사업량 - 약품실 철골브레이스 보강 6개소 - 안전난간 시설개선 12개소 ❍ 사업비 : 18백만원 ❍ 기 간 : 2023. 1. ~ 8.	❍ 조사 : 2022. 12. ~ 2023. 1. ❍ 설계 : 2023. 2. ❍ 착공 : 2023. 4. ❍ 준공 : 2023. 8.	❍지진에 대한 안전성 확보 및 구조물 내구성 증대

【추진중 사업】……… 6건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
취수장시설 보완 및 정비	❍ 위 치 : 취수장 ❍ 사업량 - 조류 차단막 정비 - 활성탄 투입설비 수선 - 취수펌프 3호기 인버터 오버홀 - 취수펌프실 배관 도장 - 취수장 출입구 경보시설 설치 등 ❍ 사업비 : 291백만원 ❍ 기 간 : 2023. 1. ~ 12.(연간)	□ 추진사항 ❍ 설계 : 2023. 1. ❍ 착공 : 2023. 2. □ 향후계획 ❍ 준공 : 2023. 12.	❍ 정상추진
1･2정수장 시설 보완 및 정비	❍ 위 치 : 1·2정수장 ❍ 사업량 - 1･2정수장 기계 및 전기설비 수선 - 2정수장 탈수기동, 약품동 등 도색 - 1･2정수장 안전난간 보강 및 설치 - 2정수장 침전지 워크웨이 설치 - 1정수장 배수지 유출 유량계 교체 - 2정수장 응집제 약품투입펌프 교체 - 2정수장 배니지 대차 수선 - 1정수장 가로등 정비 전기 공사 - 1･2정수장 침전지, 배수지 청소 - 1･2정수장 출입구 경보시설 설치 등 ❍ 사업비 : 1,661백만원 ❍ 기 간 : 2023. 1. ~ 12.(연간)	□ 추진사항 ❍ 설계 : 2023. 1. ❍ 착공 : 2023. 2. □ 향후계획 ❍ 준공 : 2023. 12.	❍ 정상추진
취수장 생물 감시장치 유지관리 용역	❍ 위 치 : 취수장 ❍ 사업량 - 생물감시장치 유지용역 1식 ❍ 사업비 : 12백만원 ❍ 기 간 : 2023. 1. ~ 12.(연간)	□ 추진사항 ❍ 용역착수 : 2023. 1. □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2023. 12.	❍ 정상추진
망간계측기 유지관리 용역	❍ 위 치 : 취수장 ❍ 사업량 - 망간계측기 유지용역 1식 ❍ 사업비 : 13백만원 ❍ 기 간 : 2023. 1. ~ 12.(연간)	□ 추진사항 ❍ 용역착수 : 2023. 1. □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2023. 12.	❍ 정상추진
2023년 취·정수장 공정안전관리(PSM) 유지관리 용역	❍ 위 치 : 취수장, 1·2정수장 ❍ 사업량 - 공정안전보고서 이행 ❍ 사업비 : 18백만원 ❍ 기 간 : 2023. 2. ~ 12.(11개월)	□ 추진사항 ❍ 용역착수 : 2023. 2. □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2023. 12.	❍ 정상추진
1･2정수장 슬러지 탈수케이크 처리 용역(단가계약)	❍ 위 치 : 1·2정수장 ❍ 사업량 - 탈수케이크 처리 1식 - 계약물량 : 4,545톤 ❍ 사업비 : 399백만원 ❍ 기 간 : 2023. 1. ~ 12.(연간)	□ 추진사항 ❍ 용역착수 : 2023. 1. □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2023. 12.	❍ 정상추진

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 고품질 수돗물 생산·공급

❍ 취·정수장 정수처리 시설물 개선 및 개량으로 안정적인 수돗물 공급

❍신뢰 증진을 위한 수질검사 체계 확립 및 찾아가는 수도꼭지 수질검사   서비스 강화

□ 효율적 공정관리를 위한 유지관리 체계 확립

❍ 공정 개선과 전문성 제고를 위한 주기적 교육 시행

❍ 정비이력관리제 정착과 공정별 정비주기 설정 관리 및 위생관리 강화

□ 체계적인 정비·관리와 교육·훈련으로 위해요인 사전 차단

❍ 진단보고서 및 이력카드에 기반한 노후시설 정비계획 수립

❍ 정기적인 시설 점검 및 안전교육·위기 대응 훈련 등 시행

❍ 통합정수장 설치공정에 연계, 기존 시설 개량 및 호환성 제고

□ 진주정수장 취수원 수질개선사업

❍ 수질 악화 및 유충 차단에 적극 대응

❍ 시민에게 안전하고 깨끗한 수돗물 생산공급

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구분	건수	소요사업비	추진계획 (착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	4	2,062	4	-	-	-
일반시책사업	2	-	2	-	-	-
주요예산사업	2	2,062	2	-	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

정성을 담은 고품질 수돗물 생산 공급

안정적 수돗물 생산 및 운영체계 정립으로 수돗물의 품질 신뢰성 제고

효율적 공정관리체계 구축으로 저비용 고품질 수돗물 생산 실현

□ 사업개요

❍ 사업목표 : 수질 목표값(탁도 0.1 NTU 이하) 설정으로 고품질 수돗물 생산 실현

❍ 추진방향 : 정비이력관리제, 정비주기 설정 관리제, 기술진단 분석 활용으로  효율적

공정관리

□ 추진계획

❍ 최적의 수질관리를 통한 고품질 수돗물 생산·공급

- 수질 목표값 탁도 0.1 NTU(법정기준 : 0.5 NTU) 이하 유지

- ｢찾아가는 우리집 수돗물 안심확인제｣ 시행으로 신뢰받는 수도행정 구현

❍ 효율적 공정관리를 위한 유지관리체계 확립

- 정비이력관리제의 제도적 정착과 정비주기 설정관리제 시행

❍ 체계적인 정비·관리와 선제적 교육·훈련으로 위험요인 사전 차단

- 기술진단 및 안전진단 보고서, 이력카드 등에 기반을 둔 정비·수립 시행

- 시설 안전 점검, 안전교육, 위기 대응훈련 등의 정기적 시행

□ 기대효과

❍ 완벽한 정수처리로 깨끗하고 안전한 수돗물 생산

신뢰 증진을 위한 수질검사 체계 확립

다양한 첨단 장비와 전문 인력의 기술력을 활용한 체계적 정수공정 관리

찾아가는 민원서비스와 검사 결과 공표를 통한 수돗물 신뢰 증진

□ 사업개요

❍ 깨끗한 수돗물 생산을 위한 수질검사 체계 확립

❍ 수돗물 민원 발생 시 찾아가는 민원 서비스로 수돗물 신뢰 증진

□ 추진계획

❍ 조류 등 특이 수질 대비 수돗물 특별관리 대책기간 운영 : 6~10월(5개월간)

❍ 진양호 원수 및 상류수계 수질에 대한 정기적 검사 실시

- 진양호 원수 수질검사

∙ 탁도 등 7항목/매일, pH 등 18항목/매주, 카드뮴 등 38항목/매월

- 상류 수계 수질검사 : 매월 10개소(BOD 등 11항목)

❍ 공정관리 및 급수계통 수질관리를 위한 수질검사

- 수질 변화에 따른 자(jar)테스트 실시 : 주 2회 이상(수질 이상 시 수시)

- 정수공정 관리 수질검사 : 9항목/매일, 8항목/매주, 60항목/매월

- 수도꼭지 및 노후급수관 수질검사 : 10항목/매주(16개소-일반 12, 노후 4)

- 중점관리지역 노후급수관 수질검사 : 11항목/월(40개소)

❍ 가정 수도꼭지 수질 이상 민원 및 수돗물 안심확인제 신속·정확한 민원처리

❍ 수도행정에 대한 시민 신뢰도 증진 프로그램 운영

- 수돗물 수질검사 결과 전광판 표출 : 월 1회(옥외전광판, 시청사 로비홍보판)

- 수돗물 수질검사 결과 공표 : 월 1회(홈페이지, 일간지, SNS, 게시판 등)

- 정기적 민·관 합동 수질확인 검사 실시 : 월 1회(시민단체 회원 참여)

- 수돗물평가위원회 개최 : 연 2회(상·하반기)

□ 기대효과

❍ 수질검사 체계화를 통한 깨끗한 수돗물 공급으로 시민 신뢰도 증진

취·정수장 시설 보완 및 정비사업 시행

진양호 수질 악화 및 이상 수질 발생에 대비한 정수 처리시설 보완 및 지속적 개량

안정적인 수돗물 생산을 위한 정수 처리시설 노후설비 교체 및 정비

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 취·정수장 일원

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 사 업 량 : 노후시설 보완 및 정비 24건

❍ 사 업 비 : 1,462백만원

❍ 사업내역	(단위 : 건, 백만원)

구 분	사업내용	사업량	사업비	비 고
계		24	1,462
취수장	◦기계·전기 설비 유지관리 ◦약품투입설비 유지관리 ◦건축물, 구조물 유지관리	9	208
1·2정수장		15	1,254

□ 추진계획

❍ 2024.  1. ~  3. : 설계 착수 및 완료

❍ 2024.  3. ~ 12. : 사업 착공 및 준공

□ 기대효과

❍ 깨끗한 수돗물의 안정적인 공급으로 시민 불편 최소화

❍ 노후 시설물의 적기 정비를 통한 안정적인 수돗물 생산

4상수도시설물 정밀안전진단 용역

｢시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법｣ 제12조의 규정에 따라 상수도시설물 정밀안전진단 용역 시행

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 취수장, 1정수장, 2정수장

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 6.

❍ 사 업 량 : 정밀안전진단 1식

❍ 사 업 비 : 600백만원

❍ 법적근거 : ｢시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법｣ 제12조 (정밀안전진단의 실시)

※ 상수도시설물 정밀안전진단 : 5년마다 실시

□ 추진계획

❍ 2024. 1. ~ 3. : 설계 및 계약

❍ 2024. 3.     : 용역 착수

❍ 2024. 6.     : 용역 완료

□ 기대효과

❍ 공공시설물의 안전성 확보로 재난사고 사전 방지

❍ 적정한 유지관리를 통한 시설물의 내구연한 증진

하수시설과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원 현황	(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	16	1	4	5	4	2
현 원	15	1	3	5	4	2
증 감	△1	-	△1	-	-	-

※ 공무직 : 9명

□ 하수도 현황

시설용량 (㎥/일)	면 적(㎢)		관 로(㎞)		보 급 률(%)
	배수구역	처리구역	계 획 (A)	실 적 (B)	관 로 (B/A)	하수도
202,300	63.56	33.54	1,707.4	1,616.4	94.7	94.0

□ 시설물 현황

구 역	관 로 (㎞)	맨 홀 (개)	오수받이 (개)	맨홀펌프장 (개소)	우수토실 (개소)
하수처리 구역 내	1,616.4	31,953	71,255	76	70

□ 공중화장실 현황

❍ 전체 현황	(단위 : 개소)

계	공공용 시 설	관광･체육 시 설	교통시설 (역,터미널)	상업시설 (시장,상가)	주유소	공 원	기 타 (둔치 등)
465	175	57	7	26	119	45	36

❍ 부서별 관리(지도·점검) 현황	(단위 : 개소)

계	하수시설과 (23개 읍면동)	공원관리과	산림과	체육진흥과	진주성 관리사업소	기 타 (민간 등)
465	59	34	10	22	6	334

❍ 하수시설과 관리 현황	(단위 : 개소)

계	공 원	둔치	등산로	시장	주차장	가로변
59	11	22	2	3	5	16

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	9	1	8	-	-
예산사업	9	1	8	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

【완료 사업】……… 1건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주 요 성 과
물재이용 (빗물+중수도)시설 설치사업	❍ 위 치 : 진주종합경기장 진주실내수영장 한국세라믹기술원 ❍ 사업량 - 중수도시설 : 220㎥/일 - 빗물이용시설 : 1,130㎥/일 (기존시설활용) ❍ 사업비 : 5,263백만원 ❍ 기 간 : 2020. ~ 2023.	❍ 착공 : 2021. 11 ❍ 준공 : 2023. 2.	❍ 물재이용으로 효율적인 물자원 활용 및 공공수역의 수질보전 기여

【추진중 사업】……… 8건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
대곡 공공 하수처리시설 증설사업	❍ 위 치 : 대곡면 일원 ❍ 사업량 - 처리장 증설 : 950㎥/일 (기존 1,900㎥/일⇒2,850㎥/일) - 관로정비 L=17.4km - 배수설비 608개소 ❍ 사업비 : 31,272백만원 ❍ 기 간 : 2019. ~ 2024.	□ 추진사항 ❍ 2020. 11. : 기본 및 실시설계 용역 ❍ 2020. 12. : 재원협의(환경부) ❍ 2021. 6. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2024. 6. : 공사 준공	❍ 정상 추진
초전동 외 8개 지구 하수관로 정비사업	❍ 위 치 : 상대,하대,장재,초전,판문,내동,정촌,금산,집현,명석일부지역 ❍ 사업량 - 관로정비 L=26.1km - 배수설비 784개소 - 맨홀펌프장 22개소 ❍ 사업비 : 28,321백만원 ❍ 기 간 : 2020. ~ 2025.	□ 추진사항 ❍ 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영 ❍ 2021. 10. : 기본 및 실시설계 용역 ❍ 2021. 10. : 재원협의(환경부) ❍ 2022. 6. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2025. 6. : 공사 준공	❍ 정상 추진
강주 소규모 공공하수 처리시설 증설사업	❍ 위 치 : 정촌면 강주· 목과마을 ❍ 사업량 - 처리장증설 : 50㎥/일 (기존 110㎥/일⇒160㎥/일) - 관로정비 L=3.2km - 배수설비 133개소 ❍ 사업비 : 5,692백만원 ❍ 기 간 : 2022. ~ 2025.	□ 추진사항 ❍ 2021. 9. : 신규 국고보조사업 선정 ❍ 2022. 5. : 기본 및 실시설계 용역 착수 ❍ 2022. 6. : 처리장부지 공유재산 심의 ❍ 2023. 2. : 처리장부지 보상협의 ❍ 2023. 11. : 재원협의(환경부) □ 향후계획 ❍ 2024. 1. : 기본 및 실시설계 용역 준공 ❍ 2024. 4. : 공사 착공 ❍ 2025. 10. : 공사 준공	❍ 정상 추진
서촌 소규모 공공하수 처리시설 신설사업	❍ 위 치 : 수곡면 원내리(서촌) 원외리(신촌) 일원 ❍ 사업량 - 처리장 신설 60㎥/일 - 관로정비 L=3.1km - 배수설비 136개소 ❍ 사업비 : 4,428백만원 ❍ 기 간 : 2023. ~ 2025.	□ 추진사항 ❍ 2022. 9. : 신규 국고보조사업 선정 ❍ 2023. 5. : 기본 및 실시설계용역 착수 ❍ 2023. 8. : 처리장부지 공유재산 심의 □ 향후계획 ❍ 2024. 2. : 재원협의(환경부) ❍ 2024. 3. : 기본 및 실시설계 용역 준공 ❍ 2024. 6. : 공사 착공 ❍ 2025. 12. : 공사 준공	❍ 정상 추진
사봉지역 하수관로 정비사업	❍ 위 치 : 일반성면,이반성면, 사봉면 일원 ❍ 사업량 - 관로정비 L=21.4km - 배수설비 1,301개소 ❍ 사업비 : 22,387백만원 ❍ 기 간 : 2022. ~ 2027.	□ 추진사항 ❍ 2022. 11. : 중기지방재정계획 반영 ❍ 2023. 1. : 기본 및 실시설계 용역 착수 ❍ 2023. 9. : 신규 국고보조사업 선정 □ 향후계획 ❍ 2024. 6. : 재원협의(환경부) ❍ 2024. 9. : 기본 및 실시설계 용역 준공 ❍ 2024. 12. : 공사 착공 ❍ 2027. 12. : 공사 준공	❍ 정상 추진
진주시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	❍ 위 치 : 진주시 전체 ❍ 사업량 - 하수도정비 기본계획(변경) 1식 - 노후 하수처리시설 실태평가 1식 ❍ 사업비 : 3,000백만원 ❍ 기 간 : 2023. ~ 2025.	□ 추진사항 ❍ 2023. 6. : 기본계획 변경수립용역 착수 □ 향후계획 ❍ 2024. 10. : 낙동강유역환경청(환경부) 사전 협의 ❍ 2025. 3. : 기본계획 승인 신청 ❍ 2025. 6. : 기본계획 변경수립용역 준공	❍ 정상 추진
노후하수관로 정비사업 (1차-2단계)	❍ 위 치 : 관내 일원 ❍ 사업량 - 노후하수관로 정비 : 10.8km ❍ 사업비 : 28,911백만원 ❍ 기 간 : 2020. ~ 2025.	□ 추진사항 ❍ 2021. 12. : 기본 및 실시설계 완료 ❍ 2022. 4. : 재원협의(환경부) ❍ 2022. 10. : 공사 착공 □ 향후계획 ❍ 2025. 5. : 공사 준공	❍ 정상 추진
노후하수관로 정비사업 (2차)	❍ 위 치 : 관내 일원 ❍ 사업량 - 노후하수관로 정비 : 21.2km ❍ 사업비 : 28,868백만원 ❍ 기 간 : 2023. ~ 2026.	□ 추진사항 ❍ 2021. 5. : 정밀조사 용역 완료(2차) ❍ 2023. 6. : 기본 및 실시설계 용역 착수 □ 향후계획 ❍ 2024. 3. : 재원협의(환경부) 및 행정절차 이행 ❍ 2024. 6. : 기본 및 실시설계 용역 완료 ❍ 2024. 9. : 공사 착공 ❍ 2026. 12. : 공사 준공	❍ 정상 추진

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 시민의 삶의 질 향상 및 수질오염 예방을 위한 농촌지역 하수처리시설 확충

❍ 대곡 공공하수처리시설 증설사업 및 정촌면 강주 소규모 공공하수처리시설  증설사업 차질 없는 추진

❍ 수곡면 서촌 소규모 공공하수처리시설 설치사업 추진

□ 체계적이고 계획된 하수관로 설치 및 정비로 지속 가능한 도시기반 유지

❍ 하수도정비기본계획에 따른 하수처리구역 확대를 위한 하수관로

정비사업 추진

❍ 노후하수관로 정밀조사 및 정비사업으로 노후 관로의 지속적 정비

□ 하수도 사용료 현실화로 하수도특별회계 재정 건전성 강화

❍ 하수 처리원가 및 요금현실화율 면밀한 분석으로 경영 합리화 실현

2. 총    괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공 기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	12	25,621	-	2	1	1
일반시책사업	-	-	-	-	-	-
주요예산사업	12	25,621	-	2	1	1

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

대곡 공공하수처리시설 증설사업(계속)

신축 건물의 증가 추세와 진주교도소 생활하수 등의 원활한 처리

공공하수처리장 유입 하수의 처리효율 제고 및 공공수역 수질 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 대곡면 일원(유곡,유동,설매,상촌,월암,덕곡,용암,중촌,오곡마을)

❍ 사 업 량 : 처리장증설 950㎥/일(기존 1,900㎥/일⇒변경 2,850㎥/일)
관로정비 L=17.4㎞, 배수설비 608개소

❍ 사 업 비 : 31,272백만원(국비 70%, 도비 10.5%, 시비 10.5%, 기금 9%)

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년(6년간)

□ 추진상황

❍ 2019.  4. ~ 2020. 11. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2020.  6. ~ 10. : 설계경제성(VE) 용역 및 경남도 지방건설기술심의

❍ 2020. 10. ~ 12. : 재원협의 및 행정절차 이행

❍ 2021.  6. : 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2024.  2. ~  5. : 하수처리시설 시운전

❍ 2024.  6. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년
계	31,272	13,906	4,510	8,667	4,189
국 비	21,626	9,375	2,773	6,325	3,153
도 비	3,376	1,480	382	478	1,036
시 비	3,376	2,326	1,050
기 금	2,894	725	305	1,864

□ 기대효과

❍ 하수처리구역 확대로 하천 수질 개선

❍ 하수관로 정비로 쾌적한 생활환경 제공

초전동 외 8개 지구 하수관로 정비사업(계속)

생활하수가 차집되지 않는 마을을 하수처리구역으로 확대

생활하수 공공하수처리시설 유입처리로 하수처리 효율 향상 및 공공수역 수질 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 상대, 하대, 장재, 초전, 판문, 내동, 정촌, 금산, 집현, 명석일부지역

❍ 사 업 량 : 관로정비 L=26.1㎞, 배수설비 784개소, 맨홀펌프장 22개소

❍ 사 업 비 : 28,321백만원(국비 70%, 도비 10.5%, 시비 10.5%, 기금 9%)

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년(6년간)

□ 추진상황

❍ 2020.  4. ~ 2021. 10. : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2021.  8. : 경남도 지방건설기술심의

❍ 2021. 10. ~ 12. : 재원협의 및 행정절차 이행

❍ 2022.  6. : 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2025.  6. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2023년	2024년	2025년
계	28,321	11,597	3,850	1,752	11,122
국 비	19,825	7,229	2,800	1,085	8,711
도 비	2,700	1,161	58	67	1,414
시 비	3,247	2,966	11	270
기 금	2,549	241	981	330	997

□ 기대효과

❍ 하수처리구역 확대로 공공수역 수질 개선

❍ 하수관로 정비로 쾌적한 생활환경 제공

정촌 강주 소규모 공공하수처리시설 증설사업(계속)

하수처리구역 확대 및 처리효율 향상으로 방류 수질을 개선하고 주민 생활불편 해소

□ 사업개요

❍ 위    치 : 정촌면(강주, 목과마을) 일원

❍ 사 업 량 : 처리장증설 50㎥/일(기존 110㎥/일 ⇒ 변경 160㎥/일)
관로정비 L=3.2㎞, 배수설비 133개소

❍ 사 업 비 : 5,692백만원(국비 70%, 도비 10.5%, 시비 10.5%, 기금 9%)

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4년간)

□ 추진상황

❍ 2022.  5. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2022.  6. : 처리장부지 공유재산심의

❍ 2023.  2. : 편입부지 보상 협의(1필지, 1,206㎡)

❍ 2023. 11. : 재원협의 및 행정절차 이행

□ 추진계획

❍ 2024.  1. : 기본 및 실시설계 용역 준공

❍ 2024.  4. : 공사 착공

❍ 2025. 10. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년
계	5,692	645	200	978	3,869
국 비	3,984	300	162	564	2,958
도 비	598	45	34	120	399
시 비	598	300	4	294
기 금	512				512

□ 기대효과

❍ 하수처리구역 확대 및 처리효율 향상으로 하천 수질 개선

❍ 하수관로 정비로 쾌적한 생활환경 제공

수곡 서촌 소규모 공공하수처리시설 설치사업(계속)

진양호 상류농촌지역 자연마을의 생활하수 처리시설 설치

생활하수의 처리로 공공수역의 수질 보전 및 쾌적한 생활환경 제공

□ 사업개요

❍ 위    치 : 수곡면 원내리(서촌), 원외리(신촌) 일원

❍ 사 업 량 : 처리장신설 60㎥/일, 관로정비 L=3.1㎞, 배수설비 136개소

❍ 사 업 비 : 4,428백만원(국비 60%, 도비 14%, 시비 14%, 기금 12%)

❍ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년(3년간)

□ 추진상황

❍ 2022.  9. : 신규 국고보조사업 선정

❍ 2023.  5. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2023.  8. : 처리장 부지 및 공유재산 심의

□ 추진계획

❍ 2024.  2. : 재원협의 및 행정절차 이행

❍ 2024.  3. : 기본 및 실시설계 용역 준공

❍ 2024.  6. : 공사 착공

❍ 2025. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	2023년	2024년	2025년
계	4,428	500	433	3,495
국 비	2,657	300	100	2,257
도 비	620	100	33	487
시 비	620	100	300	220
기 금	531			531

□ 기대효과

❍ 공공하수처리시설 신설을 통한 공공수역의 수질 개선

❍ 하수관로 정비로 쾌적한 생활환경 제공

사봉지역 하수관로 정비사업(신규)

농촌 자연마을을 하수처리 구역으로 확대하고 악취 발생이 많은 지역은 하수관로를 분류식 관로 설치

생활하수 처리효율 향상으로 하천 수질개선 및 주민불편 해소

□ 사업개요

❍ 위    치 : 사봉면, 일반성면 일원

❍ 사 업 량 : 관로정비 L=21.4㎞, 배수설비 1,301개소

❍ 사 업 비 : 22,387백만원(국비 60%, 도비 14%, 시비 14%, 기금 12%)

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2027년(6년간)

□ 추진상황

❍ 2022. 11. : 중기지방재정계획 반영

❍ 2023.  1. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2023.  9. : 신규 국고보조사업 선정

□ 추진계획

❍ 2024.  2. : 설계경제성(VE) 및 안전성검토 용역

❍ 2024.  4. : 경남도 지방건설기술심의

❍ 2024.  6. : 재원협의 및 행정절차 이행

❍ 2024.  9. : 기본 및 실시설계 용역 준공

❍ 2024. 12. : 공사 착공

❍ 2027. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년이후
계	22,387	999	400	766	20,222
국 비	13,432			500	12,932
도 비	3,134			166	2,968
시 비	3,134	999	400	100	1,635
기 금	2,687				2,687

□ 기대효과

❍ 하수처리구역 확대 및 하수관로 정비로 하천 수질개선 및 쾌적한 생활환경 제공

문산지역 하수관로 정비사업(신규)

농촌지역 자연마을을 하수처리구역으로 확대

생활하수 처리로 하천 수질개선 및 쾌적한 생활환경 제공

□ 사업개요

❍ 위    치 : 문산읍 옥산리·두산리 일원

❍ 사 업 량 : 관로정비 L=6.92㎞, 배수설비 262개소

❍ 사 업 비 : 6,732백만원(국비 60%, 도비 14%, 시비 14%, 기금 12%)

❍ 사업기간 : 2024년 ~ 2026년(3년간)

□ 추진상황

❍ 2023.  9. : 신규 국고보조사업 선정

❍ 2023. 11. : 중기지방재정계획 반영

□ 추진계획

❍ 2024.  3. : 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2024. 12. : 재원협의 및 행정절차 이행

❍ 2025.  1. : 기본 및 실시설계 용역 준공

❍ 2025.  4. : 공사 착공

❍ 2026.  3. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	2023년	2024년	2025년	2026년
계	6,732		583	2,459	3,690
국 비	4,039		350	1,476	2,213
도 비	942		116	382	444
시 비	943		117	382	444
기 금	808			219	589

□ 기대효과

❍ 하수관로 정비로 하천 수질개선 및 쾌적한 생활환경 제공

진주시 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역

공공하수도의 보급률 향상 및 생활여건 변화를 반영한 하수도 시설의 계획적·체계적인 정비 도모

□ 용역개요

❍ 위    치 : 진주시 일원

❍ 용역기간 : 2023년 ~ 2025년(3년간)

❍ 용역개요 : 하수도정비 기본계획(변경) 1식
노후화 실태평가 개선 타당성 조사 1식

❍ 용 역 비 : 2,700백만원(시비)

□ 추진상황

❍ 2022. 11. : 중기지방재정계획 반영

❍ 2023.  6. : 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 추진계획

❍ 2024. 10. : 낙동강유역환경청 및 환경부 사전 협의

❍ 2025.  3. : 기본계획 승인 신청(환경부)

❍ 2026.  5. : 기본 및 실시설계 용역 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	2023년	2024년	2025년
계	2,700	2,200		500
시 비	2,700	2,200		500

□ 기대효과

❍ 계획적·체계적인 하수도시설 정비로 공공수역 수질개선 및 쾌적한 생활환경 조성

노후하수관로 정비(1차-2단계)사업(계속)

노후하수관로 정밀조사 결과, 파손 등 결함이 많은 하수관로를 우선 교체·개보수하여 하수 차집율 향상 및 지반침하 사전 예방

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 일원

❍ 사 업 량 : 노후하수관로 L=10.8㎞

❍ 사 업 비 : 28,911백만원(국비 50%, 도비 16%, 시비 19%, 기금 15%)

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년(6년간)

□ 추진상황

❍ 2016.  5. : 노후하수관로 정밀조사 용역 완료(1차)

❍ 2021. 12. : 기본 및 실시설계 용역, 경상남도 지방건설기술심의

❍ 2022.  1. ~  9. : 재원협의(환경부) 및 행정절차 이행

❍ 2022. 10. : 공사 착공

□ 추진계획

❍ 2025.  5. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년 이후
계	28,911	2,055	4,498	4,293	2,500	15,565
국 비	14,383	1,250	2,249	1,930	942	8,012
도 비	4,567		957	922		2,688
시 비	5,646	744	1,292	1,091	267	2,252
기 금	4,315	61		350	1,291	2,613

□ 기대효과

❍파손된 노후하수관로 교체 및 개보수로 하수 차집율 향상 및 시민의 안전성 확보

노후하수관로 정비(2차)사업(계속)

노후하수관로 정밀조사 결과, 파손 등 결함이 많은 하수관로를 우선 교체·개보수하여 하수 차집율 향상 및 지반침하 사전 예방

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 일원

❍ 사 업 량 : 노후하수관로 L=21.2㎞

❍ 사 업 비 : 28,868백만원(국비 60%, 도비 14%, 시비 14%, 기금 12%)

❍ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)

□ 추진상황

❍ 2021.  5. : 노후하수관로 정밀조사 용역 완료(2차)

❍ 2023.  6. : 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 추진계획

❍ 2024.  3. : 재원협의(환경부) 및 행정절차 이행

❍ 2024.  6. : 기본 및 실시설계 용역 준공

❍ 2024.  9. : 공사 착공

❍ 2026. 12. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년
계	28,868		1,800	1,402	12,832	12,834
국 비	17,320		500	841	7,989	7,990
도 비	4,042		166	32	1,922	1,922
시 비	4,042		1,134	33	1,437	1,438
기 금	3,464			496	1,484	1,484

□ 기대효과

❍ 파손된 노후하수관로 교체 및 개보수로 하수 차집율 향상 및 시민의 안전성 확보

상평산업단지 노후폐수관로 정비사업(환경부)

상평산업단지 폐수관로 노후화(30년 이상)로 잦은 지반침하(싱크홀) 발생에 따른 폐수관로 정비 시급

안전사고 위험성이 높은 구간부터 우선 시공으로 시민의 안전성 확보

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주 상평일반산업단지

❍ 사 업 량 : 노후폐수관로 정비 L=16.5km (※ 총연장 : 20.9km)

❍ 사 업 비 : 43,256백만원(국비 70%, 시비 30%)

❍ 사업기간 : 2021. 10. ~ 2026. 3.

❍ 발주기관 : 한국환경공단

□ 추진상황

❍ 2020.  7. : 폐수관로조사 및 기본계획 수립 업무협약 체결
(환경부, 진주시, 한국환경공단)

❍ 2021.  6. : 노후폐수관로 조사 및 기본계획 수립 용역

❍ 2021. 11. : 상평산업단지 노후폐수관로 정비사업 위·수탁 협약 체결
(환경부, 진주시, 한국환경공단)

❍ 2022. 12. : 기본설계 및 시공업체 선정

❍ 2023.  4. : 실기설계 완료 및 실공사 착공

❍ 2023.  9. : 본공사 계약 및 착공

□ 추진계획

❍ 2026.  2. : 공사 준공

□ 연도별 투자계획	(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년
계	43,256	4,008	2,143	12,792	13,298	11,015
국 비	30,279	3,545	1,500	9,240	9,062	6,932
시 비	12,977	463	643	3,552	4,236	4,083

□ 기대효과

❍ 노후폐수관로 정비로 수질오염 예방 및 시민의 안전성 확보

하수관로 기술진단 용역

하수도법 제20조에 따라 공공하수관로에 대한 주기적인(5년) 기술진단을 통해 문제점을 파악하고 관로 시설개선 방안을 마련

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 전역(진주, 문산 동방, 정촌 소곡, 지수 송정, 일반성 답천처리구역)

❍ 사 업 량 : 하수관로 L=36km

❍ 사 업 비 : 226백만원

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 3.

□ 추진상황

❍ 2018. : 평거1지구 외 4개소(L=45㎞)

❍ 2020. : 평거3지구 외 4개소(L=36㎞)

❍ 2021. : 혁신도시 외 3개소(L=64.3㎞)

❍ 2022. : 이현·신안지구 외 2개소(L=41.4㎞)

❍ 2023. : 평거1지구 외 7개소(L=112.8㎞)

□ 추진계획

❍ 2024. 2. : 사업수행능력평가 기준안 수립

❍ 2024. 3. : 사업수행능력평가 제출 안내 공고

❍ 2024. 4. : 사업수행능력 평가(평가위원회)

❍ 2024. 5. : 업체 선정 및 용역 착수

❍ 2025. 3. : 기술진단 용역 완료

□ 기대효과

❍ 하수관로 기술진단으로 시설개선 등 하수처리 효율증대

하수도 사용료 현실화 추진

하수처리시설 확충 및 관리비 증가로 하수처리원가 상승

하수도 요금 현실화로 하수도공기업특별회계 재정 건전성 확보

□ 추진배경

❍ 하수처리 원가 대비 현실화율이 낮아 하수도공기업특별회계 재정건전성 악화

* 톤당 하수처리 원가 : (’19)1,517.2원 → (’20)1,514.63원 → (’21)1,611.41원 → (’22)1,667.66원

* 현실화율 : (’19)30.05% → (’20)27.64% → (’21)25.52% → (’22)25.91%

❍하수처리 기반시설 확충 및 관리비 증가 등에 따른 재정 여건 악화로 신규 시설투자 애로

□ 사용료 인상 현황

구 분	2012년	2013년	2015년	2016년	2017년	비고
요금인상율(%)	20.00	15.50	60.00	7.21	7.91
현실화율(%)	22.33	25.06	22.8	30.98	32.52

※  ’17년 이후 하수도 요금은 동결하였으나, 하수도시설 투자 등 비용증가에 따른 하수       처리 원가상승

□ 추진상황

❍ 2023.  9. : 하수도사용료 현실화 단가산정 용역 착수

□ 추진계획

❍ 2023. 12. : 하수도사용료 인상계획(안) 수립 및 단가산정 용역 준공

❍ 2024.  2. : 진주시물가대책위원회 사용료 인상(안) 상정

❍ 2024.  5. : 의원 간담회 및 조례 개정 등

❍ 2024.  7. : 하수도 사용료 인상

※ 2024년 하반기부터 3개년(2024~2026년)간 연차적으로 단계별 인상 추진 검토

□ 기대효과

❍ 하수도공기업특별회계 재정 건전성 확보로 하수행정 신뢰도 향상

하수운영과

목    차

Ⅰ. 기본현황

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

2. 추진실적

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

2. 총    괄

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

Ⅰ. 기본현황

□ 직원 현황	(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	연구사	비 고
정 원	41	1	8	7	8	16	1
현 원	41	1	16	12	7	4	1	휴직자 2명 포함
증 감	-	-	8	5	△1	△12	-

□ 공공하수처리시설 현황

구 분	계	진 주	문 산	사 봉	대 곡	진 성
시설용량 (톤/일)	202,300	190,000	7,100	2,400	1,900	900
처리구역	진주시 전역	시가지 금산·집현· 명석면	문산읍	일반성면	대곡면	진성면 사봉면
부지면적 (㎡)	206,477	153,275	19,482	18,067	8,605	7,048
중계펌프장 (개소)	23	11	1	6	5	-
운영방법	-	직영	직영	직영	직영	관리대행 환경시설관리 ㈜

※ 진성 및 소규모 공공하수처리시설(38개소 2,289톤) 관리대행: 2022.7.~2025.6.(3년간)

□ 하수슬러지처리(탄화)시설 현황

위 치	시설용량	부지면적	건축연면적	운영방법	운영업체
남강로 1607	100톤/일	4,230㎡	1,943㎡ (지하2, 지상3)	민간위탁	환경시설관리(주)

※ 계약기간 : 2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(3년간)

□ 하수·분뇨처리 및 수질현황

❍ 하수·분뇨처리	(2023. 9. 30. 기준)

구 분	시설용량 (㎥/일)	하수량(㎥/일)		분뇨량 (㎘/일)	슬러지 케익 발생량 (톤/일)
		유입량	방류량	처리량	소화시설	총인시설
계	202,300	145,927	133,521	86.39	82.37	13.4
진주공공 하수처리시설	190,000	138,578	126,812	86.39	82.37	10.0
문산공공 하수처리시설	7,100	3,838	3,727			1.7
사봉공공 하수처리시설	2,400	1,160	984			0.3
대곡공공 하수처리시설	1,900	1,805	1,485			1.0
진성공공 하수처리시설	900	546	513			0.4

❍ 수질현황	(2023. 9. 30. 기준, 단위 : ㎎/L, 개/mL)

항 목 구 분		BOD (생물학적산소요구량)	TOC (총유기탄소량)	SS (부유물질)	T-N (총 질소)	T-P (총 인)	총대장균 군 수
방류 수질기준		4.5이하	15이하	10이하	20이하	0.27이하	3,000이하
진주공공 하수처리시설	유입수	132.7	100.7	177.9	38.311	3.367	313,576
	방류수	2.1	5.3	2.2	9.844	0.098	24
문산공공 하수처리시설	유입수	90.9	39.9	112.2	18.209	1.765	135,948
	방류수	0.6	5.0	2.4	7.513	0.026	5
사봉공공 하수처리시설	유입수	21.7	7.3	70.9	8.393	0.894	6,060
	방류수	0.5	2.5	2.7	8.250	0.062	4
대곡공공 하수처리시설	유입수	89.1	35.4	118.5	13.884	1.351	71,316
	방류수	0.6	3.5	5.5	3.546	0.041	4
진성공공 하수처리시설	유입수	168.4	80.7	148.0	31.26	3.396	110,000
	방류수	1.3	3.5	2.1	3.012	0.036	5

Ⅱ. 2023년도 주요업무 추진실적

1. 총    괄

(단위 : 건)

구 분	계	완 료	추 진 중	시기 미도래	미 착 공	비 고
계	18	13	5	-	-
예산 사업	18	13	5	-	-
비예산사업	-	-	-	-	-

2. 추진실적

【완료 사업】……… 13건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 실 적	주요성과
칠암중계 펌프장 토출배관 및 밸브 교체공사	❍ 사업대상 - 칠암중계펌프장 ❍ 사업내용 - 토출배관 및 밸브 교체공사 1식 ❍ 사 업 비 : 321백만원 ❍ 기 간 : 2023. 5. ~ 8.	❍ 공사계약 : 2023. 4. ❍ 공사착공 : 2023. 5. ❍ 공사업체 : 세화건설(주) ❍ 공사완료 : 2023. 8.	❍ 노후 배관 및 밸브 교체로 중계펌프장 효율적 공정관리
혁신 1·2 중계펌프장 악취저감시설 구매 설치	❍ 사업대상 - 혁신 1·2 중계펌프장 ❍ 사업내용 - 악취저감시설 구축 2식 ❍ 사 업 비 : 649백만원 ❍ 기 간 : 2023. 4. ~ 7.	❍ 공사계약 : 2023. 4. ❍ 공사착공 : 2023. 4. ❍ 공사업체 : 센텍(주) ❍ 공사완료 : 2023. 7.	❍ 악취로 인한 인근 주민 민원해소 및 쾌적한 생활 환경 조성
진주공공하수처리시설 전기실 소방설비 설치공사	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리 시설 내 ❍ 사업내용 - 간선·경보설비, 소방 설계, 소방감리 각 1식 ❍ 사 업 비 : 116백만원 ❍ 기 간 : 2023. 3. ~ 5.	❍ 공사계약 : 2023. 3. ❍ 공사착공 : 2023. 3. ❍ 공사업체 : ㈜경복전력 ❍ 공사완료 : 2023. 5.	❍ 화재감지기 설치로 화재예방과 피해 최소화
진주공공하수처리시설 CCTV증설 공사	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리 시설 내 ❍ 사업내용 - CCTV 설치 24개소 ❍ 사 업 비 : 175백만원 ❍ 기 간 : 2023. 3. ~ 5.	❍ 공사계약 : 2023. 3. ❍ 공사착공 : 2023. 3. ❍ 공사업체 : ㈜창성통신 ❍ 공사완료 : 2023. 5.	❍ CCTV설치에 따른 방범 및 시설보호, 설비가동 상태 실시간 확인 등 사고 발생 시 즉각적 대응
혁신2중계 펌프장 MCC반 이설공사 ※MCC(Motor Control Center) : 전동기 제어반	❍ 사업대상 - 혁신2중계펌프장 내 ❍ 사업내용 - MCC반 이설 1식 ❍ 사 업 비 : 133백만원 ❍ 기 간 : 2023. 4. ~ 7.	❍ 공사계약 : 2023. 4. ❍ 공사착공 : 2023. 4. ❍ 공사업체 : ㈜대아전력 ❍ 공사완료 : 2023. 7.	❍ 부식성 가스로 인해 노후된 MCC반을 야외로 이설하여 원활한 기계설비 가동
진주공공하수처리시설 2, 3단계 DO 및 계면계측기 설치공사 ※DO(Dissolved Oxygen) : 용존산소	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리 시설 내 ❍ 사업내용 - DO계측기 2대, 계면 계측기 7대 ❍ 사 업 비 : 200백만원 ❍ 기 간 : 2023. 4. ~ 6.	❍ 공사계약 : 2023. 4. ❍ 공사착공 : 2023. 4. ❍ 공사업체 : ㈜디에이치 ❍ 공사완료 : 2023. 6.	❍ 2, 3단계 DO 및 계면 계측기 설치로 정확한 용존 산소량 및 슬러 지 계면을 측 정하고 이를 상시 원격 감시하여 효율적인 수질관리
진주공공하수처리시설 다기능저류조 토출 유량계 설치공사	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리 시설 다기능 저류조 ❍ 사업내용 - 다기능저류조 토출유량계 설치 1식 ❍ 사 업 비 : 24백만원 ❍ 기 간 : 2023. 2. ~ 3.	❍ 공사계약 : 2023. 2. ❍ 공사착공 : 2023. 2. ❍ 공사업체 : ㈜에이치에스 씨엠티 ❍ 공사완료 : 2023. 3.	❍ 비점저류시설 내 저장된 하수의 연계 처리되는 토출량을 확인하여 하수처리공정을 효율 적으로 운영
진주공공하수 처리시설 2 단 계 초 침 슬러지수집기 구매 교체	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리시설 ❍ 사업내용 - 2단계 초침 슬러지 수집기 구매 교체 1식 ❍ 사 업 비 : 144백만원 ❍ 기 간 : 2023. 4. ~ 8.	❍ 공사계약 : 2023. 4. ❍ 공사착공 : 2023. 4. ❍ 공사업체 : 효림이엔아이(주) ❍ 공사완료 : 2023. 8.	❍ 초침 내 원활한 슬러지 제거로 펌프 등 후단 설비 보호 및 가동효율 증대
진주공공하수처리시설 CS반 PLC 이중화 모듈 교체공사 ※CS(Control System) : 원격감시제어반 ※PLC(Progra mmable Logic Controller) : 자동 제어 설비	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리 시설 전기실 ❍ 사업내용 - 이중화모듈 교체 1식 ❍ 사업비 : 192백만원 ❍ 기 간 : 2023. 4. ~ 10.	❍ 공사계약 : 2023. 3. ❍ 공사착공 : 2023. 4. ❍ 공사업체 : 대경건설(주) ❍ 공사완료 : 2023. 10.	❍ 노후 PLC 교체로 공공하수처리시설 안정적 공정관리
공공하수처리시설 소화조 D지 구조물 보수공사	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리 시설 소화조 D지 ❍ 사업내용 - 소화조 상부 센터 돔 : 314㎡ ❍ 사업비 : 591백만원 ❍ 기 간 : 2022. 12. ~ 2023. 10.	❍ 공사계약 : 2022. 12. ❍ 공사착공 : 2022. 12. ❍ 공사업체 : 한성건설(주) ❍ 공사완료 : 2023. 10.	❍ 소화조 복구에 따른 슬러지 및 수처리 공정 원활화
진주공공하수처리시설 방류펌프동 내진 보강공사	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리 시설 방류펌프동 내 ❍ 사업내용 - 방류펌프동 내진보강 : 472.85㎡ ❍ 사업비 : 217백만원 ❍ 기 간 : 2023. 6. ~ 10.	❍ 공사계약 : 2023. 6. ❍ 공사착공 : 2023. 6. ❍ 공사업체 : 토양종합 건설(주) ❍ 공사완료 : 2023. 10.	❍ 건축물 및 구조물의 내력 증진을 통한 시설물 안정성 유지로 대형 안전사고 예방
진주공공하수처리시설 자외선(UV) 소독설비 소모품구입 ※UV(ultraviol et):자외선	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리 시설 UV 소독설비동 ❍ 수 량 : 97개 (UV램프 21개 외 8품목/76개) ❍ 사업비 : 111백만원 ❍ 기 간 : 2023. 5.~10.	❍ 물품계약 : 2023. 5. ❍ 납품업체 : ㈜에코셋 ❍ 납품완료 : 2023. 10.	❍ 진주공공하수 처리시설 방류수 내 미확인 병원균을 살균하기 위해 적기에 소모품을 교체함으로써 병원균 소독
진주공공하수처리시설 2단계 초침 스컴스키머 구매교체 ※스컴스키머(scum skimmer):부상된 슬러지를 걷어내는 장치	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리시설 ❍ 사업내용 - 2단계 초침 스컴스키머 구매 교체 6 SET ❍ 사업비 : 370백만원 ❍ 기 간 : 2023. 4. ~ 9.	❍ 공사계약 : 2023. 4. ❍ 공사착공 : 2023. 5. ❍ 공사업체 : 효림 이엔아이(주) ❍ 공사완료 : 2023. 9.	❍ 스컴 및 슬러지 원활한 제거로 펌프등 후단 기기 보호 및 하수의 처리 효율 개선

【추진중 사업】……… 5건

사 업 명	사 업 개 요	추 진 상 황	문제점 및 대책
진주하수 슬러지(탄화) 시설민간위탁용역	❍ 사업대상 - 진주하수슬러지(탄화)시설 ❍ 사업내용 - 시설의 운전 및 유지관리 업무 ❍ 사업비 : 3,433백만원 ❍ 기 간 : 2022.1.~2024.12. (3년)	□ 추진사항 ❍ 용역계약 : 2021. 12. ❍ 용역착수 : 2022. 1. ❍ 용역업체 : 환경시설관리㈜ □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2024. 12.	❍ 정상 추진
공공하수처리시설 협잡물 대행처리용역	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리시설 ❍ 사업내용 - 공공하수처리시설 협잡물 폐기물 처리 용역 ❍ 사업비 : 198백만원 - 운반 및 처리단가 : 397천원/톤 - 계약물량 : 500톤 ❍ 기 간 : 2023. 1. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 용역계약 : 2022. 12. ❍ 용역착수 : 2023. 1. ❍ 용역업체 : ㈜에코비트 그린 외 1개 업체 ※ 협잡물처리량 : 205톤 (2023. 9. 30. 기준) □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2023. 12.	❍ 정상 추진
공공하수처리시설 하수처리오니 위탁처리용역	❍ 사업대상 - 진주공공하수처리시설 ❍ 사업내용 - 공공하수처리설 하수처리 오니 폐기물처리 용역 ❍ 사업비 : 1,199백만원 - 운반 및 처리단가 : 119천원/톤 - 계약물량 : 10,000톤 ❍ 기 간 : 2023. 1. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 용역계약 : 2022. 12. ❍ 용역착수 : 2023. 1. ❍ 용역업체 : ㈜정호산업 외 4개 업체 ※ 하수처리오니 처리량 : 8,203톤(2023. 9. 30. 기준) □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2023. 12.	❍ 정상 추진
진성 및 소규모 공공하수처리시설관리대행용역	❍ 사업대상 -진성 및 소규모하수처리 시설 38개소 ❍ 사업내용 - 시설의 운전 및 유지관리 업무 ❍ 사업비 : 4,102백만원 ❍ 기 간 : 2022.7.~2025.6. (3년)	□ 추진사항 ❍ 용역계약 : 2022. 6. ❍ 용역착수 : 2022. 7. ❍ 용역업체 : 환경시설관리㈜ ㈜우진 ㈜성일엔텍 □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2025. 6.	❍ 정상 추진
공공하수처리시설 수질TMS유지관리용역 ※ TMS (Tele- Monitoring System) : 원격 감시 체계	❍ 사업대상 - 진주, 문산, 사봉, 대곡, 진성공공하수처리시설 ❍ 사업내용 - 수질 TMS 시설 유지관리 ·검･교정 및 수시점검 ❍ 사업비 : 181백만원 ❍ 기 간 : 2023. 1. ~ 12.	□ 추진사항 ❍ 용역계약 : 2022. 12. ❍ 용역착수 : 2023. 1. ❍ 용역업체 : ㈜미래환경연구원 □ 향후계획 ❍ 용역완료 : 2023. 12.	❍ 정상 추진

Ⅲ. 2024년도 주요업무 추진계획

1. 기본방침

□ 효율적 공정관리를 위한 유지관리 체계 정립

❍ 정비이력관리제 정착과 공정별 정비주기 설정 관리

□ 노후설비의 적기 정비와 하수처리 공정개선을 통한 효율적 시설 운영

❍ 기술진단보고서 등을 기반으로 노후시설물 정비사업 지속 추진

❍ 배전반, 계측기 등 노후설비 교체를 통한 안정적 설비 운영

□ 시설물 안전점검 및 시설 개선을 통한 위해요인 사전 차단

❍ 지진 등 재해발생을 대비하여 시설물 안전점검 주기적 시행

❍균열 및 누수 발생 건축물 및 토목구조물에 대한 개선공사 시행으로 시설물 안정성 제고

2. 총    괄                                             (단위 : 건, 백만원)

구 분	건 수	소요사업비	추진계획(착공기준, 건수)
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	5	735	3	2	-	-
일반시책사업	1	-	1	-	-	-
주요예산사업	4	735	2	2	-	-

3. 단위사업별 주요업무 추진계획

하수처리 안정화를 통한 방류수질 개선

안정적 하수처리와 운영체계 정립으로 방류수질의 안정성 확보

효율적 공정관리체계 구축으로 시설운영의 합리성 제고

□ 시설용량 및 하수처리량	(2023. 9. 30. 기준)

구 분	합 계	진 주	문 산	사 봉	대 곡	진 성
시설 용량(㎥/일)	202,300	190,000	7,100	2,400	1,900	900
평균처리량(㎥/일)	145,927	138,578	3,838	1,160	1,805	546

□ 추진계획

❍ 수질운영기기(TMS) 관리기준 강화 등에 대응한 안정적 운영체계 확립

- 수질검사 자료 등 공정관리 데이터 분석·활용체계 도입

- 합리적 공정관리 방안 도출을 위한 공정회의 정례적 시행

❍ 체계적 공정관리 기법과 효과적 유지관리체계 정립

- 공정 개선방안 발굴과 전문성 제고를 위한 직무연찬회 정례화

- 정비이력관리제의 제도적 정착과 정비주기 설정 관리제 시행

❍ 선제적 시설 투자를 통한 처리공정 안정화 실현

- 노후설비의 적기 정비를 통한 공정 신뢰도 최적화 추진

- 소화조 및 탄화설비 등 하수슬러지 처리 계통의 운영효율 극대화 추진

□ 기대효과

❍ 안정적 하수처리로 쾌적한 도시환경 조성 및 남강수질 개선

진주공공하수처리시설 분뇨처리동 내진보강공사

노후(20년 이상 경과)된 건축물의 내진성능평가 결과에 따라 시설물 내진 보강 사업을 실시하여 시설물 안전성 확보(지진·화산 재해대책법 제15조)

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주공공하수처리시설 분뇨처리동

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 6.

❍ 사 업 비 : 250백만원

❍ 사 업 량 : 분뇨처리동 A=600㎡

건축물명	건축면적	설 비 명	사용승인일	비 고
분뇨처리동	600㎡	분뇨처리설비	1995. 5.	내진성능평가반영

□ 추진계획

❍ 2024. 1. : 실시 설계 용역

❍ 2024. 3. : 공사 착공

❍ 2024. 6. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 건축물 및 구조물의 내력 증진을 통한 시설물 안정성 유지로 대형 안전사고 예방

진주공공하수처리시설 약품공급 설비 정비

총인처리시설에 투입하는 총인 처리 약품의 안정적 공급을 위해 주입 배관 및 설비를 정비하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주공공하수처리시설 지내

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 5.

❍ 사 업 비 : 250백만원

❍ 사 업 량 : 폴리황산제2철 약품 공급 설비 정비

구분	공급배관	정량펌프	저장탱크	비고
용량	120M(50mm)	1L/min	50㎥×1식

□ 추진상황

❍ 2023. 8. : 실시 설계 용역

□ 추진계획

❍ 2024. 2. : 공사 착공

❍ 2024. 3. : 정비 공사 시행

❍ 2024. 5. : 공사 준공

□ 기대효과

❍ 총인 처리 약품의 안정적 공급으로 효율적 공정관리체계 구축

남산마을 소규모 공공하수처리시설 외 9개소 기술진단 용역

하수도법 제20조에 따른 공공하수처리시설의 운영·유지 및 시설 전반에 대한 기술진단을 통한 시설개선 및 효율적인 관리방안 제시로 방류수역 수질 환경보호에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 지내

❍ 사업기간 : 2024. 2. ~ 6.

❍ 사 업 비 : 160백만원

※ 환경부 고시 제2023-17호(2023.1.20.) 공공하수도의 기술진단 비용

❍ 사 업 량 : 10건

시설명	소재지	시설용량	비고
계	10개소	530㎥/일
남산	진성면 대사리 398-2	50㎥/일
평촌	집현면 덕오리 310-1	50㎥/일
대암	집현면 대암리 297	50㎥/일
동방	문산읍 안전리 568 외 1	60㎥/일
청담	지수면 청담리 436-4	60㎥/일
상남	일반성면 남산리 463-2	50㎥/일
예상	정촌면 예상리 596-3	50㎥/일
신촌	문산읍 옥산리 209-5	50㎥/일
오방	미천면 오방리 787-2	50㎥/일
팔미	명석면 외율리 587-8	60㎥/일	`

□ 추진계획

❍ 2024. 2.     : 입찰공고 및 계약

❍ 2024. 2. ~ 5. : 기술진단 용역 실시

❍ 2024. 6.     : 기술진단 결과 보고

□ 기대효과

❍ 시설개선 및 효율적 유지관리방안을 통해 방류수질 향상 및 환경보호에 기여

문산공공하수처리시설 외 2개소 악취기술진단 용역

악취방지법 제16조의 2에 따른 주민의 건강상 위해를 예방하고 생활환경을 보전하기 위하여 악취배출시설 악취기술진단을 통한 시설 개선 및 효율적인 관리 방안 제시로 악취발생을 저감하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 지내

❍ 사업기간 : 2024. 4. ~ 8.

❍ 사 업 비 : 75백만원

※ 환경부 고시 제2016-214호(2016. 11. 25.) 공공환경시설의 기술진단비용

❍ 사 업 량 : 3건

시설명	소재지	시설용량	비고
계	3개소	11,400㎥/일
문산공공하수처리시설	문산읍 월아산로1117번길 154	7,100㎥/일
사봉공공하수처리시설	일반성면 동부로1960번길 44-25	2,400㎥/일
대곡공공하수처리시설	대곡면 진의로 927-9	1,900㎥/일

□ 추진계획

❍ 2024. 4.     : 입찰공고 및 계약

❍ 2024. 4. ~ 6. : 기술진단 용역 실시

❍ 2024. 8.     : 기술진단 결과 보고

□ 기대효과

❍ 시설 개선 및 효율적 관리방안을 통한 악취 저감으로 쾌적한 생활 환경 보전