현장방문 참고자료

송백리 어르신 체육시설 조성사업

□ 사업개요

□ 위    치 : 진주시 금산면 송백리 666-1 일원

□ 사업기간 : 2018 ~ 2022년

□ 사 업 량

- 파크골프장 36홀, 그라운드골프장 2면, 게이트볼장 6면

- 기타부대시설 1식(화장실 2동, 쉼터, 다목적광장 등)

□ 총사업비 : 42억원(국비 22%, 시비 78%)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2018	2019	2020	2021	2022
계	4,200		4,200
국 비	930		930
시 비	3,270		3,270

□ 추진내용

❍ 2018. 12. ~ 2019.  6. : 실시설계 용역

❍ 2020. 1. ~ 4. : 소규모 환경영향평가 용역 착수 및 준공

❍ 2020. 4. ~ 11. : 소규모 환경영향평가 신청 및 협의(낙동강유역환경청)

❍ 2020. 11. : 하천점용허가 신청 및 협의(부산지방국토관리청)

❍ 2020. 12. : 공사 착공 (도급사 :000사 대표 000)

❍ 2021. 3. : 하천점용허가(부산지방국토관리청)

□ 추진계획

❍ 2021.  10. : 공사 준공

□ 공사진도 : 95%

남가람 테니스장 지붕설치공사

□ 사업개요

❍ 위    치 : 진주시 남가람 체육공원 내

❍ 사업기간 : 2020년 12월 ~ 2021년 12월

❍ 사 업 량 : 막구조 설치 A=2,782㎡(4면)

❍ 사 업 비 : 3,041백만원(국비1,000백만원, 시비2,041백만원)

- 도급 : 936백만원, 관급 : 2,105백만원

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2018	2019	2020	2021	2022
계	3,041		3,041
국 비	1,000		1,000
시 비	2,041		2,041

□ 추진내용

❍ 2018. 12 : 실시설계 용역 착수

❍ 2019. 07 : 문화체육관광부 생활SOC 공모선정

❍ 2020. 11 : 실시설계 용역 완료

❍ 2020. 12 : 시공업체 선정 및 계약【도급사:남화토건(주) 대표 김석재】

❍ 2021. 02 : 건축허가 및 착공

❍ 2021. 3 ~ 9 : 토공사, 막구조 기초, 철골공사, 막재공사

□ 추진계획

❍ 2021. 10 ~ 11 : 남가람 막재공사 및 창호공사, 기타 부대공사

❍ 2021. 11 : 공사준공

□ 공사진도 : 85%

진주성 내 운주헌(선화당) 복원사업 추진보고

추진배경

❍ 관찰사의 집무실이었던 운주헌(선화당) 복원을 통해 경남의 수부도시로서의 위상을 되찾고, 진주성의 역사적 가치 제고

사업개요

❍ 위    치 : 진주성 내 운주헌(선화당) 유구 발견 장소(경절사와 청계서원 사이)

※ 1998년 운주헌(선화당) 유구 조사 결과, 경절사의 부속건물인 충의당 일부가 운주헌(선화당)에 포함됨

❍ 사 업 비 : 7,030백만원(국비 70%, 지방비 30%)

구분	총사업비	해체비	이전비	토지매입비	용역비 (설계, 감리)	건축공사비	발굴조사비
총사업비	7,030	1,736	1,844	957	149	2,182	162
경 절 사	1,895	919	976
청계서원	2,642	817	868	957
선 화 당	2,493				149	2,182	162

❍ 복원방법

- 경절사의 부속 건물인 충의당을 이전하고 유구를 찾아 운주헌(선화당) 본당만 원형 복원

※ 문화재청에서는 원형 복원 시에만 사업 승인과 국비를 지원함

추진상황

❍ 1987. 6. ~ 1989. 11. : 청계서원 정비 공사(문중 171백만원)

※ 2010년 청계서원정비 : 80백만원(국56 도8.4 시15.6)

❍ 1988. 6. ~ 1991.  4. : 경절사 정비 공사(295백만원)

(문중241 국27 도11 시16)

❍ 1996. 4. : 경남탄생 100주년 기념사업으로 관찰사 집무실(선화당)복원 결정

❍ 1997. 10. : 진주국립박물관에서 발굴조사결과 경절사(충의당)이 저촉

❍ 1998 : 관찰사 집무실(선화당) 복원 시행하였으나, 진양하씨의 반대로 공북문 복원공사(20억)로 변경 시행 (공북문 복원 2002.4)

❍ 2018. 12. ~  2019. 5. : 관찰사(선화당)복원 기본계획 수립 및 타당성조사 용역

❍ 2019. 6 ~ 현재 : 진주시와 진양하씨대종회 간담회(면담) 14회 실시

진주시	진양하씨대종회
□ 관찰사의 집무실이었던 운주헌(선화당) 복원을 통해 경남의 수부도시로서의 위상을 되찾고, 진주성의 역사적 가치 제고 □ 문화재청에서 문화재(선화당)는 원형복원 사업만 인정함 □ 경절사 부속건물인 충의당만 이전한 후 운주헌(선화당) 본당만 복원할 예정	□ 1992년 정부로로부터 확장이전 승인과 함께 국비보조사업으로 건축함 □ 충의당을 포함한 부속건물 일체에 대해 이전은 불가하며, 운주헌(선화당)을 다른 장소에 복원요구 □ 경절사를 보존할 수 있는 범위내에서 건축물 재배치(영남포정사와 비석군 사이) □ 진주박물관 철거터 일원에 선화당 등관아일체와 병영(주영), 양인가옥, 서민가옥, 주막, 시전 일괄 복원

- 주요의견내용

※ 1997년 진주 선화당 복원예정부지 발굴조사 결과 : 건물의 정확한 규모를 알기 어려우며 잔존유구는 건축공사에 의하여 훼손되지 않은 후대건물사이의 공간에 위치한 것으로 추정

향후계획

❍ 진주성 종합정비계획 용역에 운주헌(선화당) 복원을 포함하여 추진

❍ 운주헌(선화당) 복원사업은 총사업비 70억원의 막대한 사업비가 소요되므로, 중영복원 후 하씨대종회와 재협의 추진