2020년도 수시분 공유재산 관리계획 변경안

의안 번호	2902		제출년월일	2020. 11. 13.
			제 출 자	진 주 시 장

▢ 제안이유

당초 공유재산의 취득․처분에 대한 관리계획을 수립한 후 공유재산 및 물품관리법 제10조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 2020년도 수시분 공유재산 관리계획(변경)안을 수립하여 시의회의 의결을 받아 시행하고자 함.

▢ 주요내용

2020년도 공유재산 관리계획 변경안의 의결을 얻고자 하는 재산은 2018년도  수시분 공유재산 관리계획안 의결(의안번호: 2018-2526, 의결일자: 2018.08.24.)된

『월아산 산림레포츠단지 조성사업』건의 변경에 관한 사항임

❍ 취득재산

- (당초) 토지 49필지 37,232㎡ / 1,900백만원, 레포츠단지 조성 1식 / 3,900백만원

- (변경) 토지 49필지 37,232㎡ / 3,200백만원, 레포츠단지 조성 1식 / 5,895백만원,

건물 1동 신축 500㎡ / 1,300백만원

가. 사업개요

❍ 사 업 명 : 월아산 산림레포츠단지 조성사업

❍ 위    치 : 진주시 진성면 동산리 산134번지 일원

❍ 사 업 비

- (당초) 5,800백만원(균특 2,900, 도 870, 시 2,030)

: 토지매입비 1,900, 용역비 223, 공사비 3,677

- (변경) 10,395백만원(전환도비 3,340, 도 1,002, 시 6,053)

: 토지매입비 3,200, 용역비 500, 공사비 6,695

❍ 부지면적

- (당초) 50,000㎡ (국·공유지 12,768㎡ / 사유지 37,232㎡)

- (변경) 75,000㎡ (국·공유지 37,768㎡ / 사유지 37,232㎡)

❍ 주요시설

- (당초) 어드벤처 브릿지, 스카이슬라이드, 서바이벌, 루지 등

- (변경) 에코라이더, 곡선형짚와이어, 네트놀이시설, 하늘숲길,

산림체험안내소 신축

❍ 건물 신축 : 1동 500㎡

건물용도	구 조	연면적(㎡)	취득시기	비 고
산림체험안내소	철근콘크리트 (2층)	500	2021년

❍ 사업기간 : 2018년 8월 ~ 2021년 12월

❍ 사업부서 : 교통환경국 산림과

나. 사업목적

❍ 월아산 시유림 일원 산림문화·체험단지로 조성하여 자연과 함께 하는 건전한 여가문화 조성 및 시민 건강증진 도모

❍ 특색 있는 산림레포츠 공간으로 어린이부터 성인에 이르는 삶의 활력소 제공 및 지역경제 활성화 도모

❍ 생활권에서 쉽게 접근 가능하고 인근 시군과의 교통망이 발달한 지리적 이점을 활용하여 경남 대표 산림체험 명소 제공

다. 추진상황

❍ 2018년 8월 : 공유재산 관리계획 의결 및 지방재정투자심사(자체, 조                      건부), 중기지방재정계획 반영(완료)

❍ 2018년 11월 : 보상계획 공고

❍ 2019년  4월 : 보상 착수

❍ 2019년  7월 : 타당성 평가 완료

- 타당성 평가 결과 : 61점(총 75점 중 50점 이상 적지)

❍ 2019년 12월 : 기본계획 및 실시설계 용역 착수

❍ 2020년  6월 : 지방재정투자심사(도심사, 조건부), 중기지방재정계획반영(완료)

라. 향후계획

❍ 2020년 11월 : 기본계획 및 실시설계 용역 완료, 공사 발주

❍ 2020년 12월 : 착공

❍ 2021년 12월 : 준공

▢ 2020년도 수시분 공유재산 관리계획(변경)안 목록

❍ 공유재산 관리계획 총괄표

❍ 공유재산 취득재산 목록

❍ 위치도 및 현황사진

공유재산 관리계획 총괄표

(단위 : ㎡, 백만원)

구 분			당 초			변 경			증 감			비고
			건수	(연)면적	금액	건수	면적	금액	건수	면적	금액
취득	계	토지	49	37,232	1,900	49	37,232	3,200	-	-	1,300
		건물				1	500	1,300	1	500	1,300
		기타	1		3,900	1		5,895	-	-	1,995
	매입 (신축)	토지	49	37,232	1,900	49	37,232	3,200	-	-	1,300
		건물				1	500	1,300	1	500	1,300
		기타	1		3,900	1		5,895	-	-	1,995
	교환으로 취득	토지
		건물
		기타
	기타취득	토지
		건물
		기타
처분	계	토지
		건물
		기타
	매 각	토지
		건물
		기타
	양 여	토지
		건물
		기타
	교환으로 처분	토지
		건물
		기타
	기타처분	토지
		건물
		기타
무상사용 및 대부허가		계
		토지
		건물
		기타

공유재산 취득재산 목록

(단위 : ㎡, 백만원)

사업명	취 득 재 산 표 시					소요 사업비	취득 시기	취득 방법	비고 (소관부서)
	구분	소 재 지	지목	(연)면적	기준가격
계		토지 49필지 건물 1동 공작물 1식		37,232 500	166.6 1,300 5,895	10,395
월아산 산림레포츠 단지 조성 사업	토지	진성 동산 1199-2	과수원	1,140	5.7	3,200	2018 ~ 2021	매입	산림과
		진성 동산 1243	답	1,458	16.2
		진성 동산 1243-1	답	1,411	15.7
		진성 동산 1244	답	188	2.1
		진성 동산 1245	답	592	6.6
		진성 동산 1246	답	155	1.7
		진성 동산 1258	답	218	1.1
		진성 동산 1260	답	499	2.9
		진성 동산 산148-1	도로	166	0.1
		진성 동산 산155-1	도로	406	0.1
		진성 동산 1196	유지	132	0.1
		진성 동산 1198	유지	526	0.4
		진성 동산 1197	임야	155	0.1
		진성 동산 1199-1	임야	577	0.8
		진성 동산 1241	임야	152	0.1
		진성 동산 1242	임야	145	0.2
		진성 동산 산118	임야	397	0.5
		진성 동산 산120	임야	397	0.7
		진성 동산 산123	임야	1,289	1.3
		진성 동산 산124	임야	496	0.4
		진성 동산 산126	임야	793	0.6
		진성 동산 산127	임야	496	0.4
		진성 동산 산128	임야	595	0.5
		진성 동산 산133	임야	1,289	1.4

사업명	취 득 재 산 표 시					소요 사업비	취득 시기	취득 방법	비고 (소관부서)
	구분	소 재 지	지목	(연)면적	기준가격
월아산 산림레포츠 단지 조성 사업	토지	진성 동산 산135	임야	496	0.4		2018 ~ 2021	매입	산림과
		진성 동산 산142	임야	298	0.2
		진성 동산 산143	임야	595	0.5
		진성 동산 산144	임야	397	0.3
		진성 동산 산145	임야	496	0.4
		진성 동산 산146	임야	496	0.4
		진성 동산 산147	임야	496	0.4
		진성 동산 산148	임야	429	0.5
		진성 동산 산149	임야	397	0.4
		진성 동산 산150	임야	397	0.4
		진성 동산 산151	임야	298	0.4
		진성 동산 산152	임야	793	1.4
		진성 동산 산155	임야	685	0.9
		진성 동산 산61	임야	650	0.7
		진성 동산 산68-1	임야	496	0.5
		진성 동산 산68-2	임야	2,380	2.2
		진성 동산 산69	임야	4,959	4.4
		진성 동산 산70	임야	496	0.5
		진성 동산 1194	전	952	10.6
		진성 동산 1195	전	992	11
		진성 동산 1199	전	823	4.1
		진성 동산 1236	전	2,466	29.6
		진성 동산 1237	전	1,193	14
		진성 동산 1238	전	1,374	19.8
		진성 동산 1259	전	506	2.9
	공작물	진성 동산 산134 일원			5,895	5,895		신축
	건물	진성 동산 산134 일원		500	1,300	1,300	2020 ~ 2021	신축

월아산 산림레포츠단지 조성사업 부지 위치도

월아산 산림레포츠단지 조성사업 부지 현황사진